과업지시서

4 -

1. 적용범위

본 과업지시서는 장봉도 남부 해상 계류바지(Barge) 설치(고정작업)에 적용한다.

2. 필요조건

2.1. 외주과업 업체는 150T 이상의 해상크레인(좌2 . 우현2 윈치를 보유한 선박)을 사용한다.

* 작업요건 고려하여 크레인 톤수 변경 시에 감독관의 승인을 받는다.

2.2. 해상크레인을 감독관이 지정한 작업장소에 위치시킬 수 있어야 한다.

2.3. 작업진행 또는 완료 시 작업 누락 및 미흡한 부분(작업장 주변 청결정돈 포함)이

발생되면 해군감독관 및 해상함정장은 추가과업을 요구할 수 있고 계약업체는 즉시

수정해야 한다.

3. 과업범위

3.1. 계류바지를 해상크레인 이용 기존 설치된 체인(49mm / 75m x 4개)에 연결한다.

3.2. 체인에 연결된 위치 부이(Bouy)가 유실되었을 경우 적절한 방법을 이용하여 탐색한다.

4. 과업 일반

4.1. 작업 장소는 해군이 지정한 장소(장봉도 남부 해상)에서 작업을 진행하고 이를

위한 모든 작업인원, 작업장비 등 관련 수송 업무는 계약업체가 주관한다.

4.2. 계약업체는 교체과업 대상 현장을 사전 실사 후 안전성 여부, 작업여건, 작업장비,

작업인원 등을 선정한 다음 작업에 착수한다.

5. 과업기준(과업지시)

5.1. 계류바지 체인 연결ㆍ설치작업등은 해군에서 제시하는 일정에 따라 실시하며,

작업 시 사전 조율을 통해 상호 업무 수행 상 문제가 발생치 않도록 한다.

* 계약 후 인천에서 감독관 주관 작업 전 사전회의 실시

5.2. 해군 감독관과 계약업체 현장대리인은 작업 착수 전에 상호 입회하여 교체 작업에

필요한 물품을 확인하여야 한다.

5.3. 계약업체는 작업진행 중 작업에 지장이 되는 구조물 발견 시에는 해군감독관에게

승인을 득하고 해군감독관 입회하에 취외하고, 작업완료 후 원상복구를 하여야 한다.

5.4. 현장 작업기간은 3월 18일부터 3월 29일 중에 설치를 원칙으로하고 기상악화,

천재지변, 작전 등 불가피한 상황에 따라 작업일정, 기간은 감독관이 판단하여 변경

할 수 있으며, “공급자”는 대상 용역설치결과(입고검사 등) 과업지시서에 명시된 용

역(검사)범위 외 추가 용역(검사)소요가 발생하여 총비용이 계약금액을 초과할 것으

로 예상되는 경우 추가 용역소요에 대하여 감독관이 확인 서명한검사결과서, 가격         자료 등을 첨부하여 수정계약을 요청할 수 있다.

5.5. 민간크레인은 작업현장에서 4묘박 후 해군 바지와 계류하여 체인 인양 시 해군바지가

이탈하는 것을 방지하며, 체인 연결 시 작업이 용이하게 윈치를 사용하여 이동한다.

5.6. 기존 설치된 체인 위치부이에 연결된 훗줄을 앵카홀에 통과시킨다.

5.6.1. 체인 위치부이가 유실되었을 경우 적절한 방법을 이용하여 탐색한다.

5.7. 통과시킨 훗줄을 크레인에 연결하여 인양한다.

5.8. 적절한 길이의 체인이 인양되면 체인을 선체 비트와 스토퍼에 고정한다.

5.9. 위 작업을 3회 추가 반복한다.

5.9. 설치 중 발생한 폐체인 및 샤클은 218대대 군수로 반납한다.

5.10 체인 인양 시 체인 꼬임 상태를 확인하여 설치작업을 실시하여야 한다.

5.11. 계약업체는 체인 등 교체 작업 시 기본적으로 환경오염 방지대책을 수립하고,

그에 따른 적법한 조치를 시행 후 작업에 임하여야 한다.

6. 검    사

6.1. 육안검사

6.1.1. 만조 시 모든 함정 이탈 후 체인 장력 및 고정상태 확인한다.

6.1.2. 체인꼬임 상태를 확인 후 설치한다.

6.1.3. 설치 후 고정된 방위각은 ±10 ̊(진방위 기준) 이내로 제한한다.

6.2. 장력시험

6.2.1. 해군에서 지정하는 방법으로 장력 상태, 고정상태를 시험한다.

6.2.2. 시험 결과 이상 발생 시 즉시 복구하여야 한다.

7. 서류의 작성 및 제출

7.1. 계약업체는 감독관이 작업진행 및 결과확인을 위한 관련 자료 요청 시 최대한 협조한다.

7.2. 계약업체는 계약 후 3일 이내에 현장대리인을 임명하여 통보하고, 해군 감독관과

사전 협의하여 아래 사항이 포함된 작업 일정계획 및 공정표 각 5부를 감독관에게 제출한다.

7.2.1 세부 공정별 투입계획 인원, 공정별 사이클 타임, 일일작업시간

7.2.2 사이클 타임을 토대로 한 전체 소요 공기

7.3. 현장대리인은 작업 수행 전 근로자 작업일지를 작성하여 감독관에게 제출한다.

7.4. 계약업체는 제출한 작업 공정표에 따라 일일 작업진행현황을 기록유지하고,

작업완료시 해군 감독관에게 제출한다.

7.5. 계약업체는 작업완료 후 7일 이내에 아래 서류 1부를 작성 후 감독관에게 제출한다.

7.5.1. ‘작업진행 현황기록부’ , 작업 사진철, 시험검사서(육안 및 장력시험)

7.5.2. ‘착수계’ 제출 시 ‘용역일정/공정표 등’ 첨부

8. 과업기간 및 기간의 해석

8.1. 과업완료일은 최종검사 완료일로 하며, 완료일 판정은 감독관이 한다.

8.2. 과업기간은 납기연장 사유가 발생하지 않는 한 계약서에 명시된 기간 내에 작업을

실시한다.

8.3. 계약업체는 해군에서 요구하는 일정계획에 따라 작업을 실시하되 휴일, 야간작업을

지양하며, 필요시 감독관 사전 승인 하에 작업을 실시한다.

8.4. 계약업체는 함정 행동, 기타 사유 등으로 인하여 작업진행상 문제점 발생 시

해군감독관 및 해당함정과 협의하여 신속하게 작업을 진행한다.

9. 책임의 한계

9.1. 계약업체는 작업 중 발생될 수 있는 인명 및 장비안전, 보안 등에 대한 사고예방

계획을 사전에 수립하고 인명 및 장비(선체 포함) 안전사고가 발생되지 않도록

작업 전 예방교육과 제반 안전 대책을 강구하여야 하며, 작업 및 이동 중 발생되는

모든 안전사고에 대한 책임을 진다.

9.2. 계약업체 인적․물적 등의 사고 손해에 대하여 자기 자신의 보호를 위하여 보험의

가입 등 적절한 사전조치를 취하여야 한다.

9.3. 그럼에도 불구하고 과업, 검사 등 모든 작업 시 발생하는 인적․물적 사고에

대하여 해군측은 어떠한 책임도 지지 아니한다.

9.4. 계약업체는 해군이 지정하는 장소(부두)에서 작업 진행 중 오염물질(폐유, 쓰레기 등)이

해상으로 유입되지 않도록 철저한 해상오염 방지대책을 수립하여 시행한다.

10. 관계관임무

10.1. 해군 준공검사관/감독관은 218전대에서 임명하며 기술검사관은 인천기지대대

시설대에서 임명하여 설치에 대한 전반적인 업무를 수행한다.

10.2. 준공검사관 임무

10.2.1. 과업지시서 및 계약특수조건대로 과업이 이행되었는지 준공검사(감찰/헌병 입회)를 한다.

10.3. 감독관 임무

10.3.1. 계약이행내용에 대한 확인/감독

10.3.2. 과업지시서에 따른 설치여부 확인감독 및 시정조치

10.3.3. 작업 기준에 따른 사전 준비상태(안전조치, 책임자 배치 등) 확인 / 감독

10.3.4. 작업인원에 대한 보안조치(보안서약서 작성, 사진촬영 통제 등 보안교육) 여부 확인

10.3.5. 안전/환경 CHECK OF LIST 확인 후 작업 진행

10.3.6. 재료비 및 경비사용 내역 확인

10.4. 기술검사관 임무

10.4.1. 계약건의 기술판정 확인에 필요한 업무를 집행하여 기술분야에 대한

책임을 진다.

11. 기  타

11.1 작업일정은 해군에서 제시하는 일정계획을 준수하되, 해군 사정으로 일정계획

변경 필요 시 일주일전에 계약업체에 통보하고 대상함정은 계약업체와 일정계획을

협의하여 재수립하며, 작업이 지체되지 않도록 최대한 조율해야 한다.

11.2. 해군은 과업 작업진행 중 계약업체 직원이 부대시설 사용에 대하여 지원 가능한

범위에서 편의제공을 할 수 있으며, 지원내용에 대해서는 사전 감독관 측과 협조한다.

별지

안전/환경관리 CHECK OFF LIST

용 역 명			작업 일시	‘19. . . ∼ . .
업 체 명		(인)	작업장소
과업감독관		(인)
순 번	확 인 사 항				확 인
1	□ 작업전 안전교육은 실시하였는가?
2	□ 각종 보호장구 착용상태는 확인하였는가?
3	□ CO2 소화기/안전감시자는 배치하였는가?
4	□ 작업장 주변 안전위해 요소는 없는가?
5	□ 화재 발생 위험성은 없는가?
6	□ 과업 작업전 준비상태는 양호한가?
7	□ 작업장 주변 인화성 물질이 방치된 곳은 없는가?
8	□ 용접 및 화기작업시 인접격실 안전감시자는 배치 하였는가?
9	□ 청소 용구 및 작업도구 준비상태는 이상이 없는가?
10	□ 계약업체 인력은 산재보험 또는 근로자재해보험에 가입하였는가?
11	□ 계약업체 안전관리자가 배치되어 있는가?
12	□ 과업 작업자에게 안전 및 환경오염방지 교육을 실시 하였는가?
13	□ 계약업체는 과업에 수반되는 모든 안전조치를 취하였는가?
14	□ 작업 종료 후 뒤처리 상태는 양호한가?
기 타