원본대조필
번 호

공 사 설 계 서

【’19년도 해저케이블용 등부표 인양점검 보수공사】

프로젝트 코 드	○ 예산과목 : 수선비/지중배전기타계획(S20270)

2019. 2

	경 남 본 부
	특 수 설 비 팀

공 사 계 획 서

공 사 명	‘19년도 해저케이블 등부표 인양점검 보수공사
총 공 사 비	￦ 84,499,860 (부가세 별도)
내 용	○ 등부표 인양정비 및 도장작업(등부표 8기) - 등부표 전체 도장 및 손상부위 보수, 전기설비 점검 불량분 교체 - Chain 및 연결장치, 계류구 등의 치수 측정 및 20% 이상 마모분 교체(실적정산) - 노후 태양전지판 교체 및 지지금구 점검 - 철재류 부식 제거, 계류장치 침수부 패류 제거 등
프로젝트 코드	수선비/지중배전기타계획(S20270)
자 금 구 분	자기자금
공 사 기 간	착공 2019 년 월 일 준공 2019 년 월 일	착 공 후	45 일간
공 사 방 법	도급공사
공 사 책 임 자	경남본부 전력사업처 배전운영부장
공 사 감 독 자	경남본부 전력사업처 배전운영부장이 임명하는 자
준 공 검 사 자	경남본부 전력사업처 배전운영부장이 임명하는 자
공 사 인 수 자	경남본부 전력사업처 배전운영부장
첨 부 서 류
1) 공사설명서 2) 공사시방서 3) 공정표 4) 공사비 예산서
비 고

공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : ’19년도 해저케이블 등부표 인양점검 보수공사

2. 공사목적 : 배전 해저케이블 경과지 표시용 사설항로표지의 인양‧점검 보수를 통해 항로표지 관리 규정을 준수하고 전력시설물 유지관리 및 도서지역 안정적 전력공급에 만전을 기하고자 함.

3. 공사개요

가. 위    치 : 통영, 진해지역 배전 해저케이블 경과지 내

나. 주요공종

○ 인양점검 및 보수 : 등부표 5기

○ 등부표 전체 도장 및 손상부위 보수, 전기설비 점검 불량분 교체

○ Chain, 연결장치, 계류구 등의 치수측정 및 20% 이상 마모분 교체

○ 노후 태양전지판 교체 및 지지금구 교체

○ 철재류 부식 제거 및 계류장치 침수부 패류 제거 등

○ 체인교체 및 연결은 현장 확인 후 실적 정산

4. 공사방법 : 도급공사

5. 공사기간 : 착공 후 45일

6. 하자기간 : 준공 후 2년

공 사 일 반 시 방 서

2019. 2

일  반  시  방  서

1. 일반사항

1.1 적용

1.1.1 본 시방서는 한국전력공사 경남본부『’19년도 해저케이블 등부표 인양점검 및 보수공사』에 적용한다.

1.1.2 본 시방서 내용외의 필요한 사항은 건축공사표준시방서 및 제반 법령에 의한다.

1.2 적용순서

1.2.1 설계도서 간에 내용이 불명확하거나 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 계약서

나. 계약특수조건 및 일반조건

다. 공사시방서

라. 설계도면

마. 산출내역서

바. 관계법령의 유권해석

사. 발주자의 요청사항

아. 관련 전문시방서 또는 표준시방서

1.2.2 이 공사시방서의 일반사항과 일반사항 이외의 시방서 내용 간에 상호 모순이 있을 경우에는 일반사항이외의 시방서에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.2.3 당해공사의 계약자는 공사시행에 있어서 관계법규 및 그에 근거한 관계 관청의 지시를 준수하여야 한다.

1.2.4. 시공자는 공사 시행에 있어서 아래의 관련 기준 및 규정을 숙지하고 준수하여야 한다.

가. 건설산업기본법

나. 한국공업규격

다. 건설기술관리법

라. 산업안전보건법

마. 대기환경보전법

바. 소음·진동규제법

사. 시설공사 검사업무 규정

아. 건설공사 품질관리 검사기준

자. 항로표지법

차. 표준형부표 제작 및 품질관리기준(국토해양부 훈령215호)

카. 항로표지 업무편람(2006 최신본)

1.2.5 사전협의 사항

본 공사의 시행에 있어서 다음 사항은 감독원과 협의 후 시행한다.

가. 공사 시행 순서 및 공법

나. 인원 및 장비투입계획

다. 공사용 가설물의 설치계획 및 자재 사용계획

라. 공사시공방법 변경

마. 기타 필요한 사항

1.3 용어의 정의

1.3.1 공사시방서

공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질, 시험 및 검사 등 품질관리 등에 관한 사항을 기술한 공사계약 문서를 말한다.

1.3.2 건설업자

건설산업기본법 제2조제5호에 의해 등록을 하고 건설업을 영위하는 자를 말한다.

1.3.3 발주자

건설공사 또는 건설기술용역을 발주(발주)하는 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1 이상을 출자한 기업체의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장을 말한다.

1.3.4 감독원(업무담당자)

공사에 대하여 설계도서 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 품질·시공·안전 및 공정관리 등에 대한 감리업무와 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 기타 필요한 업무를 지원 또는 수행하는 발주자의 소속직원을 말한다.

1.3.5 시공자

건설산업기본법 제9조의 규정에 의하여 공사업의 등록을 한 자로서 발주자로부터 당해공사를 도급받은 공사업자(이하 ‘시공자’라 한다)를 말한다.

1.3.6 현장대리인

현장대리인은 건설기술관리법, 건설산업기본법 및 동시행형에 의한 유자격자로서 현장에 상주하여야 한다.

가. 시공자는 당해공사에 해당하는 기술자격소지자를 현장대리인으로 임명하여야 한다.

나. 시공자가 현장대리인을 임명 또는 교체하고자 할 때는 그의 기술자격증, 이력서, 기타 필요한 사항을 감독원에게 제출하여 발주자의 승인을 얻어야 한다.

다. 현장대리인은 공사 현장에 상주하여 감독원의 지시에 따라 공사 현장을 관장하고 책임 관리하여야 하며, 준공검사 입회의 책임을 갖는다.

라. 발주자는 현장의 운영관리 및 작업수행에 현장대리인이 부적합하다고 인정할 경우 이의 교체를 명할 수 있으며 이 경우 시공자는 이에 응하여야 한다.

1.3.7 설계도서

공사시방서, 설계도면, 검토서, 기술계산서, 공사비 예산서 및 설계에 관련된 일체의 도서를 말한다.

1.3.8 공사 계약문서

계약서, 설계도서, 공사입찰 유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건으로 구성되며 상호 보완의 효력을 지닌다.

1.4 시공자의 의무

시공자는 공사 계약문서에 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여   전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 안전하게 시공하고    정해진 기간 내에 준공하여야 하며, 발주자의 재시공, 공사 중지명령, 기   타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에   응하여야 한다.

1.4.1 설계도서 검토

가. 시공자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토한 후 ‘3.2절 시공계획서’에 명시된 시공계획서를 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 임해야 하며, 시공계획의 검토 소홀로 인하여 부실시공이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 유의하여야 한다.

나. 설계도서 검토 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 통지하고 발주자의 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

1) ‘1.5.7 공사변경’에 명시한 사유가 있는 경우

2) ‘2. 공사협의 및 조정’에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

5) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

1.4.2. 책임 한계

가. 시공자는 시공자가 당해공사를 위하여 임명, 지정, 고용한 자 및 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 시공자는 공사 목적물을 발주자에게 인도하기 전에 발생한 공사 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형으로 인한 피해나, 제 3자에 끼친 손해에 대하여는 시공자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 시공자가 발주자에게 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

라. 시공자가 지정, 배치한 현장대리인은 현장에 상주하여야 한다.

1.5 공정관리 및 공사변경

1.5.1 발주자가 필요하다고 인정할 경우 시공방법 및 공정을 지시할 수 있다.

1.5.2 시공자는 공사수행에 앞서 시공방법 및 공정표를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.5.3 발주자가 전항의 시행방법 및 공정에 대하여 의문이 있을 때는 시공자는 구체적인 설명을 하여야 하며, 최종 결정은 발주자의 지시에 따른다.

1.5.4 발주자는 아래사항에 대하여 필요하다고 인정될 경우, 이유를 명시하여 시공방법 및 공정 변경지시를 할 수 있다.

가. 공사가 지연될 우려가 있을 때

나. 안전 및 재해예방에 관한 조치가 불충분하다고 인정될 때

다. 기타 필요하다고 인정할 때

1.5.5 시공자는 1.5.2항에 의해 제출한 시공방법 및 공정의 변경이 필요하다고 인정 될 때에는 지체 없이 발주자에게 그 사유를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5.6 시공자는 불가항력이나 기타 시공자의 책임외의 사유로 인하여 공사 진행의 지장이 발생할 경우는 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 준공 연기 신청을 하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.5.7 공사변경

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 공사의 변경이 불가피할 경우에는 발주자의 승인을 득하여 변경, 시행할 수 있다.

가. 시공자가 발주자에게 통지한 다음 각호의 사유

1) 설계도서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순이 되는 점이 있을때

2) 지질 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

나. 발주자가 시공자에게 통보한 다음 각 호의 사유

1) 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

2) 특정 공종의 삭제

3) 공정계획의 변경

4) 시공방법의 변경

5) 기타 발주자의 계획변경이 있을 때

다. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

1.5.8 공사변경요청 서류

공사변경에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 ‘3.4 공사서류 3.4.6 공사변경 승인요청’에 따른다.

1.6 손해에 대한 예방

시공자는 사급자재, 대여기기, 기타 발주자 소유설비에 대한 손해를 발생   시키거나 발주자의 전력공급에 지장을 초래하였을 경우, 발주자 규정에    의하여 변상하여야 함은 물론, 이에 대한 철저한 예방조치를 강구하여야 한다.

1.7 공사부지

1.7.1 현장사무실 및 자재보관 등에 필요한 부지는 발주자와 협의하여 확보하여야 한다. 단, 발주자가 시공자에게 부지를 제공할 경우는 예외로 한다.

1.7.2 발주자가 제공한 부지가 발주자의 사정에 의하여 필요하게 되었을 경우는 발주자의 요구에 따라 당해 부지를 즉시 반환하여야 하며, 이 경우 시공자는 당해 부지 내에 있는 공사용 가설비, 기계기구, 공사용 자재 등을 즉시 철거하여야 한다.

1.8 공사 현장관리

1.8.1 시공자는 공사현장의 질서를 유지하여야 하며, 항상 정리 정돈하여야 한다.

1.8.2 시공자는 당해공사와 연관공사의 시행에 있어 시공자간에 긴밀한 연락을 취하고 협력하여 공사시행을 원활하게 하여야 한다.

1.9 철거자재, 잔자재 등의 처리

시공자는 공사시행에 있어 발생하는 철거자재, 잔생자재에 대하여 설계도서에 따라 신속히 처리한다.

1.10 시방에 의한 치수 및 공사수량

설계도 및 설계서에 기재되어 있는 구조물의 치수 및 공사수량은 완성된 후의 치수 및 수량을 표시한다.

1.11 공사 완료 후의 조치

시공자는 공사완료 후 발주자의 지시에 따라 공사용 가설비 및 공사용 잔자재를 철거하고 특히 사급자재의 잔재 및 대여기기는 발주자가 지시한 기일 내에 지정한 장소에 반환하여야 한다. 또한 대여용지가 있을 경우에는 원상 복구하여 반환하여야 한다. 또한 상기 사급자재에 대한 반환품이 손상되었을 경우는 그 수리 및 보상은 시공자가 부담하여야 한다.

1.12 설계도서에 대한 이견

설계도서에 관한 해석, 공사 중 이견 또는 설계도서에 기재되지 않은 사항은 발주자와 시공자의 상호 협의에 의한다.

1.13 행정처리

시공자는 공사 시행에 따른 대관 인허가 신청에 필요한 서류 작성 및 수   속 일체를 책임지며, 이 시방서에 별도로 지정하거나 발주자의 지시가 있   을 경우에는 이에 따른 모든 수속을 수행하여야 한다.

1.14 민원처리

공사와 관련하여 시공자의 귀책으로 발생된 민원은 시공자 책임으로 처리   하고 그 결과를 발주자에게 보고 하여야 한다.

2. 공사협의 및 조정

2.1 공사 협의 및 조정

시공자는 당해공사와 연관된 다른 공사의 시공자(토목공사, 건축공사, 통   신공사 등)들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될   수 있도록 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의하여 공사의 진행에 지장이   없도록 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 수행하여야 한다.

2.1.1 공사변경

시공자는 당해공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과 공사변경을 요하는 사항은 발주자에게 공사변경을 요청할 수 있다.

2.1.2 종합공정관리

시공자는 착공부터 준공까지 관련 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 발주자가 행하는 종합 공정관리계획 수립 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

2.2 공사 시공한계

시공자는 공사 시공한계를 상세히 검토하여 연관공사의 시공을 원활히 하   고 분쟁을 사전에 차단하며, 他시공자와의 시공한계점의 품질을 확보하여   야 한다.

2.3 착공 전 회의

2.3.1 시공자는 공사 착공 전 발주자와 아래사항을 충분히 협의하여야 하며 그 결과를 공사에 참여하는 전 작업원에게 주지시켜야 한다.

가. 공사의 설계 및 시방

나. 공사 공정(착공 및 준공기일)

다. 자재도착 일시, 장소 및 방법

라. 시공방법 및 시공 주의사항

마. 사고방지대책 및 사고 조치

바. 품질 및 안전관리

사. 공정관리

아. 공사 중의 입회 및 검사

자. 기타 필요한 사항

2.3.2 시공자의 현장대리인, 재해방지 책임자는 전항의 공사 협의에 반드시 참석하여야 하며, 시공자는 사전에 현지를 충분히 조사한 후 공사계획을 수립하여 협의에 임하여야 한다.

2.3.3 시공자는 협의사항에 대한 회의록을 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.3.4 공사착공 후라도 발주자는 시공자가 필요하다고 요청하는 사항에 대하여 재협의를 할 수 있으며 시공자는 공사 시행방법의 확인 및 공사 실시에 있어 적정 여부를 검토, 확인하여야 한다.

2.4 사전승인

‘3.2시공계획서’에 명시되어 있는 공종의 공사는 작업실시에 앞서 시공계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 얻은 후 작업을 시행하여야 한다.

2.5 공사수행

2.5.1 시공자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주자의 시정요구 또는 이행 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

2.5.2 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

2.5.3 시공자는 당해공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 한다.

2.5.4 시공자는 공사현장의 작업효율증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해예방, 보건, 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착 토사의 정리, 정돈, 점검, 청소 등을 충분히 행하여 현장을 청결히 유지하여야 한다.

2.5.5 시공자는 공사를 일시 정지한 후 또는 천재지변 및 기타 사유로 공사를 중단한 경우에는 공사 중단으로 인하여 품질이 저하되지 않도록 공사 중단 부분, 시공물, 가설재 등을 보호하고 정비하여야 한다.

3. 제출서류

3.1 제출절차

3.1.1 협의 및 확인

가. 시공자는 각 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 발주자와 협의하여 조정한다.

나. 시공자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치 여부를 확인한 후 제출물에 날인하여 발주자에게 제출하여야 한다.

3.1.2 규격

가. 서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정양식을 제외하고는 시공자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리하여 제출하여야 한다.

나. 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

3.1.3 추가요구 및 변경

발주자는 공사의 원활한 진행을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 이 공사시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록 유지를 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

3.1.4 내용변경

모든 제출물은 내용의 변경을 수반하는 사유가 있어 발주자가 이를 인정한 경우에는 관련된 제출물을 재작성하여 제출하여야 한다.

3.2 시공계획서

3.2.1 승인

시공자는 단위 공종에 대하여 시공계획서를 작성하여 발주자의 확인을 받은 후 공사를 착수하여야 한다. 단, 시공계획서에 대하여 변경사항이 발생하면 변경계획안을 작성하고 발주자의 승인 후 공사를 수행하여야 한다.

3.2.2 포함내용

가. 공사개요

나. 시공관리체계

다. 세부공정표(사용할 자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)

라. 사용재료

마. 품질보증계획

바. 안전관리계획

사. 환경 및 보건관리계획

아. 他공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

자. 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

차. 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항을 기준으로 작성

3.3 공사 기록 사진

3.3.1 비치 및 제출

공사 시공 후 은폐되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 사진으로 기록, 정리하여 현장에 상시 비치하여야 하며, 1부는 원본파일과 같이 발주자에게 제출한다.

3.3.2 촬영방법

공사시공 후 은폐되는 주요 부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

3.4 공사서류

3.4.1 공사서류의 비치

시공자는 공사의 진행을 위한 서류를 사실과 증빙자료에 근거하여 작성하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에는 감독원이 필요시 수시로 열람할 수 있도록 비치하고 공사가 준공되면 발주자에게 제출하여야 한다.

3.4.2 착공서류

시공자는 다음 서류를 제출하여 감독원의 승인 후 착수하여야 한다.

가. 착공계

나. 현장대리인계(현장기구표 포함)

다. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

라. 공사예정 공정표

마. 공사도급계약서 사본 및 내역서

바. 시공계획서

사. 안전관리계획서

아. 환경관리계획서

자. 품질관리계획서

3.4.3 공사일지

가. 제출서류

당일의 일기, 공정, 장비현황, 인원사항과 익일의 공사추진 계획을 상세히 기록하여 감리원에게 제출하여야 한다.

나. 공사일지에는 아래사항이 포함되어야 한다.

1) 최저, 최고온도, 습도 및 날씨

2) 공정, 인원, 장비현황

3) 공사 주요사항

- 사건, 사고

- 공사의 중단, 연기, 결함, 손실

- 측정 및 검사사항

- 감리원의 지시, 요구사항

- 점검, 감사 등

3.4.4 준공검사원

가. 제출서류

1) 준공검사원

2) 공사비 세부내역

3) 준공 사진(원본파일 포함)

4) 보험료 지불 영수증 및 증권

5)기타 요청 서류

나. 제출시기 및 부수 : 준공검사 요청 시 각2부 제출

다. 준공검사원 제출 시 발주자에게 확인을 받아야 하는 사항

1) 현장점검 지적사항 조치완료 여부

2) 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

3.4.5 공사변경승인 요청

가. 제출서류

1) 변경요청 공문

2) 변경 사유서

3) 변경 총괄표, 내역서, 산출근거

4) 변경 설계도면

5) 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

나. 제출시기 및 부수 : 공사변경 승인 요청 시 각 2부 제출

3.4.6 품질시험· 검사 및 자재관리 서류

가. 품질보증 계획 및 품질시험계획서‘6.2 품질관리계획’에 따른다.

나. 자재 관련 서류

1) 품질시험· 검사 대장

지입자재에 대한 품질시험· 검사 결과에 대하여 시험자 및 현장대리인이 날인하고, 감독의 확인을 득하여 상시 비치한다.

2) 자재수불대장

사급 자재 중 현장에 반입되어 시공자가 인수한 자재 및 시공자 지입자재는 자재 품목별 인수, 출고, 재고의 상태를 상시 기록 관리한다.

3.4.7 안전관리 서류

가. 안전관리 계획서 등

제출시기 및 부수는 ‘3.4 공사서류 3.4.2 착공서류’에 따른다.

나. 안전일지

시공자가 자체 관리하며, 안전점검, 안전진단, 전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

4. 환경관리

4.1 일반사항

환경관리라 함은 환경영향평가법에 의하며, 사업시행으로 인한 위해를 예   방하고 자연환경, 생활환경, 사회 및 경제환경을 적정하게 관리보전함으로   써 현재와 장래의 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게   하며 환경영향평가 내용 및 이에 대한 협의내용을 충실히 이행하기 위함이다.

4.1.1 환경관리 조직편성 및 임무

감독원

가. 조직편성

시공자는 환경영향평가 협의 내용을 근거로 하여 현장에 적합한 환경관리조직을 편성한다.

나. 임무

1) 환경관리책임자는 환경관리계획수립 및 대책 등을 지시하고 예산의 조치 및 환경관리자, 환경담당자를 임명하고 현장 환경관리 업무를 책임지고 추진한다.

2) 시공자는 환경영향평가법의 규정에 의하여 협의내용 관리책임자를 지정하여 발주기관의 장에게 보고한다.

4.1.2 환경관리

시공자는 환경의 보전을 위하여 관련 법규 및 본 공사의 환경영향평가 시 협의된 내용을 이행하여야한다.

4.2 환경관리 업무

4.2.1 환경관리 계획서 작성·제출

가. 시공자는 당해공사에 대한 환경영향평가 보고서 및 협의 내용을 근거로 하여 지형, 지질, 대기, 수질, 소음, 진동 등의 관리계획서를 수립하여 공사 착공 서류 제출 시 이를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 환경관리 계획서에 포함하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 공사 개요

2) 환경요인(측면) 분석

3) 환경관리 계획

(1) 환경관리 조직 및 책임

(2) 환경교육계획

(3) 인허가 등 법규준수 및 대관업무 계획

4) 오염물질별 관리 계획

5) 비상사태 대응 계획

6) 관련 절차 목록

4.2.2 작성 사전검토 사항

가. 시공자의 환경관리 조직편성, 임무의 법적 구비조건, 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

나. 환경영향 평가 협의 내용의 관리계획 실효성 검토

다. 환경영향 저감대책 및 공사 중, 공사 후 환경관리 계획서 적정성 검토

라. 환경관리자에 대한 업무수행능력 및 권한 여부 검토

마. 환경전문기술자 자문사항에 대한 검토

바. 환경관리 예산편성 및 집행계획 적정성 검토

4.2.3 기록유지

환경영향평가법 제23조 협의내용 이행의무 및 시행규칙 제11조, 제13조에 따라 협의내용 관리 책임자로 하여금 관리대장을 기록, 비치한다.

4.2.4 제보고 사항

환경영향평가법 제26조 및 시행규칙 제14조에 따라 사후 환경영향조사를 실시하고 결과 보고서 4부를 매분기별로 협의내용관리책임자가 로 작성하여 감독원에게 제출한다.

5. 준공

5.1 준공검사

5.1.1 준공검사원

준공검사원의 제출은 ‘3.4 공사서류 3.4.4 준공검사원’에 따른다.

5.1.2 준공검사 및 조치

가. 시공자는 준공검사일에 현장대리인이 입회하여 발주자가 요구하는 사항을 이행하여야 한다.

나. 준공검사 결과 미시공 부분이 발견 되거나 설계내용과 현격한 차이가 있어 재시공이 불가피한 경우 또는 시정사항의 과다로 인수하기에 부적당하다고 판정되는 경우에는 불합격판정을 내리며 재시공후 다시 준공검사를 받아야 한다.

다. 사용전검사일에도 시공관리책임자이 입회하여야 하며 검사결과 시정사항은 시공자 부담으로 시정하여야 한다.

공 사 특 기 시 방 서

2019. 2

특  기  시  방  서

본 특기시방서는『'19년도 해저케이블 등부표 인양점검 및 보수공사』에 적용하며, 본 시방서의 모든 규정은 일반시방서의 제규정보다 우선한다.

[등부표 해체 및 설치 작업]

1. 등부표 철거 작업을 할때에는 기 설치된 체인이 밑으로 떨어지지 않도록     스치로폼등의 부유체로 고정을 단단히 하여 유실되지 않도록 하여야 한다.     만약,  체인이 바다 저면에 흘러 내렸다면 계약자 부담으로 즉시 체인 및     CON'C ANCHOR BLOCK를 제작 설치하여 등부표 운영에 차질이 없       도록 하여야 한다.

2. 등부표 설치하기전 반드시 수심을 정확히 체크하여 산출식에 의해 체인길     이를 정확히 산정후  작업에 임해야한다. 산정길이의 부정확으로 인한 재     설치 및 추가비용은 계약자부담으로 한다.

3. 체인 및 부속물은 20%이상 마모시 교체하여야 하며, 반드시 감독원의 확     인절차를 거쳐야 하며,  기타 추가 교체 필요시는 감독원의 승인하에 교     체토록한다.

4. 체인 및 부속자재 수량은 감독원의 확인 후 실적정산 한다.

5. 잠수부 투입시에는 산업안전보건법 및 관계법규를 준수하여 안전한 작업이     될수있게 하여야 하고, 수중 안전장구는 사전에 이상유무를 확인하고 양     호한 것만을 사용하여야 한다.

6. 잠수작업시 사전에 기상상태나 조류의 속도(물때)등을 면밀히 체크하여 작     업에 지장이 있다고 판단되는 경우 현장대리인은 즉시 작업을 중지시키고     철수시켜야 하며, 독단적인 작업을 할수 없도록 관리에 만전을 기해야한다.

7. 잠수 작업시 산업안전보건법에 명시된 일일 작업시간 및 표준 감압시간을     준수하여야 한다.

8. 등부표를 설치할때는 반드시 관리청에 신고된 좌표를 확인한후 정확히 허     가된 위치에 설치하여야하며 만약, 부정확한 위치에 설치되어짐이 확인될     경우, 즉시 계약자 부담으로 허가된 좌표를 찾아 정확히 재설치한다.

9. 등부표 인양, 설치 작업전에는 기상변화에 주의를 기울이고 사전에 면밀한     작업계획을 세워 작업에 차질이 없도록 하여야 한다.

10. 등부표 인양, 설치 작업시 체인 및 침추 등 중량물 설치가 많으므로 안      전사고에 철저를 기하여야하며, 크레인등 중장비 작동시 신호수를 배치      하여 중장비 기사의 사각지대로 부터 작업자들을 보호토록 하여야 한다.

11. 샤클등의 체결부속은 반드시 체결핀의 말단부에 용접을 철저히하여 스윙      도중 빠지지 않게 단단히 고정 하여야 한다.

12. 모든 작업과정은 해상에서 이루어지므로 구명조끼등 안전장구 착용을 철      저히 하고, 만일의 상황에 대비해 긴급구난 계획을 세우고 작업자들에게      교육을 시행해야 한다.

13. 작업과정은 공종별로 사진촬영을 하고, 준공시 정리하여 제출하여야 한다.

14. 제반사항은 수중공사 및 항로표지에 관한 관련법규 및 규정에 준하며,       기타 감독원과의 협의에 의하여 감독원의 지시에 따른다.

15. 등부표 인양 후 수리 및 도장작업에 필요한 작업장은 계약자 측에서 각종 민원이 야기되지 않고 작업이 용이한 장소로 선정하여 작업하도록 한다.

16. 공사사진은 주요 공정별로 시간 순으로 촬영하여야 하고 작업내용이 어떤 내용인지 충분히 식별이 가능하여야 하며, 5기의 등부표에 대하여 모든 공정이 각각 촬영되어야 한다.

[(등)부표 도장작업]

1. 도장전에 표면처리는 동력공구 세정 처리하여야 한다.

2. 도장시 온도는 10℃ ~ 32℃에서 시행하고 습도는 이슬점보다 적어도 2.7℃    이상 높아야하고 바람은 40KM/HR이상이면 도장을 중지하여야 한다.

3. 도장될 표면은 완전히 건조되고 청결해야 하여야 한다.

4. 도료는 시공전에 바탕만들기 상태를 한 후에 감독원의 확인 및 검사를 득     한 후에 시공을 하여야 하며, 계약자는 별도 서식에 따라 check list를 만     들어 감독원의 승인을 받아야 한다.

5. 계약자는 도료를 칠할 때 마다 감독원에게 경화 및 도막두께 측정을 하여     승인 후 다음 공정으로 넘어가야 한다.

6. 도료중 선저부의 상도 도료는 TIN FREE SPC 도료로 유기주석계 방오제  를 함유치 않는 자체마모형 방오도료로서 해양환경 오염을 유발하지      않는 도료이기에 계약자는 사양에 맞는 도료를 선정하여 감독원에게 시   험성적서등을 제출하여 승인을 받아야 한다.

7. 계약자는 등부표를 재설치전에 도료 제작업체나 공인기관의 도막측정 결  과를 샘플을 첨부하여 서면으로 감독원에게 제출하여 승인후에 등부표를  설치하여야 한다.

8. (등)부표 표체에는 표면 도장 완료후 부표명, 연락처,"한국전력공사 특고압 해저케이블", "위험"을 인식할수 있는 표식을 도색 및 부착 하여야 한다.

[기타사항]

1. 상기 시방서에 명기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

2. 본 공사 시공중 관련 제규정 및 시방서에 이견이 있을 경우 감독자와 협    의내용에 따른다.

3. 계약자는 공사시행전에 모든 자재에 대해서 자재검수를 감독자에게 승인     을 득한 후에 사용하여야 한다.

4. 철 중추는 주철 제품(Cast iron)을 사용하되 육안으로 보아 재질에 기포가     없고 표면이 균일하여야 한다.

가. 조립 시 중추가 이탈되지 않도록 견고하게 취부하여야 한다.

나. 철 중추의 규격은 강관의 호칭Φ610의 외경에 충분히 삽입되도록

Φ900× 620×100t로 제작한다.