□위   치   도□

과업대상위치

광안대교

광안리해수욕장

민락항

민락수변공원

요트계류장

해운대해수욕장

삼익비치아파트

용호부두

동백섬

목            차

Ⅰ.    설 계 설 명 서

Ⅱ.    시 방 서

Ⅲ.    설 계 예 산 서

Ⅳ.    수 량 산 출 서

Ⅴ.    도             면 (별  첨)

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅰ. 설  계  설  명  서

가. 공  사  명 : 민락수변공원 태풍(콩레이) 피해복구공사

나. 위       치 : 부산광역시 수영구 민락동 110-19 민락수변공원 일원

다. 공사의 목적 : 2018년 제25호 태풍 콩레이에 의해 피해를 입은 민락수변공원 친수호안 시설물을 향후 태풍내습시 피해 및 재난사고 발생을 경감․예방하고자 하는데 그 목적이 있음.

라. 공사의 개요

1)	토 공	-	구조물깨기 등	:	1 식
2)	블 럭 설 치 공	-	격벽블럭 제거 및 제작 설치	:	29 ea
		-	T형블럭 재설치	:	38 ea
		-	+형블럭 재설치	:	30 ea
3)	피복석 복구공	-	피복석 수중투하	:	174.3 ㎥
		-	피복석 고르기(수중)	:	497 ㎡
4)	구 조 물 공	-	수로횡단 슬라브교 설치(3.0x9.0x0.3t)	:	1 개소
		-	징검다리 복구	:	3 ea
5)	부 대 공	-	공사현황표지판, 가도, 볼라드설치(72경간) 외	:	1 식

마. 주요자재내역

1) 관급자재

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
레 미 콘	25-30-12	㎥	152.0
피 복 석	1.3㎥급이상	㎥	121.0
도막형바닥재	스텐실, 2mm	㎡	358.0
볼라드(상하이동식)	Φ127, H630, STS	경간	72.0	부속자재 포함(사슬 등)

2) 주요자재

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
레 미 콘	25-30-12	㎥	152.0	관급(할증포함)
피 복 석	1.3㎥급이상	㎥	121.0	관급(할증포함)
도막형바닥재	스텐실, 2mm	㎡	358.0	관급
볼라드(상하이동식)	Φ127, H630, STS	경간	72.0	부속자재 포함(사슬 등)

바. 공사기간

본 공사의 공사기간은 착공일로부터 3개월로 한다.

단, 다음의 경우에 시행청의 승인을 득하여 공사기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 천재지변 또는 일기불순으로 인하여 본 공사를 시행할 수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우

2) 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우

3) 시행청의 공사중지 명령에 의거 작업이 중단되었을 경우

사. 유의사항 및 설계변경조건

본 공사의 설계도서는 2019년 건설공사 표준품셈과 부산시, 수영구 설계지침서, 항만 및 어항 설계기준 및 설계 당시까지 파악된 자료에 의하여 작성하였으며, 아래사항 발생시 설계변경 할 수 있다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3) 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건의 내용에 의거 변경사유 발생시 변경

4) 기타 설계변경 사유가 발생한 경우

아. 예정공정표

공 종	보할 (%)	공 사 기 간 (3개월)						비 고
		15일	30일	45일	60일	75일	90일
토공	5.0	2.5	2.5
블럭설치공	50.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
피복석복구공	30.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
구조물공	10.0		2.5	2.5	2.5	2.5
부 대 공	5.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
단위공정율(%)	100	19.4	21.8	19.3	19.3	19.3	0.9
누계공정율(%)	100	19.4	41.2	60.5	79.8	99.1	100

Ⅱ. 시      방      서

Ⅲ. 설  계  예  산  서

설계년월일

2019년 3월

설계자

심  사

게  장

과  장

2019년도

민락수변공원 태풍(콩레이) 피해복구공사  설계예산서

▣ 공 사 개 요

1)	토 공	-	구조물깨기 등	:	1 식
2)	블 럭 설 치 공	-	격벽블럭 제거 및 제작 설치	:	29 ea
		-	T형블럭 재설치	:	38 ea
		-	+형블럭 재설치	:	30 ea
3)	피복석 복구공	-	피복석 수중투하	:	174.3 ㎥
		-	피복석 고르기(수중)	:	497 ㎡
4)	구 조 물 공	-	수로횡단 슬라브교 설치(3.0x9.0x0.3t)	:	1 개소
		-	징검다리 복구	:	3 ea
5)	부 대 공	-	공사현황표지판, 가도, 볼라드설치(72경간) 외	:	1 식

◎ 총    공   사   비 : 일 금 이억팔천만원정           (￦280,000,000)

도      급      액 : 일 금 이억일십만칠천원정       (￦200,107,000)

관  급  자  재  대 : 일 금 칠천육십오만삼천원정     (￦ 70,653,000)

폐 기 물  처 리 비 : 일 금 구백이십사만원정         (￦  9,240,000)

Ⅳ. 수  량  산  출  서

Ⅴ. 도           면(별 첨)