공 사 특 기 시 방 서

2019. 04

제 1  장   총   칙

1-1 일반사항

본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 특별한 사항을 규정하며 타 시방서에  우선한다.

1-2 관련사항

본 공사와 관련된 제 규정 및 본 공사 시공도면은 본 시방서의 일부로 간주한다.

1-3 안전원 선임

본 공사와 관련하여 해당 공종시공에 대한 자격을 가진자를 안전원으로 선임하여 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

제 2 장 『'19년 HVDC 해저케이블 보호설비 보강공사』에 적용

2-1 일반사항

가. 본 장은 『'19년 HVDC 해저케이블 보호설비 보강공사』에 대한 기술적 사항을규정한다.

나. 도급자는 설계서의 실제적인 내용을 검토하고 상세한 시공계획서를 작성, 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 작업에 착수하여야하며.시공계획서에는다음사항을포함하여작성하여야한다.

1) 시공방법

2) 공사 진행순서

3) 공사관리

4) 공사 장비명세 및 수행 일람표

2-2 공사준비 및 수행

가. 『'19년 HVDC 해저케이블 보호설비 보강공사』의 시행착수에 앞서 공사의 능률과 안전에 영향을 미치는 다음 사항을 사전에 조사하여 시공계획에 반영하여야한다.

1) 기상조건 : 풍향, 풍속, 강우량, 기온, 안개발생일수

2) 해상조건 : 파랑, 조위, 조수, 태풍

나. 도급자는 기상청에서 발표하는 기상정보를 청취하여 해상공사에 대비하여야   하며 악천후 시 공사에 사용하는 예선, 대선 및 해상장비에 대한 대피 등 필요한 모든 대책을 강구하여야 한다.

다. 사업에 투입되는 작업선 및 기타 선박은 『'19년 HVDC 해저케이블 보호설비 보강공사』란 표지 깃발을 부착 후 정비 공사에 임하여야 한다.

라. 도급자의 부주의로 기존 구조물에 영향을 주었거나 파손 발생 시켰을 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고, 감독관의 지시에 따라 원상회복 등 조치를 취하고,그 비용은 도급자 부담을 원칙으로 한다.

2-3 공사장비

공사 장비는 본 공사의 요건을 충족 할 수 있는 충분한 규모와 용량을 가진 것 이어야 하며, 공사의 수행이 능률적으로 될 수 있는지 여부를 감독관이 확인․점검 후 공사에 투입하여야한다.

2-4 보강공사

가. 시공전에 김양식장구간 (케이블 중심 좌우 200m, 케이블 끝단 선로방향으로 50m)에 대한 현장조사를 시행하여 양식장구간에 피해가 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 만약 도급자의 착오로 훼손이 수반 되었을 시 에는 도급자가 배상하여야 한다.

나. S-FCM (전체 폭 2.0m)

보강공사시 보호설비의 폭은 2.0m(4블록), 길이는 이상개소별 길이 양측에 길이1.0m 추가 설치(양측 각각 0.5m)하며, 설치 시 에는 기존 보호설비 상부 중앙에 위치하여야 하며, 현장여건상 수중에서 개별조립(1블럭간 샤클연결작업)을 시행하도록 한다.

※보강자재 및 개략도 참조

다. 보호설비 설치시 별도의 시공품질표에 정해진 기준치 이상으로 해저면에 최대한 안착 되도록 시공에 만전을 기하여야한다.

2-5 검  사

가. 작업 공정별 수중촬영 후 감독관에게 승인을 받은 후 다음 공정에 임하며, 해저케이블 잠수점검 이상개소 보강작업이 완료되면 감독관 또는 감독관이 임명한 자의 확인․검사를 받아야 하며 검사 결과 불합격시는 재시공 보완하여야 한다.

나. 보호설비는 수중에서 개소별로 확인 가능하도록 육상에서 사전에 이상개소별   소요자재를 상이하게 표기하여 작업을 시행하도록 한다.