「홍성파출소 연안구조 정」

계류시설(도교ㆍ인양기 제작 및 푼 툰)설치 공사시방 서

1. 사업 명

보령해양경찰서 홍성파출소 연안구조 정 계류시설 설치 공사

2. 사업위치

충남 홍성군 서부면 남당항로 213번 길 25-6 (홍성파출소 앞 부두 우측 해상)

3. 목적(일반사항)

가. 본 사업은 항・포구에서 연안구조정이 안전하게 접안・계류를 할 수 있는 시설을 제작・설치하는 사업으로 안전성 및 효율성이 우수한 계류시설(도교, 인양기)을 설계・건조하여야 하며, 연안구조정과의 기본성능 제약 등 문제가 없어야 한다.

나. 본 시방 서에 기술되지 않았으나 본 계류시설(도교․인양기(대) 제작 및 푼 툰)을 설치하는데 있어서 법규나 규정에서 요구하는 사항은 본 시방 서에 포함하여 설계 및 시공한다.

4. 사업개요

가. 푼 툰 설치공사

- 푼 툰 규격(조달청 물품구매) : 전장 20.52m × 폭 6.06m × 전고 1.2m

- 앵커 6E A(54관), 앵커체인 300m(1개소 50m), 샤 클 18E A(1개소 3E A)

- PP로프 80m(부잔교 고정 50m, 파이프 고정 30m), 계선 고리 설치 2개소 등

다. 도교제작 설치공사 : 전장 18m × 폭 1.2m × 전고 1m (재질 : STS304)

라. 인양기(대)제작 설치공사 : 2.5m(폭) × 4.0m(전고)

5. 사업기간

본 사업기간은 착공일로부터 30일 미만으로 한다.

6. 설계변경 조건

본 사양서의 내용을 변경하고자 할 때에는 변경내용, 이유, 변경이 본 공사에 미치는 영향, 공사비 변동 및 그 내역 기타 기술적인 자료 등을 명기한 서류를 발주자 측에 제출하고 검토 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 또한, 발주자측이 본 사업의 시방 서에 대하여 사양, 설계, 각 구조 및 공작 등에 대한 변경을 할 때에는 계약자에게 그 내용을 문서로서 통지하며, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 발주자 측의 요구사항을 반영하여 수정 보완해야 한다.

7. 각종 검사 및 공사 시 유의사항

1) 해상부유구조물(푼 툰)이 육상에서 납품업체서 조립하여 납품되면, 설치공사 前 도교, 인양기(대), 닻, 체인 등 발주자 측에서 자재에 대한 납품검사 등 각종검사를 실시하며, 계약상대자(시공업체)는 이에 절대적으로 협조 하여야 한다.

2) 또한 본 계류시설 설치장소에 대하여 현지사전 답사를 하고 충분한 기술 검토를 거쳐 안전하게 설치하여야 한다.

3) 현장작업 시 주변 정리정돈 및 청소를 하여 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.

8. 착공 시 서류 제출사항

도급 자는 물품 제작 시, 다음 서류가 포함된 착공신고서를 감독관에게 제출하여야한다.

1) 착공 계(설명서)

2) 현장대리인계, 현장기술자 지정신고서(안전관리자 등)

3) 예정공정표

4) 안전・환경 및 품질관리 계획서

5) 공정별 인력 및 장비투입 계획서

6) 착공 전 현장 사진

7) 기타 발주처가 지정한 사항

9. 적용법규

본 계류시설은 항・포구에 설치되는 시설로서 검사기관 관련기준 등 관계법령에 맞도록 설계・제조 되어야 한다.

10. 주요제원

가. 계류시설(폰툰)제원

	< 해상부유구조물(푼툰) 제원 >
	❖ 전장, 폭, 높이 : 20.52m * 6.06m * 1.2m ❖ 재질 : PE(폴리에틸렌) ❖ 물품가 : 99,924,000원(조달청,조달수수료 제외) ❖ 제작사 : (주)혁 신 ❖ 기타 : 조달우수제품(기술인증제품) 식별번호 22981127 수량 4EA 식별번호 22981128 수량 6EA

나. 도교 등 (18m×1.2m×1m)

	<연결 도교 제원 >
	■ 도교 - 전장 18m * 폭 1.2m * 높이 1m - 재질: 스테인레스 (STS304)

계획 평면도

계획 측면도

부잔교 평면도

부잔교 하부평면도

다. 앵커 외

		<앵커자재 제원 >
		■ 앵커닻 - 중량 200kg ■ 앵커체인 - 22mm

11. 계류시설 주요구성 및 설치

가. 주요 구성 품

1) PE해상부유구조물(=푼 툰) : 조달 물품구매

2) 계류시설 : 공사계약 ( 닻, 앵커, 계선 고리, PP로프, 체인, 샤 클 설치 등)

3) 도교제작 설치 : 공사계약 (도교, 도교베이스 판, 상하좌우멀티힌지 설치 등)

4) 인양기(대)제작 설치 : 공사계약 [체인블록 2개(각 10톤), 와이어 등]

나. 계류시설(푼 툰) 설치공사

1) 본 계류시설(푼 툰)이 육상에 조립 후 발주자 측의 제반검사 완료되면, 최종 설치하려는 해상에 크레인, 어선 등을 이용하여 발주자 측 지정장소에 이동설치 해야 하며 이동 및 설치비용 등 최종 준공, 인수 시까지 소요비용 일체는 계약자(시공업체) 부담으로 한다.

2) 앵커 및 앵커체인의 종류 및 크기, 수량 등은 공사감독 및 검사자의 안전성 검토 후 설계도면에 따라 설치한다.

3) 앵커와 체인의 연결은 푼 툰의 상부모서리 전후 각 2개소, 좌우 2개소 총 6개소를 연결하여 고정시키되 각 개소 당 50m의 체인을 사용하여 주변어선 통항 및 지리적 여건을 고려하여 안전하게 연결 고정시킨다.

(주변 조류 및 어선통항을 고려하여 계약담당공무원과 협의 길이 조정가능)

* 앵커 200kg 이상, 앵커체인 및 샤클 D19이상, PP로프 D36이상

4) 앵커는 정박을 위해 다양한 크기의 말뚝, 파일, 케이블, 체인을 하부 앵커에 부착하거나, 사이드 고정 장치를 부착할 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 앵커와 앵커체인은 연안구조정 계류시설 설치지점의 해상여건을 충분히 고려하여 설치하여야 한다.

다. 도교제작 설치공사

1) 도교시설의 치수를 전장 18m, 폭 1.2m, 높이 1m 이상으로 설치한다.

2) 도교시설의 재질은 스테인리스(STS304)를 사용하고, 부속 설비품은 도면에 표기되어있는 치수대로 제작 및 설치한다.

3) 부속 설비품 중 도교 베이스판(2m*3m*6T), 상하좌우유동장치(1.5m*0.5*20T)는 용융도금을 사용한다.

4) PE부잔교와 도교의 시설의 접척부의에 마찰에 따른 파손이 되지 않도록 도교하부에 PE롤러를 부착한다.

5) 향후 다른 곳으로 이동설치를 위해, 도교의 육상연결부를 분리가능토록 제작 설치하여야 한다.

6) 스테인리스 재질로 제작‧설치하되 도교 이용 시, 미끄럼방지 및 배수가 용이하도록 발판을 익스펜디드망(6T이상), ㄱ형강(25*25*3T) 사용한다.

마. 인양기(대)제작 설치공사

1) 인양기(대)의 치수를 폭 2.5m, 높이 4m으로 설치한다.

2) 인양기(대)의 재질은 일반 H형강(SS400)으로 용융도금을 사용하고, 부속 설비품은 도면에 표기되어 있는 치수대로 제작 및 설치한다.

3) 인양기(대)와 육지 고정방법은 앙카방식(케미칼앵커 주입)으로 Base Plate를 20T이상 사용한다.

4) 부속 설비품 중 수동식체인블록은 태풍 시, 도교를 인양 가능토록 1개소당 10Ton씩 상부좌우 2개소를 설치한다.

5) 보강이 필요한 부분에 Plate를 12T이상 사용한다.