	제1장		총 칙
		1-1 일반적인 조건 1-2 공사준비 및 시공관리 1-3 자재관리 1-4 품질관리 및 시공점검, 검측 1-5 안전 및 보건관리 1-6 환경관리 1-7 가시설물

제 1 장  총 칙

1-1 일반적인 조건

1-1-1 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

이 시방서는 제주특별자치도에서 발주하는 ‘우도항 준설공사

’ 에 적용한다.

1.1.2 적용순서

(1) 설계서(목적물 물량이 표시된 내역서는 제외한다)는 상호보완의 효력을 가지며 상호 모순이 있어 적용상의 혼란 등의 문제가 발생할 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

① 현장설명서 및 질의응답

② 본 공사시방서

③ 설계도면

④ 공사비 내역서

(2) 이 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방내용 간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

(3) 공사계약일반조건 제3조에 의한 계약문서는 상호보완의 효력을 가지며 해석을 위한 문서들 간의 우선순위는 다음의 순서에 따른다.

① 계약서

② 설계서

③ 유의서

④ 공사계약 특수조건

⑤ 공사계약 일반조건

⑥ 공사시방서

⑦ 표준시방서

⑧ 설계도면

⑨ 입찰내역서 및 계약의 일부를 구성하는 기타문서

(4) 설계서를 구성하는 어느 한 문서의 사항이 특별히 불합리하거나, 중대한 하자가 있는 등 특별한 경우에는 발주자의 사실 판단이나 설계 및 공사 관계자 등의 의견을들어 조정 시행할 수 있다.

1.2 용어의 정의

1.2.1 발주청 또는 발주자

이 시방서에서 『발주청』또는『발주자』라 함은 해당공사의 시행주체로서 공사를 시행하기 위하여 입찰을 집행하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

1.2.2 수급인

이 시방서에서 『수급인』이라 함은 공사계약일반조건 제2조의 제2호『계약상대자』를 말하며 본 시방서에서『시공자』또는『도급자』라고 표기된 경우도 또한 같다.

1.2.3 공사감독자

이 시방서에서 『공사감독자』라 함은『공사계약일반조건 제2조 제3호』의『공사감독자』로서 발주청에서 임명한 기술직원 또는 그의 대리인이나 또는 건설기술 진흥법 제39조 제2항에 따라 감독 권한대행 등 건설사업관리를 하는 공사는 해당공사의 건설사업관리를 수행하는 건설사업관리기술자를 말한다. 본 전문시방서에서 공사감독자 또는 감리원이라고 표현될 수 있다.

1.2.4 현장요원

이 시방서에서 『현장요원』이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자 로서 수급인이 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

1.2.5 현장대리인

이 시방서에서 『현장대리인』이라 함은 공사계약일반조건 제14조의『공사현장대리인』을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자(전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

1.2.6 이 시방서에서 『공사』라 함은 본 공사와 가설공사 또는 이에 준하는 공사를 말 한다.『본 공사』라 함은 계약에 의하여 시공되는(설비를 포함한) 영구(永久)공사를말한다.『가설공사』라 함은 공사의 실시 및 준공과 하자보수에 필요한 모든 종류의 임시 공사를 말한다.

1.2.7 『제작자』라 함은 공사에 사용할 제품을 제조 또는 제작하여 공급하는 제조업체 또는 제작업체를 말하며, 관련부분 시방서에서는 이들을 별도 구별하지 아니하고 모두 제작자라 칭한다.

1.2.8 『납품자』라 함은 공사에 사용할 제품을 공급하는 업체로서 납품업자 또는 공급업자를 말한다.

1.2.9 『하수급인』이라 함은 수급인으로부터 건설공사를 하도급 받은 자를 말한다.

1.2.10 『설계도서』라 함은 발주청이 제공한 본 공사의 모든 설계도면과 계산서 및 계약서에 의해서 발주청 또는 공사감독자가 수급인에게 제공하는 모든 종류의 기술자료 및 도면, 계산서, 견본, 양식, 모형, 그리고 수급인이 제출하고 공사감독자가 승인한 유사한 종류의 다른 기술자료를 말한다.

1.2.11 『현장』이라 함은 공사가 실시되는 장소로서 발주청이 제공하는 장소와 현장의 부분을 구성하는 것으로 계약에 의해 특별히 지정된 다른 장소를 말한다.

1.2.12 『승인』이라 함은 수급인으로부터 서면으로 제출되어 요청 받은 사항에 대하여 공사감독자가 그 권한의 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

1.2.13 『지시』라 함은 발주청 또는 공사감독자가 수급인에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 서면으로 지시하여 실시토록 하는 것을 말한다.

1.2.14 『협의』라 함은 공사감독자 또는 발주청이 수급인으로부터 서면으로 제출된 내용을 수급인과 토의를 통해 상호 합의에 도달하여 공사감독자 또는 발주청이 서면으로 인정하는 것을 말하며, 공사감독자 또는 발주청이 서면으로 수급인에게 제출하여 수급인과의 상호 합의를 통해 수급인이 서면으로 인정하는 경우도 또한 같다.

1.2.15 『확인』이라 함은 발주청 또는 공사감독자가 본 전문시방서 또는 관련 법규 및 계약내용의 관련내용을 검측, 계측, 목측 등으로 확인하고, 서면으로 동의하는 것을말한다.

1.2.16 『표준시방서』라 함은 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서 발주청 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다.

1.2.17 『전문시방서』라 함은 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공 기준을 말한다.

1.2.18 『공사시방서』라 함은 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성·지역여건·공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공 방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술하는 시공기준을 말한다.

1.3 공사감독자의 업무

1.3.1 공사감독자는 계약된 공사의 원활한 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원, 수급인이 이 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 수급인과 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련 법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사, 승인 등을 행하며 그 권한의 범위 내에서 공사전반에 대하여 발주청을 대신하여 업무를 행한다.

1.3.2 공사감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인, 확인 등 공사추진과 관련된 모든 행위는 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 행할 수 있되 수급인이 필요하다고 판단할 경우 문서로 이를 확인할 수 있으며 공사감독자는 이 같은 수급인의 요구에 응하여야 한다.

1.3.3 공사감독자는 수급인이 건설공사의 설계도서.시방서 기타 관계서류의 내용과 적합 하지 아니하게 해당건설공사를 시공하는 경우에는 재시공·공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

1.3.4 공사감독자는 수급인에게 재시공·공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 수급인에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 공사 재개 지시 등 필요한 조치를 한다.

1.3.5 공사감독자는 계약변경을 유발하거나 비용 부담이 되는 어떠한 행위도 발주청의 승인을 받지 않고는 할 수가 없다.

1.4 수급인의 책무

1.4.1 일반적 의무

(1) 수급인은 본 공사의 계약에 따라 공사를 근면하고 성실하게 설계(계약에서 규정한 경우)하고 시행·완공하여야 하며 또한 관련법규 및 계약조건에 명시된 어떠한 하자에 대해서도 계약에 따라 성실하게 보수하여야 한다.

(2) 수급인은 계약내용에서 수급인이 제공하도록 명시되어 있거나 또는 계약내용으로부터 합리적으로 추정할 수 있는 한, 관련설계 또는 공사를 수행함에 있어서나 하자 보수 시 그 수행내용을 스스로 감독하여야 하며 노동력, 재료 또는 자재, 플랜트, 수급인의 장비 등 동 업무수행을 위하여 필요한 모든 것을 제공하여야 한다.

(3) 수급인은 공사감독자의 업무수행에 특별한 사유가 없는 한 적극적인 자세로 협조 하여야 한다.

1.4.2 설계도서 검토

(1) 수급인은 공사착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치하여야 한다. 공사가 진행 중이라도 같다.

(2) 수급인은 공사 착공 전 또는 진행 중에 설계도서를 검토한 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공종 착수 전까지 검토의견서를 첨부하여 발주청에 통지하고 발주청의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

① 『본 절 1.6.1 설계변경 사유』에 명시한 사유가 있는 경우

② 『1-2-2 공사협의 및 조정』에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

③ 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

④ 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

⑤ 수급인이 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

⑥ 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

⑦ 기타 공사시행과 관련하여 수급인의 판단으로 발주청의 해석, 지시 또는 발주청과 협의할 사항이 있을 경우

(3) 앞의 (2)항과 관련하여 발주청이 해석 또는 지시 등을 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 발주청의 재량으로 기성량으로 인정하지 않을 수 있다. 또, 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 발주청의 원상복구나 시정지시가 있을 때에는 수급인은 자신의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

1.4.3 책임한계

(1) 수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 수급인과 납품 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련된 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물을 발주청에 서면으로 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 수급인 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 교체, 원상복구, 배상 등 일체의 책임을 진다. 수급인은 공사 중 또는 공사 중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

(3) 수급인은 본 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료하여야 한다.

(4) 수급인은 공기가 연장되는 경우에도 공사구간을 관리할 책임이 있으며, 적절한 배수처리 등 공사구간에서의 피해를 방지하기 위한 필요한 예방조치를 취하여야 한다.

(5) 수급인이 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력을 발생한다.

1.4.4 현장대리인 등의 현장상주

(1) 수급인이 지정.배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 품질관리자, 시험사는 현장에 상주하여야 한다.

(2) 공사의 전부, 또는 일부의 착공지연기간 동안의 현장요원, 안전 관리자, 품질관리,시험사 등의 상주여부 및 인원수 등에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

1.5 공사기간 연기

1.5.1 연기요청

수급인이『공사계약일반조건제26조제1항』에 따라 계약기간(공사기간) 연장을 발주청에 요청할 수 있는 일수는 수급인이 제출한 공사예정공정표 상의 주공정이 해당 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없다. 다만, 완성물의 사용일정계획을 감안하여 발주청과 협의하여 승인을 득하였을 경우에는 그러하지 아니하다.

1.5.2 제출

공사기간의 연기 요청 시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 공사감독자와 협의하여야 한다.

1.6 설계변경

1.6.1 설계변경 사유

(1) 설계변경에 관련한 사항은『공사계약일반조건』의 관련규정에 의한다.

(2) 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피한 경우에는 발주청의 승인을 득하여 설계변경을 할 수 있다.

① 본 절『1.13 법령 및 규정의 준수』의 규정에 따라 설계도서의 변경이 수반되는 경우.

② 본 절『1-2-2 공사협의 및 조정의 1.2.2 협의 및 조정에 따른 설계변경』에 규정 되어 있는 사항.

③ 설계도서와 당해 공사의 관급자재 구입계약서 및 시방서가 합치되지 않는 사항.

④ 기타 본 전문시방서의 각 절에 설계변경에 대하여 명시되어 있는 사항.

(3)『공사계약일반조건 제19조의 5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)』에 의거 발주청이 수급인에게 설계변경을 지시할 경우에는 수급인은 이에 따라야 하며 이를 이유로 계약에 대한 어떤 이의도 제기할 수 없다. 다만, 동 설계변경에 의하여 계약금액의 조정이 필요할 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 의하여 계약금액을 조정한다.

1.6.2 변경요청서류

설계변경 요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은『공사계약일반조건』및 『1-2-3 제출서류 및 공정관리의 1.3.11 기타제출 및 보고서류』에 따른다.

1.7 계약금액의 조정

『공사계약일반조건』의 관련규정을 따르되 본 시방서에 특별한 언급이 있을 경우에는 이에 따른다.

1.8 하도급

1.8.1 하도급에 관한 내용은 공사계약일반조건제42조 및 제43조를 따른다.

1.8.2 수급인은 하도급의 통보는 건설산업기본법 등 관련법령에서 정한 바에 의하여 발주청에 통보하여야 하며 하도급 통보를 하였다 하더라도 수급인은 하도급인 및 그의 대리인, 종업원 또는 근로자의 모든 행위나 결과 등에 대하여 책임을 져야 하고, 하도급으로 인하여 발주청과 수급인 사이에 체결된 계약내용은 어떤 영향도 받지 아니한다.

1.8.3 수급인은 다음의 경우에 다른 계약문서에 특별한 언급이 없는 한 발주청의 승인을 받지 아니한다.

(1) 노무제공에 관한 사항

(2) 계약에 구체적으로 명시된 기준에 따라 구입되는 재료 또는 자재에 관한 사항

(3) 계약에서 하수급인이 지명되어 있는 공사부분의 하도급계약, 단 이 경우에는 하도급 계약 후 발주청에 통보하여야 한다.

1.9 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차

1.9.1 청구 또는 요구의 통지

수급인이 본 공사의 수행과 관련하여 그 자신의 귀책이 아닌 사유로 손실이 발생 하여 본 공사 계약의 관련항목을 근거로 계약금액의 증액을 가져오는 어떠한 청구나 요구를 하고자 하는 경우에는 계약의 다른 규정에도 불구하고 그 청구 또는 요구의 원인이 되는 사안이 처음으로 발생한 후 30일 이내에 공사감독자와 발주청에 그 같은 의사를 통지하여야 한다.

1.9.2 기록 및 입증서류의 보관

(1) 앞의 1.9.1항에서 언급된 사안이 발생하면 수급인은 이후에 제기할지도 모르는 청구 또는 요구를 뒷받침하는데 필요한 당시의 기록 및 서류를 유지하여야 한다.

(2) 공사감독자와 발주청은 앞의 1.9.1항에 의한 통지를 받으면 발주청의 책임여부에 대한 판단 없이도 당시의 기록이나 서류 등을 조사.검토하고 객관적으로 입증할 수 있는 자료를 요구하거나 기록을 유지하도록 지시할 수 있다.

1.9.3 청구 또는 요구의 입증

(1) 앞 1.9.1항에 의한 통지를 하고 30일 이내에 수급인은 공사감독자와 발주청에 상세한 청구 또는 요구액의 산출내역서와 청구의 근거를 송부해야 한다.

(2) 청구 또는 요구를 제기하게 한 사안이 계속하여 지속될 때에는 앞의 (1)항에 의한 계산서는 중간산출내역서로 간주하며 수급인은 발주청이나 공사감독자가 요구하는 간격 또는 시기에 추가적인 중간산출내역서(이전의 금액을 포함)와 그 추가근거를 송부하여야 한다.

1.9.4 불이행

수급인이 제기하려고 하는 청구 또는 요구에 대해서 본 시방서의『1.9 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차』에서 정한 규정에 따르지 아니한 경우, 발주청은 수급인이 청구 또는 요구한 권리의 상당부분을 포기한 것으로 간주하고 발주청이 당시의 기록을 근거로 명확하게 입증된 부분에 한하여 청구 또는 요구에 대한 적절한 금액을 결정하였을 때 수급인은 이에 따라야 한다.

1.9.5 청구 또는 요구에 의한 계약금액 조정

발주청은 수급인이 제기한 청구 또는 요구의 내용이 정당하다고 판단하여 계약 금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 수급인이 제출한 산출내역서와 입증 서류를 검토하여 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정한다.

1.10 공사중지

1.10.1 수급인은 관련법령에 따라 공사감독자의 지시가 있을 경우 공사감독자가 필요 하다고 판단하는 기간과 방법에 따라 공사의 진행을 중지하여야 하며, 중지기간 중에는 공사감독자의 지시에 따라 수행된 공사의 부분 또는 전체를 적절한 방법으로 보호하여야 한다.

1.10.2 공사감독자의 공사중지 명령이 건설기술진흥법 관련 규정에 근거하였을 경우에는 동 규정에 따라야 한다. 그 외의 경우로 공사중지를 지시할 경우에는 공사감독자는 공사중지 지시 이전에 발주청의 승인을 받아야 한다.

1.11 손실 또는 손상 복구의 책임

1.11.1 수급인의 복구책임

(1) 공사 시공 중에 1.11.3에 의한 규정된 발주청의 위험 이외의 원인으로 인하여 공사의 전체 또는 부분, 재료, 플랜트 등에 손실 또는 손상이 발생되는 경우에는 수급인은 그 원인을 불문하고 발생된 손실 또는 손상을 자신의 부담으로 복구하여야 한다. 복구는 계약의 관련 규정에 적합하고 발주청 또는 공사감독자의 요구수준에 부합 되게 이루어져야 한다.

(2) 공사 시공 중 또는 하자 담보책임 기간 중 수급인에 의한 손실 또는 손상의 복구 공사 시행과 관련, 그로 인하여 발생하는 모든 손실 또는 손상에 대한 책임은 수급인에게 있다.

1.11.2 발주청이 부담하는 위험은 다음과 같다.

(1) 공사계약 일반조건의 관련 규정에 따른다. 다만, 불가항력의 경우 수급인이 불가 항력의 사유에 대하여 그 위험을 면하거나 최소로 하기 위하여 경험 있는 기술자 로서 합리적이고 적절한 대책을 세운 경우에 한한다.

(2) 수급인이 제공하였거나 수급인에게 책임이 있는 설계의 일부가 아닌 공사설계에 기인하는 손실 또는 손상.

1.12. 인명 및 재산에 대한 손상

1.12.1 수급인은 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 공사의 시행 및 하자보수와 관련 하여 발생되는 다음의 모든 손실과 청구에 대하여 변상의 책임을 진다.

(1) 인명의 사망 또는 상해

(2) 공사목적물 이외의 재산 (이하『1.12 인명 및 재산에 대한 손상』에서『재산』이라 함)에 대한 손실이나 손상

1.12.2 앞의 1.12.1항에 의한 수급인의 변상은 다음의 1.12.3항에 의한 예외사항을 제외 하고는 모든 청구, 소송, 손해배상, 비용, 부과금 기타 모든 경비를 포함한다.

1.12.3 앞의 1.12.2항에서 언급한 예외사항은 다음과 같다.

(1) 공사목적물의 전부 또는 일부에 의한 토지의 영구적 사용 또는 점용과 관련하여 발생하는 재산상의 손실이나 손상

(2) 계약내용에 의한 공사의 시공 또는 하자보수 시행의 불가피한 결과로서 발생되는 재산상의 손실 또는 피해

(3) 발주청이나 그의 대리인 또는 피고용자, 수급인에 의하여 고용되지 않은 타 시공자의 행위나 과실로 인하여 발생한 인명, 재산상의 손실이나 피해 또는 이와 관련하여 발생하는 (2)항의 모든 경비

1.12.4 앞의 1.12.3의 (3)항과 관련, 수급인이나 그의 대리인 또는 피고용자가 피해나 손상 등에 책임이 있는 경우에는 수급인은 그에 상당하는 변상을 하여야 한다.

1.12.5 근로자의 사고 또는 상해

발주청이나 그의 대리인 또는 피고용자의 행위나 태만에 기인하는 경우를 제외하고는 발주청은 수급인 또는 하수급인이 고용한 근로자나 다른 사람에게 지불하는 손해 또는 보상 등의 일체의 책임을 지지 않는다.

1.13 법령 및 규정의 준수

1.13.1 수급인은 모든 점에서 다음의 규정을 준수하여야 하며 이는 통지의 발급과 수수료 지불 등을 포함한다.

(1) 대한민국의 법령 또는 공사의 실시와 준공, 하자보수 등과 관련하여 적법하게 구성된 기관의 규칙이나 조례, 훈령(해양수산부와 지방해양항만청, 지방어업관리단을 포함한다.)

(2) 공사의 시행과 관련하여 어떤 식으로든 재산이나 권리가 영향을 받게 되는 공공기관 또는 회사의 규칙이나 규정.

1.13.2 수급인은 앞의 1.13.1항의 규정 등의 위반으로 인한 모든 종류의 책임과 벌칙에 대하여 발주청에게 책임이 없도록 해야 한다.

1.13.3 수급인은 본 시방서에서『관련법규(조례를 포함한다. 이하 본 전문시방서에서는 같다.)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다.』라고 명시 또는 그와 유사한 취지의 별도 명시가 있지 않는 한, 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수 하되 발주청에서 특별히 요구하는 경우에는 이에 따라야 한다.

1.14 교통 및 인접재산의 간섭

1.14.1 공사시행과 관련한 모든 작업은 계약의 조건을 이행하는 한 다음의 사항이 불필요 하게 또는 부적절하게 간섭되지 않도록 시행되어야 한다.

(1) 공공의 편의시설

(2) 발주청 또는 기타 누구의 소유에 관계없이 재산 또는 공공도로, 사설도로, 보도 등 으로의 진출과 점용 및 사용

1.14.2 수급인은 수급인 자신에게 책임이 있는 앞의 1.16.1항과 관련하여 발생하는 모든 청구, 소송, 비용, 부과금 및 경비에 대하여 일체의 책임을 져야한다.

1.14.3 수급인은 공사시행과 관련하여 사용하는 도로, 교량 등이 손상 또는 파손되지 않도록 적절한 예방수단을 강구하여야 하며 공사용 자재 또는 장비 등의 운송으로 인하여 도로, 교량 등이 파손 또는 손상됨으로서 발생하는 변상 등 모든 법적인 책임을 짐으로서 발주청에 손해가 없도록 하여야 한다.

1.15 자재, 설비 및 시공기술

1.15.1 자재, 설비 및 시공기술의 품질

(1) 모든 자재, 설비, 시공기술은 다음 사항을 충족시켜야 한다.

① 계약에 기재되거나 규정된 종류의 것으로서 공사감독자 또는 발주청의 지시에 일치 하여야 한다.

② 제조, 제작, 조립 또는 준비 장소나, 공사현장, 계약에 명시된 장소, 기타 지정된 다른 장소에서 수시로 공사감독자 또는 발주청이 지시하는 시험을 받아야 한다.

(2) 수급인은 자재나 설비의 시험 및 검사, 검측에 통상적으로 필요한 지원, 노무, 전기, 연료, 창고, 선박, 기구 및 기기를 제공하여야 하며, 공사감독자나 발주청이 요구하는 시험 등을 위하여 필요하다고 지시하는 경우 공사에 사용하기 전에 자재의 견본을 시험용으로 공급하여야 한다.

1.15.2 견본의 비용

모든 견본은 계약에 명백하게 명문화되어 있거나 규정되어 있는 경우에는 수급인의 비용부담으로 공급되어야 한다.

1.15.3 시험비용

다음과 같은 시험을 실시하는데 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

(1) 계약에 의하여 명백하게 명문화되거나 규정되어 있는 경우

(2) 재하시험이나 완공 또는 부분적으로 완공된 공사에 대하여 당초 설계가 의도한 목적에 부합되는지를 확인하기 위한 시험인 경우 수급인이 제출한 입찰서 등에 그와 같은 비용이 계상되었거나 설계서 등 계약문서에서 수급인이 그 같은 비용을 계상할 수 있을 정도의 내용으로 명시되어 있는 경우

1.16 공사의 착공과 지연

1.19.1 공사의 착공

수급인은 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공 시에는 본 시방서의『1-2-3 제출서류 및 공정관리』에서 규정하는 서류 등을 제출하여야 한다.

1.16.2 공사현장의 점유 및 출입

(1) 발주청은 계약에 규정되어 있는 경우에는 계약내용에 따라 공사수행에 지장이 없도록 적어도 수급인이 수시로 출입 및 점유할 필요가 있는 넓이의 공사현장을 제공하여야 한다.

(2) 발주청은 계약에 명시되어 있지 않더라도, 수급인이 제출한 공사공정예정표에 따라 공사를 착수하고 시행하는데 필요한 만큼의 공사현장에 대한 점유와 이의 출입권을 제공하여야 한다.

1.16.3 공사현장 인도의 불이행

발주청의 과실로 앞의 1.19.2항에 의한 공사현장을 인도하지 못하므로 인하여 공기지연 또는 비용이 발생하게 될 경우에는 공기연장 또는 비용(이윤을 제외한다)을 수급인의 신청에 따라 지급할 수 있다. 다만, 공기연장의 경우에는『공사계약일반조건』의 관련규정에 따르며, 손실 비용의 경우에는 수급인은 본 시방서『1.9 추가지급에 대한 청구 또는 요구의 절차』를 따른다.

1.16.4 공사현장 출입

수급인은 공사현장 출입에 필요한 특별 또는 일시적 통행권 또는 통행로에 대한 모든 비용과 부과금을 부담하여야 한다. 또한, 수급인은 공사수행을 위하여 필요로 하는 추가시설(공사현장 밖의 시설 등)은 자신의 비용으로 준비하여야 한다.

1.16.5 공정지연

(1) 수급인에게 공사기간을 연장해줄 사유가 없다고 하더라도 공사감독자는 공사의 전체 또는 특정 공종의 공사 진행이 지연되고 있어 준공기한을 준수할 수 없다고 판단 할 때에는 이를 수급인과 발주청에 통지하여야 한다.

(2) 수급인은 앞의 (1)항의 통지를 받은 때에는 공사감독자의 승인을 받아 부진공정을 만회하기 위한 조치를 취해야 한다. 이러한 조치의 시행을 위하여 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

(3) 앞의 (2)항에 의한 공정만회 조치를 위하여 야간 및 휴일작업이 필요할 경우에는 『공사계약일반조건』의 관련규정에 따른다. 다만, 1.19.5항의 책임을 위하여 추가로 공사감독(감리 및 발주청 직원에 의한 공사감독)을 위하여 소요되는 비용이 있을 경우 발주청은 수급인과 협의하여 추가비용을 결정하고 이 비용은 수급인이 부담 하여야 한다.

1-1-2 공사량 측정

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 수급인이 시공한 공사량을 측정하는 일반적인 요건을 제시한다. 이 공사 시방서의 관련 절에서 구체적으로 공사량의 측정방법을 제시하는 경우와 다른 계약 문서에 관련 규정이 있는 경우는 그 내용에 따라야 한다.

1.2 측정방법

1.2.1 계약에 따라 완성된 모든 공사의 수량은 미터법에 따라 공사감독자가 측정한다.

1.2.2 육상면적을 산출하기 위하여 종단방향으로 길이를 측정할 때에는 본 전문시방서의 관련 절 또는 설계도서에 별도 규정이 없는 한 수평면에서의 길이로 측정하며 1㎡ 이상의 면적을 가지는 공종은 수량 산출에 반영한다.

1.2.3 육상면적을 산출하기 위하여 횡단방향으로 길이를 측정할 때에는 준공(기성)도면에 표시된 치수 또는 공사감독자가 서면으로 표시한 치수에 의해 검측 한다.

1.2.4 중량으로 측정할 때에는 공사감독자가 인정하는 계중기 또는 기타 방법을 사용하여 정확히 실시하여야 한다. 만일 자재를 차량으로 운반할 경우 자재의 순중량을 확인할 수 있는 방법이 제시되면 차량에 적재된 상태로 계중할 수 있다.

1.2.5 체적으로 측정하여 지불하는 경우에는 소정규격의 차량에 적재된 상태로 그 체적을 측정할 수 있다.

1-1-3 재해예방

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 수급인이 공사수행 중 공사현장의 시설물과 동원된 육.해상 장비 및 인력이 폭풍, 태풍, 해일 및 지진 등으로 인한 재해를 예방 또는 저감하기위한 일반적인 사항을 정한다. 이항에 규정하지 않은 내용은 관련 절에서 규정한 사항에 따른다.

1.2 적용법규

재난 및 안전관리기본법 및 동법 시행령, 시행규칙

1.3 재해예방

1.3.1 재해위험시 응급대책

(1) 총괄책임자는 재해예방계획에 의하여 재해발생우려나 재해 발생 시에는 재해예방 또는 재해경감을 위하여 다음사항을 실시하여야 한다.

① 경보발령 또는 전달, 피난의 권고 또는 지시

② 수방, 지진방재, 진화, 기타의 응급조치와 구조 활동

③ 피해시설의 응급복구

④ 긴급수송 및 구조수단의 확보

(2) 총괄책임자는 앞의(1)항에 의한 재해응급대책을 위하여 필요한 경우에는 다른 재해 예방조직이나 관계기관에 협조요청을 할 수 있으며 요청받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며 본 현장 총괄책임자도 협조요청을 받는 경우에는 동일 하다.

1.3.2 재해위험시설의 보강 및 철거 지시

(1) 수급인은 평상시 현장점검을 실시하여 재해위험성이 있는 시설물의 보강 또는 안전 조치 및 철거하여 재해요인을 사전에 제거하여야 한다.

(2) 공사감독자는 앞(1)항의 규정에 의한 수급인의 활동이 미흡할 경우에는 재해위험성 있는 시설물의 안전조치 및 보강 또는 철거를 지시할 수 있으며 수급인은 공사 감독자의 지시에 따라야 하며 그 비용은 수급인이 부담한다.

1.3.3 발견자의 신고

수급인은 자연재해대책법 시행령 제37조의 규정에 의거 재난(재해)의 발생이나 재난 (재해)이 발생할 징후를 발견한 때에는 즉시 공사감독자 및 그 지역관할 기관장에게 보고하고 재해에 관한 예보경보, 통지 및 응급조치를 하여야 한다.

1.3.4 위험지구 출입통제

총괄책임자는 현장 내 재해위험이 있는 지역은 공사감독자와 협의하여 경계 구역을 설정하고 일반인의 출입통제 및 기타행위 금지와 퇴거, 대피명령을 할 수 있으며 필요한 사항을 표시한 표지판을 통행인이 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.

1-1-4 공사준공

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 시방서는 공사 준공 절차, 최종청소, 조정, 공사기록문서, 운전 및 유지관리자료 그리고 개별 제품시방에서 직접 참조할 수 있는 제품보증 등에 관한 일반적인 요건을 제시한다.

1.2 준공 절차

1.2.1 수급인은 다음의 제출 자료를 발주자 또는 공사감독자에게 제출해야 한다.

(1) 보관용 도면 : 최초 도면으로부터 변경된 작업범위를 표시한 도면과 최종 시공 제작 도면(CD-ROM 포함)

(2) 보관용 시방서 등 : 공사 기간 중 각종양식으로 발행한 추가보고서, 설계와 공사변경명령 및 이와 유사한 변경사항이 포함된 자료

(3) 시공상세도

(4) 준공사진이 포함된 공사사진첩 및 CD

(5) 최종현황 측량보고서 : 측량 원부 및 원도면이어야 한다.(실시할 경우)

(6) 기타 공사감독자 또는 발주자가 요구하는 최종기록 자료

1.2.2 조정된 계약금액, 기 수령액 및 수령 잔액을 명기한 최종 기성부분 신청서를 제출 해야 한다.

1.2.3 발주자는 준공완료 전이라도 시설물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

1-2 공사준비 및 시공관리

1-2-1 공사준비 일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공정추진계획에 맞추어 공종별로 공사를 수행하기 전에 수급인이 수행하여야 하는 일반적인 내용을 규정한다.

1.2 설계도서의 검토

수급인은 본 시방서『1-1-1 일반사항』의 1.4.1항과 1.4.2항에서 규정한 내용에 따라 설계도서를 검토하고 문제점이 있을 경우 발주청에 보고하여야 한다.

1.3 현장사무실의 설치

1.3.1 공사의 원활한 추진을 위하여 수급인은 계약에 따라 공사현장 사무실을 설치하여야 한다.

1.3.2 공사현장 사무실의 설치에 관한 사항은『1-7-1 가설 공급시설물』및『1-7-2 임시 가설시설물』의 규정에 따른다.

1.4 공사표지판 등의 설치

수급인은 본 시방서『1-7-2 임시 가설시설물』의『1.6 공사표지판』항목에서 규정한 바에 의거 공사감독자의 지시에 따라 공사표지판 등 필요한 입간판을 설치하여야 한다.

1.5 현지여건 조사

1.5.1 수급인은 공사감독자와 공동으로 공사 착공 후 빠른 시간 내에 공사 추진에 지장이 없도록 다음 각 호의 사항을 현지 조사하여 시공 자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 따라 처리하여야 한다.

(1) 각종 재료원 확인

(2) 지반 및 지질상태

(3) 진입도로 현황

(4) 인접도로의 교통규제 상황

(5) 지하매설물 및 장애물

(6) 기후 및 기상상태

(7) 기타 항만공사용 기준면 등 공사에 필요한 각종 여건

1.5.2 수급인과 공사감독자는 현지여건을 조사한 내용과 설계서의 공법 등을 검토하여 인근 주민에 대한 피해발생 가능성이 있거나 공사수행과 관련하여 문제점이 예상 되는 경우에는 다음 각 호의 상황에 대한 대책을 강구하여야 하며, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

(1) 인근 가옥 및 가축 등에 대한 대책

(2) 지하매설물, 인근의 도로, 교통시설물 등의 손괴에 대한 예방대책

(3) 선박 및 차량, 주민 등의 통행지장에 대한 대책

(4) 소음.진동대책

(5) 낙진.먼지대책

(6) 지반침하대책

(7) 하수로 인한 인근 주민, 농작물 피해 대책

(8) 오탁 및 오수발생으로 인한 어장피해 대책

1-2-2 공사협의 및 조정

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 본 공사와 연관된 타 공사와의 상호간의 협조 및 조정 등에 관하여 적용한다.

1.2 공사 상호간의 마찰방지

1.2.1 협의 및 조정

(1) 수급인은 당해공사와 연관된 다른 건설업자들이 있을 경우 상호간의 마찰을 방지 하고 전체공사가 계획대로 완성될 수 있도록 모든 공사 관련자들과 면밀히 상호 협조하여 공사 착수시기, 시공순서, 공사 진행속도, 공사 준비, 구조물 보호 등 필요한 최선의 조치를 파악.도출, 공사전체의 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 앞의 (1)항에서 규정한 업무를 소홀히 하여 재시공 또는 수정.보완 등 공사추진 에 문제점이 발생되었을 경우에는 수급인이 책임을 져야한다.

1.2.2 협의 및 조정에 따른 설계변경

(1) 수급인은 당해공사와 연관된 다른 공사와의 상호간 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과, 아래와 같은 경우에는 발주청에 설계변경을 요청할 수 있다.

① 지하구조물공사의 우선순위 상 불가피한 선후시공에 따라 기초저면의 안전성 저하를 방지하기 위하여 설계변경이 불가피한 경우

② 기타 협의 및 조정결과가 수급인의 업무소홀이라고 볼 수 없는 경우로서 공사감독자가 수급인이 제시한 관련서류의 검토결과 설계변경이 필요하다고 판단하는 경우

1-2-3 제출서류 및 공정관리

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 시방서는 자료의 제출과 승인을 얻기 위하여 수급인이 발주자 또는 공사감독자 에게 제출할 서류의 작성과 발송에 대한 일반 요건과 절차, 수급인이 제출해야 하는 제출물 및 작성, 보관하여야 하는 서류 및 공정관리 등에 대한 일반적인 내용을 제시 한다. 이 항에서 규정하지 않은 내용은 관련 절에서 규정한 서류 및 제출물에 대한 내용에 따른다.

1.2 적용 규준

1.2.1 건설기술진흥법, 시행령 및 시행규칙

1.2.2 건설산업기본법, 시행령 및 시행규칙

1.2.3 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2015-473호)

1.3 제출서류

1.3.1 착공보고

(1) 수급인은 착공 시에는 공사계약일반조건의 관련규정에 따라 착공신고서를 발주청에 제출하여야 한다.

(2) 발주청이 필요하다고 판단하여 착공보고회를 개최토록 지시할 때에는 수급인은 이에 따라 지시 후 7일 이내에 공사감독자와 함께 착공보고회를 개최하여 관련내용을 발주청에 보고하여야 한다.

(3) 착공신고서는 공사계약일반조건에서 제시한 내용 외에 다음의 사항을 추가하여야 한다.

① 공사도급계약서 사본 및 산출내역서

② 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

③ 하도급 시행계획

④ 민원방지 및 민원발생시 조치계획

⑤ 본 공사추진을 위한 수급인의 본사에서의 지원계획

⑥ 기타 현장관리에 필요한 사항

1.3.2 공사예정공정표

(1) 공사예정공정표는 PERT/CPM 방식으로 작성되어야 한다. 다만, 발주청 또는 공사감독자가 공사의 특성상 필요 없다고 판단할 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

① 공종별 및 공종 내 주요공정 착수시점, 완료시점과 휴지기간 후 재착수시점

② 공종별 및 공종 내 주요공정단계별 선·후행 등의 연관관계

③ 주공정 공사의 목록, 소요공기

1.3.3 시공계획서

(1) 제출 및 승인

수급인은 다음 항에 명시한 공사에 대한 시공계획서를 작성 제출하여 발주청과 공사

감독자의 확인을 받은 후 공사를 착수하여야 한다.

(2) 포함내용

시공계획서에는 아래사항이 포함되어야 한다.

① 공사개요

② 시공관리체제

③ 세부공정표(자재, 인력 및 장비동원계획을 포함한다.)

④ 사용재료 및 품질기준

⑤ 주요공종의 시공절차 및 시공법

⑥ 품질관리계획 : 품질관리조직, 관리목표 및 실시방법, 목표 미달 시 조치방안

⑦ 안전관리계획 및 환경관리계획

⑧ 타 공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

⑨ 적합한 시공을 위하여 설계서의 조정 및 변경이 필요한 사항

⑩ 기타 전문시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

1.3.4 시공상세도

(1) 제출 및 승인

① 수급인은 계약문서에서 규정한 시공상세도를 작성하여 공사감독자의 승인을 받은 후 관련 공종 공사를 착수하여야 한다.

② 수급인이 작성하여야 할 시공상세도의 목록이 계약문서에 규정되어 있지 아니할 지라도 공사감독자가 안전관리 및 부실공사 방지 등 공사목적 달성을 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 계약문서의 관련내용상 당연히 필요하다고 판단하여 시공 상세도의 작성을 지시할 경우, 수급인은 이에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인의 부담으로 한다.

③ 공사감독자 및 발주청은 사실상 설계용역의 과업에 해당되는 내용을 작성토록 수급인 에게 지시하는 등 관련 규정을 악용하여서는 안 된다. 수급인이 요청하고 공사 감독자가 판단하기에 관련 내용이 설계용역의 과업에 해당된다고 판단하는 경우에는 발주청의 승인을 얻어 실비를 지급할 수 있다.

④ 공사감독자의 승인을 받은 시공상세도는『1-1-4 공사준공』에 따라 발주청에 제출 하여야 한다.

(2) 작성방법

① 시공상세도는 설계서의 요구사항이 종합되도록 작성되어야 하며, 부위별 재료명과 시공 또는 설치 및 마감상태가 명확히 표기되어야 하고, 정확한 치수가 명시되어야 한다. 또한, 설계서대로 시공하기 위해 조정하여야 할 조건이 있을 경우는 이를 명시 하여야 한다.

② 시공상세도는 스케치 형태로 작성할 수 있다. 다만, 시공상세도 작성의 목적을 충분히 달성할 수 있도록 하여야 하며 공사감독자와 협의하여야 한다.

③ 시공상세도는 관련분야 전문기술자의 책임 하에 작성하여야 하며 구조계산서가 필요한 경우에는 구조 계산서를 포함하여야 한다.

(3) 수급인의 책임

시공상세도는 공사감독자의 승인을 받은 경우라도 공사의 시공과 안전에 대한 책임은 수급인에 있다.

1.3.5 공사사진

(1) 비치 및 제출

공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진으로 기록, 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공 시『1-1-4 공사 준공』에 따라 발주청에 제출 하여야 한다.

(2) 촬영방법

공사 시공 중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 하고 필요하면 치수확인을 위한 조치를 취하여야 한다.

(3) 대상부위

사진촬영 대상부위는 이 시방서 해당조항의 시방에 따르되 관련규정이 없는 경우에는 시공 상태를 객관적으로 알 수 있는 부위를 촬영하여야 한다.

1.3.6 기타 제출 및 보고서류

(1) 공사 일지

(2) 현황 보고

(3) 품질시험.검사 및 자재관리 서류

(4) 관급자재 관련서류

(5) 하도급 관련서류

(6) 기성검사원 및 준공검사원

① 기성검사원 제출 서류

② 준공계 제출 서류

(7) 설계변경 여건보고 사항

(8) 안전관리 서류

1.4 제출절차 등

1.4.1 협의 및 확인

(1) 수급인은 각 제출물에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 공사감독자와 협의·조정한다.

(2) 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인 하여 공사감독자에 제출하여야 한다.

1.4.2 규격 등

(1) 서류의 규격은 계약서에서 지정한 양식을 제외하고는 수급인이 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4크기로 정리하여 제출하여야 한다.

(2) 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류도 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

1.5. 공정관리

1.5.1 자재, 장비, 인력동원

(1) 수급인은 공종공사 착수 전에 시공계획서에 의한 자재를 현장에 반입하여 공사감독자의 검사를 득해야 한다.

(2) 수급인은 예정공정에 부합되는 장비를 투입하여야 하며 현장 투입 전에 점검 및 정비를 하여 고장에 의한 공정차질이 없도록 하며 또한 고장 시 응급조치할 수 있는 부품과 정비인력을 확보 또는 동원 할 수 있는 체제를 갖추어야 한다.

1.5.2 수급인은 1-2-3(제출서류 및 공정관리)의 규정에 의한 공정관련 서류를 적기에 제출하여 공사감독자가 신속히 공정진도 및 공정의 이상흐름을 파악할 수 있도록 하여야 한다.

1-3 자재관리

1-3-1 자재관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공사에 사용되는 공사용 자재의 관리에 대하여 필요한 일반적인 사항을 정한다. 이 절에서 사용되는『자재』라는 용어는 특별한 언급이 없는 한 관급자재를 제외한 공사용 자재를 말한다.

1.2 적용기준

1.2.1 사용자재

공사에 사용하는 자재 중에서 이 시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물 자재를 제외한다)을 사용하여 야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목 또는 구체적 으로 언급되어 있지 않은 경우에는 아래의 기준에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각 호의 1에 적합한 자재(이하 본 시방서에서『한국산업표준에 적합한 제품 등』이라 한다.)를 우선 사용한다.

①『산업표준화법』에 의한 한국산업표준 표시품(이하 본 시방서에서『KS표시품』이라 한다.)

② 건설기술진흥법에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 산업표준화법에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

③ 산업표준화법에 의한 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 관련 국가기관 또는 공인기관에서 인정한 것

(2) 앞의 ① 및 ② 항목에 적합한 자재가 없을 경우에는 품질 및 성능이 우수한 시중 제품으로 하되 이를 입증할 수 있는 관련 자료를 검토하여 결정하여야 한다.

1.2.2 사용제한

품질시험.검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주청 또는 공사감독자는 사용제한을 지시할 수 있으며 수급인은 이를 따라야 한다.

1.2.3 수급인의 책임

수급인이 자재를 사용함에 있어 품질시험.검사 등 본 전문시방서에서 정하는 방법에 따라 적절한 절차를 거쳤다하더라도 사용자재의 불량에 의한 하자가 발생하였을 경우에는 수급인이 책임을 져야 한다.

1.3 반입

1.3.1 반입시기

(1) 공사에 사용되는 자재는 공사추진에 지장이 없도록 반입하여야 하며 설계도서 또는 본 시방서와 기타 관련법규에 의하여 품질시험·검사 등이 필요할 경우에는 그 소요 시간을 감안하여 현장에 반입하여야 한다.

(2) 수급인은 적절한 시기에 자재를 반입하지 아니하므로 인하여 공사추진에 문제 발생이 예상된다는 이유로 공사감독자가 자재품질관리와 관련하여 설계도서 또는 본 시방서, 기타 관련 법규에 의하여 행하는 시험, 검사 등을 적절히 행할 수 없도록 하는 어떠한 행위 등을 하여서는 안 된다.

1.3.2 자재에 대한 품질보증

(1) 수급인은 다음 자재의 반입 시에는 차량별로 시험결과 등이 기재된 납품서를 납품자로부터 받아 공사감독자가 확인할 수 있도록 하여야 한다. 수급인은 공사용 자재에 대하여 품질관리를 위하여 필요하다고 판단할 경우에는 품질시험전문기관이 작성한 시험성적서 등 품질보증에 관한 자료나 공사감독자의 참여하에 품질시험 또는 검사 등에 의한 품질의 확인을 자재의 생산자 또는 수입.판매하는 자에게 요구하여야 한다.

(2) 자재의 품질확보와 관련하여 발주청에 대한 책임은 수급인에게 있다.

1.4 관급자재관리

1.4.1 검사 및 확인

수급인은 반입된 관급자재(관급자재가 설치도인 경우에는 설치 완료된 상태)의 다음 사항에 대하여 검사 및 확인을 시행하고, 그 결과 문제점이나 이의가 있을 때에는 그 내용을 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(1) 납품서

(2) 품질, 규격, 성능 및 수량 등

(3) 납품기일

1.4.2 관급자재의 품질 등

발주청이 공급하는 관급자재와 관급에서 사급으로 변경된 자재 및 사급에서 관급으로 변경된 자재의 품질, 규격 및 납품방법 등은 당해 자재의 『관급자재구입시방서』에 따른다.

1.5 자재(관급자재 포함)의 보관, 운반, 취급

1.5.1 자재의 보관 부지, 창고

(1) 수급인은 자재의 보관을 위한 부지 또는 창고를 준비하여야 하며, 그 위치를 공사 감독자에게 통지하여야 한다.

(2) 보관 장소가 사유재산일 경우에는 소유자 또는 임대인의 서면 승인 없이 보관 장소로 사용할 수 없으며 공사감독자가 요구하면 서면 동의서를 제출하여야 한다.

1.5.2 품질변화 방지

(1) 반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장되도록 보관하여야 하며, 수급인은 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 한다.

(2) 보관된 자재는 보관 전에 승인을 받았더라도 공사 투입 전에 다시 검사할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

1-4 품질관리 및 시공점검, 검측

1-4-1 품질관리계획

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 건설공사의 품질을 확보하고 부실공사를 방지하기 위한 품질관리계획의 일반적인 요건을 정한다. 본 시방서의 관련 항목에 품질관리에 관한 규정이 있을 경우 에는 그에 따른다.

1.2 품질관리계획

1.2.1 계획 수립 및 제출

(1) 건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙의 관련 규정에 따라 품질보증 또는 품질시험 계획서를 작성 제출하여야 한다.

(2) 발주청 및 공사감독자는 수급인이 제출한 앞 (1)항의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 수급인에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

1.2.2 계획수립 대상공사의 범위

건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙의 관련규정에 따른다.

1.3 품질보증계획의 수립

건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙의 관련 규정을 따른다.

1.4 품질시험계획의 수립

건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙의 관련 규정을 따른다.

1.5 품질시험 및 검사

1.5.1 수급인은 공사용 자재 및 재료의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한 지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

1.5.2 품질시험 기준은 건진법의 관련 규정에 따른다.

1.5.3 품질시험 및 검사를 실시할 때는 공사감독자의 입회하에 실시하여야 한다.

1.5.4 품질시험기준에 명시되지 아니한 자재 또는 재료라도 공사감독자가 공사의 목적상 필요하다고 판단하여 품질시험을 요구할 때는 이를 실시하여야 한다.

1-4-2 시공점검, 확인 및 검측 등

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 수급인이 공사를 수행함에 있어서 공사의 부실시공 방지와 품질관리를 위하여 공사단계별로 시공 상태를 점검하기 위한 사항과 이와 관련한 공사감독자의 시공확인 또는 검측에 대한 일반적인 사항을 정한다. 본 시방서의 관련 항목에서 시공 확인 및 검측 등에 대하여 구체적으로 제시한 경우에는 이를 따른다.

1.2 수급인의 의무

1.2.1 수급인은 공사의 품질확보를 위하여 성실히 노력하여야 하며 이를 위하여 공사 시행의 모든 단계에서 본 공사시방서의 각 절에 특별한 언급이 없더라도 시공점검을 자체적으로 시행하여야 한다(이하 본 절에서 이를『시공점검』이라 한다).

1.2.2 수급인은 본 시방서의 각 절에서 공사감독자의 시공확인 또는 검측을 받도록 규정 되어 있을 경우에는 시공확인 또는 검측의 요구 전에 수급인이 시공점검을 실시하여 설계도서에 따라 시행되었는지 그 여부를 확인하고 이상이 없을 때 공사 감독자에게 시공확인 또는 검측을 요구하여야 한다.

1.2.3 수급인은 시공점검 대상공종에 대해서는 공사감독자의 시공확인 또는 승인을 받은 후 후속공종에 착수하여야 한다.

1.3 자체시공점검

1.4.1 수급인은 자체 시공점검 후 시공 상태가 적정하고 설계도서와 일치할 때에만 공사 감독자 승인 하에 후속공종의 공사를 시행하여야 한다.

1.4.2 자체시공점검은 관계법규, 설계도서와 합리적인 기술적 판단, 발주청 및 공사감독자가 제시한 기준에 따라 행하여야 한다.

1.4 시공확인 및 검측

1.5.1 공사감독자는 수급인에 의한 시공확인 또는 검측의 신청이 있을 시 지체없이 실시하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.5.2 공사감독자가 공사시방서의 관련규정에 따라 시공확인 또는 검측을 실시할 때에는 수급인은 최대한 협조하여야 한다.

1.5 발주청의 현장 지도점검 및 시공평가 등

1.6.1 현장 지도점검

(1) 발주청은 사전에 부실시공을 방지하고 공사의 품질관리가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 발주청이 필요하다고 판단할 때에는 수시로 현장을 방문하여 지도점검을 실시할 수 있다.

(2) 발주청은 점검결과 지적사항이 있을 때에는 시정을 요구할 수 있으며 수급인은 이를 시정하고 그 내용을 상세히 작성하여 발주청에 보고하여야 한다. 수급인이 보고하는 시정조치의 내용에는 시정 전, 시정 후의 사진이 포함되어야 한다.

1.6.2 발주청의 시공평가

(1) 발주청은 당해 공사에 대하여 건설기술진흥법 관련규정에 의한 시공평가를 실시할 수 있으며 수급인은 시공평가 시 발주청의 지시에 따라야 하며 공사가 완료된 경우에도 공사내용, 현장조사, 분석 등에 적극 협조하여야 한다.

(2) 발주청은 시공평가 결과 부실공사로 평가되었을 경우에는 관련부분에 대하여 보완 또는 재시공을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

1-5 안전 및 보건관리

1-5-1 안전 및 보건관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공사를 수행함에 있어서 공사의 안전.보건 및 환경관리에 관한 일반적인 사항을 정하며, 본 절에서 명시하지 않은 내용은 관련법규와 본 시방서의 각 항의 내용에 따른다.

1.2 관련법규 및 규정

1.2.1 건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본 절에서『건진법』이라 한다.)

1.2.2 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본 절에서『산업안전보건법』이라 한다.)

1.2.3 건설공사 안전관리계획서 작성지침(국토교통부)

1.3 일반원칙

1.3.1 수급인의 일반적 책임

(1) 수급인은 관련법규에서 정하는 바에 따라 공사현장 내에서의 안전.보건관리를 위하여 성실하게 노력하여야 하며 그 의무를 소홀히 함으로서 발생되는 일체의 사항에 대한 모든 책임은 수급인에게 있다.

(2) 수급인은 공사현장내의 수급인 측 직원 및 작업인원(하도급업체 직원 및 작업인원을 포함한다. 이하 같다.) 등의 통제, 안전.보건 및 보안, 인사사고에 대하여 비록 관련 법규에 규정하지 않았다 하더라도 자체적으로 안전대책을 수립.시행하고 사고 발생 시에는 수급인의 책임으로 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

(3) 수급인은 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 공작물, 농작물 및 가축, 양식어류에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이와 관련 손해 등이 발생하였을 때에는 수급인의 부담으로 이를 원상복구하거나 보상하여야 한다.

(4) 수급인이 본 공사를 하도급 할 경우에는 시공방법, 공기 등에 관하여 안전하고 위생 적인 작업수행을 저해할 우려가 있는 조건을 붙여서 하도급 하여서는 안 된다.

1.4 안전관리계획의 수립

1.4.1 적용

수급인은 건진법의 관련규정 및 『건설공사 안전관리계획서 작성지침』(국토교통부)에 따라 본 공사가 안전관리계획수립 대상공사일 때는 안전관리계획을 수립하여야 하며 발주청은 대상공사가 아닐 경우라도 공사 시행 상 필요하다고 인정되는 공사에 대해서는 계획 수립을 지시할 수 있다.

1.4.2 안전관리계획 수립 대상

건진법의 관련 규정에 의하되, 필요한 공사에 한하여 발주청은 계획 수립을 지시할 수 있다.

1.4.3 제출시기

건진법의 관련 규정을 따른다.

1.4.4 안전관리계획의 내용

(1) 건진법 및 『건설공사 안전관리계획서 작성지침』(국토교통부)을 따른다.

(2) 발주청 또는 공사감독자는 수급인이 작성 제출한 안전관리계획을 보완하도록 지시할 수 있으며 특별한 이유가 없는 한 수급인은 이에 따라야 한다. 비록 발주청 또는 공사감독자가 보완조치를 지시하였을 경우라도 안전관리에 대한 최종 책임은 수급인에게 있다.

1.5 유해.위험방지계획서

본 공사가 산업안전보건법 관련 규정에 따라 유해.위험방지계획서를 작성하여야 하는 사업일 경우에는 산업안전보건법의 관련규정에 따라야 하며 안전관리계획서와 유해.위험방지계획서를 통합하여 작성할 수 있다.

1.6 안전관리조직

1.6.1 수급인은 공사 착수 전 건진법, 산업안전보건법 등 관련 법령에 따라 안전관리조직을 구성, 운영하여야 한다.

1.6.2 수급인은 공사 수방계획안을 편성하여 현장 사무실내에 비치.부착한다.

1.7 안전관리활동

1.7.1 안전.보건교육

시공자(안전보건관리 책임자)는 당해 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령이 정하는 바에 따라 안전.보건교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과는 교육일지에 작성, 보존하여야 하며 교육대상 및 교육시간은 산업안전보건법 제33조제1항(산업안전보건관련 교육과정별 교육시간)에 따른다.

1.7.2 안전 점검

(1) 건설공사의 안전점검은 건진법 시행령 제46조의 4항에 따라야 한다.

(2) 건설공사의 수급인은 자체안전점검 및 건설안전 전문기관의 정기점검과 정밀점검에 대한 계획을 수립 실시하여야 한다.

(3) 안전점검의 결과와 조치내용을 기록.유지하여야 하고, 기록서류는 준공 후 하자 담보 책임기간까지 보관하여야 한다.

1.7.3 산업안전보건관리비의 사용

(1) 발주청은 수급인과 공사계약을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사금액에 계상하여야 한다.

(2) 수급인은 공사계약을 체결할 때 계상된 금액 이상을 산업안전보건관리비로 사용 하여야 하며, 발주청은 수급인과 하도급인이 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 아니한 금액에 대하여 계약 금액에서 감액 조정하는 등의 방법으로 산업안전보건관리비의 목적 외 사용을 방지할 수 있다.

(3) 수급인은 공사의 일부를 하도급 시행할 때에는 계상된 산업안전보건관리비의 범위 안에서 하도급인에게 적정하게 산업안전보건관리비를 지급하여 사용하게 한다.

(4) 수급인은 산업안전보건관리비를 사용하고 그 내역서를 당해 공사 현장 내에 비치하여야 하며, 공사감독자는 수급인에게 산업안전보건관리비 사용 및 관리에 대하여 공사 도중 또는 종료 후 산업안전보건관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응하여야 한다.

1.8 현장안전관리

1.8.1 공통사항

(1) 현장의 안전관리는 근로기준법, 산업안전보건법 및 관련법규를 준수하여야 하며, 특히 다음 사항에 유의하여야 한다.

① 일반인 및 근로자의 출입통제와 질서 및 보건의 유지

② 화재, 도난, 소음 등의 방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

③ 재료와 설비의 정리 및 관리, 현장내외의 정리정돈 및 청소

④ 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

⑤ 공사장 주변의 안전조치는 관계법규에 따라 시설하고 근로자의 안전보호구, 재해 예방시설, 경보용 설비 및 유사시의 대책 등을 구비하여야 한다.

(2) 공사구역 및 부근해역에 대한 규제 등에 대해서는 관계기관(관할 지방해양항만청, 지방자치단체 등)과 협의하고, 해운, 항만관련기관 및 단체에 규제사항을 주지시켜야 한다. 작업구역은 간판, 울타리, 부표(부표, 등부표 등) 등을 사용하여 명확하게 표시 하여야 한다.

(3) 공사현장 근로자와는 고용계약을 적법하게 체결해야 하며, 계약의 내용에는 근로 조건을 명시하여야 한다.

(4) 공사현장 및 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다. 또 해저에 매설된 시설물(관로, 케이블 등)에 대해서도 손상되지 않도록 유의하여야 한다.

1.8.2 공사현장의 안전조치

(1) 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소 한도로 줄이는 조치를 하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 계획, 조치, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독자의 승인과 검사를 받아야 한다.

1.9 현장보건관리

1.9.1 산업보건기준 : 작업현장에서는 다음의 보건기준을 준수하여야 한다.

(1) 유해원인제거 : 가스, 유류, 화학물질, 증기, 유해광선, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 병원체에 의한 오염. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업 방법 및 시설의 변경 또는 개선조치를 하여야 한다.

(2) 채광 및 조명 : 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않는 방법으로 법정수준으로 설치하여야 한다.

(3) 온도 및 습도 : 고온, 저온, 건조, 다습한 옥내 작업 시는 냉난방, 통풍 등 적절한 온도, 습도조절조치를 하여야 한다.

(4) 출입금지조치 : 유해.위험한 장소에는 출입금지조치를 하고, 이를 제시하여야 한다.

(5) 휴게시설 : 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

(6) 응급용구 : 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 그 비치장소와 사용 방법을 근로자에게 알려주어야 한다.

(7) 세척시설 : 작업 중 근로자의 의복이 심하게 젖거나, 유해물질 등에 오염될 수 있는 작업장에는 탈의시설, 목욕시설, 세탁시설 및 작업복을 말릴 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

1.9.2 건강진단

근로자의 건강을 유지하기 위하여 보건기준에 따른 일반건강진단, 배치 전 건강진단 등을 실시하여야 한다.

1.9.3 작업환경측정

(1) 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후에 그 결과를 기록.보존하여야 한다.

(2) 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당 근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

(3) 발암성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 유발할 우려가 있는 작업장내의 그 노출농도를 허용기준이하로 유지하여야 한다.

1.9.4 질병자의 취업금지 및 제한

전염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1.9.5 근로시간 연장의 제한

(1) 휴일작업이나 야간작업은 공사계약일반조건 관련규정을 준수하여야 하며 사전에 해당자에게 통보하고, 동의를 받아야 하며 필요할 때 공사감독자가 입회할 수 있어야 한다.

(2) 시가지 공사 또는 사용 중인 기존 시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위당사자들과 협의 조정하여야 하며, 자체에 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업 등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전 작업 기준을 준수하여야 한다.

1.9.6 사고처리 및 응급처치

(1) 응급조치 : 사고발생에 따른 근로자에 대하여는 응급구조를 위해 다음의 조치를 신속하게 하여야 한다.

① 사고로 인한 부상에 대하여 응급조치에 필요한 구급용구를 비치하여야 한다.

② 사고발생시 적절한 긴급조치를 취해야 한다.

가. 부상자 및 질병자에 대한 응급조치

나. 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

(2) 유해 또는 위험한 작업(잠함 또는 잠수작업 등 높은 기압에서 하는 작업)에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하게 하여서는 안 된다.

1-6 환경관리

1-6-1 환경관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공사를 시행함에 있어서 수급인이 수행하여야 할 환경관리에 대한 일반적인 요건을 정한다. 이 절에서 규정하지 않은 사항은 본 시방서의 관련항이나 계약문서, 관련 법령, 조례, 훈령 등 적법한 절차에 의해 규정되어진 내용에 따라 시공 되어야 한다.

1.2 관련 법령

1.2.1 대기환경보전법령

1.2.2 해양환경관리법령

1.2.3 환경정책기본법령

1.2.4 폐기물관리법령

1.2.5 소음·진동규제법령

1.3 자연환경 관리

토목공사로 인하여 자연생태계가 인위적으로 훼손과 오염이 되지 않도록 보호 하여야 한다. 훼손된 자연생태계는 그 원래의 기능이 발휘되도록 최대한 복원되어야 하므로 자연환경 보전에 의한 공사감독자의 지시를 준수하여야 하며, 환경관련 법규의 자연환경 보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

1.4 생활 환경관리

1.4.1 공통사항

수급인은 당해 공사로부터 야기되는 환경오염에 대하여 스스로 이를 방지하여야 하며 생활환경 보전을 위한 공사감독자의 지시를 준수하고 환경관련 법규의 생활환경 보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

1.4.2 대기 오염 방지

(1) 공사용 차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 세륜 시설 등을 설치하여야 하며, 공사 중인 도로에는 살수 차량을 운행하여 먼지 등의 날림을 방지하여야 한다.

(2) 공사현장에서 악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법령에서 정하는 적합한 소각시설을 이용하여 이를 소각하여야 한다.

1.4.3 수질오염방지

(1) 공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니(汚泥)를 버리거나 자동차를 세차 하는 행위를 하여서는 안 된다.

(2) 강우 시 하천수질의 탁도 증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시배수로 설치, 침사지 설치 등 준비 작업을 철저히 시행하여야 한다.

1.4.4 소음·진동방지

(1) 수급인은 공사구간이 건설소음 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 관련 법령에 따라야 한다.

(2) 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하며, 작업장에서는 사용 장비의 작업시간 조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

1-7 가 시설물

1-7-1 가설 공급시설물

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 요건을 제시한다.

1.1.1 공사 중 사용될 임시공급 시설물과 이후의 철거

1.1.2 임시전기, 임시조명 등 공급시설물의 설치 운영에 관한 사항

1.2 공사용 가설 공급시설

1.2.1 계약문서에 의해 설치되는 공사용 가설 공급시설은 관련법 규정에 의거 인.허가 또는 신고하고 안전하게 설치되어야 하며 이의 태만으로 인한 모든 책임은 수급인 에게 있다.

1.2.2 각종 시설은 공사시행에 방해되지 않도록 배치하고 필요에 따라 재배치한다.

1.2.3 공사용 가설 공급시설은 공사감독자와 협의하여 설치하여야 한다.

1.3 임시전기

1.3.1 시공 작업에 필요한 전기시설이나 전기는 수급인이 공급하고, 비용을 부담해야 한다.

1.3.2 시공계획서, 작업방법 등을 면밀히 검토하여 필요한 동력용 전기용량, 작업구역 및 사무실 등을 포함한 조명용 전기용량 등을 감안하여 충분한 용량의 전기 수급계획을 수립하여야 한다.

1.3.3 필요한 용량, 지구별 사용계획에 따라 변압기의 용량, 개소 등 수전설비의 배치계획을 수립하여 시행하여야 한다.

1.3.4 기존의 배전시설을 이용할 경우에는 임시 배전선로를 명시된 지점 또는 기존건물 에서 인입하고, 배전용량과 특성은 필요한대로 수급인이 보완하여 사용해야 한다. 이때 발주자 또는 기존사용자의 사용을 방해해서는 안 된다.

1.4 임시 조명

1.4.1 공사할 각 장소의 작업, 시험 또는 검사작업, 안전대책 및 이와 유사한 작업의 조건 이나 요구사항에 적합한 단계의 조도 상태가 되도록 조명 설비를 지속적으로 유지 관리하여야 한다.

1.4.2 수급인은 누전이나 감전사고가 발생하지 않도록 배선 상태를 점검하고 철저히 유지 관리하여야 한다.

1.4.3 공사 준공 후 임시 조명시설 사용이 불필요하게 될 때에는 공사감독자와 협의 후 조명시설을 철거하여야 한다.

1.5 임시 상수도

1.5.1 시공 작업을 위해 필요한 적합한 수질의 급수시설은 공사착공 준비 시에 설치하거나 기존 상수도에 연결하고, 유지관리와 비용은 수급인이 부담해야한다.

1.5.2 배관을 연장하고 급수전을 두어서 바로 호스를 연결해서 물을 사용할 수 있게 해야 한다.

1.6 임시 하수시설

1.7.1 기존 시설물을 사용할 수 없는 경우에는 공사착공 준비 시에 필요한 하수시설을 하고 유지 관리해야 한다.

1.7.2 시공완료 시에는 시설물을 당초와 같거나 더 좋은 상태로 보수해서 반환해야 한다.

1.8 방재시설 및 기구

방재시설 및 기구 등을 설치할 경우 소방관련 법규에 규정된 관리책임자를 선임하여 관리하여야한다.

1.13 임시 현장배수

1.13.1 현장의 바닥면은 자연배수 되도록 비탈을 두고 땅파기 하는 구역에 물이 유입되지 않게 하고, 필요하면 펌프를 설치해서 운전, 유지 관리해야 한다.

1.13.2 현장에 물이 고이거나 흘러내리지 않게 하고, 물막이를 해서 세굴 되지 않도록 해야 한다.

1-7-2 임시 가설시설물

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 조건을 제시한다.

1.1.1 공사 중에 사용될 임시 가설 시설물의 설치와 이후의 제거

1.1.2 임시통제장치, 방호책 및 울타리, 공사 보호공

1.1.3 현장 임시 시설물로서 진입도로 및 주차장, 청소, 표시판 및 임시 건물 등

1.2 현장 보안

공사현장의 보안은 수급인의 책임 하에 이루어져야 한다.

1.3 공사 표지판

1.4.1 공사 표지판은 공사감독자가 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작해야 한다.

1.4.2 표지판에는 공사명, 발주자, 공사감독자 및 수급인의 회사명과 현장대리인, 공사기간 등을 명시해야 한다.

1.4.3 표지판은 공사감독자가 지정한 위치에 설치해야 한다.

1.5 공사 중 현장청소 및 폐기물 제거

공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지해야 한다.

	제2장		조 사
		2-1 시공측량

제 2 장 조 사

2-1 시공측량

2-1-1 육상측량

1. 일반사항

1.1 적용 범위

1.1.1 이 시방서는 항만·어항공사의 시공을 위한 육상 시공측량에 적용한다.

1.1.2 수급인은 측량을 시작하기 전에 측량계획을 수립하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

1.2 측량의 기준

1.2.1 측량은 측량 · 수로조사 및 지적에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 공공 측량 작업규정에 의하여 시행하여야 한다.

1.2.2 측량기준점은 국가기준점(위성기준점, 수준점, 중력점, 통합기준점, 삼각점, 지자기점, 수로기준점, 영해기준점)과 공공기준점(공공삼각점, 공공수준점)으로 한다.

1.2.3 평면좌표계는 세계측지계에 따라 측정한 지리학적 경위도를 기준으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 직각좌표 및 그 밖의 다른 좌표로 표시할 수 있다.

1.2.4 직각좌표로 표시하는 경우에는 T.M(transverse mercator, 횡단 머케이터) 방법을 기준으로 하며, X축은 좌표계 원점의 자오선에 일치하여야 하고 진북방향을 정(+)으로 표시하며, Y축은 X축에 직교하는 축으로서 진동방향을 정(+)으로 한다.

1.2.5 투영원점과 평면직각좌표 적용 지역 등은 다음 표와 같으며, 제주도 지역은 투영 원점의 가산(加算)수치를 X(N) 550,000m로 한다. 다만, 각 좌표계 경계에서는 좌표계 원점을 중복하여 적용할 수 있다.

명칭	원점의 경위도	투영원점의 가산(加算)수치	적용 구역
서부 좌표계	38°N, 125°E	X(N) 600,000m Y(E) 200,000m	124～126°E
중부 좌표계	38°N, 127°E	위와 같음	126～128°E
동부 좌표계	38°N, 129°E	위와 같음	128～130°E
동해 좌표계	38°N, 131°E	위와 같음	130～132°E

1.2.6 기본지리정보의 생산·구축에 활용하기 위한 단일평면직각좌표계(UTM-K)의 원점은 38°N, 127°30′E로 한다. 투영방법은 T.M(횡단 머케이터)으로 하고, 축척계수는 0.9996으로 하여 한반도 전역을 포괄한다. 투영원점의 수치는 X(N) 2,000,000m, Y(E) 1,000,000m로 한다.

1.3 측량기술자

1.3.1 측량작업은 “측량·수로조사 및 지적에 관한 법률, 제39조 ②항”에서 정한 측량 기술자가 수행하여야 하며, 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

1.3.2 수급인은 당해 공사의 측량을 원활하게 수행할 수 있도록 측량기술자를 충분히 배치하여야 한다.

1.4 제출물

1.4.1 측량계획서

(1) 수급인은 측량계획서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공측량을 실시한다.

(2) 측량계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 세부 측량계획, 작업공정표 및 측량 성과표 양식(야장 포함)

② 용지경계 말목 설치도

③ 허용 오차, 측량기기 성능 검사서 및 측량인원 편성표

1.4.2 성과품

(1) 수급인은 공사 착공 후 30일 이내에 당해 공사에 대한 시공측량을 실시하여 설계 도서와의 상이점을 확인하고 그 결과를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 측량기록에 대한 성과 및 측량 중에 설치한 시설물의 위치와 사진을 정리 하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 측량 책임기술자는 측량 성과에 서명, 날인하여 제출하여야 한다.

2. 재 료

2.1 장비

수급인은 사용할 측량기기를 공사감독자의 승인을 받아 선택하여야 하며, 공인된 기관의 측량기기 성능 검사서를 현장에 항시 비치하여야 한다.

3. 시 공

3.1 측량기준점 설치

3.1.1 평면기준점

(1) 수급인은 현장 내에 3점 이상의 평면기준점을 설치하여야 한다.

(2) 평면기준점은 2점 이상의 국가삼각점을 이용하여 삼각측량, 삼변측량, 트래버스측량 또는 GPS 측량방법으로 실시하며, 트래버스 측량방법을 사용할 경우에는 출발기선과 검기선을 결합하는 결합트래버스 방법을 사용하여야 한다.

(3) GPS 측량방법을 사용할 경우에는 “GPS에 의한 기준점 측량작업규정”에 준하여 실시하고 공사감독자의 승인을 득하여야 한다.

(4) 평면기준점은 공사 진행에 편리하게 이용될 수 있도록 시계가 양호하고 견고한 지반 위에 설치하여야 한다.

(5) 평면기준점의 좌표계는 세계측지계를 원칙으로 하며, 필요하면 공사감독자와 협의 하여 T.M좌표계 등의 다른 좌표계를 사용할 수 있다.

3.1.2 표고기준점

(1) 표고기준점은 현장에서 가까운 국토지리정보원의 수준점(B.M) 또는 국립해양조사원의 기본수준점(T.B.M)으로부터 왕복수준측량을 실시하여 결정한다.

(2) 측량의 정밀도는 2급 수준측량에 준한다.

(3) 현장 내에 기본수준점(T.B.M)을 3점 이상 설치하여야 한다.

(4) 기본수준점에는 측지기준면(인천항 평균해면), 당해 지역의 평균해면과 약최저저조면 (D.L)을 같이 표기하여야 하고, 기준면은 측지기준면과 당해 지역의 약최저저조면 중 공사감독자와 협의하여 결정한다.

3.2 기준점의 유지관리

3.2.1 수급인은 현장 내에 평면 및 표고기준점을 설치하여 도면에 명기하고 측량결과를 공사감독자에게 보고하여야 한다.

3.2.2 수급인은 기준점을 공사 초기부터 완료 시까지 유지, 관리하여야 한다.

3.2.3 수급인은 기준점에 대한 보호시설을 하여야 하며 관측이 용이한 표지를 설치하고 점의 조서를 작성하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

3.2.4 기준점의 일부가 멸실(망실)되거나 파손되어 지면의 재측량이 요구되는 경우 및 변동 또는 기타 이유로 인하여 재설치가 요구되는 경우에는 공사감독자에게 보고하고, 재설치 후 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.3 시공기간 중 검측

3.3.1 시공에 필요한 다음의 기준선측량 또는 이에 준하는 기선측량은 공사감독자가 입회하여야 한다.

(1) 터파기 구역 기준선측량

(2) 사석 및 피복석 고르기 기준선측량

(3) 케이슨 거치 측량

(4) 콘크리트블록 거치 기준선측량

(5) 방파제, 안벽, 호안 기준선측량

(6) 포장, 토공, 매립구역 측량

(7) 탐사 구역

(8) 토질조사 위치

3.3.2 시공기준선 또는 기선측량 시의 유의사항

(1) 모든 측량은 공종별 시공기준과 허용오차의 기준을 준수하여야 한다.

(2) 위 (1)항을 준수하여 육상에 인조점을 설치할 경우 GPS 및 토탈스테이션(total station)을 이용하여 정확하게 설치하여야 한다.

(3) 인조점 설치결과를 공사감독자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

(4) 콘크리트 구체공사의 케이슨 및 블록 거치는 토탈스테이션을 이용하여 2점 이상 교회법 또는 GPS(RTK) 측량방법으로 실시하여 시공허용오차 이내로 정확하게 설치하여야 한다.

(5) 강구조물 및 기초말뚝 공사 시 현장타설 위치 측량은 육상에서 가까운 곳(약 1km 이내)은 토탈스테이션의 2점 이상 교회법으로, 그리고 그 이상 지역은 GPS (RTK) 측량방법으로 실시하여 시공허용오차 이내로 정확하게 시행하여야 한다.

2-1-2 수심측량

1. 일반사항

1.1 적용 범위

1.1.1 이 시방서는 항만·어항공사의 시공을 위한 수심측량에 대한 일반적인 요건을 제시 한다. 확인측량을 위해 수심측량을 실시하는 경우에도 본 절의 일반적인 요건을 따른다.

1.1.2 수급인은 공사 시행 전에 공사감독자와 협의하여 공사구간 내에 대한 수심측량을 실시하여야 한다. 계약에 관련 규정이 없을 경우에는 시행하지 아니할 수 있다.

1.1.3 수급인은 수심측량 계획서를 작성하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다. 승인을 받지 못하였거나 승인을 받지 아니하고 시행한 측량은 공식적인 자료로서 인정하지 아니한다.

1.1.4 발주청이 제공한 수심측량 기록이 있고 수급인이 별도로 수심측량을 실시하지 않은 경우에, 수급인은 발주청이 제공한 수심측량 기록을 기준으로 공사를 시공하여야 한다. 발주청은 수급인이 수심측량을 실시하지 아니함으로써 발생하는 수급인의 불이익(공사량의 증가 등)에 대하여 책임지지 아니한다. 앞의 1.1.2항의 단서 조항에 의하여 수급인이 수심측량을 시행하지 않더라도 마찬가지이다.

1.2 측량의 기준

1.2.1 측량은 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 수로 측량 업무규정 및 동 규정 시행기준에 의하여 시행하여야 한다.

1.2.2 위치는 지리학적 경도 및 위도(지리좌표)로 표시한다. 필요한 경우에는 직각좌표 또는 극좌표로 표시할 수 있으며 공사감독자와 협의하여 결정한다.

1.2.3 측량의 원점은 대한민국 경위도 원점으로 한다. 측량 원점의 수치는 측량·수로 조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제7조 제②항의 규정을 따른다.

1.2.4 수심은 기본수준면으로부터의 깊이로 표시하고, 간출암과 간출퇴는 기본수준면으로부터의 높이로 표시한다.

1.2.5 해안선은 해면이 약최고고조면에 달하였을 때의 육지와 해면과의 경계로 표시한다.

1.2.6 교량 및 가공선의 높이는 약최고고조면으로부터의 높이로 표시한다.

1.3 제출물

1.3.1 측량계획서

(1) 수급인은 측량계획서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 수심측량을 실시한다.

(2) 측량계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 세부 측량계획, 작업공정표 및 측량 성과표 양식(야장 포함)

② 측량 구역도

③ 측량기기 및 측량인원 편성표

1.3.2 성과품

수심측량이 완료되면 다음과 같은 각종 성과품을 정리하여 공사감독자에게 제출한다.

(1) 각종 관측야장, 기록부 및 자료(기준점측량, 수심측량, 수준측량, 조석관측 등)

(2) 음향측심 기록지, 검조 기록지

(3) 기준점측량 계산서, 조석 조화분석 계산서, 기본수준면 결정서

(4) 항적도, 측심원도

(5) 수심측량 보고서(기준점 측량, 검조, 측심 등의 방법과 성과)

2. 재 료

2.1 장비

2.1.1 수심측량은 음향측심기를 사용한다. 측량선이 접근하기 어려운 곳에서는 공사감독 자의 승인을 받아 연추(lead) 등에 의할 수 있다.

2.1.2 수심측량에 사용되는 음향측심기는 다음과 같은 성능을 갖추어야 한다.

항 목		규 격
		수심 100m 이하	수심 100m 이상
발진 주파수		20～500kHz
송수파기 지향각 (반감반각)	단빔 음향측심기	8˚ 이하	약 10˚
	다중빔 음향측심기	1빔 당 3˚ 이하
기록지 송출속도		30mm/분 이상
가정 음속도		1,500m/s
기록 방식		건식 직선기록 또는 디지털 방식
최소 독취단위		최소눈금의 1/2 이상을 독취하되 수심 40m 미만 에서 0.1m까지, 100m 미만에서 0.2m까지, 100m 이상은 1m까지 각각 독취한다.

2.1.3 유효 측심폭을 확대하기 위하여 공사감독자와 협의하여 다소자 음향측심기 또는 다중빔 음향측심기를 사용할 수 있다. 사측심용 송수파기의 지향각은 가급적 선체 직하부를 향하도록 하고 수심에 따라 조절할 수 있다.

2.1.4 디지털 음향측심기는 매 측심값이 자동 입력되어 일정 시간 내의 최저 수심 및 평균 수심 등을 계산할 수 있어야 한다.

3. 시 공

3.1 해상위치 측량

3.1.1 해상위치측량은 전파측위, 위성측위 또는 광학적 측위방법으로 시행하여야 하며, 측량 방법에 대하여는 사전에 공사감독자와 협의하여야 한다.

3.1.2 위성측위의 경우, 실시간으로 육상기준국에서 송신하는 위성오차를 보정하거나 후 처리방식으로 오차를 보정하여야 하며, 세계측지좌표계(WGS-84)에서 bessel 측지 좌표계로 변환할 때는 변환에 이용한 변환 상수값을 명기하여야 한다.

3.1.3 사용하는 전파측위기 또는 위성측위기의 거리 오차는 ±3.0m 미만이어야 한다.

3.1.4 정도가 높은 측심에 대한 해상측위는 DGPS에 의함을 원칙으로 한다.

3.1.5 DGPS 측정기는 다음과 같이 검정 및 점검하여야 한다.

(1) 육상 기지점에 기준국을 설치하고 해상 기지점에 해상 이동국을 설치하여 얻은 좌표값의 오차가 기기의 허용오차 이내에 있는가를 검정하여야 한다.

(2) 매일 측량 개시 전에 해상 기지점에서 측량선(이동국)의 위치를 측정하여 점검 하여야 한다.

3.1.6 음향측심 중 해상위치 측정을 위한 위성신호는 초당 1회 이상 수신하여야 한다. 측정한 위치의 기입오차는 도상 1.0mm 이내로 한다.

3.1.7 후처리시스템을 이용할 경우 인근 고정국 자료를 이용하여 처리한다.

3.1.8 교회에 의한 해상 위치 결정은 2선 이상으로 하며, 그 교각은 30˚ 이상으로 한다.

3.2 음향측심 방법

3.2.1 수심측량은 국립해양조사원이 고시한 기본수준면(약최저저조면)을 기준으로 하여야 한다. 기본수준면이 고시되지 않은 곳에서는 1개월 이상 조석 관측을 실시하여 신규로 기본수준면을 설정하여야 한다.

3.2.2 안벽 등 접안시설 전면에 대하여는 안벽측심을 실시하여야 한다.

3.2.3 측심연에 의한 측심

(1) 측심연에 의한 측심은 계류선박이 밀집되어 있는 통상 4m 이하의 해역에서 측량선이 항주할 수 없는 경우에 시행할 수 있으며, 정치어장 구역이나 양식장 등에서도 이를 준용할 수 있다.

(2) 측심선 간격은 30m를 표준으로 한다.

(3) 측심줄은 신축이 적고 질긴 재질이어야 하며, 수심 0.1m 단위까지 측정할 수 있도록 심도를 표시하여야 한다.

(4) 측심줄에 장치하는 연추의 무게는 통상 2kg 이상이어야 하며, 기상상태에 따라 적절히 조정하여 사용할 수 있다.

3.3 음향측심 작업

3.3.1 음향측심기의 송수파기는 측량선의 중앙 부근에 설치하여야 한다.

3.3.2 작업 조건

(1) 측심작업은 해상 상태가 가급적 평온한 때에 실시하여야 하고, 특히 준설구역과 암초구역에서는 파랑이 있는 경우를 피하여야 한다.

(2) 측량선의 속도는 6～10km/hr(1.7～2.8m/s)로 하며 조류가 빠른 곳에서는 조류를 역행하는 방향으로 실시한다.

(3) 안벽시설 전면의 측방 수심은 안벽 등의 방충재 가장 가까운 곳에서부터 먼 바다 쪽으로 실시한다. 안벽 가장 안쪽의 측심은 방충재 외단 직하에서 외측 1m 이내의 곳에서 실시하고, 이 경우 안벽 측에 위치하는 송수파기의 사각은 0˚ 상태에서 사용 하여야 한다.

(4) 사주가 존재하는 구역에서는 측심선 방향이 능선 또는 계곡선에 직교하도록 설정 하여 측심을 실시한다.

(5) 경사측심에서 직하 수심보다 얕은 기록이 확인되었을 경우, 직하 수심을 확인할 수 있도록 그 부분에 대한 재측을 실시하여야 한다.

(6) 간출암 중에서 현저한 것은 그 위치, 형상 및 높이를 측정하여야 한다.

(7) 측심치의 정확성을 검토하기 위하여 각 측심선과 교차하는 검측심선을 설정, 검측심을 실시하여야 한다.

3.4 측심 간격

3.4.1 측심 방향은 해안선에 직각되는 방향으로 설정하여 해저지형을 파악할 수 있도록 하여야 한다.

3.4.2 측심선의 간격은 다음과 같이 하는 것을 원칙으로 하되 공사감독자와 협의하여 조정할 수 있으며, 측심 결과에 따라 필요한 보측을 하여야 한다.

(1) 단빔음측기 사용의 경우

수역의 종류	해저의 상태	수심 구분	미측심폭 또는 측심선 간격
항만, 항로 및 박지	준설 구역	수심 구분 없이	미측심폭 5m 미만
	자연 해저	수심 구분 없이	미측심폭 30m 미만
위쪽 이외의 일반 수역	자연 해저	3～10m	측심선 간격 50m 미만
		10～20m	측심선 간격 100m 미만
		20m 이상	측심선 간격 100m 이상

① 미측심폭은 측심선을 기준으로 음파의 지향각 외측의 해저면으로서 선위 오차(편위량 포함)를 더한 폭이다.

② 일반 수역의 자연 해저를 대상으로 하는 측심의 경우에 경사측심용 송수파기의 사각은 20˚로 한다.

③ 암반 해저의 경우에는 사니질 해저의 2배 이상의 밀도로 시행한다.

④ 구조물, 장애물 등의 철거 수역에 대하여는 철거 여부를 확인할 수 있는 밀도로 시행한다.

(2) 다중빔음측기 사용의 경우

수역의 종류	해저의 상태	해저 경사도	측심율
항로 및 박지			100%
위 이외의 일반 수역	평탄지	5˚ 이내	50% 이상
	경사지	5～20˚	70% 이상
	굴곡이 심한 지역	20˚ 이상	80% 이상
	항해 위험 천소 지역		100%

3.4.3 주 측심선 간격은 도상 10mm를 초과하지 않아야 하며, 수심과 측량의 목적을 고려 하여 적절히 조정할 수 있다.

3.4.4 검측심 간격은 주 측심선 간격의 15배를 넘지 않아야 한다.

3.5 기록 및 독취

3.5.1 음향측심 기록지에 기재하는 사항은 다음과 같다.

(1) 측심구역명, 측심일자, 측점번호, 측정치(음속, 흘수 등), 5～10분마다 시각 및 현지의 심도(다소자의 경우 기록지의 시작 부분에 각 송수파기의 기록순서 및 사각)

(2) 선박의 동요 상태, 바람, 파랑 등 참고사항

3.5.2 측심야장에 기재하는 사항은 다음과 같다.

측심 연·월·일·시, 측심구역, 측심 및 항법파일명, 기타 관측자료(위치, 수심 등)

3.5.3 측심기록의 독취

(1) 수심 31m 미만은 소수 2자리 이하를 버리고 0.1m 단위까지, 31m 이상은 소수 1자리 이하를 버리고 1m 단위로 읽는다.

(2) 얕은 수심을 우선하고, 자연 해저의 경우에는 해저지형이 표현될 수 있도록 독취한다.

(3) 독취간격은 측심도상 10mm를 표준으로 하되, 준설구역의 경계선 및 천소 부근에 대하여는 그 범위를 파악할 수 있는 간격으로, 계획수심 이상으로 준설된 구역에 대해서는 10～20mm 간격으로 독취한다.

(4) 자동화에 의한 수심 독취는 도상 4mm마다 최천 수심을 선택하여 파일에 저장·보관하되 수심과 축척에 따라 적절히 조정할 수 있다.

3.6 수심 보정

3.6.1 측득 수심에 대하여 기계 오차, 송수파기 흘수량, 수중음속도 변화에 의한 오차, 조위 등의 보정을 실시하여야 한다. 수심 200m 이상에서는 조위 보정을 실시하지 않는다.

3.6.2 기계오차 및 수중음속도의 보정

(1) 음향측심치에 대한 기계오차 및 수중음속도의 보정은 음속측정기 등을 이용한 음속 관측 또는 바-체크 방법으로 실시하여야 한다. 다만, 이 외의 방법을 적용할 경우 에는 수중음속 계산식을 이용하여 개정치를 산출할 수도 있다.

(2) 바-체크

① 바-체크는 매일의 측심 전·후에 측심 해역의 최대 수심 부근의 심도에서 실시한다.

② 바-체크에 사용하는 심도줄은 사용 상태와 같은 장력을 걸어 철재척으로 측정한다.

③ 심도 32m까지는 2m 간격, 그 이상에서는 5m 간격으로 측정하고, 오차는 32m까지는 25mm, 그 이상은 50mm 이내이어야 한다.

④ 수심 보정은 바의 기록 심도가 ±0.05m 이내에서 합치하는 독취 스케일을 선정하여 시행하여야 한다.

(3) 음속 보정

① 음향측심기에 의한 수심치는 음속을 1,500m/s로 가정하여 측정한 값이므로 현장의 수온, 염분, 수심에 따라 변화하는 현장 음속으로 보정하여야 한다.

② 해중의 음속은 다음 식으로 계산한다.

V = 1410 + 4.21 T - 0.037 T2 + 1.14 S + 0.0168 D

여기서, V는 음속 (m/s), T는 수온(℃), S는 염분, 그리고 D는 수심(m)이다.

③ 음속 보정계수 C는 다음 식으로 계산한다.

C = ( V - 1500 ) / V

(4) 측심연의 심도줄 보정

① 측심연에 의한 측심을 실시하는 경우, 당일의 작업 종료 후에 측심줄의 신축을 조사 하여 심도 1m에 대한 개정량을 1cm 단위까지 측심 야장에 기입하여야 한다.

② 측심연을 이용하여 측득한 수심은 심도줄 보정을 실시하여야 한다.

3.6.3 조위 보정

(1) 음측 또는 측심연으로 취득한 수심에는 기본수준면상의 조위가 가산되어 있으므로 이를 감하여야 한다.

(2) 조위는 측량 현지에서 실측함을 원칙으로 하나, 기준검조소가 있을 경우에는 이를 이용하여야 한다. 표준 조석도에 의한 조위를 산출할 수 있는 경우에는 표준 조석 시스템에서 제공하는 조위를 적용하며, 부득이한 경우는 인근 기준검조소의 조위 관측치를 개정(조시차 및 조고비 적용)하여 사용할 수 있다.

(3) 조시차 및 조고비를 적용하여 현장 조위를 산출하는 경우 조고 개정량의 차가 0.1m 이내인 곳의 검조소 성과를 사용할 수 있다.

(4) 조시차 및 조고비를 결정하기 위해서는 현장에서 조석 1주기 이상 표척관측을 실시 하여야 한다.

(5) 조시차 및 조고비는 다음과 같이 계산한다.

① 조시차 = 현지의 평균고조간격 - 기준항의 평균고조간격

② 조고비 = 현지의 대조차 / 기준항의 대조차

(6) 측심 구역에서 부진동의 진폭이 0.2m 이상인 경우의 조위 보정은 그 부진동이 나타내는 값을 사용하여야 한다. 이 경우에 구역 내의 적당한 장소에서 관측을 실시하여 진폭비 구분대(區分帶)를 결정하여야 한다.

3.7 측심자료의 전산 처리

3.7.1 자동화 수심측량 프로그램을 사용하는 경우에 수심 자료는 연속적으로 받으며 위치 자료는 초당 1개 이상 수신하되 원시자료(raw data)와 편차보정용 자료(quality data)를 동시에 받는다.

3.7.2 조위는 통상 10분 단위로 입력하며 원시자료는 소수 2자리까지, 최종 출력자료는 소수 1자리 이하를 절사하여 파일을 생성한다.

3.7.3 자동 독취한 음측치도 바-체크에 의한 기계오차 및 음속 보정, 그리고 조위 보정을 실시하여 최종 측심치를 얻는다.

3.7.4 DGPS로 해상 위치를 결정하는 경우 WGS-84에서 tokyo datum인 bessel값으로 변환할 때는 다음 값을 사용한다. 좌표계 변환에 의하여 변환값이 변경되었을 때는 변경된 값을 사용한다.

ΔX = 145.907m, ΔY = -505.304m, ΔZ = -685.756m

3.8 측량원도의 작성

3.8.1 측량원도의 축척은 측량 계획 시에 공사감독자와 협의하여 결정한다.

3.8.2 도법은 세계측지계에 의한 U.T.M도법을 기준으로 한다. 다만 필요한 경우, 공사 감독자의 승인을 받아 다른 도법을 사용할 수 있다.

3.8.3 육상기준점 및 기본수준점과 격자점을 기입하고, 경위도 숫자는 “ㄱ”측에, U.T.M 숫자는 "ㄴ"측에 기재한다. 다만, 원도 작성방법 등 특이한 사유 발생 시에는 변경 하여 기재할 수 있다.

3.8.4 측심점의 기입 오차는 도상 0.5mm 이내로 하고, 측심점의 간격은 항적도상 10mm 표준으로 한다.

3.8.5 수심치는 30m 미만은 0.1m 단위까지, 30m 이상은 1m 단위로 기록한다. 등심선 간격은 매 2m로 하며 필요에 따라 보조등심선을 기재하여야 한다.

3.8.6 표제에는 도엽명, 도법, 축척, 측량 연·월, 단위, 좌표원점의 경위도, 기본수준면에 대한 기사 및 비고를 기재한다.

	제3장		준설 및 매립
		3-1 준설 및 기초터파기 3-2 매립(뒷채움)

제 3 장 준설 및 매립

3-1 준설 및 기초터파기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 박지 및 항로 등의 신설, 확폭, 증심, 수심 유지를 위해 시행하는 각종 준설공사

1.1.2 항만 혹은 만내의 수질개선을 위한 퇴적오니 준설공사

1.1.3 해상장비를 이용하여 시행하는 방파제, 안벽 등 수중 구조물의 기초 터파기 공사

1.1.4 상기 준설 및 터파기 공사에 수반된 쇄암 및 발파공사

1.1.5 준설 및 터파기 공사로 발생된 부산물의 운반, 투기

1.2 참조규정

1.2.1 개항질서법

1.2.2 총포·도검·화약류 등 단속법

1.2.3 항로표지법

1.2.4 해양환경관리법

1.2.5 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률

1.3 제 출 물

1.3.1 수급인은 해당 공사 착수 전에 시공계획서를 작성하여 공사 감독자에게 제출하여 야 하며 제출 시기는 본 시방서 “제1장 총칙 1-2-3, 1.3.3 시공계획서”에 따른다.

1.3.2 공사 착수 전 제출할 시공계획서에는 아래 내용이 포함되어야 한다.

(1) 현장조사계획 : 본 절 “3.1.1 사전조사” 항목에 제시된 자연조건, 토질, 저질, 위험 물, 장애물 및 투기장의 여건

(2) 준설선 선정 : 공사량, 기상, 해상, 토질, 운반로 부근의 선박 교통상황, 준설선 투 입조건, 공기 등의 공사 여건을 감안하여 적합한 준설선을 선정

(3) 선단구성 : 선정된 준설선에 따라 예인선, 토운선, 양묘선, 연락선 등을 포함한 가 장 능률적인 작업을 할 수 있는 선단구성, 현장 투입 및 회항 계획

(4) 투기계획 : 준설토의 운반방법 및 투기계획

(5) 환경관리계획 : 준설 시, 준설토 운반 시 및 투기 시의 환경관리 계획과 예상민원 대처방안

(6) 안전관리계획 : 준설선의 이동, 대피, 회항 및 발파, 쇄암준설 시의 안전관리 계획

(7) 재해예방대책 : 악천후 시 준설선단의 대피 등 재해예방 계획

(8) 위치 및 심도확인 : 준설 작업 중 준설선의 위치와 준설심도를 정확하게 확인 할 수 있는 방법, 준설구역의 표시방법

1.3.3 공사 완료 후에는 본 절『3.4 검사 및 허용오차』항목의 내용이 포함된 검측계획서 및 검측결과 보고서를 제출하여야 하며 해양수산부장관이 발행한 수로 도서지의 내용변경이 필요할 경우에는 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률의 해당규정에 의거 수로조사를 시행하여야 한다.

2. 재 료

해당 없음.

3. 시 공

3.1 공통사항

3.1.1 사전조사

(1) 기상여건

① 바람은 파랑을 발생시키고 준설공사의 진행이나 안전성에 직접 영향을 주므로 해당지역의 풍향이나 풍속을 파악하여야 한다.

② 하구의 경우 강우 시 유사로 인해 준설구역이 매몰될 수 있고 안개 등의 영향으 로 조업차질이 예상될 수도 있으므로 항상 일기예보를 청취하여 미치는 영향을 최소화하여야 한다.

(2) 해상여건

① 준설 공사 시 파랑의 특성은 공사기간에 큰 영향을 미치므로 통계적 성질(파고, 파향, 주기)을 파악할 필요가 있으며 파랑예보를 청취하여 작업계획과 선단대피 등 안전관리에도 유의하여야 한다.

② 조석에 의한 고저차는 바다의 기본적 현상으로서 특히 준설공사와 관계가 깊으므로 현장에서 직접 관측하거나 인근 검조소의 기록을 분석하여 그 특성을 파악하여야 하며 공사용 기준면과의 상호관계도 확인하여야 한다.

③ 태풍시의 기압강하나 강풍이 지속적으로 불 경우 수심이 얕은 내만에 이상 수위 가 발생하여 만조 시와 겹치게 되면 큰 피해가 날수 있으므로 기상 이변 발생에 대비 사전 안전조치를 철저히 하여야 한다.

④ 준설 시 오탁수가 조류에 의해 확산될 가능성이 많은 경우나 협수로에서의 준설 공사 시에는 사전에 준설구역 부근해역의 조류조사를 시행할 필요가 있다. 조사의 규모나 내용, 지역 등은 공사의 규모나 내용, 인근지역현황(어장의 유무, 규모 등)에 따라 적절히 조정한다.

⑤ 표사에 의한 매몰이 심한 해역에서는 표사 이동방향, 계절별 표사 이동 양상 등을 조사한다.

⑥ 준설 중 해수 오탁이 우려될 경우에는 사전에 해수수질을 조사하고 시공 중이나 시공 후 분석결과와 비교하여 환경영향 평가 시 제시된 기준치를 초과할 경우 공사 중단이나 준설강도의 조절 등, 조치를 취하여야 한다.

(3) 측량 및 탐사

① 준설 공사 시에는 다음과 같이 공사 단계별로 수심측량을 시행한다.

가. 공사발주 혹은 공사시행 전 실시하는 사전측량

나. 시공 중의 관리측량

다. 준공확인 측량

라. 수로 도서지의 내용 변경에 필요한 수로조사

② 공사시행 중 사전측량 시에는 선단투입 가능수심, 간조와 만조 시 준설 가능 수심 등을 검토한다.

③ 측심기의 선정이나 측량방법, 해상위치 결정 등은 본 시방서『2-1-2 수심측량』항목에 제시된 기준에 따른다.

④ 해저에 폐선박이 매몰되거나 기뢰, 폭탄 등의 위험물이 존재할 가능성이 많아 상 세한 조사가 필요할 것으로 판단되는 해역에서는 공사감독자와 협의하여 사전에 자기탐사나 잠수탐사 등에 의해 확인하고 장애물이 발견될 경우 적절한 안전조치를 취한 후 제거하여야 한다.

(4) 지반조사

① 사전지반조사를 통해 준설 시 설계된 지반과 현장지반조건이 상이할 경우 이에 대한 대책이 검토, 수립되어야 한다.

② 준설예정구역에 일부 암반이 분포할 경우 공법 변경과 이에 따른 준설선 변경 투입도 예상되므로 조속한 대책을 수립하여 계획 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.

③ 해수면과 해저면 사이에 노출된 암반에 대해서는 조밀한 수심측량이나 다중빔 음측기에 의해, 해저면 이하의 비노출 암반에 대해서는 시추조사나 해저음파 지층탐사에 의해 분포상태를 조사한다.

④ 지반조사 방법, 시추공의 간격 및 토질시험에 대한 내용은 본 시방서『제2장 조 사, 2-3 지반조사』의 해당항목을 참조한다.

(5) 투기장소 및 투기경로

① 준설토 사토 장소인 투기장의 조건은 공사의 능률과 경제적인 면에서 중요한 역 할을 하므로 제반조건을 충분히 검토하여야 한다.

② 설계 시 제시된 외해 혹은 호안으로 조성된 투기장에 대해서 사전 검토할 내용다음과 같다.

가. 준설구역으로부터의 운반경로와 거리

나. 투기장의 수심과 넓이

다. 투기장 주변의 조류와 해류

라. 투기토의 누출과 표사이동에 대한 검토

마. 어업 및 수산물 피해

바. 환경오염

사. 투기장 허가

아. 매립조건

자. 호안 및 가호안

차. 여수토 규모와 운용방법

카. 해역이용현황(선박통행, 군사 훈련 등)

3.1.2 작업선의 선정

(1) 작업선은 해저 토질, 준설량, 수심, 투기조건, 기상, 해상, 공사기간, 주변해역 이용 상황 등의 현장여건을 고려하여 효율적인 작업이 가능한 선종 및 규격을 선정 하여야 한다.

(2) 준설선의 종류 및 규격은 해당 준설물량을 정해진 공기 내에 완료할 수 있도록 선정 하여야 한다.

(3) 토질별로 적용 가능한 표준적인 선종은 다음 표와 같으나 장비의 상태 및 현장여 건 등에 따라 달라질 수 있으므로 주의하여야 하며 N치 30 이상의 토사나 암반의 경우 쇄암이나 발파 등에 의한 파쇄 작업이 병행되어야 한다.

(4) 버킷 준설의 경우 토사 또는 자갈 혼합이 많은 지반에 주로 적용되나 경질에서 비교적 연약지반까지 대처가 가능하다.

종별	시험종목	시험방법	시험빈도(측정빈도)
토목섬유 (연약지반 매트)	인장강도, 인장변형율	KS K ISO 10319	20,000m2 마다 제조회사별, 제품규격마다
	수 직 투 수 계 수	KS K ISO 11058
	봉 합 강 도	KS K ISO 10321

토 질		표 준 적 용 선 종				비 고
분 류	N치, 상태	펌 프 준설선	그래브 준설선
			보 통 지반용	경토 지반용	암반용
점 토 질	30 미만	○	○			점성토, 또는 점토질토사
	30～50 미만	○		○
사 질 토	30 미만	○	○			사질토, 또는 사질토사
	30～50 미만	○		○
자갈혼합 토 사	30 미만		○
	30～50 미만			○
암 반	연질			○
	중질			○
	경질				○

3.1.3 준설공사의 작업한계

(1) 바람은 풍속이 15m/sec 이상이면 작업이 어렵고 일 강우량 10㎜ 이상이면 야외작업이 곤란하며, 시계 1㎞ 이하의 안개일 때는 토운선 운항 등을 중지하는 것이 좋다.

(2) 아래 표는 준설선의 종류에 따른 준설공사의 작업한계를 표시한 것으로 해상조건 이 아래의 한계치를 초과한 경우에는 공사감독자와 협의하여 작업을 중지하거나 안전 대책을 수립한 후 작업의 진행 여부를 확인하여야 한다.

준 설 선		풍 속 (m/s)	파 고 (m)	비 고
준설선의 종류	규 격
비 항 식 펌 프 선	1,000ps 이하	5	0.3
	2,000ps 급	10	0.4
	3,000ps 급	10	0.5
그래브선	100ps 이하	5	0.3
	250ps 급	10	0.4
버 킷 선	150ps 이하	5	0.3
	400ps 급	10	0.4
디 퍼 선	350ps 이하	5	0.3
	1,000ps 급	10	0.4
쇄 암 선	중추 10t	5	0.3
	중추 20t	10	0.4

(3) 조류는 2～4노트 이상일 경우 작업이 어렵고 2노트 이하에서도 준설선의 계류방향 을 저항이 적은 쪽으로 택할 필요가 있다.

(4) 자항식 펌프선 즉 호퍼준설선의 작업한계파고는 크기에 따라 1.5～3.0m 정도이나 대형선의 경우 3m 이상인 경우에도 작업이 가능하므로 선종에 따라 사전에 작업 한계파고를 확인하여야 한다.

3.1.4 예항 및 회항

(1) 작업선의 예항 및 회항 거리가 멀 경우에는 도중에 파랑에 의한 손상이나 침수피 해 등이 발생할 수 있으므로 예인 선박의 조합, 예항속도, 기상, 해상, 항로상 타선박의 종류나 규격 등을 종합적으로 고려하여 안전성이 가장 높은 예항 및 회항 방법을 채택하여야 한다.

(2) 필요할 경우에는 보험에 가입하고 출발지에서 도착지까지의 일정 및 코스를 해당 지방해양항만청에 통보하여야 한다. 예항 및 회항의 계획 시 만일의 경우를 대비 긴급 회항항도 고려한다.

3.1.5 소요수심 및 소요폭

(1) 여굴두께는 준설심도나 토질, 준설선의 형식과 능력, 토층의 두께, 해상조건 등에 따라 달라지며 다음 표에 제시된 값을 표준으로 한다.

토 질	선 종	시공수심별 여굴두께
		5.5m 미만	5.5 이상~9.0m 미만	9.0m 이상
보통토사	펌 프 준설선	0.6m	0.7m	1.0m
	그래브 준설선	0.5m		0.6m
암 반	그래브 준설선	0.5m

주) 시공수심은 평균해면(M.S.L)을 기준으로 한 준설저면(여굴포함) 수심임.

(2) 여쇄두께 및 폭은 다음 표의 값을 기준으로 한다.

구 분	여쇄두께	사면여쇄폭(한쪽)
암 반	0.8m (저면여굴두께 0.5m 포함)	2.0m (사면여굴폭 1.0m 포함)

(3) 사면 여유폭(餘裕幅)은 투입되는 준설선종에 따라 아래 표와 같은 값을 기준으로 한다.

구 분	선종	여유폭
보통토사	펌프준설선	6.5m
	그래브준설선	4.0m
암반	그래브준설선	2.0m

주) 상기 여유폭은 양쪽 기준이며 한쪽 준설폭 및 유지준설일 경우에는 본 표 값의1/2을 적용한다.

(4) 버킷선 및 디퍼선의 여굴두께와 여유폭은 버킷선의 경우 펌프선, 디퍼선의 경우 그래 브선의 규정을 적용하며 현장여건에 따라 공사감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

(5) 기초 터파기와 같이 준설사면의 존치기간이 일시적이고 구조물 안전상 문제가 없 으며 선박통항이 이루어지지 않는 경우에는 여굴 및 여유폭을 고려하지 않는다.

(6) 준설구역이 기존구조물에 인접한 경우에는 준설로 인한 인접구조물의 안전에 유의 하여 준설하여야 하며, 준설 중 구조물 등에 이상이 발생할 우려가 있거나 민원이 발생할 경우 공사감독자와 협의하여야 한다.

3.1.6 시공관리

(1) 준설장비 및 공사용 선박은 개항질서법의 관련규정에 의거 해양수산부장관에게 출입신고를 하여야 하며 항계 내에서의 정박 및 통행 시에도 개항질서법의 관련규정을 준수하여야 한다.

(2) 작업구역은 항로표지법의 관련규정에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 항로표 지(부표, 등부표 등)를 설치하여야 한다.

(3) 발파작업 시 화약류의 사용이나 저장 등은 총포, 도검, 화약류 등 단속법의 관련규정을 준수하여야 한다.

(4) 준설토의 투기는 호안시설을 설치하여 해역과 차단된 투기장이나 관계기관이 허가하여 지정한 해역에 투기하여야 하며 해양환경관리법상의 관련규정과 관계기관의 지시사항을 준수하여야 한다.

(5) GPS 측량에 의한 성과에 따라 굴착구역을 선정하고 작업 중 수시로 확인하여 준 설구역의 위치를 명확히 하여야 한다.

(6) 준설선의 작업위치를 확인하기 위한 기준점은 관측이 용이한 곳에 설치하여야 한다. 장대나 부표를 보면서 위치나 구역을 판단할 경우에는 풍향이나 조류의 영향을 고려하여야 한다.

(7) 준설공사는 연속적인 교대작업이므로 1조의 승무원 중에 갑판부, 기관부를 포함하고 인계조에서 시행한 운전방법이나 상황의 변화에 대하여 인수조에게 철저하게 연락하도록 하여 작업상 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(8) 준설작업 중 항시 준설선의 위치나 준설 깊이를 정확하게 확인하여 과대한 준설이 나 불필요한 준설이 발생하지 않도록 하여야 한다. 이 경우 공사감독자는 과대한 준설 등이 인접구조물의 안전상 문제가 있다고 판단될 경우 수급인에게 원상복구를 요구할 수 있으며 수급인은 그 요구에 즉시 응해야 한다.

(9) 준설깊이는 항상 조위를 환산하여 확인하여야 한다. 안개, 비, 야간작업 등으로 인 해 준설선에서 양수표가 보이지 않거나 양수표를 준설선 인근에 설치할 수 없을 경우 일정시간(조위차에 따라 적절히 정함)마다 양수표 관측자와 연락하여 조위를 확인하여야 한다.

(10) 준설깊이의 확인은 음향측심기와 DGPS로 하되 간격은 공사감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

(11) 준설작업은 환경영향평가 기준을 준수하고, 준설 중 오탁조사를 실시하여 준설해역의 환경기준을 지켜야 한다. 필요한 경우 준설구역 주변에 감시점을 설치하여 상시 수질감시를 실시하고 오탁방지막, 오일휀스 등 오탁방지 대책을 강구하여야 한다.

(12) 준설공사 시 안전을 확보하기 위하여 작업 전에 안전관리 체계수립 및 중점관리 항목 선정, 종사자 교육 등을 실시하고 사고 발생 시에는 공사감독자와 상의하여 긴급조치를 취한 후 관할 관청에 보고하여야 한다.

(13) 준설장비의 원활한 가동을 위하여 공사구역 내에 필요한 장비, 설비 및 부대기구의 예비품을 구비하여 장비의 고장 시 교체 혹은 수리가 가능하도록 하여야 한다.

(14) 공사 관련 장비는 정기적으로 점검하여 항상 최상의 상태를 유지하여야 하며 특히 마모가 심한 부위나 손상 시 안전관리 상 문제점 발생이 예상되는 부위 등은 수시로 점검하여야 한다.

(15) 모든 준설토와 굴착토는 지정된 투기장으로 반출 투기하여야 하며 운반 도중에 누출 등이 없도록 주의하여야 한다.

(16) 어떠한 사유이든지 투기장이 아닌 곳에 투기하였거나 지정된 구역 밖에 흩어져 있는 투기토는 수급인 부담으로 이를 제거하여 지정된 투기장에 투기하여야 한다.

(17) 주변에 통행 선박이 빈번할 경우에는 통행선박의 주 운행방향, 일정 등을 사전에 분석 하여 가장 효율적이고 안전한 작업이 될 수 있도록 세부준설계획도를 작성하여야 한다.

(18) 작성된 준설 계획도는 인근 항만시설을 이용하는 관계자(부두운영사, 도선사회, 선박회사, 선박관제소 등)에게 배포하여 상호 협조할 수 있도록 하여야 한다.

(19) 준설토를 투기하거나 혹은 투기 후 준설구역으로 선박을 이동할 경우에는 준설계 획도상 준설 예정구역과 예상시간을 관계자들에게 무선으로 통보하여야 하며 통항 선박에 지장이 있을 경우에는 관계자와 재협의 하여야 한다.

3.2 항로 및 박지 준설공사

3.2.1 비항 펌프준설

(1) 준설작업은 준설순서나 작업구역, 공사용 기준면 등을 점검하고 배사관의 이상 유·무를 최종확인한 후 시작하여야 한다.

(2) 준설선단은 준설 깊이, 폭 및 토질과 배송거리를 검토하여 능률적이고 효율적인 작업이 되도록 구성하여야 한다.

(3) 육상 연결점은 펌프준설선의 시동이나 파랑에 의하여 해상 부동관(浮動管)에 힘이 가해져도 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.

(4) 해저관(배사관) 설치를 위하여 작업장에서 조립한 관등의 부유물체를 개항의 항계 안에서 해상으로 운반할 경우에는 개항질서법의 관련규정에 의거 해양수산부장관의 허가를 받아야 한다.

(5) 부상연결점은 해저관에 영향을 주지 않도록 앵커로 견실히 고정시켜야 한다.

(6) 운전자는 준설선 운전 시, 주펌프의 압력(흡입압력계, 토출압력계), 진공상태, 관내 유속(유속계), 윈치모터의 부하(swing motor의 전류계), 커터의 회전수 등에 유의하여 이상이 발견되면 즉시 대응책을 강구하여 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다. 또 준설선의 위치 이동시 배송, 스윙앵커나 스퍼드의 재 타설 시 오조작이 없도록 주의하여야 한다.

(7) 배사관은 파손이나 폐쇄 유무 및 플로트의 앵커와이어 신축여부 등을 수시로 점검 하고 조정, 보수, 교체 등 대책을 강구하여 작업에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

(8) 계획된 준설토의 두께가 두꺼울 경우 준설선의 능력을 감안하여 적절한 두께로 하여 몇 단계로 나누어 준설하여야 한다.

(9) 해저관을 부상시켜 철거할 경우 잠수부로 하여금 작업 전에 해저관의 상황을 조사 하게 하고, 해저토의 이동으로 관이 흙속에 묻혀 있는 경우 크레인선이나 양묘선 등으로 강제로 인양하여 한쪽에서 차례로 철거하여야 한다.

(10) 준설 작업 중에는 인근을 항행하는 선박에 대하여 각별한 경계가 필요하며 선상 이나 주위에 작업표지를 설치하거나 야간에는 식별이 가능한 공사용 등표 등을 설치하여 충돌사고가 발생되지 않도록 주의하여야 한다.

3.2.2 자항 펌프준설(호퍼준설)

(1) 비항 펌프준설은 대량의 준설토를 비교적 단거리에 투기하는데 적합하며 호퍼준설은 넓은 구역의 준설토를 내장한 호퍼에 흡입하여 비교적 먼 거리에 투기하거나 심해의 토사를 준설하여 매립 등의 목적으로 사용하는 경우에 적합하다.

(2) 호퍼준설선은 커터가 없으며 비항 펌프준설선이 HP으로 표시되는데 비해 호퍼의 용량으로 표시된다.

(3) moored suction 형식은 흡인장치가 붙은 래더(또는 arm)를 계획준설위치에 내려놓고 투묘한 앵커체인을 감으면서 준설하는 방식으로서 하천이나 항구의 유지준설에 적합하다.

(4) drag suction 형식은 자항으로 전진하면서 준설하는 방식으로서 연장이 긴 항로나 준설구역이 여러 군데 산재한 지역, 선박 출입이 많아 해상교통이 빈번한 항로 준설 등에 적합하다.

(5) 준설선의 종류 및 형식, 용량 등은 토질, 준설 깊이 투기거리, 해상조건 등을 고려 하여 현지 여건에 가장 적합한 것으로 선정한다.

(6) 호퍼선으로 준설 시 해저면에 폐그물이나 타이어, 폐선박 등이 산재해 있을 경우 작업이 불가능하므로 사전조사를 철저히 하여 이들 지장물을 제거한 후 시행하여 야 한다.

(7) 호퍼준설선의 drag head는 준설토질에 적합한 형식으로 교체하여 효율적인 준설 작업이 되도록 하여야 한다.

(8) 준설 작업 시 함니수가 호퍼를 월류하여 허용기준을 초과하는 오염이 발생되지 않도록 주의하여야 한다.

(9) 준설선에는 준설기능, 작동기계, 준설위치 및 준설량을 실시간 모니터링 할 수 있 는 관리시스템이 갖추어져 있어야 한다.

(10) 운반 중 준설토의 유실이 발생되지 않도록 하여야 하며 투기장소의 좌표를 숙지 하여 정확한 위치에 투기하여야 한다.

3.2.3 그래브(grab) 준설

(1) 준설선단은 토질조건, 준설토층의 두께, 주변해역의 상황, 기상·해상 조건 등과 토운선, 예인선의 크기, 척수 및 그래브 버킷의 종류 등 현지여건을 고려하여 작업 효율이 최고로 될 수 있도록 구성한다.

(2) 준설두께가 두꺼울 경우에는 몇 단계로 나누어 (1～3m의 깊이) 층별로 준설하고 최후의 층을 마무리 준설로 하여야 한다.

(3) 준설토를 토운선에 적재 시에는 과적하여 여수가 흘러나오지 않게 하고 한쪽으로 편중되지 않도록 적재하여야 한다.

(4) 저개식 토운선을 사용할 경우 투기 후 선창이 확실하게 닫혔는지를 확인하여 버리다 남은 준설토가 항행 중 흘러나와 수질을 오염시키는 일이 없도록 하여야 한다.

(5) 투기 장소에 오탁방지막을 설치할 경우 조류의 영향으로 토운선의 출입구는 오탁 이 확산되기 쉽기 때문에 유황(流況)을 주의 깊게 관찰하여 출입구의 변경 등 대 응책을 강구하여야 한다.

(6) 그래브의 선회반경 내에서 다른 작업을 하여서는 안 된다. 또 수심 검측 시에 버 킷을 달아 올린 데릭 아래에서 검측을 하여서는 안 된다.

3.2.4 쇄암준설

(1) 쇄암선은 지반이 단단하여 일반준설선으로 준설이 되지 않는 토질이나 구조물이 인 접하여 발파방법으로 쇄암을 할 수 없는 경우 쇄암선에 의해 파쇄하는 방법이다.

(2) 선단 구성 시에는 암을 파쇄한 후 그래브준설선이나 디퍼준설선을 투입, 파쇄암을 준설하여 토운선에 싣는 작업이 포함되어야 하며 토운선의 고장 등으로 토운선이 부족하면 준설선의 대기에 따른 가동률이 저하되므로 투기장이 멀거나 선박수리시설이 인근에 없는 경우 예비 토운선의 확보를 검토하여야 한다.

(3) 쇄암 작업을 하기 전에 암반표면의 요철(凹凸)이나 절리(節理)상태, 조류나 파랑 등을 면밀히 조사하여 작업계획을 수립 시행하여야 한다.

(4) 쇄암공의 간격 및 깊이는 토질 및 쇄암 후의 준설선 능력을 고려하고 현장시험시 공이나 과거의 실적 등을 참고하여 결정한다.

(5) 쇄암층이 두꺼워서 여러 층으로 나누어 쇄암할 경우에는 각 층에서 쇄암한 암편의 제거를 확인하고 다음 단계 쇄암 작업으로 들어가야 한다. 쇄암선은 중축식과 충격식이 있으며 중추식은 쇄암봉을 낙하하여 낙하충격으로 암을 파쇄하며 충격식은 바이레터에 연속충격을 가하여 쇄암하는 공법이다. 쇄암봉의 규격은 파쇄암의 상태에 적합한 규격을 선정한다.

3.2.5 발파준설

(1) 수급인은 화약취급보안책임자의 선정, 화약류의 취급허가 신청 등 필요한 행정절 차를 작업 전에 이행하고 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(2) 발파작업은 반드시 공사감독자의 사전 승인을 얻은 후 실시하고 위험물 취급에 관한 법규를 준수 하여야 하며 작업장 주위에 안전원을 배치하여 조업원은 물론 타 구조물의 안전에 최선을 다하여야 한다.

(3) 수중발파의 시공방법에는 암반에 구멍을 뚫고 구멍 내부에 폭약을 장약하는 천공 발파공법, 폭약을 전석이나 암반 표면에 장약하는 표면발파공법이 있으며, 천공(穿孔) 깊이, 간격, 공경(孔徑)과 폭약량은 시험발파에 의해 현장작업조건과 목적에 맞도록 선정하여야 한다.

(4) 발파 작업 시에는 불발이 생기지 않도록 약통제작, 장약, 서브케이블(sub cable)의 설치 등을 신중하게 행하고, 화약은 일정시간이 경과하면 그 폭발성을 잃어버리는 것을 사용하여야 한다.

(5) 장약작업에 사용하는 장전구는 마찰, 충격, 정전기 등에 의해 폭발위험이 없는 것 을 사용하여야 하며, 낙뢰의 위험이 있을 때에는 전기뇌관 및 도화선에 관계되는 작업을 하여서는 안 된다.

(6) 수급인은 발파작업 시 발파작업해역에서의 안전대책을 수립하여 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(7) 공사 해역 및 그 부근을 항행하는 선박, 어선 등에 피해를 주지 않도록 위험수역 을 선정하고 사전에 이러한 사실을 관련단체나 개인에게 홍보하여야 하며, 기폭 (起爆) 시 선박이 위험수역에 접근하지 않도록 경계를 철저히 하여야 한다.

(8) 발파 종료 시에는 반드시 완폭(完爆) 여부를 확인하여야 한다. 또 발파작업의 기능 면허를 갖고 있는 잠수부에 의해 발파한 해저상황, 가스 발생 유무 등을 조사하여야 한다. 불발공(不發孔)이 발견되면 장약의 제거 등 즉시 대책을 강구하고, 또 가스 발생 등 이상이 발견되면 공사감독자와 협의하여 적절한 대응책을 강구하여야 한다.

(9) 완폭 확인 후 발파작업을 종료하였을 때에는 다음과 같은 조치를 하여야 한다.

① 경계선이나 대피중인 작업선, 일반선박 관계자에게 작업종료를 통보한다.

② 경계선은 경계표지를 내리고, 위험수역에 설치한 부표 등을 철거한다.

③ 사용하고 남은 화약은 수납하여 책임자가 보관 관리토록 한다.

④ 화약 사용량 및 잔량을 확인하여 기장(記帳)한다.

3.2.6 기타 장비에 의한 준설

(1) 상기 방법 이외에도 버킷, 디퍼, 백호 등이 있으며 현장여건에 따라 적합한 준설방법을 채택할 수 있다.

(2) 버킷 준설은 버킷 라인에 여러 개의 버킷을 연결부착하여 버킷라인을 회전시켜 토사를 연속적으로 준설하는 장비로서 준설능력이 비교적 크기 때문에 대규모이고 광범위한 준설에 적합한 장비이며 그래브 준설선보다는 준설면이 평탄하게 시공된다.

(3) 디퍼준설은 단단한 토질이나 암반을 파쇄한 후 준설을 하기 위하여 선단부에 디퍼버킷(dipper bucket)을 장착한 붐을 준설 위치에 내려 바깥으로 퍼 올리는 방식으로서 강력한 힘을 요하므로 선체를 스퍼드로 고정시킨다. 파쇄암이나 단단한 토질의 준설토는 토운선에 적재하여 예인선으로 투기장까지 운반하여 투기한다. 백호준설은 디퍼의 반대방향으로 설치되어 있으며 장비구조나 방법은 디퍼준설과 같다.

(4) 본 시방서에 규정된 시공관리 지침 이외의 장비별 특수 시방사항은 해당 장비의 특성을 감안 공사감독자와 협의하여 결정한다.

3.3 기타 준설

3.3.1 오니준설

(1) 오니준설은 유해한 오염물질을 함유한 채 해저에 퇴적된 오니를 대상으로 하며 오염된 해저를 통상의 준설방식으로 처리할 경우 미립자가 확산되어 2차 오염이 발생될 수 있으므로 해저 교반이 없는 특수 오니 준설선이 필요하게 된다.

(2) 오니준설 시에는 준설 및 이송 시 2차 오염을 일으키지 않도록 다음의 기능 및 성능을 갖춘 오니전용 준설선을 사용하여야 한다.

① 준설 시 탁도를 상시 감시할 수 있는 관리시스템을 갖출 것

② 준설 시 확산에 의한 2차 오염방지가 가능할 것

③ 함니율은 최소 30% 이상일 것

④ 수중작업을 확인할 수 있는 수중 카메라 장치가 있을 것

⑤ 준설위치 파악이 가능한 자동위치 측정설비가 있을 것

(3) 오니 준설방식은 에어펌프식, 피스톤펌프식, 수중펌프식, 밀폐그래브 방식 등이 있으며 각 방식별 특성과 준설심도, 오니층의 두께, 해상조건 등을 고려하여 현장여건에 가장 부합되는 방식을 선정한다.

(4) 1회 준설두께는 50㎝ 이내로 하되 전면을 고루 준설하여 표층이 이동되지 않도록하여야 한다.

(5) 준설 시 스윙속도는 오탁이 부유되지 않도록 저속으로 하여야 하며 작업 중 급격 한 탁도의 변화가 발생 시에는 즉시 준설작업을 중지하고 원인을 파악한 후 공사 감독자와 상의하여 적절한 대책을 수립한 다음 재개하여야 한다.

(6) 배사관은 수시로 점검하여 준설오니가 누출되는 일이 없도록 하며, 마모 손상된 것은 즉시 교체하여야 한다.

(7) 준설된 오니의 운반을 간편히 하기 위해 일정수준 이하의 함수비로 농축시킬 경우에는 침전 시 배출되는 상등수가 기존수질 혹은 환경영향평가 시 제시된 수질보다 양호하도록 지속적으로 관리하고 침전된 오니토를 토운선 등으로 운반할 때 유출 및 누출이 되지 않도록 하여야 한다.

(8) 준설오니를 해양 배출하여 처리할 경우 배출해역의 지정 및 배출방법 등은 해양환경관리법에 따라야 하며, 이로 인한 민원이 없도록 사전조치를 철저히 하여야 한다.

(9) 기타 부대설비의 조합 및 시공 중 유의사항은 펌프준설선의 관련 규정에 준한다.

3.3.2 기초 터파기

(1) 바다나 하천에서 해상장비를 이용하여 시행하는 구조물 기초 터파기 작업은 대부 분 항로 및 박지 준설공사와 유사하므로 여기서 규정되지 않은 사항은『3.2 항로 및 박지 준설공사』의 관련규정에 준한다.

(2) 대상 지역의 토질이 점토인 터파기 공사에 있어 마무리 정밀도가 특별히 요구될 경우나, 굴착 폭이 좁고 해저 굴착토량이 적을 경우 등은 잠수부가 해저굴착상황 을 육안으로 직접 확인하면서 에어리프트(air lift)를 사용하여 굴착한다.

(3) 지지층까지 굴착할 경우에는 계획저면 부근 준설토사의 토질을 항시 파악하여 지 지층을 확인하여야 한다. 지지층이 설계도서와 다르게 나타날 경우 즉시 공사감독자에게 보고하고 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

(4) 사질토와 점성토를 번갈아 층이 형성되는 곳은 특별히 주의하여 시공하고 지지층 확인에 오류가 없도록 하여야 한다.

(5) 지지층은 점성토와 혼합되거나 교란되지 않도록 주의 깊게 시공하여야 한다. 지지층에 점성토가 혼입되거나 교란으로 인하여 소정의 지지력을 확보할 수 없을 때에는 수급인의 책임 하에 이를 제거하고 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(6) 터파기 공사 후 장기간 방치할 경우 지지층에 부유토가 침전되어 상부 구조물의 침하가 발생될 수 있으므로 굴착 후 빠른 시일 내에 후속 치환공사를 시행 하여야 한다.

(7) 지지층이 암반일 경우 장기간의 방치 등으로 암반위에 이토가 침전되었을 때에는 에어컴프레서, 에어리프트 등으로 침전된 이토를 완전하게 제거하고 공사감독자의 확인을 받은 후 후속공사를 시행 하여야 한다.

(8) 허용범위를 초과하여 굴착한 경우에는 공사감독자의 승인을 받아 원지반과 동등 이상의 재료로 되메우기를 하여 소정의 지반지지력을 유지할 수 있게 하여야 한다.

(9) 수급인은 허용범위를 초과하여 굴착함으로서 발생한 투기량의 증가나, 치환재의 증가로 인하여 발생한 공사비를 부담하여야 한다. 또 이로 인하여 구조물의 안전 에 지장을 주거나 계약 공기에 영향을 줄 우려가 있을 때에는 수급인의 책임 하에 대책을 강구하여 공사감독자의 승인을 얻어야 한다.

3.4 검사 및 허용오차

3.4.1 검사일반

(1) 수급인은 준설공사가 끝나면 검측일정, 기준 및 방법이 포함된 검측계획서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야한다.

(2) 준설구역에 대한 준설확인은 도면상의 위치와 실작업 위치가 일치하는지, 시공된 구역의 수심, 폭, 준설사면 등이 설계와 같이 시공되었는지 확인하여야 한다.

(3) 준설공사가 완료된 후 그 성과는 수심도에 의해 최종 확인되므로 수급인은 수심측 량 결과를 기초로 수심도를 작성하여 수심측량 성과표와 같이 제출하여야 한다.

(4) 성과 확인을 위한 수심측량은 공사 중 발생한 부유토가 침강하도록 공사감독자와 협의하여 일정시간동안 방치 후 시행 하여야 한다.

(5) 검사 확인측량은 작업선이 공사현장에서 철수하기 전에 시행하여야 하며 음향측심기 및 DGPS를 사용한다.

(6) 평면도의 축척은 1/1,000, 측심간격은 10m를 기준으로 하되 공사의 종류 및 현지 여건에 따라 공사감독자와 협의하여 결정한다.

3.4.2 허용오차

구 분	준 설	기초 터파기	비 고
수심(저면)	(+) : 0 (-) : 규정하지 않음	(±) 300mm
비 탈 면	(+) : 100mm (-) : 규정하지 않음	외측 : 2m 내측 : 300mm	비탈면(법면)과 직각방향

3-2 매립(뒷채움)

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 해저토사를 준설하여 시행하는 매립공사

1.1.2 준설토 혹은 육상토사에 의한 구조물 뒷채움 공사

1.1.3 육상토사에 의한 일반매립 및 토공사는 본 규정을 적용하지 아니한다.

1.2 참조규정

1.2.1 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률

1.2.2 해양환경관리법

1.2.3 토목공사 일반표준시방서『제2장 토공』

1.3 제출물

1.3.1 수급인은 해당 공사 착수 전에 시공계획서를 작성하여 공사 감독자에게 제출하여 야 하며 제출 시기는 본 시방서 “제1장 총칙 1-2-3, 1.3.3 시공계획서”에 따른다.

1.3.2 공사 완료 후에는 검측 계획서 및 결과 보고서를 제출하여야 한다.

2. 재 료

2.1 매립 및 뒷채움 재료

2.1.1 준설토사

(1) 준설선으로 해저의 토사를 채취하여 매립재로 사용하는 경우에는 유해물질이 함유 되거나 확산으로 인한 2차 오염 등이 발생되지 않도록 각별히 주의 하여야 한다.

(2) 채취구역을 결정할 때에는 준설토의 종류 및 매립지의 이용계획과 매립 후 연약지 반처리 등이 함께 고려되어야 한다.

(3) 수역시설(항로, 박지 등)을 위하여 부득이하게 해저토사를 준설하여 매립하는 경우 에는 매립토에 대한 재료의 시방을 별도로 규정하지 않는다.

(4) 준설구역으로부터 채취할 매립토는 준설구역, 준설 깊이, 재료의 형상 등을 파악하 기 위하여 사전에 토질조사 등을 시행하여야 한다.

(5) 매립용 토사의 채취장소가 지정되지 않은 경우에는 작업 전에 사용할 재료의 시험 성적서 및 채취 장소가 첨부된 서류를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2.1.2 육상토사 및 기타

(1) 뒷채움재로 육상 토사를 사용할 경우에는 토목공사일반표준시방서의 규정에 준하며 수중 공사일 경우 모래나 석재류 등 가급적 점성이 적은 재료를 사용하여야 한다.

(2) 채취장소가 지정되어 있지 않을 경우에는 사용하기 전에 재료의 시험성적표 및 산 지를 명기한 서류를 제출하여 품질이 적합한지 검토하고 공사감독자의 승인을 득 한 후 사용하여야 한다.

(3) 슬래그(slag) 등 산업폐기물을 뒷채움재로 사용할 경우에는 무해성이 입증되어야 하고 해양환경관리법 등 관련 규정에 저촉되지 않아야 한다.

3. 시 공

3.1 공통사항

3.1.1 사전조사

(1) 신속하고 확실한 매립과 안전한 시공을 위해서는 사전조사를 철저히 하여야 한다.

(2) 매립공사 시 조사할 주요내용은 다음과 같다.

① 매립 예정지의 토질, 기상, 해상조건

② 매립토사의 조달방법

③ 매립공법의 검토

④ 매립호안의 설계 혹은 기 설계된 호안의 안전성

⑤ 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 등 관련법령에 따른 인·허가 절차

⑥ 매립공사로 인한 민원발생요인

(3) “해양환경관리법”상에서 정하는 폐기물을 “공유수면 관리 및 매립에 관한 법률”에 따라 매립하고자 할 때는 해양환경관리법 시행규칙에서 정한 처리기준과 방법에 따라야 한다.

3.1.2 환경관리계획

(1) 유해물질이 함유된 토사를 매립할 경우에는 주변해역의 수질이나 매몰 상황 등을 상시 감시할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다.

(2) 육상운반 시에는 소음, 진동, 분진의 발생 등을 고려하여 적정 운반로를 선정하고 운반시간의 규제, 교통사고 방지대책 등을 수립하여야 한다.

3.1.3 안전관리계획

(1) 매립작업은 대량의 토사와 다수의 장비가 투입되므로 사전에 철저한 안전관리계획 을 수립하고 조업원을 교육시켜야 한다.

(2) 해상작업 시 고려사항은 다음과 같다.

① 작업구역의 수심, 토질, 기상, 해상조건과 준설선의 작업능력

② 위험물, 장애물, 매설물 등의 유무

③ 항로상의 통행제한이나 작업해역 항행선박에 대한 대책

④ 시공 상황의 파악 및 작업선박의 좌초에 대한 안전대책

⑤ 야간작업 시의 작업체계

⑥ 사고발생 시의 처리대책 및 작업선의 피난장소

3.1.4 공사관리 일반사항

(1) 이상 침하, 활동 등 예측치 못한 사태가 발생할 우려가 있을 때에는 즉시 공사감 독자에게 보고하고 대책을 수립하여야 한다.

(2) 매립된 구역으로부터 분진 또는 악취가 발생할 경우에는 공사감독자와 협의하여 대책을 수립, 시행하여야 한다.

(3) 매립지반은 심한 요철이 없도록 하여야 하며 시공 허용오차는 ±30㎝로 한다.

(4) 매립구역은 정기적으로 순찰하여야 하며 야간 및 악천후 시에는 2인 이상이 1조가 되어 무전기, 조명기구 등을 휴대하여야 한다.

(5) 매립중이나 매립 후에 연약지반이나 위험지역에는 출입을 금지하고 표지를 설치하 여야 한다.

3.2 구조물 뒷채움

3.2.1 구조물 뒷채움 공사 시에는 기존 구조물의 변위 파악을 위한 계측계획을 수립하여야 한다.

3.2.2 공사 순서는 반드시 구조물 기준선에서 육지 쪽 방향으로 시행하여야 하며 안벽 이나 호안 등의 뒷채움 구역 바닥에 점토 등 연약한 흙이 퇴적되어 있는지를 확인하고 만약 퇴적되어 있을 경우에는 사전에 이를 제거하고 시작하여야 한다.

3.2.3 공사 시행 전에 뒷채움과 매립을 동시에 시공할 경우는 뒷채움 구역에 연약한 점토(또는 이토)가 유입, 퇴적되지 않도록 하여야 한다.

3.2.4 타이로드나 타이케이블 등이 설치되어 있을 경우에는 손상이 되지 않도록 특히 주의하여야 한다.

3.2.5 뒷채움 공사를 육상 공사로 하는 경우에는『토목공사 일반 표준시방서』의 관련 규정에 정하는 바에 따른다.

4. 특기사항

(1) 기초굴착 및 박지준설 구역의 암굴착토를 뒷채움사석 및 매립재로 유용하며, 유용시 준규격석(0.001~0.03㎥급)에 준하게 소할을 하여 최소한의 공극을 없애도록 하여 시공하여야 한다.

	제4장		항로표지
		4-1 등부표

제 4장 항로표지

4-1 등부표(부표)

1. 일반공사

1.1 적용범위

항행 선박의 안전 운항 유도와 해양공사구역, 침선 등의 장애물 등에 설치하는 등부 표(부표)에 적용한다.

1.2 참조 규격

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1 관련 시방서

(1) 강구조공사 표준시방서

(2) 건축강구조 표준접합 상세지침(한국강구조학회, 2010)

(3) 한국산업표준(KS), 국제표준화기구(ISO) 및 국제적으로 통용되는 기타 국제기준 중 해당사항

1.2.2 관련법규 및 기타 기준

(1) 항로표지법

(2) 항로표지법 시행령 및 시행규칙

(3) 항로표지 고시에 관한 업무취급 요령 (4) 항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준

(5) 표준형부표 제작 및 품질관리 기준에 관한 규정

1.3 제출물

1.3.1 수급인은 공사착수 전에 시험 및 검사계획서를 본 시방서『1-4-1 품질관리 계획』의 해당요건에 따라 작성하여야 한다.

1.3.2 수급인은 시공상세도를 본 시방서『1-2-3 제출서류 및 공정관리』에 따라 작성하 고, 시공순서도를 추가하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.3.3 수급인은 강재 및 부속품, 구입품의 품질 확인 및 검증을 위하여 KSD 0001(강재 의 검사통칙), KSD 0028(단강품의 검사통칙), KSD 0401(주강품의 제조시험 및 검 사통칙), KSQ 1001(계량 규준형 1회 샘플링검사) 및 그 외 각 해당 규격에서 규정 한 사항 등에 의하여 작성된 각 재료의 밀시트, 시험․검사성적서 등을 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

1.3.4 KS 규격품이 아닌 경우에는 해당 구조물의 용도에 따라 용접 성능과 피로 성능 등 요구 성능을 확인 할 수 있는 자료를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 체인, 고삐체인, 접환(샤클), 전환(스위블)은 필요한 경우 납품 이후 공사감독자 가 직접 샘플링하여 한국산업표준의 KSV3313 시험방법에 따라 시험을 거치도록 할 수 있다.

2. 재   료

부표는 표체, 중추, 계류구, 두표 및 항로표지 장비․용품으로 구성되며, 부표에 사용 되는 자재와 부품은 아래 규격에 적합한 제품 또는 동등이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 자재 및 부품

2.1.1 표체 : 표체의 주된 재질은 일반구조용 압연강재(KS D 3503), 일반구조용 탄소강관(KS D 3566) 및 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 등 한국산업표준 중 적합한 관련 기준에 의해 제작되어 시험 검사에 합격한 강재를 사용하여야 한다. 단, 설치 시 해역(수역)의 자연환경, 선박교통량, 이용 선박의 크 기 및 사용용도 등을 감안하여 알루미늄 등 비철금속 또는 합성물질(GRP, 폴리에틸렌, 우레탄수지, FRP, foam 등)의 재질을 사용할 수 있다.

2.1.2 중추 : 중추는 한국산업표준 철계 저열팽창 주조품(KS D 4127), 회주철(KS D 4301)에 의해 제작하고 시험 검사에 합격한 제품을 사용하여야 한다.

2.1.3 계류구 : 계류구(부표와 침추를 연결하는 체인과 부품)의 주된 재질은 플래시 버트 용접앵커체인(KS V 3313), 주강 앵커체인(KS V 3312), 부이샤클(KS V 3316) 등 한국산업표준 중 적합한 관련 기준을 적용한 강재를 사용하 여야 한다. 다만, 설치목적, 설치 해역의 수심, 자연환경 및 이용선박 등 을 감안하여 표준형부표 제작 및 품질관리기준에 관한 규정에 따른 섬유재질, 탄성고무를 사용할 수 있다.

2.1.4 침추 : 침추는 ‘표준형부표 제작 및 품질관리기준’에 따라 콘크리트를 타설하여 제작한다. 다만, 필요시 철제침추, 앵커 등을 사용할 수 도 있다.

2.1.5 두표 : 두표는 폴리에틸렌 또는 경량 재질을 사용하되, 부표의 설치환경 등을 감안하여 두표의 규격, 재질, 지주 등을 의 변경할 수 있다.

3. 시   공

3.1 등부표 기능

3.1.1 도색 : 설치 목적에 따른 IALA 규정 도색(녹, 적, 흑, 황, 청색)

3.1.2 두표 : 설치 목적에 따른 IALA 규정 두표(원통, 원추, 구형, X형)

3.1.3 등광(설치 시) : 설치 목적에 따른 IALA 규정 등색 및 등질 (녹, 적, 백, 황, 청색)

3.1.4 등부표의 기능은 국제해상부표식 IALA 규정에 따른다.

3.2 시공기준

3.2.1 시공 전 준비

(1) 표준부표(강재)의 제작 및 수리에 관한 기본적인 사항에 대하여 적용하나, 부표의 설치위치, 해역환경, 사용장비, 재질 등의 여건에 따라 공사감독관과 협의하여 현 장실정에 적합하도록 시방을 변경할 수 있다.

(2) 부표 제작자는 제작 착수 전에 설계도면의 제작내용을 충분히 확인하고 의문이 있 거나 잘못된 부분이 있을 경우에는 감독관의 확인을 받아 시행한다.

(3) 부표를 제작하는 재료는 설계도면에 표시된 것으로 한국산업표준(KS)에 적합한 것을 사용하여야 하며 저장 및 취급 방법은 다음과 같다.

① 재료는 가공 전․후를 막론하고 항상 먼지, 기름 등의 오물에 의하여 더럽혀지지 않고 부식되지 않도록 적절한 높이에 저장하여야 한다.

② 재료 운반 및 적하 시에는 손상이 발생하지 않도록 적절한 대책을 강구 하여야 한다.

(4) 부표를 가공하기 전에 다음 사항을 준수하여야 한다.

① 재료는 부재를 제작하기 전에 녹, 먼지, 기름 등을 제거하여야 한다.

② 굴곡, 변형 등이 있는 부분은 재질이 손상되지 않는 방법으로 교정하여야 한다.

③ 부분적으로 가열한 강재는 적절한 소둔(annealing)을 하여야 한다.

(5) 재료의 절단 시 전단면이나 가공 면의 표면 거칠기는 최대한 미려하게 처리하고 절단 또는 가스절단에 의한 변형은 표면을 깨끗이 정리하여야 한다.

(6) 재료의 롤러 밴딩은 원통부 및 기타 부위의 구부리기 작업에 앞서 롤러의 청결 상 태를 육안으로 검사하여야 하며 강판을 롤러로 밴딩하여 원하는 원호(圓弧)를 만 들 때 작은 각도로 서서히 수차례 반복하여 강재의 급격한 재질 변화가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3.2.2 용접 작업

(1) 용접 작업은 적합한 전기 ARC용접에 의하여 시공되어야 한다.

(2) 용접 자세는 회전대 또는 경사대 등을 사용하여 하향 용접을 한다.

(3) 용접 작업 전 모재(강재)에 있는 모든 불순물(수분, 녹, 기름, 페인트 등)은 충분히 제거한 후 작업에 착수토록 한다.

(4) 용접봉은 피복이 탈피되었거나 오손된 것과 습윤 상태에 있는 것을 사용하여서는 아니되며, 충분히 건조된 상태에서 사용되어야 한다.

(5) 모든 용접은 최종 용접 시 만족하게 융합할 수 있도록 매끄럽게 연마를 하여야 하며, 품질 관리에 만족토록 육안검사에 합격하여야 한다.

(6) 용접 결점의 수정은 용접 완료 후 금이 갈라지거나 작은 구멍이 생기는 결점이 있을 때는 원인을 제거하여 보완 용접하여야 한다.

3.2.3 표체 제작

(1) 표체의 구조는 강판으로 구성되며, 접합은 종․횡선모두 용접으로 시공하여야 한다.

(2) 상부 경판에 미끄럼방지용 철근(D10㎜)을 부착하고 배수가 잘되도록 사이의 틈새를 충분히 두어 부분 용접으로 고정한다.

(3) 상․하부 경판을 가공(R150)하고 내․외부 수밀 테스트를 하여 균열이 없고 미려  하게 제작한다.

(4) 상부경판의 중앙에서 해치에 연결되는 축전지실의 내부는 해상용 축전지 6개가 들어갈 수 있는 구조로 하되, 코너부분에 도면에 명시된 정도의 곡률을 주어 처리하도록 하며 해치의 끝단부 단면은 매끈하게 가공하여 해치의 고무패킹을 손상하지 않도록 한다.

(5) 철탑의 구조는 앵글로 된 4개의 주 기둥에 수평 보강대로 구성되며 각 부재의 규격은 도면에 따른다.(주 기둥은 등명기 하부까지 일체식으로 제작)

(6) 사다리장치는 철탑 외면에 항로표지 설치장비의 정비에 필요한 경사다리를 설치하여야 하며 사다리의 구조(폭 300㎜, 간격 300㎜) 및 구성부재(평철9×50㎜, 환봉ψ19㎜)를 전기 용접으로 부착하여야 한다.

(7) 축전지실 및 폐쇄장치(랜비는 제외)는 표체 상부에서 축전지실로 통하는 뚜껑을 9t 강판으로 750×750㎜의 사각형으로 제작하며 4개의 고정용 볼트걸이를 취부 하여야 하며, 정첩핀 재질은 스테인리스(27종)볼트․너트를 사용하며, 뚜껑내부에는 고무패킹(20×30)을 부착하여 수밀 구조로 제작하여야 한다.

(8) 번호판은 철탑높이 중앙부근에 규격의 표시판을 철탑 3면에 용접하여 부착한다.

(9) 미통은 원통형 강관 Φ610로 제작 또는 동일규격의 기성품을 사용하며 그 하부에는 철 중추를 취부 할 수 있는 구조로 제작하여야 하며, 미통은 하부경판의 중심부에 고정 부착하고 브라케트로 보강하고 미통 타판은 표체 하부 경사면에 연결하여 부착하여야 한다.

3.2.4 인양고리, 사슬고리 및 스위벨 제작

(1) 인양고리, 사슬고리 및 스위벨은 주강을 사용하여 제작하고 육안으로 보아 재질에 기포가 없어야 한다.

(2) 스위벨은 내마모성이 매우 강한 재질로서 작은 힘에도 원활하게 회전이 되어야 하며, 이물질이 끼어들어 회전을 정지시키지 않도록 제작되어야 한다.

(3) 인양고리는 상부경판에 사슬고리는 하부 경판에 고정 취부 하여야 한다.

(4) 인양고리 및 사슬고리는 볼트구멍을 뚫어 상․하부 경판에 고정시키고 볼트로 조립하여 용접하고 고리판 둘레도 철저히 용접하여야 한다.

(5) 인양고리와 사슬고리의 위치는 90°를 유지하여야 하며. 인양고리 4개를 부착 할 경우에는 표체 하부와 직각이 되도록 설치한다.

3.2.5 레이더 반사기 제작

(1) 부표에 레이더 반사기(코너크러스타)를 설치하는 경우에는 ‘10방향 반사판(코너크리스타)’에 의한 모양으로 제작하며 사용하는 재료는 알루미늄판 3t로 하며 다음과 같이 제작한다.

(2) 제작과정 중 울퉁불퉁한 부분은 그라인더 및 사포지로 잘 다듬는다.

(3) 도면에 지정된 위치에 결합형 반사판 1개를 설치대에 부착한다.

(4) 반사판의 규격은 647×340㎜로 도면을 참조하여 제작하여야 하며 볼트 너트의 규격은 Φ12×32㎜로 반사판 상하부의 해당 개소에 견고하게 취부 하여야 한다.

(5) 철 중추는 주철 제품(cast iron)을 사용하여 다음과 같이 제작 설치하되 육안검사 에서 재질에 기포가 없고 표면이 균일하여야 한다.

① 조립 시 중추가 이탈되지 않도록 견고하게 취부하여야 한다.

② 철 중추의 규격은 강관의 호칭Φ610의 외경에 충분히 삽입되도록 Φ900×620×100t 로 제작한다.

3.2.6 아연판 부착

등부표의 부식을 방지하기 위해 등부표의 종류에 따라 다음 규격의 아연판을 적 정위치의 표체하부 경판에 볼트너트(M16×30L)를 용접을 한 후 견고하게 너트 조 임으로 취부한다.

등부표 형식	방식면적 (㎡)	전류밀도 (mA/㎡)	규격 (㎜)	수 량
U-17(P)＆(S)/C,S	12.46	120	70×150×20t, 1㎏	2
U-17(P)＆(S)/C,S	12.46	120	70×150×20t, 1㎏	2
LT-10	4.03	120	70×150×20t, 1㎏	2
LL-24	30.76	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-26(M)	29.55	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-26	29.55	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-28	32.64	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-30	36.00	120	70×150×20t, 1㎏	3
LS-35	28.89	120	70×150×20t, 1㎏	3
LSP-10	52.39	120	70×150×20t, 1㎏	5
LANBY-100	159.41	120	70×150×20t, 1㎏	4
도장 결함률 = 5%, 소모율 = 11.23%㎏/A.Yr 유효 사용률 = 85%

3.2.7 두표

두표는 다음 표와 같이 부표의 형식 및 종류에 따라 적절한 두표를 선택하여 제 작 설치하여야 한다. 다만, 부표의 설치환경이 매우 열악한 경우 두표의 규격, 재 질과 지주의 강관 두께를 변경할 수 있다.

표지 종류	규격 및 두께	재질	지주	기타
우 현	360㎜×460×3t (원추형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
좌 현	500㎜×390×3t (원통형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
안전수역	360Φ×3t (구형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
고립장해	360Φ×2개×3t×2개 (구형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
특수표지	800×800×3t (×형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
침선표지	1050×1050×3t (+형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스강관 Φ26mm, 1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm,
신위험물표지 (비상 침몰, 좌초선박표지)	460×50×3t (X형)	폴리에틸렌 또는 경량재질	스테인리스 강관 Φ26mm,1.2t	스테인리스프렌지 Φ200mm

3.2.8 표체 도장

(1) 도장 전 금속재의 이물질과 녹을 완전 제거한 후 작업을 하여야 한다.

(2) 도장은 금속전처리 도료 또는 동 품종이상으로 붓칠․롤러칠 또는 뿜칠로 도장하 여야 한다.

(3) 도장 표면은 다음 조건을 만족하여야 한다.

① 도장된 표면은 매끄러워야 한다.

② 표면에는 붓 자국, 흘러내린 자국, 울퉁불퉁함이 없어야 한다.

③ 표면에 들뜨기, 변색 또는 오손 등이 없어야 한다.

④ 표면에는 균열, 흠 등이 없어야 한다.

(4) 다음과 같은 경우에는 도장작업을 하여서는 아니 된다.

① 온도가 5℃ 이하일 때

② 상대습도가 80%를 초과하는 경우

③ 바람에 모래와 먼지가 날릴 때

④ 일출 3시간 이내 일몰 3시간 전(단, 옥내 작업의 경우 제외)

(5) 일반적인 부표의 도장은 다음 기준에 따라야 한다.

① 표체 전체 : 무기질 zinc도료(녹막이 방지용), 에폭시계 도료(방식 A/C용, 중도용) 각 1회 도장

② 수선하부 : 염화고무계 도료(접착제 상부용), 선저도료(방오 A/F) 각 1회 도장

③ 수선상부 : 광택이 나는 에나멜계․폴리우레탄계 등의 도료(상도용 마감도료 2회) 도장

④ 세라믹 도료 등 특수 도료를 사용하는 경우에는 도장 특성에 따른 도료제조회사의 별도의 기준에 따라야 한다.

⑤ 도료는 색도 기준에 적합하여야 한다.

3.2.9 등명기 설치

(1) 등명기는 설치대에 볼트와 너트를 이용하여 고정하여야 하며, 해면과 수평을 이루도록 한다.

(2) 등명기 설치대는 등탑 난간 높이 이상의 높이로 설치하여야 한다.

3.2.10 축전지 설치

축전지는 LDA-400 규격을 사용하여야 한다.

(1) 축전지는 KSC 8505 중 PS 250E 또는 동등 성능 이상으로 경제적이고 효율적인 제품 등을 사용한다.

(2) 축전지 전압은 12V를 유지한다.

3.2.11 태양전지 설치

(1) 태양전지는 사용 등명기의 소모 전력량을 계산하여 모듈의 용량 및 수량을 결정하여 설치하여야 하며, 설치 장소는 등명기의 하부 또는 상부 슬래브의 난간에 풍압에 흔들리지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

3.3 시험 및 검사

3.3.1 주요 재료에 대해서는 가공 전에 한국산업표준에 의한 공인기관의 시험증명서 확 인과 외관, 치수, 규격 등을 검사하여야 한다.

3.3.2 용접한 부위에 대하여는 육안 및 게이지를 이용하여 검사하되 필요시에는 비파괴 검사를 하여야 한다.

3.3.3 제작 단계부터 완성 단계에 이를 때까지 각부의 치수, 구조, 기능 등이 도면대로 제작되었는지에 대하여 단계별로 검사하여야 한다.

3.3.4 부표의 수밀성 여부는 다음과 같이 현장에서 공기압시험을 하여야 한다.

(1) 공기압 시험은 등부표에 공기를 압력을 가하여 천천히 유입하면서 비누거품 등을 용접된 각부에 도포 하여 공기의 누출(거품의 생성)여부와 기타 이상 유무를 육안으로 검사하여야 한다.

(2) 공기압 유지시간은 15분 이상으로 하며 규정압력(5-7㎏/㎠) 이상을 초과하여서는 안 된다.

3.3.5 도장작업은 매 칠 회수 마다 육안 및 도막 측정기를 이용하여 검사하여야 한다.

3.4 설치

3.4.1 위치 선정

(1) 등부표의 설치위치는 최신 최대축척의 해도 상에서 결정하여야 한다.

(2) 준설항로의 경우에는 준설 기준선의 끝단, 기타 항로의 경우에는 가항수로의 한계선에 설치하여야 한다.

(3) 항해에 위험을 초래하는 해양공사 구역 표시 등부표는 공사구역을 충분히 표시할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 다만, 이 경우에는 선박이 항행하는데 지장을 최소화 하여야 한다.

3.4.2 부표 설치

(1) 부표를 설치하고자 하는 위치를 측량하여 가부이 등을 이용한 설표를 설치한다.

(2) 설표 위치를 재 측량하여 계획위치와 일치할 경우 부표의 침추부터 천천히 투하하여야 한다.

(3) 부표의 설치가 완료되면 위치를 재측정하고 필요한 부대 장비를 설치한다.

	제5장		오탁방지막
		5-1 오탁방지막

5-1 오탁방지막

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 절은 준설공사 매립 등 항만공사에 따라 발생하는 오탁의 해양확산을 방지하기 위하여 사용될 오탁방지막의 제작, 설치공과 소요장비 및 기타사항에 대하여 규정한다.

1.2 참조규격

1.2.1 한국 산업규격

(1) KS K 0768 지오텍스타일의 파열강도 시험방법

(2) KS K 0536 준용 지오텍스타일의 인열강도 시험방법

(3) KS K 9864 지오텍스타일의 단위면적당 무게 실험방법

(4) KS K ISO 103119 지오텍스타일의 인장강도 시험방법

(5) KS K ISO 12956 지오텍스타일 및 관련제품-유효구멍크기 측정방법-습식법

1.3 제출물

1.3.1 계약상대자는 당해 공종 착수 3일전까지 시공계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

1.3.2 시공계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 섬유의 무게, 인장강도, 인열강도의 시험성적서

(2) 장비투입계획

(3) Anchor의 설치 방법

(4) 유지관리 계획

2. 재료

2.1 오탁방지막

2.1.1 오탁방지막은 흙 속이나 해수 및 일광에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 여과성이 양호하며 해수의 혼탁 및 확산을 방지할 수 있는 재료로서 반드시 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2.1.2 설계도면에 표시된 형상 및 규격으로 가공, 설치하여야 하며 그 사용 재질의 기준치는 다음과 같다.

구 분	품 질 기 준					시험방법
항목 형별	10형	15형	20형	25형	32형
재질	폴리에스테르					KS K 0210-1
중량 (g/m2, 이상)	300	400	600	700	1,000	KS K ISO 9864
인장강도 (N, 이상) ([㎏f],이상)	2500 [254]	3750 [381]	5000 [508]	6250 [635]	8000 [812]	KS K 0743 그래브법
인장신도 (%)	10～30				10～40	KS K 0743 그래브법
인열강도 (N, 이상) ([㎏f], 이상)	500 [50]	2000 [200]	2200 [220]	2500 [250]	4000 [400]	KS K 0536준용: Double Tongue법
투수계수 (cm/s)	α x 10-2 ～ -4 ( α:1.0～9.9 )					KS K ISO 11058
비중	1.0 이상					KS A 0602
치수변화율 (%)	±0.2% 이하					KS K ISO 7771

2.1.3 오탁방지막의 재료는 2.1.2의 기준에 적합한 것이라야 하며, 공공기관에서 규정하는 시험기관에서 시행한 시험성적서를 사전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

2.2 Anchor

2.2.1 오탁방지막을 고정시키기 위한 Anchor는 구조 검토한 형태의 Anchor을 사용하며 지반조건을 고려하여 충분히 기능을 발휘 가능한 방안을 적용하여야 한다.

2.2.2 Anchor의 형식은 바다와 하천으로 보면 하천은 일방향으로 유속이 있고 특히, 우기시 각종 스레기 및 토사 부유이물질들이 닻가지에 걸리지 않도록 외날형식의 닻을 사용하여 부유이물질의 걸림을 방지하여 유속의 흐름을 방해하지 않도록 해야 하며. 지반여건에 따라 설치 및 제거가 용이한 외날형 닻가지 Anchor을 사용한다

시공

3.1 계획, 조사

3.1.1 계약상대자는 본 공사를 수행하기 전에 오탁확산방지막 설치 예정 위치 및 구간에 대한 수심, 조류 등을 조사하여 현지여건과 설계와의 상이 여부를 검토, 공사감독자에게 보고하여야 한다.

3.1.2 계약상대자는 조사 자료를 활용하여 방지막 설치구간, 경로, 개구부 형상 및 안전표시 시설과 하천인 경우 고기가 상류로 올라 갈 수 있도록 어로를 확보해야하며 오탁확산방지막 및 Anchor의 설치방법, 소요장비 동원계획, 설치가간 등을 포함하는 상세한 설치계획 공정표를 작성하여 공사감독자의 승인을 받아 시행하여야 한다.

3.1.3 계약상대자는 오탁확산 방지막이 설치된 이후에는 주기적인 순찰 및 유지관리로 방지막 및 설치 부속물의 손괴, 유실 등에 의한 기능 저하 또는 상실에 대비하여야 한다.

3.2 구조형식

3.2.1 오탁방지막은 해저지형 및 조위변화에 적절히 대응하여야 하고 부유물질의 해양확산을 방지할 수 있도록 내구성 있게 제작되어야 하며, 취급 및 설치가 용이하고, 이음부가 파손되지 않도록 견실하게 봉제 가공되어야 한다.

3.2.2 Float부는 조류 및 파랑에 의해 안쪽으로 휩쓸리지 않아야 하고 부력유지 및 복원력이 우수한 원통상으로 제작되어야 하며, 이형물체와의 충돌에 의한 파손을 방지하기 위하여Float cover를 덧씌운 구조이어야 한다.

3.2.3 하단부는 Steel Chain을 부착하여 방지막 전체에 주름이 잡히거나 굴곡이 없는 평면형상을 유지하도록 하여야 한다.

3.3 시공

3.3.1 오탁방지막은 설치 후 바람, 유수 및 파랑 등에 의하여 파손 또는 유실되지 않도록 서로 견고하게 연결, anchoring하여 하며, 패류, 해조류, 해중 부유물질의 부착으로 성능저하가 없도록 이들의 제거 등 유지관리를 철저히 하여야 한다.

3.3.2 오탁방지막의 현장 점검은 매 공사일마다 1회 실시하는 것을 원칙으로 하며, 현장 점검 시 오탁방지막의 파손을 발견하며 즉시 공사감독자에게 보고하여 원래 상태와 같이 복구하여야 한다.

3.3.3 오탁방지막의 설치 및 유지관리의 불충분으로 인한 피해 발생시는 모든 책임과 비용을 계약상대자가 부담해야 한다.

3.3.4 오탁방지막의 설치는 사전에 시험 설치하여 오탁수의 확산방지 효과 등 본래 목적을 충족하는지의 여부를 검토한 후 본 공사를 실시하여야 한다.

3.3.5 오탁방지막의 유동을 방지하기 위해 해저면에서 실시하는 Anchor의 형식은 오탁방지막의 주기능을 충분히 발휘할 수 있어야 하며 조류, 조위, 파랑변화에 대처할 수 있는 형상과 규모이어야 한다.

3.3.6 닻가지anchor와 오탁방지막을 연결시키는 PP Rope는 조류, 조위, 파랑에 견딜 수 있는 충분한 재질 및 규격이어야 하며 연결용 clip, Shackle도 동일 규격이어야 사용하며 특히, 하천은 우기시 철거가 용이 하도록 PP Rope을 사용한다.

3.3.7 현장에서의 이음은 연결부에서 오탁수가 누출되지 않도록 Fly등으로 보강하여야 하며 이의 재질도 원 방지막과 동일하여야 한다.

3.3.8 공사완료 후 오탁방지막은 관련법규에 의거 폐기물 처리를 하여야 하고, 제거한 후 감독관과 협의하여 처리한다.