제주 해면양식 수중 시험어장 조성사업 시방서

제주형 해면양식 수중 시험어장(김녕) 조성사업 시방서

제주특별자치도

해양수산연구원

목     차

1. 설계설명서

2. 일반시방서

3. 특별시방서

4. 도면

1. 설 계 설 명 서

1. 설 계 설 명 서

1-1. 사업개요

1.1 사업명 : 제주형 해면양식 수중 시험어장(김녕) 조성사업

1.2 위  치 : 제주시 구좌읍 김녕리 1223-22번지선(29,000㎡)

1.3 사업목적

본 시설사업은 제주연안 외해역에 중층 수하연 양식시설인 시험어장을 설치하여 다양한 수산생물 생산(복합양식) 생산기술연구에 필요한 기초자료를 확보하는 한편 제주도의 새로운 패러다임의 수익모델을 제시하고자 함

1.4 시설내용 : 중층 수하연 양식시설(200m × 145m) : A = 3 ha × 1개소

1.5 기  간 : 착공일로부터 4개월(120일)

본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 4개월(120일)간으로 한다.

단, 천재지변 또는 시행청에서 인정하는 사유가 발생할 시에는 공사기간을 연장할 수 있다.

1-2. 결과보고 및 준공

도급자는 공사 착수시 착수보고를 하여야 하며, 공사완료시 완료보고와 동시에 다음의 공사 결과물을 제출하여야 한다. 모든 보고회의 일정은 시행청의 감독관과 협의하여 조정한다.

1) 현장의 공사공정(사진)이 포함된 공사 결과보고서 3부.

2) 중층 수하연 양식시설 조성 전·후의 수중사진을 외장하드 또는 CD로 제출

1-3. 설계변경조건

1) 설계시 예상작업환경과 현장의 설계조건이 사실과 현격한 차이가 있을 때.

2) 기타 관의 형편에 의하여 설계변경이 불가피 할 때.

3) 다음의 경우에는 공사기간을 연장할 수 있다.

가. 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.

나. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때.

다. 기후조건에 의하여 작업일수가 부족할 때(강우일수가 평균강우 일수보다 많을 때).

라. 시기로 인한 감태의 수급이 불가능 할 때

마. 기타 여건에 의해 작업이 지연될 때.

2. 일 반 시 방 서

2. 일 반 시 방 서

2.1 총칙

본 시방서는 저비용 시험어장 조성을 위한 제주 중층 수하연 양식시설 조성공사의 일반적인 공사시방을 표시한 것이며 설계도서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 아래 시방서 및 규정, 특별시방서에 준하여 시행하여야 한다.

1) 토목공사 일반 표준시방서.

2) 건설공사 관계법령 및 규정.

3) 한국공업규격.

4) 항만공사 표준시방서.

본 시방서 및 설계도서에 명기되지 않은 사항이나 해석상의 차이가 있을 때는 시행청의 해석에 따라야 하며 그 이외의 사항에 대해서는 일반 관례에 따라 해석하여야 한다.

2.2 제출서류

도급자는 공사착수와 동시에 착수보고회를 실시하여야 하며, 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 공사착공계(현장조직, 주요종사원).

2) 예정 공정표.

3) 도급자 공사도급 내역서.

4) 현장대리인계.

5) 안전관리 계획서.

6) 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반 서류.

2.3 시공계획

1) 도급자는 다음사항에 대해 감독관과 사전협의를 거쳐 시행하여야 한다.

가. 공사추진계획 및 예정공정표.

나. 공사진행순서.

다. 각종표지판 설치 및 가설물의 위치 선정.

라. 공사 표지판 설치, 출입금지구역의 설정.

마. 기타 공익 및 사유재산에 영향을 미치는 사항.

2) 진도가 예정보다 지연될 경우 도급자는 감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 및 추가 투입 등 공정만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 일체 도급자가 부담한다.

2.3.1 설계도서

1) 설계도서의 표시된 모든 치수는 완성된 치수를 말한다.

2) 도급자는 본 설계서의 제반 내용을 숙지하여야 하며 설계도서의 내용무지로 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

3) 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 감독관이 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

2.3.2 자재 및 품질관리

1) 도급자는 공사 착공전후 시험실시 내용 및 계획서를 요구 시 감독관에게 제출하여야 한다.

2) 도급자는 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설공사 품질시험 규정 시행규칙에 규정된 시험기준, 시험종목 및 시험빈도에 따라 본 공사사에 투입되는 자재에 대한 선정시험, 관리시험을 실시하여야 한다.

3) 현장에서 시험이 불가능할 경우 감독관이 지정하는 기관에 의뢰하여 시행하여야 한다.

4) 자재는 반드시 KS제품을 사용함을 원칙으로 한다.

5) 관급자재는 본 공사 이외에 사용하지 못하며, 작업장 이외의 반출을 금한다.

6) 감독관은 시험결과에 따라 시정을 요구할 수 있으며, 도급자는 이를 지체없이 시정하여 그 결과를 통보하여야 한다.

2.3.3 안전관리

1) 도급자는 고용원이나 기타인의 생명과 건강보호, 도급자 자재, 사급자재, 장비 등의 재산상의 피해예방과 안전사고에 대비하여 필요한 모든 시설물을 비치하여야 한다.

2) 도급자는 공사기간 중에 발생하는 인명의 손실, 재산상의 손실 등에 대하여 항상 기록 보존하여야 하며, 이를 감독관에게 보고하여야 한다.

3) 도급자는 공사기간 중 응급처치 시설을 준비해야 하며, 이의 소재를 종업원에게 상시 주지시켜 두어야 한다.

4) 도급자는 낙석 위험이 있거나 육상 또는 해상장비와 그 인근에서 작업하는 종업원에게는 안전모와 안전화를 착용케 하여야하며, 특히 해상작업 장비에는 구명대를 비치해 두어야 한다.

5) 중층 수하연 양식시설 조성 및 수중시설 투하현장의 안전사고 예방에 유의하도록 조치를 취하여 사고 예방에 철저를 기하여야 한다.

6) 호우, 풍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주지하여 유사시에는 피해가 없도록 응급조치를 하여야 한다.

2.3.4 현장관리

1) 도급자는 다음사항을 주간간격으로 감독관에게 보고하여야 한다.

2) 현장대리인 및 관계 기술자는 현장에 상주하여 공사시행에 관한 사항을 감독관과 협의하여야 하며, 부득이 현장을 벗어날 경우에는 사전에 감독공무원의 승인을 얻어야 한다.

3) 공사 시공 중 감독관 및 발주자의 허가 없이 유수 및 수륙교통에 방해가 되는 공사행위 또는 공공에 해를 끼칠만한 시공방법을 사용하여서는 안 되며, 공사현장의 일반 통행인이 보기 쉬운 장소에 사업명, 발주자 및 공사 도급자명 등을 소정 양식에 따라 안내표지판 등을 설치하여야 한다.

4) 도급자는 해상작업에 따른 항해규칙을 준수하며 대선, 예인선 항해에 위험을 줄 수 있는 기타 해상장비 또는 장애물에는 경고 등을 설치하여 감독관의 지시에 따른다.

2.4 공사의 일시중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며, 중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

1) 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 판단될 때.

2) 도급자가 설계도서 또는 감독관의 지시에 응하지 않았을 때.

3) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정이 될 때.

4) 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 시공이 우려될 때.

2.5 보 고

1) 도급자는 공사 진척사항과 실시공정을 기록하는 공사일보를 감독관의 지시에 따라 제출하여야 하며, 공사진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유와 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

2) 도급자는 시행청의 장에게 제출하고자 하는 모든 서류는 반드시 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

2.6 공사사진제출

본 공사의 사진은 동일 장소에서 동일 방향으로 촬영하고 필요에 따라 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 아래와 같이 감독원에게 제출한다.

1) 착공전 사진.

2) 공사진행 사진.

3) 자재입고 과정 및 입고 현황 사진.

2.7 도급자의 의무

도급자는 다음 사항에 대하여 의무가 주어지며 성실히 이행하여야 한다.

1) 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 충분히 검토하여 시행토록 하고 도급자는 기술적인 사항에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

2) 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

3) 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최종 인계를 받을 때까지 공사목적물을 도급자 부담으로 관리하여 그 책임을 진다.

4) 각종 설계도서는 보안예규에 따라야 한다.

5) 공사용 도로는 통행에 지장이 없도록 항상 양호한 상태로 유지관리 하여야 한다.

6) 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독관이 만족할 때가지 도급자가 대치 복구하여야 한다.

7) 현장 대리인 및 현장직원, 고용원이 불미한 행위를 하거나, 시공에 부적당하다고 인정되어 감독관이 이에 대해 현장직원, 고용원의 교체를 명하였을 때는 도급자는 이에 응하여야 한다.

8) 본 공사사에 대하여 제반검사 결과 처분지시가 있을 시는 이에 따라야 하며 이의를 제기할 수 없다.

2.8 준공검사

1) 도급자는 준공일 1주일전까지 감독관에게 예비준공검사를 필하여야 한다.

2) 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.

3) 공사가 완성되었을 때는 감독관의 지시에 따라 가시설물을 완전히 제거하고 잘 정리한 후 검사를 받아야 한다.

3. 특 별 시 방 서

3. 특 별 시 방 서

3.1 총칙 및 적용

1) 본 시방서는 제주형 해면양식 수중 시험어장(김녕) 조성사업에 적용한다.

2) 이 시방서에 인정되지 않는 사항 및 이에 의하지 않는 사항은 특별 시방서에 준하도록 한다.

3) 설계도 및 특별 시방서에 기재된 사항은 이 시방서에 우선한다.

3.2 일반사항

1) 중층 수하연 양식시설 조성에 종사하는 기술자는 관련 자격증을 소지하고 콘크리트 구조물(앵커) 제작 작업에 종사한 경험이 풍부하거나 이에 준한 자이어야 한다.

2) 제작업자는 설계도에 정해진 제품의 품질들을 확보하기 위하여 중층 수하연 양식시설 조성 제안자에게 기술지도 등에 따라 설계도에 준해 제작한다.

3) 제작 완료된 수하연 양식시설 고정용 앵커는 일정비율의 수량에 대해 수하연 양식시설의 제작년도 등 실명제를 실시하여 수하연 양식시설 한쪽 모서리 상단에 로프와 체결하여 표시하여야 한다.

3.2.1 시공관리

1) 도급업자는 별도로 정하는 본 설계도 및 시방서 기준에 의해 관리를 행하고, 그 기록을 감독원에 제출한다.

3.2.2 검사

1) 도급업자는 수하연 양식시설 제작에 있어서 중요한 공정의 절차 및 그 작업이 완료하였을 경우는 필요에 따라 감독원에게 제출하여 검사 또는 확인을 받아야 한다.

2) 제품검사는 도급업자 또는 현장대리인 및 감독관 입회 하에 검사를 받아야 한다.

3) 도급업자는 검사에 필요한 측정, 자료제출, 기타 처리에 따라 검사원이 지시한 것에 대하여 따라야 한다.

3.2.3 자재

1) 앵커 재료로 사용되는 시멘트는 한국공업규격(KS)의 보통 포틀랜드 시멘트로 한다.

2) 혼화재료 : AE제나 기타의 혼화재료를 사용할 경우에는 제품에 유해한 영향을 미치지 않는 것이라야 한다.

3) 골재 : 골재는 깨끗하고 단단하며, 내구적이고 적당한 입도를 가지며, 점토 덩어리, 유기물, 얇거나 긴 석편 등의 유해한 양을 함유해서는 안 되고 KSF 2526 및 KSF 2527을 따른다.

가. 굵은 골재의 최대 치수는 25mm이하로 한다.

나. 골재는 KS F 2527 (콘크리트용 부순골재)의 제품규격에 적합한 것이어야 한다. 부순 골재와 자연골재 등 다른 골재가 섞여있는 골재는 이 규격에서 제외된다.

다. 골재의 미립분, 기타 유기불순물을 제거하기 위한 방법으로 물과 공기에 의한 세척법을 공유하여 사용하도록 한다. 공기에 의한 세척법은 골재가 골재 이송 콘베이어에 올라가기 전 선풍기 및 에어브러셔를 이용하여 강한 공기를 뿜어 일부 미립분을 제거한 후 콘베이어 벨트에서 5분간 정지시켜 물을 살수하여 세척하도록 한다. 하절기 및 일조량이 충분할 경우에는 골재가 표건 상태가 될 때까지 건조시키며 온도가 낮고 공기중 습도가 70%이상일 때는 콘베이어 벨트 중의 차양 및 건조설비에 충분히 표건 상태를 만들어 사용하도록 한다. 이때 골재 세척수는 집수시설에 모아두고 가라앉은 미립분 및 유기물은 밑부분의 배출구를 통하여 분리하고 윗 부분의 물을 다시 세척수로 리싸이클링하여 이용한다.

4) P.P로프

한국공업규격(KS)의 P.P로프를 사용한다.

5) 품질시험

1) 압축강도 시험 : 압축강도 시험방법 KSF 2405에 준하며, 표준 공시체를 제작하여 시험한다.

3.3 제작

수하연 양식시설은 앵커제작에 있어 거푸집 제작조립, 콘크리트 타설과 거푸집 해체 및 양생의 과정을 거쳐 지정하는 장소까지 운반 시설하여야 한다. 로프 체결은 설계서대로 친승줄, 가릿줄, 주 로프순으로 연결 체결하고, 상승연결고리는 상부 양성틀 4지점 모서리에 체결한다.

3.3.1 자재반입

1) 재료는 규격이 다른 것이나 불량품이 혼입되지 않도록 정돈하여 양호한 상태에서 보관한다.

2) 보관은 재료의 식별이 용이하도록 조처한다.

3) 본 공사용 자재는 도급자와 감독관의 책임하에 직접 인수, 보관하여야 한다.

3.3.2 P.P 로프

KS규격의 1급품을 사용하고 허용 인장력을 사전에 확인하여 기록하는 것으로 한다.

3.3.3 현장제작

1) 수하연 양식시설을 선적할 수 있는 바지선이 접안 가능한 장소에 제작장을 두어야 한다.

2) 제작장의 부지는 최소한의 작업장을 갖추어야 한다.

3) 강한 바람, 우천을 대비한 최소한의 작업장을 갖추어야 한다.

4) 제작에 필요한 각종 장비를 갖추어 안전에 만전을 기한다.

5) 소음, 공해 등에 대해 주변 민원이 없도록 조치를 취한다.

6) 전기인입은 전기안전공급 일반기준에 따른다.

3.3.3.1 P.P 로프 체결

1) 설계서에 명시된 치수에 맞도록 체결 조립하여야 한다.

2) 수중 주로프를 체결 시 반드시 간격을 유지하여 체결하고, 이음부위가 해체되지 않고 위치가 변경되지 않아야 한다.

3.3.3.2 앵커 거푸집 제작조립

1) 거푸집의 용접부를 아크용접, CO2용접, 혹은 가스-쉴드(Gas-Shielded)아크 반자동용접, 셀프-쉴드(Self-Shielded) 반자동용접, 서버머지드(Submerged)아크 자동용접으로 하는 경우에 적용하는 것으로 한다.

2) 용접재료의 선정은 KS 규격품을 원칙으로 한다.

3) 용접에 앞서 홈이 적절한가, 부적절한가를 확인하고, 부적절한 홈의 경우에는 용접을 하여서는 안되며, 홈을 수정하고, 용접에 지장이 없는 상태가 되도록 하여야 한다.

4) 모재의 용접면은 용접에 앞서 슬래그, 수분, 녹, 기름, 도료, 기타 용접에 지장을 주는 것을 제거하여야 한다.

5) 거푸집은 조립전에 박리제를 도포하여 콘크리트 타설시 부착을 방지하여야 한다.

6) 거푸집, 철근 조립 시는 수하연 양식시설 고정용 앵커의 연결고리가 튼튼하게 제작될 수 있도록 하여야 한다.

3.3.3.3 거푸집 해체

1) 거푸집 해체 시에는 반드시 감독관이 승인을 득하여야 하며, 모서리 등이 파손되지 않도록 한다.

3.3.3.4 타설 및 양생

1) 콘크리트를 치밀하게 타설하기 위하여 진동기(바이브레타 혹은 거푸집진동기)나 수타기를 사용하여야 하며 콘크리트 타설시 운반된 콘크리트는 재비빔을 하여 균일한 수하연 양식시설 고정용 앵커가 제작되도록 하여야 하고, 양생은 거푸집의 효율과 거치 및 운반 투하시 파손되지 않도록 적절한 방법으로 충분히 양생하여야 한다(습윤, 살수양생).

3.4 제품검사 및 운반

3.4.1 검사일반

1) 콘크리트 압축강도는 재령 28일에 210 kg/㎠이상이어야 한다.

2) 콘크리트 압축강도 시험은 제반 시험규정에 의거 실시하여야 한다.

3.4.2 제품검사

1) 자재검사

가. KS규격 적용.

나. 자재 시험 보고서가 누락되었을 때는 확인하여 제출할 수 있다.

다. 입고 자재가 적용 규격 및 기준의 요구 사항과 불일치하면 불일치보고서를 작성하고, 적용규격 및 기준에 맞는 자재를 입고시켜야 한다.

3.4.3. 중층 수하연 양식시설 시설, 유지·관리

1) 중충 수하연 양식시설 고정용 앵커 거치

가. 수하연 양식시설 고정용 앵커 운반선이 도착하면 운반선(대선) 전후에 앵커를 투묘하여 바람이나, 파도, 조류 등에 의하여 운반선의 위치가 이동되지 않도록 고정시킨 후 시설하여야 한다.

나. 수하연 양식시설 고정용 앵커 투하 해역에서는 수하연 양식시설 조성 위치에 대형 부자와 PP로프를 이용 중충 수하연 양식시설 조성이 용이하도록 사전 부표를 감독관 및 입회 공무원의 지시에 따라 설치하여야 한다.

다. 수하연 양식시설 고정용 앵커는 3ha(200m*145m) 넓이에 총 8set(16개 앵커)를 설치하며, 1개의 앵커용 어초는 15톤으로 하며, 앵커어초의 시설수심은 30~40m 법위에 설치한다. 시설 위치에 대해서는 감독관의 지시를 별도로 받아 현수거치 하여야 하며, 시설지역은 발주처에서 제공한 좌표에 따른다.

라. 앵커와 연결된 로프는 최대한 팽팽하게 당겨서 옆으로 늘어지지 않도록 시공하며, 수심 15m를 유지하도록 부표의 길이를 정한다.

2) 시공상 감독관의 입회 또는 승인을 받아야 할 때는 필히 사전에 통보하여야 한다.

3) 중충 수하연 양식시설 제작 부지는 시공자가 제작수량에 적합한 제작부지를 확보하여 시행청의 확인, 검토를 받아 사용하여야 하며, 기타 관계법령 및 민원발생 등으로 인한 문제가 발생치 않도록 하여야 한다.(단, 설계상 적용 선적지의 위치변경 등으로 인한 공사비 증액요인 발생시 시공자 부담으로 한다.)

4) 중충 수하연 양식시설 제작장 선정

가. 중충 수하연 양식시설 제작 수량에 적합한 면적 및 선적이 가능한 항만시설 등 부지여건이 수반되어야 한다.

나. 작업장 소음, 진동 및 대형 차량 진.출입 등에 따른 먼지발생, 도로파손 등 민원발생 요인이 없어야 한다.

다. 시공자는 중충 수하연 양식시설 제작으로 어항시설 등 이용에 지장이 없도록 하여야 한다.

라. 중충 수하연 양식시설 제작, 하역 및 운반 시 물양장 등 어항시설물의 훼손이 우려 되므로 예방대책을 강구 하고 훼손시에는 완전복구 조치하고 그 비용과 책임을 시공자가 부담하여야 한다.

마. 사용기간 종료 시에는 현장정비를 철저히 하여야 한다.

바. 시공자는 중충 수하연 양식시설 제작장 내에 일체의 고정시설물을 시설할 수 없으며 공사완료 후 제작장을 원상복구 조치하여 민원발생이 일어나지 않도록 하여야 한다.

사. 시공자는 어항단지 내의 미관을 해치는 일이 없도록 하고 야적물은 언제나 정연하게 야적하고 주변을 청결하게 정리 정돈 하여야 한다.

5) 앵커와 하부 고정틀의 연결

가. 수중 고정용 앵커의 거치가 완료되면 육상에서 조립한 하부 고정틀을 앵커와 연결한다.

나. 하부 고정틀은 표층으로부터 수심 30~40m 사이에 수평을 유지하도록 모서리 앵커부이와 연결된 로프와 연결한 후 각 앵커와 고정틀을 연결하며 파도, 조류 등에 이동이 발생하지 않도록 해야 한다.

다. 특히 앵커줄과 고정줄을 연결하는 샤클이나 U 클립이 파도나 조류 등과 같은 반복적인 움직임에 풀리지 않도록 조치를 취해야 한다.

7) 수하연 양식시설의 유지·관리

가. 수하연 양식시설의 유지·관리는 수중 앵커와 하부 고정틀의 연결이 완료되는 시점부터 수중에서 실시하도록 한다.

나. 양성틀의 시설이 완료되기 전에는 수중 앵커의 이동이나 전도 등의 발생여부와 하부 고정틀의 수평유지와 각 d연결부위에서 발생할 수 있는 다양한 현상에 대하여 주의 깊게 관찰해야 하며, 이상 발생시 도급자의 책임하에 신속히 대처하여 안전성 확보에 이상이 없도록 유의하여야 한다.

다. 상부 양성틀이 하부 고정틀과 연결되어 수하연 양식시설 조성이 완료되면 1달 이내에 저층의 앵커와 주변에서 발생할 수 있는 파손, 이동, 전도, 매몰 등에 대하여 점검과 앵커와 로프의 연결상태 등의 관리를 실시해야 한다.

라. 이상 발생시 신속하게 시행청의 감독관에게 보고하여야 하며, 도급자가 판단하여 수하연 양식시설 전체에 문제가 발생하지 않을 간단한 문제에 대해서 자체적으로 보수, 보강을 실시한 후 감독관에게 보고하도록 한다. 수하연 양식시설 전체의 안전성에 이상이 발생할 정도의 중요한 문제에 대해서 문제 발생 상태 등을 사진이나 수중 비디오로 촬영한 후 문제 발생경위에 대한 보고서와 함께 시행청에 보고하고 협의를 통하여 보수, 보강을 실시해야 한다.

4. 도    면

4. 도  면