□위   치   도□

과업대상위치

북빈물양장 대체부두

한진조선

부산항대교

북 항

감만시민부두

북항재개발지구

영도구청

목       차

Ⅰ.    설 계 설 명 서

Ⅱ.    예 정 공 정 표

Ⅲ.    공 사 시 방 서

Ⅳ.    설 계 예 산 서

Ⅴ.   수 량 산 출 서

Ⅵ.    설 계 도 면(별첨)

Ⅰ. 설  계  설  명  서

Ⅰ. 설  계  설  명  서

가. 공  사  명 : 청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사

나. 위       치 : 부산광역시 영도구 청학동 217-33번지 일원(수산물센터 제로원 앞)

다. 공사의 목적 : 청학동 제로원 수산물직매장 앞 해안도로에 싱크홀이 발생하였으며 신속한 복구가 없이 방치시 해안도로 붕괴의 위험이 있고, 이로 인한 차량 안전사고 및 인명피해 등이 우려되어 조속히 복구공사를 시행하여 차량안전사고 및 인명피해를 방지하고자 하는데 그 목적이 있음

라. 공사의 개요

1)	토공	-	기존 구조물 및 포장깨기	:	36.1 ㎥			-	PE관 접합 및 부설(Φ400mm)	:	33.0 m
		-	와이어쏘 절단	:	7.71 ㎡			-	관보호공(L=1.2m)	:	7 개소
		-	터파기	:	47.9 ㎥			-	잡석부설 및 다짐	:	16.52 ㎥
		-	사석운반 및 투하	:	117.8 ㎥			-	해수취수인입관 철거 및 재설치	:	1.0 식
		-	기초고르기	:	16.0 ㎡	5)	포장공	-	콘크리트포장포설(t=20cm)	:	22.4 ㎥
2)	블럭설치공	-	블럭제작 및 설치(3.0x2.0x2.3H)	:	2.0 ea			-	보조기층 포설 및 다짐(t=30cm)	:	33.6 ㎥
		-	블럭제작 및 설치(2.0x4.0x2.0H)	:	1.0 ea	6)	부대공	-	가설창고외	:	1.0 식
3)	상치콘크리트공	-	상치콘크리트 설치	:	4.0 m			-	오탁방지막 설치 및 철거	:	2 Span
		-	파손반파공 보수	:	1.5 m			-	장비운반 및 선단회항	:	1.0 식
4)	관로공	-	임시 해수취수관 설치 및 철거	:	1.0 식			-	공사확인 수중 촬영	:	1.0 식
		-	배수용 강관 접합 및 부설(Φ600mm)	:	9.0 m			-	시험비	:	1.0 식
		-	관보호콘크리트	:	8.0 m			-	사다리설치	:	1 개소

마. 주요자재내역

1) 관급자재

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
레 미 콘	25-30-12	㎥	51.0
레 미 콘	25-24-12	㎥	34.3

2) 주요자재

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
레 미 콘	25-30-12	㎥	51.0	관급
레 미 콘	25-24-12	㎥	34.3	관급
사 석	0.03㎥급이하	㎥	129.0
필터매트	10t/m	㎡	23.2
와이어로프	ø25.0m/m	m	40.0
와이어로프	ø16.0m/m	m	103.0
오탁방지막	15ton,1.5mx20m	Span	2.0
앵 커	(닻형)	ea	19.0
사다리	STS	개소	1.0
와이어메쉬	(4x100x100)	㎡	130.0
보조기층	혼합골재	㎥	43.3
비 닐		㎡	112.0
고압나선호스	Φ75mm	m	105.0
고압나선호스	Φ100mm	m	92.0
고압나선호스	Φ150mm	m	105.0
강 관	Φ600mm	m	9.0
이중벽 PE관	Φ400mm	m	33.0
수도용 PE 직관	Φ100mm	m	50.0
수도용 PE곡관	Φ100mm	ea	6.0
수도용 PE 플랜지단관	Φ100mm	ea	8.0
환봉연결구	LS, D400mm, W350	ea	7.0
환봉연결구	LS, D600mm, W450	ea	2.0

바. 공사기간

본 공사의 공사기간은 착공일로부터 3개월로 한다.

단, 다음의 경우에 시행청의 승인을 득하여 공사기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 천재지변 또는 일기불순으로 인하여 본 공사를 시행할 수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우

2) 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우

3) 시행청의 공사중지 명령에 의거 작업이 중단되었을 경우

사. 유의사항 및 설계변경조건

본 공사의 설계도서는 2019년 건설공사 표준품셈과 부산시, 영도구 설계지침서, 항만 및 어항 설계기준 및 설계 당시까지 파악된 자료에 의하여 작성하였으며, 아래사항 발생시 설계변경 할 수 있다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3) 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건의 내용에 의거 변경사유 발생시 변경

4) 기타 설계변경 사유가 발생한 경우

Ⅱ. 예  정  공  정  표

공 종	보할 (%)	공 사 기 간 ( 3 개 월 )						비 고
		15일	30일	45일	60일	75일	90일
토공	30.0	7.5	7.5	7.5	7.5
블럭설치공	10.0	3.3	3.3	3.4
상치콘크리트공	5.0				20.	1.5	1.5
관로공	30.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
포장공	5.0					2.5	2.5
부 대 공	20.0	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4
단위공정율(%)	100	20.2	20.1	20.2	18.8	13.3	7.4
누계공정율(%)	100	20.2	40.3	60.5	79.3	92.6	100

Ⅲ. 공  사  시  방  서

Ⅳ. 설  계  예  산  서

설계년월일

2019년 5월

설계자

심  사

담  당

과  장

2019년도

청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사 설계예산서

▣ 공 사 개 요

1)	토공	-	기존 구조물 및 포장깨기	:	36.1 ㎥			-	PE관 접합 및 부설(Φ400mm)	:	33.0 m
		-	와이어쏘 절단	:	7.71 ㎡			-	관보호공(L=1.2m)	:	7 개소
		-	터파기	:	47.9 ㎥			-	잡석부설 및 다짐	:	16.52 ㎥
		-	사석운반 및 투하	:	117.8 ㎥			-	해수취수인입관 철거 및 재설치	:	1.0 식
		-	기초고르기	:	16.0 ㎡	5)	포장공	-	콘크리트포장포설(t=20cm)	:	22.4 ㎥
2)	블럭설치공	-	블럭제작 및 설치(3.0x2.0x2.3H)	:	2.0 ea			-	보조기층 포설 및 다짐(t=30cm)	:	33.6 ㎥
		-	블럭제작 및 설치(2.0x4.0x2.0H)	:	1.0 ea	6)	부대공	-	가설창고외	:	1.0 식
3)	상치콘크리트공	-	상치콘크리트 설치	:	4.0 m			-	오탁방지막 설치 및 철거	:	2 Span
		-	파손반파공 보수	:	1.5 m			-	장비운반 및 선단회항	:	1.0 식
4)	관로공	-	임시 해수취수관 설치 및 철거	:	1.0 식			-	공사확인 수중 촬영	:	1.0 식
		-	배수용 강관 접합 및 부설(Φ600mm)	:	9.0 m			-	시험비	:	1.0 식
		-	관보호콘크리트	:	8.0 m			-	사다리설치	:	1 개소

◎

총공사비

: 일금

일억팔백구십오만팔천만원

(￦

108,958,000

)

도급액

: 일금

구천팔백구십삼만원

(￦

98,930,000

)

관급자재대

: 일금

칠백일십만원

(￦

7,100,000

)

폐기물처리비

: 일금

이백구십이만팔천원

(￦

2,928,000

)

일위대가표

단가산출서

중기손료

노임단가

자재단가

견적및기타자료

Ⅴ. 수  량  산  출  서

Ⅵ. 설  계  도  면(별첨)