1. 일  반  시  방  서

< 목     차 >

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12	일 반 사 항 제 출 서 류 장비 , 설비 및 자재 측 량 도 면 공 사 관 리 공 사 의 품 질 관 리 보 안 관 리 공 사 기 록 의 유 지 안 전 및 보 건 관 리 환 경 관 리 기 타 사 항	1 4 6 7 9 13 16 18 19 21 25 27

일 반 시 방

일반사항

적용범위

이 시방서는 부산광역시 영도구에서 발주하는『청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사』를 수행함에 있어서 감독관과 계약상대자가 지켜야 할 사항을 규정한 것으로서, “일반시방”과 “특별시방”으로 구분되며, “일반시방”은 공사시행과정에서 지켜야 할 일반적인 사항을, “특별시방”은 공사시행과정에서 지켜야 할 기술적인 사항과 일반시방에서 규정되지 않은 사항 또는 설계상 해석의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 등을 규정한다. 기술시방에 별도로 규정되지 않은 사항은 일반시방 규정을 따라야 한다.

이 공사는 계약문서에 규정된 바와 같이 공사목적물의 건설 및 공사중 유지관리에 필요한 모든 자재, 설비, 장비의 공급과 계약상으로 『청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사』를 완성하는 것으로 규정한다.

이 공사에 인접하여 다른 계약상대자에 의해 시행되는 인접공사는 다음과 같다.

『청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사』관련 토목공사 등

이 장에 규정되지 않은 일반시방 관련사항은 제법규(공사계약관계법, 공사운영관계법) 및  제규정(계약관련예규, 공사관계시공기준, 자재관련 품질기준), 기타 전문시방서에 따른다.

이 시방서에 따로 정하지 않은 사항에 대해서는 공사계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)에 정하는 바에 따른다.

용어의 정의

이 시방서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의는 다음과 같다.

“발주청 또는 발주자”라 함은  관련규정에 따라 본 공사의 공사업무를 담당하고 있는 기관과 동 기관 소속의 담당자를 말한다.

“수급인”이라 함은 공사계약일반조건 제2조의 계약상대자를 말하며 본 시방서에서 수급인 또는 도급자라고 표기 된 경우도 또한 같다.

“감독관”이라 함은 공사계약일반조건 제2조 제3호의 공사감독관으로서 발주처에서 임명한 기술직원 또는 그의 대리인이나 또는 건설기술관리법 제 27조의 규정에 의하여 책임감리을 하는 공사에 있어서는 본 공사의 감리을 수행하는 감리원을 말한다. 본 시방서에서 감독원, 감독관, 감리원이라고 표현 될 수 있다.

“도급장비 및 자재”라 함은 이 계약에 의해 수급인이 공급할 장비와 자재를 말한다.

“승인”이라 함은 수급인의 제안에 대하여 감독관이 그 권한 범위 내에서 서면 또는 구두로 동의하는 것을 말하며 이 승인이 수급인의 책임이나 의무를 경감시키거나 면제시키는 것은 아니다.

“현장대리인”이라 함은 공사계약일반조건 제14조의 공사 현장대리인을 말하며, 공사에 대한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행 할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

적용기준 및 표준시방

이 공사에 있어서 일반적으로 적용하여야 할 기준

공사수행에 있어서의 적용기준은 설계서에 따르되 설계서에 규정되어 있지 않은 사항은 동등 이상의 국제규격 또는 건설기술관리법 제34조(설계 및 시공기준)의 규정에 의한 건설공사 표준시방서, 건설공사 설계기준, 건설공사 시공기준 및 산업표준화법 제10조(한국산업규격)규정의 한국산업규격(KS)에 의한다. 단, 이와 같은 기준이 설계서의 내용과 다를 경우에는 이 공사의 설계서가 우선한다.

위 항의 건설공사 시방서 등은 다음과 같다.

항만 및 어항공사 전문시방서 (해양수산부)

항만 및 어항공사 설계기준 (해양수산부)

토목공사 표준일반시방서 (국토교통부)

콘크리트 표준시방서 (국토교통부)

구조물 기초 설계기준

건설공사 품질관리검사기준 (국토교통부)

도로공사 표준시방서(국토교통부)

이 시방서를 포함한 설계서에 완전하게 규정되어 있지 않은 모든 자재나 설비 등을 공사에 사용하고자 하는 경우에는 국제적으로 공인 받고 있는 표준이나 기준 또는 한국산업규격(KS)에 적합하거나 유사한 공사에서 사용한 예가 있는 것으로 하되 감독관의 승인을 받아야 한다.

공사관계자

감독관

감독관의 업무는 계약일반조건 제16조 제1항에 규정한 감독관의 업무범위에 따른다.

발주자는 위 항에서 정한 감독관의 업무범위를 추가 또는 축소할 수 있으며, 이 경우 수급인에게 그 내용을 통보해야 한다.

전문기술자

수급인은 건설산업기본법 제40조 제1항의 규정에 따라 공사시행에 필요한 종목에 대한 전문지식과 경험이 있는 기술자를 현장에 배치하여야 한다.

현장대리인

현장대리인은 감독관의 승인을 얻지 아니하고는 정당한 사유없이 현장을 이탈하여서는 아니된다.

시방문구의 해석

이 시방서의 문구 해석에 있어 수급인과 감독관간에 의견의 차이가 발생하는 경우에는 사전에 충분히 상호 협의하여 시공에 지장이 없도록 조정하여야 한다.

제출서류

착공신고서

수급인은 계약서에 명시된 계약일을 기준으로 5일 이내에 서면으로 착공신고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

위 항의 착공신고서에는 다음의 각 서류가 포함되어야 한다.

공사예정공정표(공정별 인력, 자재, 장비투입계획서 포함)

현장대리인계

다음 각 사항이 첨부된 현장조직표

전체 건설기술자 경력사항 확인서

안전관리자 선임계

품질관리자 선임계

특수조건 제18조의 품질관리계획서

안전시설 설치계획 및 안전교육계획서

시공에 따른 환경오염방지계획서

보안각서

착공전 현장사진

공사예정공정표

수급인은 공사예정공정표를 작성할 경우 공사시행을 위하여 동원하는 인력, 자재, 장비 및 세부공사계획 등을 포함한 공사예정공정표를 PERT/CPM 또는 감독관이 요구하는 형식으로 작성하여야 한다.

계약문서에 첨부된 예정공정표는 계약공사기간을 나타내며 수급인은 계약체결시 제안된 예정공정표 및 시공방법에 근거하여 대안을 제시할 수 있으나 계약공사기간을 초과하여서는 아니된다.

예정공정표를 변경하는 경우 기술적 판단근거를 포함하는 상세한 사유서를 첨부하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

시공계획서

수급인은 당해 공사 수행전 시방서와 입찰당시 발주자가 제시한 도면 및 착공신고서의 공사예정공정표에 의거한 시공계획을 수립하고, 시공순서와 방법 등에 대하여는 계획수립 전에 감독관과 협의하여야 한다.

시공계획서에는 공사예정공정표와 다음의 사항이 포함되어야 한다.

시공방법(공사시행의 순서, 방법, 특수공법 등)

가설공사(계획도면, 구조계산서 포함)

장비 및 기계․기구류의 종류, 제원, 성능, 반입과 배치 및 사용계획 등

하도급 계획(공종, 수량, 시기, 사유 등)

공사수행에 따른 환경대책

기타 문제점에 대한 대책

수급인은 위 시공계획서를 감독관이 요구하는 날 이전까지 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

감독관은 수급인의 시공계획서를 검토하여 제출일로부터 15일 이내에 검토의견을 수급인에게 통보하여야 한다.

장비, 설비 및 자재

수급인이 공급하는 건설장비, 설비 및 자재

수급인은 발주자가 공급하는 건설장비, 설비 및 자재를 제외하고는 계약내용에 따라 본공사 및 가설공사에 필요로 하는 모든 설비 및 자재와 기타 공사수행, 완성, 유지에 필요한 것을 공급하여야 한다.

수급인은 건설장비를 반입할 경우에는 작업 능력 면에서 충분히 공사를 수행할 수 있는 장비를 공급하여야 하며, 이들 장비가 그 공사 수행에 있어 미흡할 경우 감독관은 다른 장비로 대체하도록 지시할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

수급인은 규정된 설비 및 자재를 구매하는데 최선을 다하여야 한다. 그러나 설계서에 규정된 자재가 없을 때에는 감독관의 승인을 얻어 동등 이상의 대체설비 또는 대체자재를 공급할 수 있다.

도급자재

수급인은 사용하고자 하는 도급자재의 검사를 받기 위해서 수급인 부담으로 감독관 요구시 견본제출 등의 방법으로 자재검사를 받아야 하고, 검사결과 합격된 자재에 한하여 공사에 사용할 수 있다.

감독관의 검사를 받지 않거나 검사에 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우, 감독관은 이에 대한 시정을 지시할 수 있으며 수급인은 감독관의 지시에 따라야 한다. 불량자재를 사용하여 발생되는 문제점들은 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

수급인은 자재검사 요청시 공인된 기관의 시험성적서를 첨부하여야 하며, 또한 다음 사항을 포함한 공사 주요자재에 대하여는 감독관이 요구할 경우 품질시험을 실시하고 그 시험성적서를 첨부하여야 한다.

자재검사 요청은 승인된 공정계획에 따라 해당공종의 공사착수 30일 전까지 하여야 하며, 이의 지연으로 인하여 발생되는 모든 불이익은 수급인이 부담하여야 한다.

자재검사결과 불합격된 자재는 다른 것으로 대체하여 10일 이내에 재검사를 요청하여야 하며, 재검사 결과 재차 불합격되었을 경우에는 그 횟수에 상관없이 최종검사 요청을 해당공사 착수 7일 전까지 하여야 한다.

수급인은 현장에 반입되어 도급자재 검사에 합격한 자재를 작업에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고 감독관의 점검이 쉽게 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

수급인은 자재 검사에서 불합격한 자재를 지체없이 공사현장으로부터 반출하여 합격품과 혼동되지 않도록 하여야 한다.

필요에 따라 감독관이 재시험을 요구할 경우 수급인은 수급인의 부담으로 공인된 기관에 의뢰하여 요구품목에 대한 시험을 시행하여야 하며 감독관에게 시험결과를 제시하여 승인을 얻은 후 사용하여야 한다.

수급인은 시방규정에 적합한 자재를 구매하기 위하여 최선을 다하여야 한다. 그러나 부득이한 사정으로 시방서에서 요구되는 품질이나 규격의 자재를 사용할 수 없는 경우에는 사전에 서면으로 감독관의 승인을 받아 대체자재를 사용할 수 있다.

측 량

측량의 종류

수급인은 다음의 사항을 포함한 공사시행에 필요한 측량업무를 수행함에 있어 모든 인력, 장비, 자재 및 기술 등을 제공하여야 한다.

공사에 관한 모든 지점의 표시를 포함한 측량

공사 시행전 측량

공사 시행과정 측량(각종 검사, 점검 등을 포함)

공사 완공 측량

기준점

수급인은 주기준점 및 보조기준점의 설치위치, 방법 등을 포함한 측량작업계획을 수립하여 작업 전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

수급인은 이 공사에 기준점이 되는 측량성과로 국립지리원이 설치한 삼각점, 수준점, 국립해양조사원이 설치한 T.B.M 등을 이용하여야 하며, 발주자가 제공한 이 공사의 실시설계 측량성과와 차이가 있을 때 관련자료를 감독관에게 제출하고 그 내용에 대하여 필요한 조치를 받은 후 이용하여야 한다.

수급인은 이 공사구역내에 설치되어 있는 국립지리원의 삼각점, 수준점 등이 공사시행으로 훼손 또는 소멸될 우려가 있을 때 감독관에게 보고한 후 관련법령에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

수급인은 주기준점 및 보조기준점을 설치하고 감독관의 확인을 위하여 필요한 장비, 인력 및 재료 등을 제공하여야 하며, 감독관은 확인 결과 수급인이 설치한 기준점 또는 모든 측량성과가 의심스러울 경우 재측량을 지시할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

수급인은 공사수행을 위하여 설치한 기준점을 임의로 이설할 수 없다. 그러나 공사수행상 필요하여 부득이 이설 하여야 할 경우에는 감독관의 승인을 받아야 하며 이설후 검측을 시행하고 그 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

수급인은 보조기준점 등 기타 측량기준점을 그 위치나 높이가 변동되지 않도록 적절하게 보호하여야 한다. 공사가 진행되는 과정에서 보존할 수 없게 될 경우에는 감독관에게 보고하고 지시에 따라 이설 하여야 한다.

모든 시설물의 기준점은 감독관의 지시에 따라 설정하되, 준공 후 유지보수 등을 고려하여 사후관리에 편리한 위치에 영구보존이 가능한 방법으로 설치하여야 한다.

본 공사의 수준측량의 기준점은 발주처로부터 인수하거나 발주처의 승인을 받은 인근에 설치된 표석을 사용한다.

측량기술자

측량에 참여하는 기술자는 해당분야 국가기술자격증을 소지한 자 또는 그에 상응하는 학력 및 경력 등을 갖춘 자로서 감독관의 승인을 받아야 한다.

기기 및 장비

측량업무에 사용되는 측량기기 및 부속장비들은 시방서 등 설계서에서 요구하는 정밀한 시공을 할 수 있는 적절한 제품과 종류로서, 항상 사용 가능한 상태로 정비 및 조정되어 있어야 하고 필요한 경우 감독관 혹은 감독관이 지정하는 전문가에게 점검을 받아야 한다.

수급인은 측량작업 또는 감독관이 확인 등에 사용할 수 있도록 측량기기를 공공측량 기준 같은 규격 및 정도를 갖춘 것이거나 동등 이상의 기기를 갖추어야 하며, 사전에 감독관의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니한다.

측량성과

수급인은 공사의 모든 부분에 대한 위치, 치수를 정확하게 측량하여야 하며, 측량을 완료한 후 측량성과표를 감독관에게 제출하여야 한다.

모든 야장, 계산서, 지도 등 위에서 언급된 측량 성과들은 측량이 종료된 후 즉시 감독관에게 보고되어야 하며 적절히 정리되어 시공에 편리하게 이용될 수 있도록 하여야 한다.

감독관의 승인을 받은 측량성과는 계약을 이행하는데 따른 공사물량의 측정근거로 이용된다.

도 면

입찰당시 발주자가 제시한 도면

입찰당시 발주자가 제시한 도면은 계약후 계약서류의 일부분으로 수급인이 계약에 의거 수행하여야 할 공사의 범위를 표시하고 있으며 시방서 및 타 계약서류와 함께 공사의 시공 및 유지관리의 기준이 된다.

수급인은 계약후 시방서와 입찰당시 발주자가 제시한 도면 등의 설계서를 주의 깊게 검토하고 착오를 발견하였을 때에는 공사시행 전에 감독관에게 서면으로 통지하여야 한다.

이 시방서와 입찰당시 발주자가 제시한 도면 사이에 해석상의 차이가 있을 때에는 시방서가 우선한다.

시공상세도

시공상세도는 공사에 직접 사용되는 도면으로 입찰당시 발주자가 제시한 도면을 근거로 수급인이 작성하며 다음과 같은 사항이 단독 혹은 복합된 총체적인 것을 말한다.

도면

계획안

도해

설명서

배치도

시험자료

모형도

시공상세도는 입찰당시 발주자가 제시한 도면에 표시된 영구구조물의 목록과 일치되도록 작성되어야 하며, 시공상세도 작성과정에서 착오가 발생하였을 경우에는 감독관의 승인 유무와 상관없이 수급인의 부담으로 도면을 재작성하거나 재시공하여야 한다.

제출된 시공상세도는 발주자의 필요에 따라 다른 공사에 다른 방법으로 사용될 수 있다.

수급인은 본공사 및 가설공사를 포함하는 모든 공사에 필요한 시공상세도를 작성하여야 하며, 입찰당시 발주자가 제시한 도면은 감독관의 승인을 받아 시공용으로 사용할 수 있다.

작성된 시공상세도는 다음과 같은 과정으로 감독관의 승인을 받아야 한다.

수급인은 승인된 공정계획에 따라 당해 공종의 공사착수 10일 전까지 시공상세도 및 관련계산서 등을 제출하여야 하며, 이의 지연에 따른 책임은 수급인에게 있다.

승인 요청시 각 3부를 제출하며, 원안 승인의 경우 3부를 추가로 제출하여야 한다.

조건부 승인의 경우 최종완성된 시공상세도 등은 6부를 제출하여야 한다.

반려하는 경우에는 위 (2)호와 동일한 방식으로 하여야 한다.

승인을 요청하는 모든 시공상세도 등은 계약체결후 발주자가 제공하는 □설계서작성기준□에 따라 작성하여야 하며, 제출할 도면에는 공사명, 도면명, 축척, 작성일, 도면번호를 기재하고 현장대리인이 서명하여야 한다.

수급인은 제출된 시공상세도가 원안 승인되는 경우에는 즉시 해당공사를 착수할 수 있으며, 감독관은 해당도면에 적색으로 “승인”  표시를 하여 통보하여야 한다.

수급인은 제출된 시공상세도가 조건부 승인되는 경우에는 제시된 조건(또는 수정요구사항)에 유의하여 해당공사를 착수할 수 있으며, 감독관은 해당도면에 수정될 사항을 기재하고 “조건부 승인”을 표시하여 통보하여야 한다. 수급인은 조건부 승인이 표시된 시공상세도를 받은 후 5일 이내 최종승인을 위한 시공상세도를 재 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

수급인은 제출된 시공상세도가 반려될 경우에는 해당공사를 착수하여서는 안되며, 감독관은 해당도면에 반려하는 사유를 기재하고 “반려”를 표시하여 통보하여야 한다. 수급인은 이를 통보 받은 후 10일 이내에 재 작성하여 승인요청하여야 하며, 재 제출된 도면이 재차 반려되었을 경우 그 반려 횟수에 상관없이 최종승인을 위한 도면은 해당공사 착수전 7일까지 제출되어야 한다.

수급인은 제출된 시공상세도가 취소되는 경우 해당공사를 시행할 수 없으며 감독관은 해당도면에 취소하는 사유를 기재하고 “취소”를 표시하여 통보하여야 한다.

수급인은 조건부 승인 또는 반려된 경우에 대하여 재 제출시 수정 또는 변경된 부위를 표시하여야 하며, 필요시 별도 사유서를 작성하여 통보할 수 있다.

수급인이 승인 혹은 재승인을 위하여 감독관에게 시공상세도면을 제출한지 15일이 경과할 때까지 감독관의 검토결과를 통보 받지 못하는 경우에는 감독관의 승인을 받은 것으로 간주한다.

시공상세도의 작성 및 제출과정에서 감독관의 검토나 승인을 받았다고 할지라도 수급인이 시방서 및 기타 다른 표준시방서, 기준상의 준수사항에 대한 의무나 공사품질 및 최종공사 목적물의 완성에 있어서 착오, 누락 등에 대한 책임을 면제받는 것이 아니다.  다만, 수급인이 시공상세도를 제출할 때 계약(시방서 등)에 위배될 수밖에 없는 사유를 별도서류로 작성하여 승인 받았을 경우에는 그러하지 아니한다.

시공상세도의 수량산출 및 대가 지불

대가의 지불을 위한 시공상세도의 수량은 A1 규격 이상의 크기로서 감독관의 최종 승인을 받은 도면의 매수로 산출한다. 단, 일식금액으로 지정된 가설비공사 등의 도면과 동일한 도면의 복사본, 도면표지 및 입찰당시 발주자가 제시한 도면이 그대로 시공에 적용이 될 경우에는 수량산출에서 제외된다.

수급인은 공사시행전 발주자가 제공하는 목록에 따라 공사의 진행단계별로 시공상세도를 작성하여야 하며, 이는 대가지불을 위한 도면의 수량에 포함된다.

수급인은 현장여건 변경에따라 시공상세도가 필요한 경우에는 도면을 작성하여야 하며, 이는 대가지불을 위한 도면의 수량에 포함된다.

감독관은 계획변경에 따라 시공상세도가 필요한 경우 수급인에게 도면작성을 지시할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다. 이 경우 수급인이 작성하는 시공상세도는 대가지불을 위한 도면의 수량에 포함된다.

수급인은 일반조건 제19조 제2항의 경우에 시공상세도를 작성하여야 하며, 이는 대가지불을 위한 도면의 수량에 포함되지 않는다.

시공상세도의 작성 및 제출에 대한 비용은 작업의 난이도에 따라 단순, 보통, 복잡으로 구분하여 수급인이 산출내역서에 입찰한 관련 지불항목(unit price：매)으로 지불되며, 이 비용에는 다음 각호의 사항이 포함된다.

해당공사의 규모 및 특성에 따라 시공상세도 작성에 투입된 인건비

시공상세도 작성에 소요되는 트래싱지, 청사진, 복사, 전산디스켓 등의 재료비, 소모품비 등

그외, 시공상세도 작성에 소요되는 경비 등

시공상세도를 작성하기 위해 구조계산 등의 기술검토가 필요한 경우에는 그 내용에 따라 감독관의 지시 및 승인 후 수급인이 산출내역서에 입찰한 관련 지불항목의 일식금액으로 지불하되, 공사 시행시 감독관이 인정하는 집행실적에 따라 금액을 정산 지불한다.

준공도면

수급인은 준공 및 유지관리를 위한 도면 3부를 별도로 작성하여야 하며, 감독관이 요구하는 시기에 제출하여야 한다.

준공도면은 입찰당시 발주자가 제시하는 도면과 최종 승인된 시공상세도를 근거로 하여 타 사업으로 인한 매설물 등의 위치를 준공도면에 포함시켜 작성하여야 한다.

준공도면에는 공사기간중 발생한 감독관의 요구사항이나 현장조건에 따른 변경사항을 반영하여야 한다.

공사관리

공정관리

수급인은 착공신고서 제출시 수립한 공사공정예정표를 기준으로 시공계획을 수립하여 공사를 수행하여야 한다.

감독관은 필요하다고 인정할 경우 수급인, 하도급자, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 수급인 회의를 개최할 수 있으며, 수급인은 공정회의를 효율적으로 진행하는데 필요한 공정추진현황, 향후 시공계획 등 필요한 사항을 감독관의 지시를 받아 준비하여야 한다.

수급인은 공사 시행중 당초에 수립한 공사공정예정표 혹은 시공계획과 공사추진 실적을 비교하여 지연된 공종이 있을 경우에는 공정 만회대책을 수립하여야 하며, 감독관이 요청할 경우에는 수립된 공정만회 대책을 감독관에게 보고하고 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

공정보고

수급인은 감독관이 정하는 서식에 의해 전일의 공사실적, 누계량, 당일에 시공할 공사계획 등이 표시된 일일 작업보고를 매일 근무시작과 동시에 감독관에게 제출하여야 한다.

수급인은 매월 감독관이 지정한 날짜에 전월 공사진척 상황을 나타낸 월간공정보고서를 감독관에게 제출하여야 한다. 월간공정보고서는 다음 사항을 포함하여야 하나 이에 한정되지는 아니한다.

주요 목적물의 공사진척 현황

직종별 가동 근로자수

수급인이 사용한 장비, 설비 및 자재

품질관리 현황

안전관리 현황

진행 중에 있는 계획, 공정과 보고기간동안의 실적공정, 보고일 이후의 예상공정, 공종별 예상착수일 및 준공예정일

계약공사금액, 보고기간전 기수행 공사금액, 보고기간중 수행공사금액, 보고일 이후의 잔여공사금액

금월까지의 공사수행결과 발생한 문제점 및 그의 대책

전력 사용량

공사진척 현황사진

현장관리

수급인은 공사시공중에는 모든 재료, 장비 등을 항상 정리정돈하고 현장 안팎을 깨끗이 청소하여야 하며, 가설물의 철거, 기타 잔해 일체를 정리한 후 기성검사 등 발주자의 각종 점검이나 검사에 임하여야 한다.

수급인은 일반인의 공사장 출입통제, 근로자, 장비, 자재 등에 대해 엄격히 관리하여야 하며 풍기와 보건위생상의 단속, 화재, 도난 보안 및 기타사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 하며, 공사현장내에서 발생한 사고 또는 공사와 관련된 사고에 대해서는 수급인 부담으로 처리하여야 한다.

수급인은 공사현장이 서로 인접하거나 동일 장소에서 시행되는 별도 공사가 있을 경우 상호 협조하여야 하며 공정계획을 조정하는 등 공사가 원만히 추진될 수 있도록 조치하여야 한다.

수급인은 관련법령에 의하여 설치하여야하는 각종 표시물을 해당 규정 또는 감독관의 요구대로 설치하고, 준공시까지 깨끗하게 유지하여야 한다.

노무관리

수급인은 공사가 원활히 진행될 수 있도록 각 공종별로 현장 동원 인력관리에 만전을 기하여야 한다.

수급인은 공사의 원활한 추진을 위하여 수급인의 근로자에게 품질관리, 안전보장, 보안 및 직무교육을 실시하여야 하며, 주요 교육은 일자, 내용, 대상 등의 교육계획을 감독관과 사전 협의를 한 후 실시하고 그 결과를 제출하여야 한다.

감독관은 수급인 또는 수급인의 근로자에게 직접 교육을 실시할 수 있으며, 이 때 수급인은 감독관의 지시를 받아 교육에 필요한 조치를 취하여야 한다.

설계변경

계약 후 공사수행 도중 설계변경이 필요한 경우, 수급인은 일반조건 제19조 제7항 각호의 서류 및 공사비 증감내역, 변경공사비 산출내역 및 산출근거 등을 작성하여 감독관에게 제출, 승인을 받아야 한다.

감독관은 계약후 설계변경 등의 공사관리를 위하여 수급인에게 이 공사의 예정가격 단가가 기재된 예정가격 산출내역서를 제공한다.

설계변경은 내용상 중간변경과 정산변경으로 구분하며, 설계서에는 설계변경을 실시할 때마다 차수로써 구분한다.

변경설계서는 감독관이 □설계서작성기준□에 의하여 작성하되 변경사항에 대한 표기는 당초를 흑색으로 위에, 변경을 적색으로 아래에 기재하며, 목차 다음에 설계변경사유서를, 예정공정표 다음에 공사비 증감대비표를 각각 추가한다.

중간 변경시의 변경설계서는 위 항의 내용중 산출내역서를 제외하고는 설계변경이 있는 부분만 작성하며, 정산변경시 변경설계서는 위 항 내용전체를 포함하여야 한다.

수급인은 기타 공사시행과 관련하여 이견이 발생할 경우에는 사전에 감독관과 협의를 거쳐 사안을 명확히 하여 사후분쟁이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

민원예방 및 주변 구조물 보호

수급인은 공사와 관련한 민원의 예방 및 처리에 적극적인 자세로 임하여야 하며 수급인의 소홀로 인해 발생한 민원에 대해서는 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

수급인은 공사 시공과정에서 소유자의 사전 승낙 및 인․허가 없이 타인 또는 공공재산을 훼손하거나 사용에 지장을 주어서는 아니되며, 부주의 또는 부적당한 방법에 의한 시공으로 타인 또는 공공재산에 손해를 끼친 경우에는 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

수급인은 공사시행중 배수에 유의하여야 하며 특히 우천시에 타인의 재산에 대해 피해를 끼치지 않도록 사전조치를 취해야 하고 이와 관련하여 감독관의 지시가 있을 경우에는 즉시 필요한 조치를 취하여야 한다.

공사의 품질관리

품질관리일반

수급인은 발주자가 목적하는 공사목적물이 완성되기까지 충분하고 인정할 만한 품질관리체계를 유지운영하여야 하며, 품질관리는 계약조건, 설계서 등 계약문서의 모든 사항과 KS시험규정 및 건설기술관리법에 적합하게 실시되어야 한다.

수급인은 감독관에게 품질관리와 작업내용 등 모든 사항을 제시하여 감독관이 적절히 감독할 수 있도록 필요한 정보를 제공하여야 하며, 감독관의 승인사항과 상반된 여건이 발생된 경우에는 즉시 보고후 지시를 받아 조치하여야 한다.

수급인은 품질관리가 적절하지 못하여 결함이 발생된 사항과 감독관의 지적사항에 대해서는 즉시 적절한 시정조치를 취하여야 한다. 만약 수급인이 즉시 시정조치를 하지 않을 경우 감독관은 적절한 조치가 있을 때까지 전면 혹은 부분적인 공사의 일시정지를 명할 수 있으며 공사정지로 인한 손해는 수급인이 책임진다.

수급인은 시험결과를 토대로 통계적인 기법 등을 활용하여 품질향상관리를 하여야 한다.

감독관은 필요시 수급인의 품질관리체계의 보완 및 변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

품질관리계획

수급인은 품질관리가 만족하게 이루어질 수 있도록 건설기술관리법에 근거하여 품질관리계획을 수립하여야 하며, 이 품질관리계획서에 대해 감독관의 승인을 받은 후 공사를 시행하여야 한다.

품질관리시험

수급인이 품질시험을 실시하고자 할 때에는 시험감독의뢰서를 감독관에게 제출하여야 하며 감독관의 지시에 따라 품질시험을 실시하여야 한다.

품질관리보고서

수급인은 매일 전일 보고서 제출이후 보고 당시까지 이루어진 아래 각호의 사항이 포함된 품질관리보고서를 감독관에게 제출하여야 하며 이 보고서는 전일 보고서와 연속하여 작성되어야 한다.

공사실적(토공, 구조물 등)

반입자재현황(품명, 규격, 수량 등)

시험성과표

시험이 진행 중에 있을 때는 그 기록사본

반입된 자재의 품질을 검토할 수 있는 서류 (한국산업규격 표시허가증, 관련규격 등)

불합격 사항에 대한 조치결과 또는 조치계획

감독관으로부터 지시 받은 사항 및 그 조치결과

품질관리 일일보고에는 현장대리인, 품질관리책임자 등 그 내용에 상응하는 직위자의 서명이 있어야 한다.

대가의 지불

품질시험 계획 및 실시에 대한 비용은 수급인이 산출내역서에 입찰한 관련 지불항목의 일식금액으로 지불하되 금액조정은 허용되지 아니하며 기성금 지불은 감독관의 승인을 받은 일식금액 지불기준에 따른다.

보안관리

보안관리 일반

수급인은 공사 시행과정에 있어서 정부 또는 발주자가 정한 제반 보안관련 법규를 철저히 숙지하여 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인하여 발생되는 제반문제들은 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

수급인은 보안책임자를 지정하고 보안에 관한 업무 및 관리를 하게 하여야 하며, 보안사고가 발생될 때에는 감독관에게 즉시 보고하고 지시를 받아 처리하여야 한다.

수급인은 이 공사에 종사하는 모든 자에게 현장대리인이 착공시 감독관에게 제출하는 서식에 준하는 보안각서를 청구하여 보관하여야 하며 수시로 보안교육을 실시하여 보안사고를 예방할 수 있어야 한다.

수급인은 발주자가 대외비 또는 비밀로 분류한 자료를 발간할 때에는 감독관과 협의하여 정부에서 인가한 민간업체를 이용하여야 하며 감독관이 발간과정을 입회하여 원지, 폐지 등을 회수, 소각할 수 있도록 조치하여야 한다.

기타 문서, 시설, 통신 및 각종 자료의 보안사항에 대해서는 감독관의 승인 또는 협의를 거쳐 필요한 조치를 하여야 한다.

설계서의 관리

수급인은 감독관으로부터 설계서를 배부 받을 때에는 보안책임자가 보관․관리토록 하고 열람 혹은 반출시 보안에 대하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

수급인은 발주자가 제공한 공사 설계서를 임의로 복제 또는 복사할 수 없다. 다만 필요한 경우에는 감독관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

수급인은 완공과 함께 공사를 위하여 발주자가 배부하거나 수급인이 복제 또는 복사한 설계서 전량을 반납하여야 한다.

수급인은 공사에 필요한 지도를 구입하거나 주요시설물을 표시하게 된 경우에는 설계서의 관리와 같은 방법으로 보안대책을 강구하여야 한다.

공사기록의 유지

기상조사에 대한 기록

수급인은 공사기간중 공사현장 인근의 주요 기상자료를 측정, 기록, 유지하여야 하며, 감독관이 요구시 제출하여야 한다.

사진, VTR의 촬영 및 제출

수급인은 감독관이 지시하거나 시공과정에서 주요한 부분, 특히 매몰 또는 수몰되어 사후검사가 곤란한 부분에 대하여는 빠짐없이 사진촬영하고 설명을 붙여 이를 사진첩으로 보존하여야 한다.

기록사진은 천연색으로 촬영하여야 하며 감독관이 확인이나 시험 등을 실시하는 경우에는 검사한 내용을 포함하여야 한다.

수급인은 매월말일을 기준으로 주요공종에 대하여 공정추진현황을 알아볼 수 있도록 가급적 동일방향, 동일장소에서 사진을 촬영하여 2부를 월간공정 보고서와는 별도로 감독관에게 제출하여야 한다.

수급인은 공사를 완료한 후 공사시행중 촬영된 사진을 시공순서에 따라 정리하고 이를 편집한 준공사진첩 2부와 완성된 공사목적물의 전면, 후면, 측면사진(10“×15”) 각 2매씩을 발주자에게 제출하여야 한다.

준공사진첩에는 밀착사진과 함께 사진원판(film)을 포함하여야 한다.

수급인은 기성 및 준공검사시 주요검사 과정과 공사의 주요부분에 대한 공사과정을 감독관의 지시를 받아 VTR로 촬영하여 보존하여야 한다.

촬영된 비디오 테이프(VHS) 또는 사진은 감독관이 제출토록 지시하는 시기나 공사를 완료한 후에 감독관에게 2식을 제출하여야 한다.

공사시공기록의 작성 및 제출

수급인은 공사의 착공에서 준공시까지의 작업공정, 진척상황, 시공법 및 시공정도(施工精度), 기상조건, 시험성적서 및 시험성과표, 안전보건 관리기록 등 공사전반에 관하여 필요한 사항을 기록하여 현장에 비치하고 감독관이 필요로 할 경우 수시로 이용할 수 있도록 하여야 한다.

수급인은 공사의 착공에서 준공시까지의 행정처리과정, 참여기술자, 관련 참여업체 등의 내용을 포함하는 다음의 사항에 대하여 공사시공기록 보고서를 작성하고, 공사를 완료한 후 감독관에게 제출하여야 한다.

품질시험 결과

신공법의 시공 또는 실패사례

공사 시공기록

구조계산서

기타 시공상 특기한 사항

수급인은 위 공사시공기록 보고서를 편집하여 인쇄 전에 감독관의 승인을 받은 후 발주자가 제공하는 □설계서작성기준□에 따라 책자로 제작하여 준공시에 감독관에게 제출하여야 한다.

수급인은 준공도면, 공사시공기록책자 등을 CD에 수록 제작하여 준공시에 2부를 감독관에게 제출하여야 한다.

대가의 지불

시설물 운영 및 유지관리 지침서의 작성 및 제출에 대한 비용과 시설물의 시운전에 대한 비용은 수급인이 산출내역서에 입찰한 관련 지불 항목의 일식금액으로 지불하되 금액조정은 허용되지 아니하며 기성금 지불은 감독관의 승인을 받은 일식금액 지불기준에 따른다.

안전 및 보건관리

안전관리일반

수급인은 공사를 수행하는데 따른 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법, 동법시행령, 동시행규칙, 산업안전기준 및 산업보건기준, 건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준 등의 법령, 규칙, 기준을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 안전관리를 위하여 필요한 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

수급인은 산업안전보건법에 따라 사업의 종류별로 안전관리자 및 보건관리자를 두어야 하며, 안전보건관리조직표, 안전보호장비 지급계획, 안전교육 실시계획, 근로자의 진단계획 등 안전관리에 대한 세부계획을 수립하여 감독관의 승인을 받은 후 당해 공사에 착수해야 한다.

안전관리비

수급인은 안전관리비를 다음의 항목에 따라 항목별로 사용하여야 한다.

안전관리 기본비용 항목(건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 공통으로 산정 하여야 하는 안전관리비)

안전보건 관계자의 인건비 및 각종 업무수당 등

안전시설비 등

개인보호구 및 안전장구 구입비 등

사업장의 안전진단비 등

안전보건 교육비 및 행사비 등

근로자의 건강관리비 등

건설재해예방 기술지도비

안전관리비 별도 계상비용 항목(공사현장특성에 따라 적정한 방법으로 계상하는 안전관리비)

위 항에 포함되지 아니한 안전관리 비용

안전시설비중 재해예방을 위하여 필요하다고 인정되는 사항

수급인은 계약금액에 포함된 안전관리비를 건설공사 표준안전관리비계상 및 사용기준에 따라 사용하고 그 사용내역서를 현장에 비치하여야 하며 감독관의 요구가 있을 경우 이를 제출하여야 한다. 또한, 하도급공사의 경우에도 이를 준용한다.

감독관은 수급인로부터 제출된 안전관리비 사용내역에 대하여 목적 외 사용여부 및 미사용 여부를 확인하고 이에 해당하는 금액에 대하여는 공사준공시 감액조치를 하여야 한다.

안전검사

수급인은 산업안전보건법 시행규칙 제58조에서 정한 유해 또는 위험한 기계, 기구 및 설비 등(이하 “법정위험기계”라 한다)을 현장에 반입할 때에는 반입 전에 설계검사, 완성검사, 성능검사 및 정기검사 등의 해당되는 안전검사를 받은 것이라야 한다.

수급인은 공사수행중 재해예방 및 법정위험기계의 안전성 확보를 위하여 해당되는 안전검사를 받아야 한다.

안전조치

수급인은 공사 시행중에 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분한 주위를 기울여야 하며, 피해를 최소화 할 수 있도록 모든 조치를 취하여야 한다.

수급인은 안전에 만전을 기하기 위하여 조직, 계획, 점검 및 훈련 등을 실시하여야 한다.

수급인은 공사 착수 전에 다음사항과 같은 안전시설을 설치하여야 한다.

출입금지 구역의 설정

전기, 상하수도 및 통신 등 주요한 시설에 대한 보호

위생적인 음료수의 확보

위생적인 화장실과 배수시설

각종 표지판, 안전망, 낙하 방지물망, 조명시설

기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 감독관이 지시하는 사항

수급인은 작업장내의 모든 근로자에게 소정의 안전모와 안전화를 착용하도록 하여야 한다.

수급인은 공사장에 구급약을 상비하여야 하며, 공사장의 규모와 위험 정도에 따라 의무실을 운영하여야 한다.

수급인은 공사시행 중 인접해 있는 기존 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요한 보호시설을 설치하여야 한다.

수급인은 공사시행 과정에서 선박의 통행이나 기존 시설물사용에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

안전표시 및 안전보호구

수급인은 공사현장 구간 내에 적절한 위치에 감독관과 협의하여 선박의 통행에 안전할 수 있도록 하여야 하며 야간 식별이 가능하도록 하여야 한다.

수급인은 공사현장의 모든 근로자가 작업시 안전모, 안전화 이외에도 필요한 안전보호구(안전대, 보안경, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 귀마개 등)를 착용하도록 하여야 한다.

안전교육

수급인은 관리감독자 및 근로자에게 정기 안전교육을 실시하여야 하며, 신규로 사원 혹은 근로자를 채용하는 경우나 작업내용을 변경하는 경우에는 업무와 관련한 교육을 실시하여야 하고, 그 결과를 감독관에게 서면으로 제출하여야 한다.

안전시공

수급인은 시행중인 공사 또는 근로자에게 위험이 없도록 필요한 가설비와 안전설비를 설치하여야 한다. 또한 안전시공을 고려한 시공방법 적용과 시공장비 운전을 하여야 하며 현장 정돈에 특별히 주의하여야 한다.

사고보고 및 응급조치

수급인은 공사 시행중 다음과 같은 사고가 발생하였거나, 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독관에게 보고하며 즉시 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

사상 사고

제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

위 항의 경우 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 감독관에게 구두 또는 전화로 6하원칙에 의거 긴급보고를 하고 추후에 서면으로 보고하여야 한다.

환경관리

환경관리일반

수급인은 이 공사를 시행하는 과정에서 환경오염방지와 관련한 환경정책기본법, 자연환경보전법, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법 등 환경관련 법령을 준수하여야 하며, 환경오염 방지시설의 설치 및 환경오염방지와 관련한 각종 인·허가 또는 신고 등 제반행위에 대하여 감독관과 협의하여 조치하여야 한다.

대기질

수급인이 공사 시행과정에서 발생되는 비산분진이 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 공사를 수행하는 경우에는 운반도로의 살수, 토사, 사석운반차 적재덮개, 세륜․ 세차시설의 운영 등 대기환경보전법 제28조의 규정에 따른 비산분진 방지시설을 설치·운영하여야 한다.

수급인은 공사 시행중 대기질 보호를 위하여 대형공사차량 운행횟수 제한, 공사차량의 정비·점검, 공사차량 속도제한, 차량운행 경로지정, 기상조건에 의한 작업의 일시적 중단(풍향, 풍속계 설치)등의 필요한 환경 악영향 저감대책을 수립하여 시행하여야 한다.

수질

수급인이 공사 시행과정에서 발생되는 부유물의 확산으로 인해 인근 해역의 피해를 최소화하기 위한 대책을 강구하여야한다.

시공시 부유물 확산으로 인해 민원이 발생치 않도록 사전에 주민대표 또는 어촌계와 협의하여야 한다.

공사현장 인근 해역에 양식장이 인접할 때에는 그 범위와 권리자를 사전에 조사하여 사고발생시 신속히 대처하여야 하며 시공시 기름유출 및 부유물확산방지에 만전을 기해야한다

소음, 진동

수급인은 공사 시행중의 소음 및 진동을 저감하기 위하여 발생원 저감대책 및 영향 완화 대책 중 적절한 대책을 선별적으로 선택하여 시행하여야 한다.

폐기물

수급인은 공사 시행과정에서 발생하는 각종 폐기물로 인하여 2차적인 환경오염이 발생하지 않도록 필요한 대책을 수립하여야 한다.

수급인은 공사과정에서 발생하는 잔토, 건축 폐자재를 폐기물 관리법에 의거 적정하게 처리하여야 하며, 공사에 관련된 쓰레기는 분리수거하여 적절하게 처리하여야 한다.

토양

수급인은 공사 시행으로 토양이 오염될 우려가 있을 경우에는 오염된 표토의 제거, 오염경로 차단 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

악취

수급인은 공사 시행과정에서 악취가 발생할 우려가 있을 경우에는 발생원의 밀폐 혹은 위치변경, 사용재료의 변경, 작업공정의 개선, 탈취설비 설치 등 개선에 필요한 조치를 하여야 한다.

기타 환경관리에 관한 사항

수급인은 이 공사의 환경영향평가서상에 지시된 환경 악영향 저감방안중 본 시방서에서 언급되지 아니한 사항에 대하여서도 별도 감독관의 요구가 있을 경우 그 대책에 대하여 성실하게 조치하여야 한다.

기타사항

검사, 진단 등의 협조

수급인은 관련법령 또는 기관 등에 의해 시행되는 각종 감사, 점검, 진단, 검사 등에 있어서 감독관의 지시에 따라야 하며, 이를 위해 감독관의 요청이 있을 때에는 장비, 기구 및 인력 등 필요한 사항을 협조하여야 한다.

감독관의 시공확인

공사시행중이 아니면 확인이 곤란한 공종에 대하여서는 확인이 가능한 시기에 반드시 감독관의 확인을 받아야 하며 감독관의 확인이 수급인의 의무 및 책임을 면제하는 것이 아니다.

대 가

일반시방 및 특별시방에서 특별히 규정하는 대가의 지불에 대한 사항을 제외하고 나머지 모든 항목에 대한 대가의 지불은 수급인이 산출내역서 상에 제출, 입찰한 금액에 포함되며, 별도 항목으로 지불되지 아니한다.

설계변경 및 공사기간 연장조건

천재지변 등 불가항력적인 사태가 발생하였을 때

설계시 가정한 수치와 실제 시험치가 상이할 때

공종 성격상 시공후 정산이 필요할 때

본 설계도서상의 현장여건이 시공도중 확인되는 현장여건과 현저하게 상이할 때

도급자로부터 신공법의 제안이 있어 이를 수락할 때

구조물 배치위치 및 구조변경이나 공법변경이 필요할 때

공사에 필요한 자재의 수급이 지연될 때

관련법규가 개정되어 설계변경이 필요할 때

기타 시행청에서 필요하다고 인정할 때