2018년 부안군 해양환경 정화사업 설계서

어촌계 : 진리어촌계(폐지주제거, 폐타이어 제거, 어장경운)

2018.   09.

	부 안 군 진 리 어 촌 계

설     계    설    명   서

설   계   설   명   서

■ 사 업 명 : 2018년 부안군 해양환경 정화사업(진리어촌계)

■ 사 업 지 : 전북 부안군 위도면 진리어촌계지선(부안마을 제3760호, 부안마을 제3686호)

■ 사업의 목적

전북 부안군 위도면 진리어촌계지선(부안마을 제3760호, 부안마을 제3686호)양식어장에 대하여 폐지주제거, 폐타이어 제거, 어장경운 등의 작업 시행으로 연안어장의 장기 보존 및 어업생산성을 향상시켜 어업경영의 안정을 도모하고자 함.

■ 주요사업내용

○ 부안마을 제3760호 - 폐지주 제거 : 3.0ton,

○ 부안마을 제3686호 - 폐타이어 제거 : 4.0ton, 어장경운 : 15.4ha(7.70ha × 2회)

■ 사업기간

○ 본 사업은 착수일로부터 2개월(60일)로 한다. 다만, 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 사업불가시         시행청의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

■ 기   타

○ 본 사업은 실시설계 예산서 및 일반시방서, 특별시방서에 의거 시행하고 기타 행정사항은 사업시행청의          지시에 의한다.

예     정    공    정    표

예    정    공    정    표

공 종 별	일 수	사 업 기 간
		10일		20일	30일	40일	50일		60일
1. 작업준비	7
2. 폐지주제거, 폐타이어제거, 어장경운	43
3. 준공	10
진도현황(%)		16.6		16.6	16.7	16.7	16.7		16.7
누 계(%)		16.6		33.2	49.9	66.6	83.3		100

일    반    시    방    서

일    반    시    방    서

1 - 1 총  칙

1. 본 사업은 정부에서 제정한 제 시방서 기준, 규격과 본 시방서 및 설계도서에 의거 시행한다.

가) 토목공사 일반 표준 시방서

나) 항만공사 표준 시방서

다) 한국 공업 규격

라) 사업 집행지침

마) 기타 본 사업과 관련되는 발주청의 각종 규정 및 기준 등

2. 도급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자의        책임이다.

3. 본 시방서와 설계도서간의 내용이 서로 다를 경우에는 시방서의 규정이 우선한다.

4. 본 시방서에 특별히 설명되어 있지 않은 사항이나, 시방서 규정의 문구 해석상 이견이 있을시에는 발주청의         해석에 따른다.

5. 본 설계도서에 표시된 치수는 모두 완성된 치수로 한다.

6. 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 감독관이 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자         부담으로 시행하여야 한다.

7. 설계서를 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하여 변경이 불가피할 때

나) 폐지주제거량, 폐타이어제거량, 어장경운 면적 등 사업현장의 제반 여건이 본 설계도서의 내용과 현저한 차      이로 사업비의 증감이발생 할 때

다) 사업비 적산 기준, 특수항목의 견적내역 또는 공법이 변경될 때

라) 기타 발주청의 형편에 따라 변경이 필요할 때

8. 준공기한을 연장할 수 있는 사유는 다음과 같다.

가) 기상 및 해상조건이 설계에 적용된 평년의 경우와 현저한 차이가 있을 때

나) 기타 발주청의 형편에 따라 시공중에 사업 중지 명령을 받았을 때

다) 위 설계변경 사유에 해당되어 예정공정 추진에 막대한 지장이 초래되었을 때

1 - 2 시공계획 및 관리

1. 도급자는 사업 착수와 동시 다음 서류를 구비 제출하여야 한다.

가) 사업 착수계

나) 예정공정표

다) 착수전 사업장 전경사진

라) 현장 대리인계

마) 안전관리자 선임계

2. 도급자는 사업착수 7일이내에 예정공정표에 의거 시행구역 우선순위를 구획하여 구역별 실시공정표와 사업         시행순서 및 인력, 장비동원 등 사업시행 실행계획을 수립하여 사업실행 계획서를 제출하여야 하며, 감독관의        승인을 받아 사업을 조기에 적극 시행하여야 한다.

3. 도급자는 감독관이 승인한 작업상황보고 양식에 따라 당일의 작업내용, 취입인원, 취입장비 및 가동시간과          사업용자재의 불출상황 등 작업실적 및 익일의 작업계획을 감독관에게 보고 후 제출하여야 한다.

4.  도급자는 매월말 그달의 작업월보 및 다음달의 작업계획서를 제출하고 필요시에는 사업진도를 확인할 수 있         는 사진을 첨부하여야 한다.

5. 사업 진도가 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의        추가 투입공정 만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생되는 경비는 일체 도급자가          부담한다.

1 - 3 안전관리

1. 작업인부의 안전관리를 위하여 물때등 기상예보에 항상 유의하여야 하며 작업중에는 현장대리인이 항상 상주하여          현장관리를 책임지휘 수행하여야 한다.

2. 작업을 수행하는 작업인부의 안전관리에 유념하여야 하며 현장에는 구급약품을 비치하여야 한다.

3. 도급자는 사업시행에 따른 인명, 재산피해 발생시에는 도급자의 부담으로 하여 제반조치를 강구하여야 한다.

4. 도급자는 사업시행과정에서 선박 또는 사람의 통행에 위험을 초래할 수 있는 곳에는 위험표지 시설을 하여         사전사고 방지 대책을 강구하여야 한다.

1 - 4 현장대리인 및 현장종사원

1. 현장대리인은 사업기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 감독관과 협의하여야 하며, 부득        이 현장을 이탈하게 될 경우에는 감독관의 승인을 얻어야 한다.

2. 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 감독관의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장한다.

3. 사업 감독관은 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 사업현장에 부적합하다고 인정하거나,           감독업무 수행에 장애가 된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이에 즉시 응하        여야 한다.

4. 도급자는 현장종사원이 사업시행과 관련하여 공․사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.

5. 현장대리인은 사업기간 중 현장에 상주하여 모든 육, 해상 사업현장의 안전관리 책임을 진다.

1 - 5 공정관리

1. 환경정화사업을 수행하는 도급자는 사업지구내 관련어업인들과 사전 원만한 협의를 통하여 사업시행 우선순위 별        사업구역을 구획하여 정화사업 공정 관리를 실시하여야 한다.

2. 도급자는 시방서에 의거 사업구역별 표지시설을 설치하고 이를 양호한 상태로 유지 관리하여 시공 및 감독         관리가 용이하게 하여야 한다.

3. 도급자는 주요 공정에 대하여 사업추진 광경을 촬영(사진)하여 사진첩을 준공검사시 3부를 제출하여야 한다.

4 도급자는 사업시행 중 민원이 발생하였을 때는 도급자의 책임으로 원만히 해결하여야 한다.

5. 본 사업은 어장순기를 고려하여 효율적으로 집행하여야 한다.

1 - 6 기   타

1. 도급자는 사업 시행에 있어 관계기관에 제출하거나 관계기관의 승인을 필요로 하는 사항이 있을 때에는 관계        기관의 인․허가를 득하여 사업을 수행하여야 한다.

2. 도급자는 본 사업의 시행과 관계되는 제반법규를 준수하여야 한다.

특    별    시    방    서

특    별   시    방    서

2 - 1  사업개요

․본 사업은 양식어장내 폐지주 제거, 폐타이어 제거, 어장경운 작업을 통하여 연안어장의 장기 보존 및 어업 생산성을 향상시키기 위한 양식어장 정화사업이다.

2 - 2  적   용

․본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 사항을 특별시방서로 명기하여 제반 시방서보다 우선하여 적용한다.

2 - 3  폐지주 및 폐타이어 제거, 어장경운

․사업지구내 관련 어촌계 및 어업인과 협의 후 어장정화 작업틀을 선택하여 사업을 시행한다.

․사업 수행 시 포획된 양식생물의 경우 어촌계 및 어업인과 협의 후 재방류한다.

․사업시행전 사업지구내 관련 어촌계 및 어업인들에게 통지하고, 확인한 후 사업을 시행한다.

․폐지주 및 폐타이어 제거, 어장경운 작업시 민원이 발생하지 않도록 도급자는 사전 조치하여야 하며, 민원발생 어촌계와 협의하여 원만히 해결하여야 한다.

․사업시행 전에 어촌계장과 충분히 협의하여 민원이 발생하지 않도록 해야하고, 작업시 어촌계장과 동행하여        실시해야 한다.

․어장경운 전·후 작업을 위하여 표지시설을 설치한 후 작업에 착수하여야 한다.

․작업현장에는 현장대리인이 상시 배치, 현장 지휘 및 안전관리 조치를 하여야 한다.

․물때에 따른 작업 시행 시 안전에 특히 유의하여야 한다.

2 - 4 기   타

․본 사업을 시행함에 있어 작업구역 우선순위의 선정 등에 대해서 관할 어촌계의 의견을 충분히 수렴하고, 협       조사항이나 문제점 발생 시 발주처 및 조사설계자와 협의하여 조정할 수 있도록 조치하여야 한다.

․사업설계서에 근거하여 철저한 사업 수행 및 사업시행 관련자료(사진 등)의 기록ㆍ유지와 일일 작업보고에 철저를 기하여야 한다.

․도급자는 작업 전 사업구역 표지를 미리 설치하고 발주처가 일일 공정 완료의 확인이 어려운 작업 진행구역과       위치를 촬영하여 사업 전후를 비교·확인할 수 있도록 발주처 요구 시 제출할 수 있도록 하여야 한다.

․본 사업 수행 시 관계 어업인의 민원이 발생하지 않도록 도급자는 최대한 방지하고 민원 발생 시에는 어촌계       와 협의하여 원만히 해결하여야 한다.

․작업지역 내 조업ㆍ기타민원 등으로 사업 추진이 어려울 경우 유관기관 및 관계어업인 등과 협의하여 사업기       간을 조정하고 이를 발주처에 보고하여야 한다.

2 - 5 사업비 정산

․사업비 정산은 폐지주 및 폐타이어 수거량, 어장경운 면적에 따르며 사업비 범위 내에서 공급단가로 정산한다.

․본 설계도서의 산업안전관리비 및 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료는 사후 사업비 범위 내에서 실비정       산을 원칙으로 한다.

○ 일일작업일지 예시