2018년도

태풍 피해 등부표 위치복구공사 설계서

2018. 10.

2018년 10월  설계

설

계 자

심사자

담당

과장

전결

청장

2018년도

태풍 피해 등부표 위치복구공사 설계서

목 차
1.	설 계 설 명 서
2.	일 반 시 방 서
3.	특 별 시 방 서
4.	예 정 공 정 표
5.	예 산 내 역 서
6.	공 사 원 가 계 산 서
7.	일 위 대 가
8.	단 가 산 출 서
9.	도 면

1.  설   계   설   명   서

1.  설   계   설   명   서

1-1 공 사 명 : 태풍 피해 등부표 위치복구공사

1-2 공사위치 : 부산남외항, 감천항 전면해상

1-3 공사목적 : 제25호 태풍(콩레이)의 영향으로 위치 이동된 남외항의 등부표를 정(正) 위치에 복구하고, 유실된 감천항유도등부표의 대체등부표를 설치하여 인근 항행선박의 안전운항을 도모하고자 함

1-4 공사개요 : 등부표(LSP-28) 이설공사 1식, 등부표(LL-28) 설치공사 1식

○ 위치 이동된 부산남외항5,6,7,8,9,10,11,12호등부표 위치 이설(총 8기)

○ 감천항유도등부표 고시 좌표에 대체등부표(LL-28) 설치

1-5 설계 변경조건

1) 현장작업여건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때

2) 정부품셈 기준이나 노임단가의 변경이 심할 때

3) 발주청의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

4) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

5) 부표류(스파부이) 이설 수량의 증․감이 발생하였을 때

1-6 공사 시행방법 : 본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

1-7 공사기간 : 착공일로부터 20일간으로 한다.

2.  일   반   시   방   서

2.  일   반   시   방   서

2-1 적용범위

1) 설계도서와 시방서가 상이한 경우에는 시방서의 내용이 우선한다.

2) 설계도서와 시방서의 내용에 불합리한 사항이 있을 경우에는 감독의 해석 및 지시에 따른다.

3) 설계도서에 언급하지 않은 사항이라도 시공 상 필요하고 경미한 사항은 도급자의 부담으로 시행하여야 한다.

4) 본 공사는 정부제정 각 표준시방서와 다음 시방서 및 설계도서에 의하여 시행한다.

가)「항로표지법」「항로표지법 시행령」「항로표지법 시행규칙」

나)「항로표지 업무편람」및「항로표지업무용선박 관리ㆍ운영에 관한 규정」

다)「선박안전법」「해사안전법」

라)「건축전기설비공사 표준시방서」및「전기설비기술 기준 및 판단기준」

마)「한국산업규격」「철물설비공사 및 수중공사 일반 표준시방서」

바) 산업안전보건기준에 관한 규칙과 한국산업안전공단에서 제정한 잠수작업 안전기술지침

사) 기타 본공사와 관련한 관계법규․령․규칙․고시․명령․조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관된 제반법령 등

5) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공 하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정 될 경우에는 감독관과 협의하여 변경 시행한다.

2-2 공사의 시행

1) 착공 시 서류 제출 사항

도급자는 공사 착공 시 다음 서류를 작성한 후 감독관을 경유 발주처에 제출하여야 한다.

가) 현장대리인계

나) 현장기술자 지정신고서(안전관리자)

다) 안전관리 계획서

라) 공사 예정공정표

마) 시공(공정별 인력 및 장비투입) 계획서

바) 기타 발주청에서 요구 및 지정한 사항

2) 도급자의 의무

가) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 이설하여야 한다.

나) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 시설물(표체, 침추, 계류용품 등) 이설 시 발생하는 시설물 유실, 손상 및 훼손에 대해 모든 책임을 져야 한다.

다) 공사 관련하여 도급자는 모든 이해관계인과 협의한 다음, 관련사항을 조속히 조치하고 발주처의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

라) 도급자는 공사시행 전 본 설계서를 숙지하고 본 공사와 관련되는 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공하여야 한다.

3) 도급자는 공사 중 감독관이 부실로 인정할 시 즉시 재시공하여야 한다.

4) 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않았더라도 시공, 구조상, 외관상 감독관이 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 도급자의 부담으로 시공하여야 한다.

5) 현장대리인 및 현장종사원

가) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서,「국가기술자격법」등 관계법령에 의한 전문가 또는 기술자라야 하며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

나) 감독관은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

다) 공사의 시행에 있어서 본 설계도서의「일반시방서」,「특별시방서」및 공사 관련「안전관리 시방서」에서 규정하고 있는 해당분야의 관리자는 당해 공종에 충분한 전문지식과 실무경험을 갖춘 관리자를 선임하여야 한다.

라) 안전관리 책임자는 유자격자로서 공사현장의 안전관리 업무를 담당한다.

마) 모든 현장 종사원은 감독관의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

바) 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

6) 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함하여야 한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 사고방지에 대한 단속

나) 시공자재 및 시공 설비의 정리와 관리, 현장 내․외 및 주변 도로의 정비

다) 기타 감독관의 지시사항

7) 공정표 및 시공계획서

가) 도급자는 당해 수행한 공사에 대하여 다음사항을 명확히 하여 감독관에게 제출하여야 한다.

① 예정공정표

② 공정 상황을 나타내는 현장 사진

나) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 등을 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

다) 도급자는 공사시행의 순서, 방법, 주요 장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대한 상세한 시공계획서를 제출 후 시공에 착수하여야 한다.

라) 기수립된 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그때마다 변경 시공계획서를 감독관에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

마) 공사 진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입 등 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

8) 제보고 및 서류 양식

가) 계약서에 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나) 감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따라 정하지 않은 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

9) 관계기관 등과의 협의

가) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 감독관 및 발주처의 협조를 받아 도급자가 하여야 한다.

나) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독관을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

10) 제법규의 준수

가) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

나) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

2-3. 시공관리

1) 공사기간

도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 발주처의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한 “2)”항의 공사 중지사항 중 가), 나), 라), 바), 사)항에 의해 공사기간 연장이 불가피한 경우에는 사유가 발생한 날로부터 7일 이내에 감독관을 경유하여 발주처에 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

2) 공사의 일시 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있고 그 중 가), 나), 라), 바), 사)항을 제외한 원인에 의한 공사기간 연장에 따른 모든 사항은 도급자의 부담으로 하며 이로 인해 계약 기간이 초과될 경우에는 공사 지체 일수에 산입한다.

가) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나) 보상 및 민원에 의한 중지 사유가 발생될 때

다) 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

라) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

마) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

바) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

사) 발주처의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

3) 공정관리

가) 도급자는 계획공정표에 따라 공기 내에 공사가 원활히 완공될 수 있도록 공정관리에 만전을 기하여야 한다.

나) 도급자는 공정이 현저하게 부진 되었을 경우 감독관의 요구에 따라 인원 및 장비를 추가투입하며 공정을 만회하여야 한다.

4) 공사기록

가) 도급자는 감독관이 승인한 작업 상황보고 양식에 따라 매일의 작업내용, 취업인원, 취업장비 및 작업시간 등을 기록하여 매 익일 전까지 감독관에게 보고하여야 한다.

나) 도급자는 공사 진행에 따라 공사기록 사진을 촬영하여 수록하고 주요 공정에 대한 검사장면은 사진을 촬영 수록하며, 완공 후 제반 성과를 작성 편집하여 제출하여야 하며, 특히 침추, 계류구의 수중설치 상태를 동영상 촬영하여 제출하여야 한다.

라) 시공 후 확인할 수 없는 부분은 필히 사진과 동영상 촬영을 병행하여 수록하여야 하며 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격 등을 판별할 수 있게 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

5) 현장관리

가) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며, 환경이 심하게 오염될 우려가 있을 경우에는 즉시 감독관에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

나) 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

다) 도급자는 해상 작업에 따른 장비의 제반 규칙을 준수하여 운반선, 바지선, 예인선 등의 항해에 위험을 줄 수 있는 기타 해상 장비 또는 장애물에는 경고등을 설치하여야 한다. 도급자는 이와 관련하여 경고등 설치를 태만히 하였거나 하지 않았기 때문에 야기되는 일체의 피해에 대한 책임을 진다. 공사로 인한 기존 항로의 장애는 최소한으로 줄인다.

라) 도급자는 공사 시행중 선박들의 항해에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

6) 사고의 처리

가) 구조물의 파손, 기타공사 수행중 계획에 영향을 미치는 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 응급조치를 취하고 그 사실과 대책을 감독관에게 보고하여야 한다.

나) 공사중 도급자의 과실로 민간인 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

7) 관계공사와의 협조 및 수속

가) 공사시공을 위하여 필요한 관공서 및 관계기관에 대한 제 수속을 신속하게 처리하여야 한다.

나) 관계 관공서 등 관련기관에 대하여 교섭이 필요하거나 또는 교섭을 받았을 경우에는 지체없이 그 내용을 감독관에게 보고하고 협의하여야 한다.

8) 준공검사

가) 도급자는 공사가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위해 필요한 제반 자료의 제출, 위성항법보정장치(DGPS) 위치 측량이나 기타 조치에 대하여는 감독관 및 검사관의 지시에 따른다.

나) 준공검사관의 검사결과 불합격시 검사관의가 지시에 따라 도급자 부담으로 다시 설치하여야 한다.

9) 비용부담에 관한 사항

공사 시행에 있어 다음 각 항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

가) 시방서, 설계내역서 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항(단, 현장 여건 변화에 의해 작업방법을 현저히 변경하였을 때에는 이에 따르지 않는다.)

나) 공사 및 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

다) 공사 시행상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험 및 필요한 제반 관측, 측량

라) 해상교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대시설

마) 주요자재의 인수, 보관 및 관리

바) 공사 착수전, 시공도중의 인도구조물, 제반 검사, 착공 및 준공 시 사진

사) 도급자의 책임으로 인한 제3자의 피해보상

2-4. 검사

1) 시공확인 및 검사

가) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

나) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 감독관의 입회하에 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

2-5. 안전 및 환경관리

1) 안전관리

「산업안전보건법」등 해당 규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

2) 안전조치

가) 공사중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립하여 감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

나) 공사에 필요한 안전 조치는 관계법령에 따라야하고 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하며 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다) 해상 작업시 선박 등에 구급상비약을 갖추어야 한다.

3) 안전표지 및 안전 보호구

공사현장에서는 작업자에게 필요한 안전 보호장구(안전모, 안전화, 구명조끼 등)를 착용하게 하여야 한다.

4) 안전

가)「산업안전보건법」에 의거 공사 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

나) 도급자는「산업안전보건법」의 해당규정을 준수하고 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 안전조치를 취하여야 하며, 현장정돈을 철저히 하고, 안전시공에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

5) 사고보고 및 응급조치

가) 공사중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 구조물의 파손 또는 추락사고

② 인사사고, 선박사고

③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

④ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

나) 전항의 경우에 인사사고, 선박사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 육하원칙에 따라 발주자 및 감독관에게 긴급보고하고, 추후에 서면보고 하여야 한다.

6) 안전관리비의 사용

가) 도급자는「산업안전보건법」등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 발주처 및 감독관의 제출 요구 시에는 이에 따라야 한다.

나) 감독관은 공사진행 중 안전관리비 사용에 대하여 수시 확인할 수 있다.

다) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

2-6. 준공

1) 준공도서

가) 준공도 작성방법 및 세부 양식은 발주처와 협의하여야 한다.

나) 전 공정의 시공 사진 및 수중촬영동영상 파일을 담은 저장매체(USB, CD 등) 및 사진첩 각 2부 제출

2) 준공검사 및 인수

가) 도급자는 계약상 준공일 전까지 공사를 완료하고 감독관에게 준공검사를 요청하여야 한다.

나) 감독관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다. 또한, 시험 및 검사에 합격하여 감독관이 공사가 완료되었다고 인정한 경우 준공검사 요청서를 제출하여야 한다.

다) 도급자는 준공검사 시 현장대리인 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회케 하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않은 곳 및 시공불량개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단 시일내에 재시공하여야 한다.

3.  특   별   시   방   서

3.  특   별   시   방   서

3-1 공사준비 및 조사

1) 도급자는 해상공사 시행 전 능률과 안전에 영향을 미치는 다음사항을 사전 조사하여 시공계획에 반영하여야 한다.

가) 기상조건 : 풍향, 풍속, 강우량, 안개발생 일수

나) 해상조건 : 파랑, 조류, 조위, 수심

다) 지리적 조건 : 현장위치, 통항선박, 운반경로

라) 현장조사 : 수중조사(촬영)을 통한 스파부이 설치상태 확인 조사

2) 도급자는 등부표 이설 및 설치해역 부근을 운항하는 선박의 위험이 없도록 안전시설과 대책을 수립 및 강구한 후 작업에 임하여야 하며, 전반적인 해상 및 항행규칙을 준수하여야 한다.

3) 작업 시행전후 해상교통관제센터(VTS) 등 해당 관내 항만당국에 보고 및 승인을 득하여 작업하여야 한다.

3-2 등부표(스파부이) 이설 및 설치

1) 등부표 이설 및 설치장소는 감독관이 지정한 지점에 WGS-84 좌표계로 정밀 위성항법보정장치(DGPS)를 이용하여 측정한 다음 정확한 위치에 설치하고, 설치 완료 후 그 성과표를 제출하여야 한다.

2) 스파부이 인양 전 잠수조를 우선 설치 장소에 투입하여 수심 및 저질에 대해 정확히 최종 확인을 하고, 침추 설치 시 기울임이 없어야 한다. 기울임이 발생 시에는 재설치 하여야 한다.

3) 잠수작업 전 잠수사의 국가자격증(잠수기능사 이상) 사본을 제출하여야 한다.

4) 잠수작업은「산업안전보건기준에 관한 규칙」한국산업안전공단에서 제정한「잠수작업 안전기술지침」에 따른다.

5) 등부표 이설 및 설치 시 태양전지 설치대 방향이 남쪽 방향으로 하여야 한다.

6) 등부표는 다음의 고시위치에 설치 및 이설하여야 한다.

번호	표 지 명	위 치(WGS-84)		철거 및 재설치					비고
		변경전	변경후	축전지	등명기	레이콘	태양전지	충방전 조절기
	합 계			19	9	1	2	1
1	부산남외항5호	35-03-35.9 N 129-01-51.5 E	35-03-35.5 N 129-01-52.0 E	2	1	-	-	-
2	부산남외항6호	35-03-36.6 N 129-02-06.9 E	35-03-36.2 N 129-02-07.0 E	2	1	-	-	-
3	부산남외항7호	35-03-56.0 N 129-01-53.0 E	35-03-56.0 N 129-01-52.8 E	2	1	-	-	-
4	부산남외항8호	35-03-56.5 N 129-02-05.0 E	35-03-56.0 N 129-02-04.8 E	2	1	-	-	-
5	부산남외항9호	35-04-16.1 N 129-01-52.9 E	35-04-15.7 N 129-01-53.1 E	2	1	-	-	-
6	부산남외항10호	35-04-17.0 N 129-02-02.3 E	35-04-16.0 N 129-02-02.6 E	2	1	-	-	-
7	부산남외항11호	35-04-35.8 N 129-01-53.7 E	35-04-35.9 N 129-01-53.6 E	2	1	-	-	-
8	부산남외항12호	35-04-36.0 N 129-02-00.4 E	35-04-36.0 N 129-02-00.4 E	2	1	-	-	-
9	감천항유도등부표 대체등부표	-	35-01-55.3 N 129-01-20.0 E	3	1	1	2	1

7) 도급자는 감독관과 협의하여 유니버셜 조인트, 점검사다리, 태양전지판 등의 방향성을 고려하여 표체를 설치하여야 한다.

8) 안전을 확보한 상태에서 등부표 설치 및 이설 작업을 실시하여야 하며, 항로표지 장비용품(축전지, 태양전지, 등명기 등), 계류구(사슬, 접환, 전환) 및 침추에 손상이 가지 않도록 작업하고, 만약 작업 시 파손, 오염 등이 발생한 경우 도급자는 책임지고 변상하여야 한다.

9) 침추인양 시 반드시 인양고리를 이용하여야 하며, 침추에 문제가 발생되거나 하자를 발견한 경우 즉시 감독관에게 보고하고 발주처에서 제공하는 새 제품으로 교체하여야 한다.

10) 이설 작업 간 유니버셜 조인트 및 사슬 등 계류구에 문제가 발생되거나 하자를 발견한 경우 지체없이 감독관에게 보고하고, 향후 작업사항은 감독관 지시하에 진행하도록 한다.

11) 등부표 설치 및 이설작업 시 주변 다양한 선박이 혼재되어 있어 안전을 확보한 상태에서 작업하여야 한다.

12)「항로표지업무용 선박의 관리ㆍ운영에 관한 규정」별표1 부표작업 요령을 참고하여 안전하게 작업하여야 한다.

13) 이설작업 완료 후 항로표지 장비용품 작동에 이상이 없어야 한다.

3-3 장비용품 설치 및 해체

1) 감천항유도등부표의 장비용품(등명기, 축전지, 태양전지, 충방전조절기 및 레이콘)을 철거하여 감천항유도등부표대체등부표(LL-28)에 재설치하며, 설치 시에는 해상의 강풍, 파도 등에 의해 파손되지 않도록 단단하게 표체에 고정하고 기능작동에 이상이 없어야 한다.

2) 스파부이 이설작업 시 등명기 및 축전지를 안전하게 철거한 뒤 진행하며, 이설 완료 후 재 설치하여 기능 작동에 이상이 없어야 한다.

3-3 기타 사항

1) 각 공정별 시방서 내용이 미비한 사항에 대하여는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

2) 현장대리인은 공사현장의 안전관리 및 품질관리에 대하여 만전을 기하여야 하며 중요공정(설치 및 이설)은 작업 전 감독관의 승인 하에 시공하여야 한다.

3) 등부표 설치 및 이설 완료 후 설치상태를 확인할 수 있도록 수중 동영상 촬영 후 결과를 제출하여야 한다.

4) 등부표 설치 및 이설작업 완료 후 준공검사에 대비하여야 한다.

4.  예  정   공   정   표

4.  예   정   공   정   표

작 업 내 용	추 진 일 정 (20일간)					비 고
	4일	8일	12일	16일	20일
1. 작업 준비 - 장비준비 - 현장조사 등 수심 확인
2. 등부표 이설작업 - 스파부이 수중점검 및 촬영
3. 현장 정리 및 준공계 제출
공 정 율 (%)	20	20	20	20	20
누 계 공 정 율 (%)	20	40	60	80	100

5.  예   산   내   역   서

2018년 10월 설계

설

계 자

심사자

담당

과장

전결

청장

2018년도

태풍 피해 등부표 위치복구공사 설계내역서

○ 사 업 개 요 :  부산남외항 스파부이 이설 8기 및 등부표 1기 설치

○ 총사업비 : 일금 사천일백만원정[￦42,000,000)	도 급 액 :	일금 42,000,000원
	공 급 가 액 :	일금 38,181,819원
	부가가치세 :	일금 3,818,181원

6.  원   가   계   산   서

7.  일   위   대   가

8.  단   가   산   출   서