복

합

다

기

능

부

잔

교

설

치

공

사

설

계

서

2018

•

08

서

산

시

		복합다기능 부잔교 설치공사
		설계서
	2018. 08

목  차

1. 설  계  설  명  서

2. 일  반  시  방  서

3. 특  별  시  방  서

4. 예  정  공  정  표

5. 설  계  내  역  서

6. 일  위  대  가  표

7. 단  가  산  출  서

8. 수  량  산  출  서

9. 설   계   도   면

1. 설 계 설 명 서

1. 설 계 설 명 서

1-1 공사명

○ 복합다기능 부잔교 설치공사

1-2 공사위치

○ 충청남도 서산시 대산읍 오지리 벌말항 포구 일원

1-3 공사목적

○ 조수간만의 차가 큰 수역에서 부족한 접안시설의 확충을 위한 부잔교를 추가 설치하여 어획물의 양육 및 승하선 등 소형어선의 안전한 이용을 도모하여, 어업인의 근로여건 개선 및 편의를 제공하는데 목적이 있음

1-4 공사개요

○ PE 부잔교	: 2EA

○ Pneumatic Fender	: 6EA

○ 부대공	: 1식

1-5 주요자재

○ 해상부유구조물 : L=30.52m, B=6.06m, 2EA

○ 닻가지 앵커 : 200Kg, 8EA

○ 기존 P.P 로프 교체 : 검정, 36mm, 144m

○ Pneumatic Fender : 1,000 × 1,500 × 6EA

1-6 공사시행방법

○ 본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

1-7 공사기간

○ 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 5개월로 하며, 다음의 경우 발주처의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간 중 강우일수가 연평균 강우일수보다 많아 적기 시공이 어려울 때.

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때.

3) 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.

4) 지장물 등으로 인한 관의 형편상 작업이 불가능 하였을 때.

1-7 설계변경 조건

○ 본 공사 수행 중 다음과 같은 사유가 발생하였을 때에는 설계변경 할 수 있다.

1) 설계 당시 조사 불가능한 부분 및 추정 설계된 사항에 대하여서는 시공 시 현장여건에 맞추어 변경.

2) 관급자재 인도지가 변경되었을 때

3) 공급변경이 불가피 할 때

4) 천재지변으로 인하여 불가피하게 설계변경이 필요할 때

5) 수요기관의 형편상 불가피한 경우

6) 기타 계약조건에 따라 설계변경이 필요한 경우

2. 일 반 시 방 서

2. 일 반 시 방 서

I. 적용 범위

○ 이 시방서는 서산시에서 발주한「복합다기능 부잔교 설치공사」를 시행함에 있어 공사 계약서, 설계도서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약 내용의 이행을 확보하기 위한 것이며, 내용은 일반시방서와 특별시방서로 구분하여 구성된다.

II. 적용 기준

1. 시방규정 및 관련 법규

○ 이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 제반 규정과 관련법의 규정을 준용하되, 규정 간에 상이한 사항이 있을 경우에는 항만  및 어항공사 전문시방서를 우선하여 적용한다.

1) 토목공사 표준일반시방서	2) 콘크리트 표준시방서

3) 항만 및 어항공사 전문시방서	4) 항만시설물 및 항로표지 구조물 설계기준

5) 한국산업규격 ㉿	6) 건설공사 품질관리 검사기준

7) 시설공사 검사업무 규정	8) 항로표지장비 ․ 용품검사기준

9) 건설공사 관계법령 및 규정	10) 건설산업 기본법

11) 건설기술 진흥법	12) 환경보존법

13) 관계 시, 도의 조례	14) 기타 본 공사에 관련되는 각종 기준 및 규격

2. 본 공사에 관련되어 발주처가 제공하는 제규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 간주한다.

3. 발주처에 제출하는 모든 서류는 반드시 공사 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

III. 공사 시행

1. 착공 시 서류 제출 사항

○ 도급자는 공사 착공 시 다음 서류가 포함된 착공신고서를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

1) 현장대리인계

2) 현장기술자 지정신고서 (안전관리자, 환경관리자, 품질관리자)

3) 공사 예정공정표

4) 안전‧환경 및 품질관리 계획서

5) 공정별 인력 및 장비투입 계획서

6) 착공 전 현장 사진

7) 주요자재 투입 계획서

8) 환경오염 방지계획서

9) 기타 발주처가 지정한 사항

2. 도급자의 의무

1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 발주처가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제반 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주처의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 공사를 위한 보상을 하거나 임대 업무를 추진함에 있어, 도급자는 토지 소유자 등 이해관계인과 협의한 다음, 관련 사항을 조속히 조치하고, 발주처의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 공정표 및 시공계획서

1) 도급자는 당해 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 익월 5일까지 공사 감독관에게 제출하여야 한다.

① 월별 공정율 및 수행공사 금액

② 인력, 장비 및 자재 현황

③ 공정 상황을 나타내는 현장 사진

2) 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 예정공정표를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

3) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 작성하여 공사감독관에게 제출하여야 하며, 월별 현황과는 별도로 주간 공정 현황을 공사감독관에게 제출하여야 한다.

4) 도급자는 공사시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입계획, 주요 장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대한 상세한 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 착수하여야 한다.

5) 기 수립된 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

6) 공사진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정 공정보다 지연될 경우, 도급자는 공사감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입 등 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

4. 현장대리인 및 현장종사원

1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법등 관계법령에 의한 건설기술자라야 하며, 공사감독관의 승인 없이 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

2) 공사감독관은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

3) 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독관의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

4) 도급자는 현장종사원이 공사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

5. 제보고 및 서류 양식

1) 계약서에 지정한 것과 공사감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 공사감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따라 정하지 않은 경우에는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

6. 관계기관 등과의 협의

1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 공사감독관의 협조를 받아 도급자가 수행하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 공사감독관을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

7. 공사부지의 사용

1) 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주처 소관의 부지는 발주처의 승인을 받아 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2) 공사를 시행하기 위해 발주처로부터 차용한 부지외에 도급자의 필요에 의하여 설계 범위이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 발주처와의 협의에 따라 토지의 차용, 보상을 시행하되, 제반 사항은 도급자 책임으로 시행되어야 한다.

3) 도급자는 공사 시행에 직접, 간접적으로 영향이 있어 철거가 불가피한 지장물에 대하여는 발주처와 협의, 당해 지장물의 소유주 (기관포함)의 사전 승인을 받아야 한다.

8. 문화재 보호

1) 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 그 즉시 공사를 중지하고 도난, 손괴 등을 방지할 수 있도록 현장보존조치를 하여야 하며, 이 사실을 공사감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

9. 제법규의 준수

1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 투입된 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

10. 설계도서 등의 비치

1) 공사 현장에는 해당공사에 관련된 계약서, 설계도서, 제반 표준시방서, 관계 법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 공사시행에 필요한 기구류 등을 비치하여야 한다.

VI. 시공기준

1. 설계도서 및 측량 기준

1) 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 내용을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

2) 도급자는 공사의 시공에 앞서 설계내역, 설계시방서, 구조계산서, 설계도 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

3) 도급자는 상기와 같은 검토과정에서 수록된 내용의 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사감독관에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

4) 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 공사감독관이 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

5) 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후의 형상과 치수를 나타낸다.

6) 공사수량의 단위 및 수량계산은 정부시설공사 건설표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

7) 공사 시공 중 또는 준공 정리 시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도요령에 따라야 한다.

2. 시공측량

1) 도급자는 설계도서 및 공사감독관이 서면으로 제시한 기준점을 기준으로 하여 정확한 시공 측량을 하여야 한다.

2) 공사 시행에 필요한 제반 측량은 공사감독관의 검증을 받아야 하며 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임져야 한다.

3) 공사 현장에서 가장 가까운 위치에 공사감독관의 승인을 얻어 수준점 양수표를 설치하여 조위를 상시 관측할 수 있도록 하여야 한다.

4) 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격시험에 합격한 자로서 당해 시공측량에 적합한 능력을 갖추고 있는 자라야 한다.

5) 측량에 사용되는 각종 기기는 반드시 국가공인교정 검정기관의 검정을 받은 기기에 한해 사용하여야 한다.

6) 도급자는 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대한 책임을 져야 한다.

3. 사전조사

1) 공사 장소에 인접한 시설물 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 공사감독관과 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

2) 기타 공사에 관련된 환경에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

4. 건설장비

1) 도급자는 현장에 반입, 공사에 투입될 장비의 제원 및 수량을 서면으로 공사감독관에게 제출하여야 한다.

2) 도급자는 투입된 선박의 고장, 수리 등에 대비하여 공사구역 내에 필요한 장비, 설비 및 부대기구의 예비품을 구비해 고장 즉시 교체, 수선이 가능토록 해야 한다.

5. 공사용 자재

1) 본 공사를 위한 주요 자재의 세부사항은 특별시방서에 따른다.

2) 공사용 모든 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라야 하며 주요 자재는 현장 반입 전에 재료시험 성과표 등의 품질확인 서류를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 주요자재 보관중 도급자 귀책에 의해 자재가 변질, 변형, 오손되었을 경우에는 도급자 부담으로 제반 품질기준에 맞는 자재로 교체하여야 한다.

4) 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 또는 산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

5) 공사현장 반입 시 합격판정을 받은 자재라 할지라도 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 파손되었을 때는 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

V. 가시설물

1. 공사용 가설물

1) 공사용 가설물은 공사감독관과 협의하여 선택할 수 있다.

2) 공사 시행을 위한 현장사무소, 공사 품질관리를 위한 시험실 및 각종 자재의 변질, 파손, 도난을 방지하기 위한 자재창고를 건립하고 이를 유지 관리하여야 하며, 공사완료 후 도급자 부담으로 이를 철거하여야 한다.

3) 현장사무소 및 시험실의 실내 배치 및 부착물 등에 대해서는 공사감독관과 협의하여 설치하여야 하며, 각종 비품 및 시험기기의 준비와 채광, 환기, 보안대책, 전화 등을 가설하여 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

2. 안내 표지판의 설치

1) 도급자는 공사의 안내 표지판을 설치하여야 하며, 그 표지판의 규격, 재료, 표기 내용 및 설치 장소 등은 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

VI. 시공 관리

1. 공사기간

1) 도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

2) 특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 공사감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한, “2.”항의 공사 중지사항 중 1), 3), 4), 5)항에 의해 공사기간 연장이 불가피할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 14일이내에 공사감독관에게 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

2. 공사의 일시 중지

○ 공사감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있고, 태풍기에 임박하여 시설이 유실될 위험이 있거나 안전에 지장을 초래할 위험이 있을 경우 위험요소가 해소될 때까지 공사를 중지시킬 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 도급자가 설계도서대로 시공하지 않을 때

3) 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

5) 발주처의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

3. 작업시간

○ 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

4. 입회 및 자료 제출

1) 수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 시공 후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에 대하여는 공사감독관의 입회 하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료 (검사보고서, 기록사진, 현장관리시험대장등)를 제출하여야 한다.

5. 공사기록

1) 도급자는 공사감독관이 승인한 작업 상황보고 양식에 따라 매일의 작업내용, 취업인원, 취업장비 및 가동시간과 공사용 자재의 불출 상황을 기입, 매 익일 공사감독관에게 제출하여야 한다.

2) 도급자는 매 익일의 작업계획을 공사감독관에게 제출하고 매월 말에는 다음달의 작업 계획과 그 달의 작업성과를 제출하여야 한다.

3) 도급자는 공사 진행에 따라 공사기록 사진을 촬영하여 필름에 수록하고, 주요 공정에 대한 검사, 매몰부분 등에 대한 검사, 기성 및 준공 검사 장면을 사진 및 비디오로 촬영 수록하며, 완공 후 제반 성과를 작성 편집하여 제출하여야 하며 기록 사진의 크기는 공정을 확인하기 위해 필요할 경우에는 변경 조정하여 제작한다.

4) 시공 후 매설되거나 담수되어 확인할 수 없는 부분은 필히 사진촬영을 하여 수록하여야 하며, 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격 등을 판별할 수 있게 측량용 Pole이나 Staff와 함께 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

6. 현장관리

1) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 해상장비에서 발생되는 쓰레기 등 폐기물은 적법하게 처리하여 해양오염방지에 노력하여야 하며 부득이하게 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독관에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

2) 도급자는 공종별로 매작업 단계마다 공사감독관의 검사를 필한 후 다음 단계의 작업을 착수하여야 한다.

3) 공사중 항상 관할 관계기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

4) 화약, 휘발유, 전기등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

5) 위험 때문에 일반인의 출입을 금지시킬 필요가 있는 공사 현장에는 공사감독관의 승인을 받아 그 구역에 적당한 방책을 설치하는 동시에 출입금지의 표지를 설치하여야 한다.

6) 도급자는 해상 작업에 따른 장비의 제반 규칙을 준수하여 운반선, 바지선, 예인선등의 항해에 위험을 줄 수 있는 기타 해상 장비 또는 장애물에는 경고등을 설치하여야 한다. 도급자는 이와 관련하여 경고등 설치를 태만히 하였거나 설치를 하지 않았기 때문에 야기되는 일체의 피해에 대한 책임을 진다. 공사로 인한 기존 항로의 장애는 최소한으로 줄인다.

7) 도급자는 공사 시행중 선박들이 항해를 자유로이 할 수 있도록 하여야 하며, 공사감독관을 위한 해상 교통수단을 제공하며 이와같은 교통수단은 공사기간중 항시 이용될 수 있도록 한다.

8) 도급자는 공사구역의 표시 및 검사의 편의에 필요한 측표, 부표 및 기타표지를 설치 및 유지하여야 한다.

7. 분진 및 소음장치

1) 도급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 분진 및 소음으로 공중에 피해가 없도록 하여야 한다.

8. 특허권의 사용

1) 공사시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법 및 재료 등을 사용할 때에는 도급자가 그의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

9. 사고의 처리

1) 공사중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

10. 가설건물

1) 공사에 필요한 현장사무소, 재료창고, 기계기구 거치장소 등에 대하여는 공사감독관과 협의하여야 한다.

2) 현장 대리인은 공사감독관 입회하에 공사구역내 가설구조물을 정기적으로 점검하여 항상 안전을 확인해야 한다.

11. 시공 중 검사

1) 공사의 단계별 완료시에는 검사요청서를 제출하여 공사감독관의 승인을 득한후 다음 단계의 작업을 진행하여야 한다.

12. 준공검사

1) 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요한 제반 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사관의 지시에 따른다.

2) 준공검사관의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

13. 비용부담에 관한 사항

○ 공사 시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

1) 공사시방서, 설계 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항

2) 공사 착공 및 준공시와 공사 진행중 필요한 수심, 수중탐사 및 각종 측량

3) 기성검사 및 예비준공검사, 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

4) 공사 시행상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험

5) 교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대 시설

14. 공사 준공 후의 정리

1) 공사가 완료되었을 때에는 공사감독의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고 현장을 청소, 정리하여 공사감독관의 검사를 받아야 한다.

VII. 품질관리 및 검사

1. 품질관리 일반

1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술관리법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당기준, 시험규정 등에 따라서 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

2) 도급자는 착공 후 공종별 품질관리계획을 수립하여 시공단계별로 공사감독관의 확인을 받아야 한다.

3) 규격 및 시험 방법은 계약서의 시방내용과 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

2. 공사용 재료의 품질

1) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국산업규격에도 부합되어야 한다.

2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 공사감독관이 변질 또는 불량품으로 판정한 때는 이를 사용할 수 없다.

3) 공사감독관이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3. 시공확인 및 검사

1) 감리원이 행하는 재료검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 도급자 부담으로 제공하여야 한다.

2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 공사감독관의 입회하에 검사를 받고, 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

4. 기성 및 준공검사

1) 공사의 기성부분 검사 및 준공 검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 공사준공 기간

① 전체 공사는 설계설명서에 정하여진 바에 따라 입찰서에 기입할 착수일로부터 계산한 기간내에 완전 준공되며, 공사기간은 휴일이 포함된 날짜를 기준하여 정한다.

② 천재지변, 국가전쟁, 화재, 전염병, 폭동, 공항 및 항구폐쇄와 같은 예기치 못한 불가항력의 원인에 의한 경우는 도급자의 공사 불이행으로 간주치 아니하며, 도급자는 원인 발생일로부터 10일이내에 그 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

VIII. 안전 및 환경관리

1. 안전관리

1) 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

2. 안전조치

1) 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립, 공사감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전 조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

3. 안전표지 및 안전 보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

4. 안전교육

1) 산업안전보건법에 의거 공사 시공 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

5. 안전시공

1) 도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

6. 사고보고 및 응급조치

1) 공사 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 공사감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 사상사고

② 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

③ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 인사사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 공사감독관에게 긴급보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

7. 안전관리비의 사용

1) 도급자는 산업안전보건법등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 공사감독관의 제출 요구시에는 이에 따라야 한다.

2) 당해 공사 금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안 된다.

3) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

8. 환경보호

1) 도급자는 공사 중 또는 공사 준공 후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 또는 훼손이 발생치 않도록 공사장과 인근의 환경 보호에 만전을 기해야 한다.

XI. 준공검사

1. 준공 도서

1) 전공정에 따른 시공 사진첩 2부

2) 준공도서에는 아래 항목들이 첨부되어야 한다.

① 준공 현장 전체 외관 사진

② 공사감독관의 지시사항에 따른 이행사항

③ 공사 시공 중 애로사항 및 시정을 요하는 사항

④ 공사도중 재해대책 및 안전관리 사항

⑤ 준공도서 사본

2. 준공검사 및 인수

1) 도급자는 계약상 준공일전에 공사를 완료하고, 공사감독관에게 준공검사를 요청하여야 한다.

2) 검사관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 실시할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다.  시험 및 검사에 합격하여 검사관이 공사 완료되었다고 인정한 경우 준공검사 요청서를 접수 처리한다.

3) 도급자는 준공검사 시 현장대리인 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 시공불량 개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단 시일 내에 재시공 하여야 한다.

4) 도급자는 준공검사 완료통지를 받은 후 지체 없이 다음과 같은 서류를 작성 제출하여, 현장인수를 요청하여야 한다.

① 공사 설계도서

② 준공 검사 조서

③ 시설물의 개요 설명서

④ 사진대장 (별도 요구양식)

3. 특 별 시 방 서

3. 특 별 시 방 서

제 1 장  총칙

1-1 일반사항

○ 본 시방서는 일반 시방서에 명기되지 않은 특별한 사항만을 규정하며 타 시방서보다 우선한다.

1-2 관련사항

○ 본 공사와 관련된 제 규정 및 본 공사 시공도면은 본 시방서의 일부로 간주한다.

제 2 장  PE부잔교 설치 일반사항

(1) 해상부유구조물은 해역 조건에 대해 충분한 강도와 내구성을 지녀야 한다.

(2) 해상부유구조물을 공장에서 제작 후 현장으로 운송할 때는 파손이나 충격에 의한 비틀림 등의 변형이 생기지 않도록 취급에 특별히 유의하여야 한다. 운송중 발생하는 파손되거나 변형에 대해서는 수급인 부담으로 보수하거나 보수가 불가능할 경우 신품으로 교체하여야 한다.

(3) 해상부유구조물의 도로운송 시는 도로교통법 등 제반관련규칙에 위배되지 않도록 해야 한다. 필요시 화물 돌출부에는 위험표시를 하는 등 다른 차량의 통행 안전을 고려하여야 한다.

(4) 해상부유구조물의 보관 장소는 배수가 잘되고 제품의 무게에 의해 침하가 발생하지 않는 견고하고 평탄한 장소이어야 하며, 해상부유구조물의 이동, 인양, 취급, 운반, 보수 등의 작업을 안전하게 하기 위한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

(5) 해상부유구조물 보관 적치 시 유형별, 종류별, 규격별로 분류 정리하여 반출하기 편리하도록 하여야 한다.

(6) 해상부유구조물의 사용 방법이나 용도의 변경, 향후 수요에 따른 연장이 가능하고 용이하여야 한다.

제 3 장  해상부유구조물 (PE부잔교)

3-1 일반사항

1. 적용범위 : 본 제작 시방서는 해상부유구조물(PE부잔교) 제작 및 설치공사에 적용한다.

2. 일반사항

(1) 해상부유구조물 제작 및 설치에 종사하는 융착 기술자는 경험이 풍부한 자이어야 한다.

(2) 해상부유구조물은 융착, 조립, 볼팅 등 공장에서 완제품 생산 후 현장에 납품하여야 한다.

(3) 제작업자는 설계도에 정해진 제품의 품질 등을 확보하여 시방서에 준하여 제작한다.

3. 제작관리

○ 제작업자는 별도로 정하는 사양서 및 본 시방서 기준에 의해 관리를 행한다.

4. 검사

(1) 제품 검사는 계약자 또는 현장 대리인이 감독관 입회하에 검사를 받아야 한다.

(2) 계약자는 검사에 필요한 측정도구, 장비, 도면 등 감독관의 지시에 따라 제공한다.

3-2 해상부유구조물(PE부잔교) 제작

1. 재료

(1) PE브라켓(롤링저감형)

- 주부력체의 양옆에 보조파이프를 두는 등 롤링을 저감할 수 있고, 브라켓간 5개의 볼트연결로 부잔교의 안정성을 키운 브라켓을 사용한다.

- 폴리에틸렌(PE) 재질로 부력재인 PE파이프를 삽입할 수 있어야 하며, 상부에는 발판과 방지턱을, 측면에는 충격방지대를 설치 할 수 있는 구조여야 한다. 또한 상부에는 발판의 일정한 간격을 유지해주고 방지턱의 이탈을 방지하는 지지대를 갖춰야 한다.

[PE발판(미끄럼방지)]

[PE브라켓(롤링저감형)]

(2) PE파이프

폴리에틸렌(PE)관으로 한국산업표준(KS) 제품(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌 제2부:관, KS M 3408-2)을 사용하며, SDR26 D500으로 한다.

(3) PE발판 (미끄럼방지)

폴리에틸렌(PE) 재질로 사용자 안전을 위한 미끄럼방지 기능이 있어야 하며, 다중격벽으로 활하중에 의한 지지력을 확보하여야 한다.

(4) PE미끄럼방지턱 / PE충격방지대(요철형)

폴리에틸렌(PE) 재질로 계류하는 선박의 손상을 방지하고, 어업의 용이성을 돕기 위해 볼트머리가 외부로 들어나지 않는 요철형태의 제품을 사용한다.

[PE미끄럼방지턱]

[충격방지대(요철형)]

(5) PE캡

폴리에틸렌(PE) 재질로 부력재의 밀폐용 또는 중간격벽으로 사용되며, 크기나 두께가 부력재의 밀폐 용의하여야 한다.

[PE캡]

(6) 볼트

모든 볼트류는 부식 방지를 위하여 STS304재질이어야 하고, 풀림방지용 너트와 함께 사용한다. 발판에 사용되어지는 볼트는 이용자의 편리성을 위하여 둥근형태로 가공된 제품을 사용한다.

- 볼트규격

재질	품명	규격	용도	1SET 구성	비 고
STS304	둥근머리육각볼트	M12×110L~130L	발판고정	B, LN, 2P
		M12×170L	방지턱 고정	B, LN, 2P
	육각볼트	M12×170L~200L	충격방지대 고정	B, LN, 2P
		M16×90L	브라켓 고정	B, LN, 2P

2. 폴리에틸렌(PE) 접합 및 부설

(1) 폴리에틸렌(PE)의 접합은 맞이음(BUTT)융착 접합방식을 이용한다.

(2) 폴리에틸렌(PE)의 융착면은 슬래그, 수분, 시름, 도료 등 융착에 지장을 주는 것을 제거하여야 한다.

(3) 폴리에틸렌(PE) 융착면은 면취작업을 통하여 맞댄면 상태가 양호하도록 한다.

(4) 가공 중에 발생한 변형은 그 변형량이 정해진 제품의 허용한도를 초과한 경우에는 교정하거나 교체하여야 한다.

(5) 변형 교정은 상온 또는 열간에서 행할시 재질이 변형되지 않도록 주의하여야 한다.

(6) 융착 부의 유해한 결점이 있는 부분은 제거하고 재 융착한다.

(7) 융착 부에 균열이 생긴 경우는 그 융착 부를 전장에 걸쳐 제거하고 재 융착한다.

3. 공작 및 부재조립

(1) 해상부유구조물의 치수는 제품사양서 및 제작도면 의한다.

(2) 부력용 파이프에 브라켓을 끼워 배열한 후, 브라켓 측면의 홈에 맞춰 결합하고 브라켓 고정용 볼트로 충분히 견고하게 체결하여 장기간 풍파나 항주파에도 뒤틀어지거나 이탈하지 않게 고정시킨다.

(3) 일정한 간격으로 배열되어 결합된 브라켓의 상부에 발판을 설치하고 발판의 외곽으로 방지턱을 설치한다. 발판의 체결은 일정한 간격으로 배열된 브라켓을 서로 견고하게 연결해 역할을 한다.

(4) 계류 선박에 의한 충격을 흡수하여 제품의 손상을 방지하는 충격방지대는 해상부유구조물의 정면, 측면, 후면에 설치하며 계류하는 선박의 다양화와 이용자의 편리성과 안전성을 위해 2단으로 설치한다.

- 제작순서도

① 브라켓 배열		② 발판 설치		③ 방지턱 및 충격방지대 설치		④ 완성

제 4 장  계류체인공

4-1 일반사항

1. 적용범위 : 본 시방서는 체인계류 시공에 관한 특별사항을 규정한다.

4-2 재 료

1. 제품승인

(1) 체인은 KS규격에 적합하고 승인된 제품을 사용하여야 한다.

(2) 계류용 PP 로프는 KS규격의 승인된 제품을 사용하여야 한다.

4-3 시공

(1) 체인은 선박의 접안에 방해하지 않도록 폰툰 밑에서 십자로 교차시켜 설치하여야 한다.

(2) 계류체인의 길이는 폰툰의 설치부 수심의 5배에 간만차를 더한 것 이상으로 설치하여야 한다.

(3) 만조시에 너무 당겨서 체인에 여부의 인장력을 주지 않아야 한다.

(4) 만조시에 선박의 접안을 방해하지 않도록 설치하여야 한다.

(5) 만조시에 충분한 앵커력이 확보되도록 해야한다.

(6) 간조시에 폰툰의 수평이동이 최소화 되도록 설치하여야 한다.

(7) 체인의 외력에 인하여 발생하는 인장력으로 인하여 끊어지지 않도록 충분한 안전율 확보해야 한다.

(8) 앵커의 중량 및 설치는 계류체인의 설계에 의한 최대인장력이 작용할 때 양커가 충분히 안정되도록 설치해야 한다.

(9) 콘크리트 블록 앵커블록은 터파기를 한 다음 바닥면에 노출되지 않게 한 다음 해저 중에 묻어야 한다.

제 5 장  콘크리트 앵커블록공

5-1 일반사항

1. 적용범위 : 본 시방서는 콘크리트앵커블록의 제작, 운반, 전치, 가치, 거치공사에 관해서 적용한다.

2. 주요내용 : 콘크리트 앵커블록 전치, 가치, 운반, 거치

3. 콘크리트 설계기준강도는 아래 표와 같다.

구 분	설계기준강도(kgf/㎠)	비고
콘크리트앵커블록 (무근)	25-180-12

4. 참조규격

(1) 건설기술진흥법

(2) 콘크리트 표준시방서

5-2 시공

1. 공통사항

(1) 수급인은 제작장 배치계획을 수립하여 공사감독자와 협의하여야 한다. 제작장 배치계획에는 콘크리트 반입로, 타설 방법과 전치(轉置)및 가치 필요할 경우 블록의 (假置) (필요할 경우), 운반방법 등이 함께 고려되어야 한다.

(2) 대형블록을 해안선에 연한 제작장에서 제작할 경우에는 기존의 호안 구조물에 대한 안정검토를 하고 검토보고서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 또 제작장 지반이 연약하여 블록제작에 악영향을 줄 우려가 있을 때에는 수급인은 지반보강공사를 실시하여야 한다.

(3) 블록의 이동, 거치작업을 용이하게 하기 위하여 블록의 중심부(重心部)나 들었을 때 평형을 유지할 수 있는 위치에 들고리를 매입하여정착시켜야 한다. 들고리 철근은 콘크리트 면보다 올라와서는 안 된다.

2. 거푸집

(1) 블록제작용 거푸집은 여러 번 재사용해도 형상이 변형되거나 면이 거칠어지지 않는 견고한 것이어야 하며 구조가 단순하여 조립과 해체가 간단하고, 취급이 편리하고, 유지보수가 용이한 것이어야 한다.

(2) 콘크리트 블록의 높이가 2m 이상이 되면 작업 비계를 설치하여야 한다.

(3) 거푸집 해체시기는 공사감독자와 협의하여 결정한다. 거푸집 해체 시 콘크리트 기준강도는 3.5 Mpa 이상 이어야 한다.

3. 콘크리트 타설

(1) 콘크리트의 운반, 타설, 양생은 본 시방서『항만 및 어항공사 전문시방서 6장 콘크리트 공사』해당기준에 따른다.

(2) 제작이 완료되어 거푸집을 떼어내면 즉시 제작일자 형별 번호 등을 표시하여야 한다.

4. 전치

(1) 전치 시기와 방법은 공사감독자와 협의하여 결정한다.

(2) 전치작업시 와이어를 감아서 들어 올릴 때는 콘크리트 면에 흠집이 나지 않도록 헝겁이나 고무류 등을 와이어가 닿는 면에 끼우고 들어 올려야 한다.

5. 가치

(1) 가치는 블록이 설계기준강도 이상 양생이 완료된 후에 하여야 한다.

(2) 가치 장소가 해안선에 인접해 있을 때는 블록질량에 대한 호안구조물의 안정성을 검토하여야 한다. 또 적치장소가 해수중일 때는 지반의 침하나 매몰, 파랑이나 조류에 의해 손상될 우려가 있는지 검토하여야 한다. 수급인은 검토결과를 공사감독자에게 보고하고 승인을받아야 한다.

(3) 적치장은 바닥을 평탄하게 고르거나 받침목을 깔아서 적치한 블록에 과대한 응력이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 가치 시 콘크리트 기준강도는 10.0 Mpa 이상 이어야 한다.

6. 운반

(1) 공사조건 및 운반조건에 맞추어 적절한 운반 장비를 선정하여야 한다. 블록을 운반 장비(트레일러, 대선 등)에 적재할 때 충격에 의해손상되지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 운반 장비 바닥에는 적절한 받침목을 깔아 블록에 과대한 응력이 발생하지 않게 하고, 블록을 와이어로 운반 장비에 견고하게 체결하여 운반도중 블록이 요동하지 않게 하여야 한다.

(3) 블록운반은 블록이 설계기준강도(fck)이상 양생한 후에 하여야 한다.

7. 거치

(1) 거치작업 착수 전에 블록 거치장소의 기초터파기를 실시하여 거치하고 앵커블록이 지표면에 노출되지 않아야 한다.

(2) 거치 작업 중에 파랑에 의한 동요 등으로 블록에 충격을 주어 블록이 손상되는 일이 없도록 충분히 주의하여야 한다. 거치장비(기중기선, 대선 등)는 블록거치작업을 하기에 충분한 규격을 가진 것이어야 한다.

(3) 시공허용오차 및 검사콘크리트 블록제작공사의 규격상의 허용오차 범위는 다음과 같다.

① 폭      : (＋) 20㎜, (－) 10㎜

② 높   이 : (＋) 20㎜, (－) 10㎜

③ 길   이 : (＋) 20㎜, (－) 10㎜

④ 벽 두께 : (±) 10㎜

제 6 장  클리트 (cleat)

(1) 클리트는 정박되는 보트의 크기를 고려하여 정박장 주위의 주잔교와 보조잔교의 가장자리에 적절히 설치하여야 한다.

(2) 보조잔교에는 적어도 양면에 2개 이상의 클리트를 가장자리를 따라 배치하여야 하며, 보조잔교 사이로 보트 2척이 나란히 계류하는 양현계류(double berth)의 경우는 주잔교에도 각 보트마다 클리트를 1개씩 추가로 배치하여야 한다.

(3) 클리트 용량 선정 시 계류된 보트에 직각으로 작용하는 풍압과 파력, 조류력 등을 고려하고, 여기에 동적인 충격력을 감안하여 적정한 안전율을 확보하도록 하여야 한다.

(4) 클리트의 모든 부분은 뾰족한 곳이 없어야 하며 계류로프가 여러 번 감겨질 수 있도록 여지가 충분히 있어야 한다.

(5) 클리트의 재질은 내부식성이 우수하여야 한다.

(6) 클리트는 부잔교의 가장자리에 배치되어 부잔교 구조물과 일체가 되도록 내부식성 관통볼트로 견고하게 고정되어야 한다.

(7) 요트 견인력에 의한 안전사고를 방지하기 위해 클리트 고정 시 충분히 안전한 고정방식을 채택하여야 한다.

(8) 클리트 설치시 주위에 계류삭이 걸릴 수 있는 장애물이 없어야 한다.

제 7 장  STS 도교 제작

7-1 재료

1. 재료의 선정

(1) 자재의 품명, 규격, 재질, 표면처리 기준은 한국산업표준(KS) 품질 기준에 적합하여야 하며, 설계도면에 준한다.

(2) 한국산업표준 KS D 3705에 적합한 자재를 사용한다.

(3) 푸팅롤러는 파손되지 않고 충분한 강도를 가진 제품을 사용하여야 하며, 설계도면에 준하여 제작 및 구입하여야 한다.

7-2 제작

1. 용접시 지정되지 않은 용접 방법을 쓸 경우 작업전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 공기나 습기의 침투방지가 필요한 조립부품은 연속된 실(Seal) 용접을 하여야 한다.

3. 용접작업 중에 변형을 방지하기 위하여 적절히 구속하거나 지그를 사용하여야 한다.

4. 용접 시에는 될 수 있는 대로 아래보기 자세 등 안정된 자세로 할 수 있어야 하며 아래 보기 자세가 불가능한 경우에는 포지셔너(positioner), 회전테이블 또는 롤러 등의 지그를 이용하여 가능한 한 아래보기자세로 용접할 수 있도록 하여야 한다.

5. 모든 스테인리스 용접은 바람이 불지 않는 장소에서 보호가스 용접을 하여야한다.

6. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균등하게 되도록 용접순서에 유의하여야 한다.

7. 계약상대자는 용접할 소재의 재질을 확인하여야 한다. 재질은 화학성분 분석, 기계 적 특성시험 등을 실시하거나 감독원의 승인이 있는 경우에는 공장 재질시험 검사 성적서로 대체할 수 있다.

8. 용접작업은 용접부재의 융합이 충분히 되도록 적절한 용접봉, 용접전류 및 용접속도를 선정하고 결함이 없도록 하여야 한다.

9. 두께가 서로 다른 재료의 맞대기 접합에 있어서는 두께차이로 인한 굽힘응력 증가를 적게하기 위하여 두꺼운 판의 끝 부분에 1/4 이상의 기울기를 갖도록 절삭 하여 야 한다. 단,  두께차가 3.0mm 미만일 때는 그대로 작업한다.

10. 용접부는 수분, 녹, 기름, 먼지, 페인트 등의 불순물은 와이어브러쉬 등으로 완전히 제거하여 적절한 용접에 악영향을 주는 결함이 없어야 한다.

11. 조립 및 가용접

(1) 조립 작업은 치수, 형상등의 잘못이 없는가 신중히 검토하여야 하며, 본 용접과 동등 이상의 기량을 갖고 시공하여야 한다.

(2) 조립시에는 일정한 루트간격 유지, 모재간의 단차 최소화, 적절한 역변형 치수 유지, 진직도나 진원도 등의 형상을 일치시켜야 한다.

(3) 가용접 부분을 제거하지 않고 본 용접을 하는 경우에는 가용접시 사용하는 용접봉 도 본 용접에 사용하는 용접봉과 동일한 것을 사용하여야 하며 용접후 슬래그 및 기타 용접잔여물을 깨끗하게 청소하여야 한다.

(4) 베벨링부를 가용접할 경우에는 기포나 균열이 생기지 않도록 해야하며, 만일 기포 나 균열이 생겼을 때에는 그라인더로 완전히 제거후 재용접하여야 한다.

(5) 가용접은 일반적으로 맞대기 이음에서는 용접두께 3˜mm, 필릿이음에서는 목두께 1mm정도의 1층으로 실시한다.

12. 본용접

(1) 비드쌓기 순서

가. 중앙에서 양끝 쪽을 향해 동시에 용접한다.

나. 대칭으로 용접한다

다. 다층용접시에는 용접면의 방향과 용접방향을 층마다 바꾸면서 용접한다.

(2) 이음용접 순서

용접부에 수축응력과 용접결함을 적게하기 위하여 동시에 한곳에 다량의 열이 집중되지 않도록, 용접열의 분포가 균등하게 되도록 다음과 같이 용접순서를 정한다.

- 작은부품부터 큰 부품순으로, 소조립에서 대조립순으로 용접이 되도록 결정한다.

- 구조물을 가장 강하게 보강하는 용접이음은 제일 마지막에 용접한다.

- 필릿용접이음보다 맞대기 용접이음을 먼저 용접한다.

- 맞대기 용접이음들은 짧은 이음들을 먼저 용접하고 긴 이음들은 나중에 용접한다.

- 원통형 구조물은 길이방향 이음을 먼저 용접하고 긴 이음들은 나중에 용접한다.

- 이음부에 작용하는 응력에 종류에 따라 용접순서를 결정한다. 전단응력이 걸리는 곳을 먼저 용접하고 다음은 인장응력과 압축응력이 걸리는 부위순으로 용접한다.

- 박판 구조물의 경우는 구속재 또는 보강재들을 먼저 용접한다.

- 조립용접시에는 용접으로 발생한 변형을 먼저 교정한 후에 계속 조립한다.

(3) 용접시공

가. 용접이음은 그 용접이 완료될 때까지 연속적으로 행한다.

나. 제2층 용접은 제1층 용접이 완료된 직후 그 온도가 적어도 200℃ 이상일 때 행하는 것이 좋다.

다. 다층용접 시에는 각 층마다 스패터(Spatter), 용제(Flux), 슬러그 및 부착물 등을 제거하고 청소한 뒤 용접하여야 한다. 이때 사용되는 브러시는 모재와 동일재료 이어야 한다.

라. 언더컷과 오버랩 발생에 대비하여 전류치와 운봉법에 주의하여야 한다. 브릿지의 제거는 모재 표면으로부터 2˜mm 남도록 가스 절단하고 그라인딩한다.

(4) 옥외 용접시 기후조건

가. 주위온도가 35℃이상 또는 -15℃이하이거나 용접면에 비, 눈, 얼음이 있을때는 용접해서는 안된다.

나. 눈 또는 비가 올 때는 용접을 하지 않는 것이 바람직하지만 불가피한 경우 눈, 비를 막고 수분을 제거하기 위한 적당한 방호시설을 한 다음 용접을 하여야 한다.

다. 강풍 하에서는 피복제의 의해 형성된 보호 가스막이 파괴되기 쉽고, 아크도 끊어지기 쉬우므로 이동식 방풍설비를 하여야 한다.

(5) 예열

가. 재질 및 판두께를 고려하는 경우 일반강재(400N/㎟급)에 있어서 예열은 불필요 하며 두께 25mm이상의 고장력 강재(500N/㎟이상)에 있어서는 40˜0℃의 예열을 하여야한다.

나. 일반강재의 경우는 동절기에 용접부의 냉각속도 지연을 위하여 주위온도 0℃ 이하 인 경우 용접선부터 편측 50mm (또는 모재두께의 3배)의 범위를 20℃이상의 온도로 예열을 하여야 하며 두께 25mm이상의 연강은 50˜5℃로 가열한다.

다. 예열은 아세칠렌가스, 프로판가스 등 가스화염에 의한 가열을 사용하고 가스토치  는 다수의 팁을 배열한 다관식 토오치를 이용한다.

라. 예열온도의 측정은 온도쵸크나 표면온도계를 사용하며 검사위치는 용접선의 양측 50mm에서 측정한다.

(6) 소켓 용접부 및 플랜지 모서리살 용접부는 배관경이 작을지라도 초층은 ø2.6mm의 용접봉을 사용하고 필히 2겹 이상 용접하여야 한다.

(7) 용접후 열처리

가. 용접부의 잔류응력완화, 변형방지, 용접열영향부의 연화, 용접부의 인성과 연성의 향상 응력부식균열 저항성의 증가, 용접부의 수소방출 등이 필요한 경우에는 후열처리를 하여야 한다.

나. 응력제거를 위한 열처리 방법은 KS B 0883, 0884에 따른다.

(8) 용접 끝손질 및 보수용접

가. 도장처리가 필요한 모서리는 평면에 대하여 최소한 0.8mm 이내로 그라인딩처리를 하여야 한다.

나. 용접불량개소는 세밀한게 제거한 후 재용접한 뒤 다시 검사를 받아야 한다.

다. 용접 끝손질 및 청소가 끝난 관은 이물질과 수분이 들어가지 않도록 개구부를 밀봉해 두어야 한다.

7-3 검사

(1) 제작자는 도교의 제작 또는 조립작업에 있어서 중요한 공정 절차 및 그 작업이 완료하였을 경우는 필요에 따라 감독원에 제출하여 검사 또는 확인을 받아야 한다.

(2) 제품 검사는 제작업자 또는 현장 대리인 및 감독관 입회하에 검사를 받아야 한다.

(3) 제작 업자는 검사에 필요한 측정, 자료제출, 장비제공 등 검사원의 지시에 따라야 한다.

4. 예 정 공 정 표

4. 예 정 공 정 표

공 사 명 : 복합다기능 부잔교 설치공사

구 분	공 사 기 간 (5개월)
	1월	2월	3월	4월		5월
공사준비
2. 해상부유구조물제작
3. 해상부유구조물설치
4. 부대공