과   업   지   시   서

Ⅰ. 일반사항

1. 과업 목적

본 용역은 2018년도 「멍게 양식초 설치용역」으로 어촌계 마을어장 및 협동양식어장내 멍게 양식초 설치를 통하여 멍게 자원조성 및 어업인 소득증대에 기여하고자 함

2. 적용범위

가. 본 과업지시서에 규정이 없거나 규정의 해석상 이견이 있을 때는 발주자의 해석 및 지시에 따른다.

나. 본 설치사업과 관련된 정부의 제규정 및 내역서 상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 과업지시서의 일부로 한다.

3. 과업내용

가. 개요

1) 설치장소 : 2개소

- 포항시 북구 흥해읍 오도2리 , 포항시 북구 청하면 이가리

2) 설치기간 : 착공일로부터 40일간

3) 설치수량 및 규격 : 멍게 양식초 58개(29개×2개소) 설치

- 멍게 양식초 규격 : 2.2×2.2×2.2m(기둥 5개, 기둥높이 1.3m, 지름 0.38m)

- 멍게 양식초 기둥내 종자 이식 : 11,200m(40m/기둥 1개)

4) 선 적 항 : 포항영일신항

5) 기타사항 : 멍게 양식초와 멍게 종자는 발주처에서 공급

나. 과업의 범위 및 내용

1) 포항시 북구 흥해읍 오도2리 1개소

○ 사전적지 조사 결과서 및 어초배치계획

○ 멍게 양식초내 멍게 종자 이식 : 3인 1조, 4팀 구성

○ 멍게 양식초 29개 시설 : 시설지내 부표시설(4개 지점)

○ 수중촬영(사진, 동영상)결과 : 사전 적지조사 및 준공 후 결과

○ 준공 후 시설위치 및 어초배열 상태 스케치 도면

2) 포항시 북구 청하면 이가리 1개소

○ 사전적지 조사 결과서 및 어초배치계획

○ 멍게 양식초내 멍게 종자 이식 : 3인 1조, 4팀 구성

○ 멍게 양식초 29개 시설 : 시설지내 부표시설(4개 지점)

○ 수중촬영(사진, 동영상)결과 : 사전 적지조사 및 준공 후 결과

○ 준공 후 시설위치 및 어초배열 상태 스케치 도면

4. 성과물 제출

“시공자”는 본 과업이 완료되어 준공계(완료계) 제출시에 다음의 성과물을 제출하여야 한다.

가. 모든 결과물은 제출 전 감독관과 사전 세부협의 후 제출

나. 준공계 및 수중촬영 결과(CD 2매 포함)

○ 양식초별 시설위치(좌표)와 수심 및 시설상태, 촬영일자를 확인할 수 있는 원경과 근경의 영상이 기록되어야 하며, 양식초 전체 수중 촬영한 CD를 제출한다.

다. 시설위치 및 어초배열 상태 스케치 도면

5. 시공교육 및 안전관리

시공자는 어초를 투하하기 전 시공에 참여하는 인력에 대하여 시공절차 및 안전관리 등 시공에 필요한 교육을 실시하여야 한다. 특히 양식초 해상 설치작업시 잠수부의 잠수 및 휴식시간을 엄수하여 신체에 무리가 가지 않도록 한다.

6. 기타사항

가. 시공자는 본 용역으로 인하여 이용어선의 입출항에 지장이 없도록 하여야 하며, 지역주민에 공사 세부추진 계획을 설명 홍보하고 공사추진에 따른 잠재 민원요인을 사전에 파악하여 적절한 조치를 취하 후 용역을 시행하여야 한다.

나. 시공자는 시공 전 수심 확인측량과 시공 후 수심확인측량 결과를 준공시 제출하여야 한다.

다. 시공자는 시행자에게 제출하고자 하는 모든 서류는 반드시 감독자를 경유 제출하여야 하며 용역이 완료되었을 때에는 시공자는 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 한다.

라. 본 공사의 하자담보책임기간은 1년이며, 하자보수보증금률은 2%이다.

Ⅱ. 세부사항

1. 멍게 종자 이식 종사줄 설치

가. 멍게 양식초내 종자를 감는 기둥(높이 1.3m, 지름 0.38m)은 5개이며, 한 기둥당 종사줄은 약 40m정도 소요된다.

나. 멍게 양식초의 기둥내 홈을 따라 종사줄을 단단히 감은 후 그 위에 반대방향으로 pp로프를 감아 수중에서 풀리지 않도록 고정한다.

다. 멍게 양식초내 종자를 이식하는 동안 남겨진 종자는 수시로 해수를 뿌려 주고, 종자 이식완료 후 양식초의 수중 시설 전까지 양식초에 수시로 해수를 뿌려 멍게 종자가 마르지 않도록 해야 한다.

2. 멍게 양식초 시설

가. 시설계획 보고

○ 시공자는 양식초 투하계획을 수립하기 전 발주부서와 협의하여 결정하고,  투하계획은 시설 예정일 5일전에 확정하여 관련 기관 및 어촌계,  어업인에게 알려야 한다.

○ 착공시 착공계, 시공계획서, 사전적지 조사 결과서(사진, 동영상) 및   어초배치계획을 제출하여야 한다.

나. 멍게 양식초 수중시설

○ 멍게 양식초는 시설예정수역의 중앙에 표지(부표)를 설치하고, 이 표지가 설치된 위치에 양식초를 실은 선박을 크레인의 와이어 로프에 길이(미터)표시하여 감독공무원, 입회자 등이 시설수심을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

○ 양식초를 현수거치 방법으로 시설할 때에는 기중기에 메달아 지반까지 내린 다음 잠수부에 의하여 거치하여야 하며, 시설 중 파손되지 않도록 하여야 한다.

○ 양식초 투하시 책임기술자는 크레인 운전원에게 시설위치, 시설방법, 바지선 이동계획 등을 충분히 설명하여 당초 계획대로 성실히 시공해야 한다.

다. 멍게 양식초 시설 후 보고

○ 양식초는 시설 후의 해저지형을 WGS-84좌표계(세계측지계)를 표시할 수 있는 GPS와 시설해역의 수심을 조사할 수 있는 장비를 갖춘 선박을 이용하여 시설장소에 대한 위치정보 및 시설정보를 생산하여야 한다.

○ 시공자는 준공시 준공계, 수중촬영(사진, 동영상)결과, 양식초의 투하 직후 주변의 지형과 시설위치, 양식초의 배열상태를 스케치하여 발주청에 제출하여야 한다.