예선계류부두 방충재 보수공사

공 사 설 계 서

2018. 11.

삼 척 기 지 본 부

시 설 보 전 부

	목 차
Ⅰ. 공 사 계 획 서 1 Ⅱ. 공 사 설 명 서 2 Ⅲ. 예 정 공 정 표 3 Ⅳ. 일 반 시 방 서 4 Ⅴ. 특 기 시 방 서 17 Ⅵ. 공 사 비 산 출 서 26 첨 부

Ⅰ		공 사 계 획 서

공 사 명	삼척기지본부 예선계류부두 방충재 보수공사
예 산 액	￦ 155,710,000 (V.A.T 별도)
예 산 과 목	수선유지비/용역/설비외
공 사 기 간	계약일로부터 60일 이내 완료
공 사 방 법	전문업체 도급공사
공사 책임자	시설보전부장
공사 감독자	삼척기지본부장이 임명한자
준공 검사자	삼척기지본부장이 임명한자
준공 인수자	삼척기지본부장
하자보증기간	준공 후 2년 (하자보수보증금률 5%)

Ⅱ		공 사 설 명 서

공 사 명: 삼척기지본부 예선계류부두 방충재 보수공사

공사목적

예선계류부두 방충재 등에 발생한 시설물 손상에 대해 보수공사를 시행하여 선박의 안정적 정박 및 부두 시설물 보호에 만전을 기하고자 함.

공사대상: 예선계류부두 및 Bunker-C부두의 방충재 및 모서리보호공

공사개요

∙ 기존 방충재 철거 및 신규 설치(예선계류부두, B/C부두): 18조

∙ 기존 방충재 제거 및 이동설치(예선계류부두): 2조

∙ 기존 모서리보호공 제거 및 신규 설치(예선계류부두, B/C부두): 20m

∙ 폐기물 처리(수량정산)

공사기간: 계약일로부터 60일 이내

기타사항

일반시방서 & 특기시방서 참조

공사세부내용

1) 방충재: 18조

- BP Type(400H×2000L): 13조(예선계류부두)

- OV Type(600H×1000L): 4조(Bunker-C부두)

- OV Type(400H×1000L): 1조(Bunker-C부두)

2) 모서리보호공

- 충격흡수용 스테인레스 모서리보호공(130×130×7T): 20m

8. 공사수행자격

가.「건설산업기본법」제9조 규정(별표1)에 의한 [토목공사업] 또는 [수중공사업] 또는 [시설물유지관리업]으로 등록된 업체

나. 가.항을 충족하는 업체로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 해당사업에 관한 사업자등록증 또는 관련 법령에 의한 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류상의 사업장 소재지)를 계속 강원도에 둔 자

Ⅲ		예 정 공 정 표

구 분	공사기간						비고
	1주차	2주차		3주차∼7주차		8주차
착수준비 (착공계 제출, 착수회의 등)
작업준비 (선박 접안일정 조율 등)
방충재 등 보수공사
현장정리 및 준공

※ 상기 공정은 현장 여건에 의하여 변경될 수 있음.

Ⅳ		일 반 시 방 서

적용범위

본 시방서는 한국가스공사 삼척기지본부(이하 발주자)가 시행하는 "삼척기지본부 예선계류부두 방충재 보수공사" 시 시공사(이하 계약상대자)가 따라야 할 기본사항을 규정하며, 본 시방서에 규정되지 않은 세부사항에 대해서는 발주자와 사전 협의 후 시공하여야 한다.

계약상대자의 역무

계약상대자는 아래의 사항에 대하여 계약의 원칙에 의거 성실하게 역무를 수행하여야 한다.

작업공정 및 현장에서 발생하는 안전, 품질, 보안 등과 관련된 제반업무에 관한보고

계약상대자가 조달하는 소요자재의 구매, 조달, 품질보증 업무

본 계약에 의한 자재의 구매, 운반, 보관, 관리, 소운반, 설치 업무

안전관리 및 품질관리 업무

의문사항 및 명확히 명시되지 않은 조항은 발주자와 협의 후 시행

기타 감독원이 요청하는 본 공사 관련 업무

적용 우선순위

본 공사 시행에 있어 계약당사자간의 권리와 의무를 규정한 계약문서는 상호보완의 효력을 지니며 계약문서간에 상호모순이 있을 경우 적용 우선순위는 관련법규, 공사입찰 유의서, 공사계약 특수조건, 공사계약 일반조건, 특기시방서, 일반시방서, 설계도면(시공 상세도로 대체된 경우에는 시공 상세도), 물량내역서 순으로 적용한다.

시방서 이외의 사항

계약상대자는 일반시방서 및 특기시방서에 명시되지 않은 사항은 다음 각항에 의거 수행하여야 한다.

공사 관련 KOGAS 기술표준 및 EHSQ규정(착공회의시 제공)

산업표준화법 제10조에 규정한 한국산업규격(KS)

본 공사(자재 포함)와 관련 있는 공인된 표준 또는 전문 시방서

상기 항에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의에 의한다.

제출용 서류

계약상대자는 공사일정에 맞춰 아래 서류 중 현장여건을 감안하여 필요서류를 감독원과 협의하여 제출하여야 한다.

착공 시 제출 서류

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 책임기술자선임계

4) 재해방지책임자선임계

5) 공사 예정공정표

6) EHSQ 관리계획서 (아래 “8. EHSQ 관리계획서 작성 항목” 참조)

7) 관련자 경력증명서 및 자격증 사본

8) 자재, 장비, 인력조달 및 투입계획

9) 공사수행 조직

10) 보안각서

11) 사용인감계

12) 기타 발주자가 요구한 서류 및 출입 허가 서류

준공 시 제출서류

1) 준공계

2) 준공 사진첩 2부

3) 기타 발주자가 요구하는 자료

공정 및 제보고

계약상대자는 계약 후 10일 이내 착공계를 제출하고 본 공사에 착수하여야 한다.

계약상대자는 공사 진행사항을 매일 감독원에게 보고하여야 하며, 직종별 동원인원, 작업내용 및 공사 진척사항 등의 보고는 발주자의 소정양식 또는 요령에 따라야 한다. 또한 필요시 감독원의 지시에 따라 계약상대자의 부담으로 사진을 첨부, 보충하여 증명하여야 한다.

설비의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명피해 또는 제3자에 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 경우에는 응급의 조치를 취하여야 하며 신속히 감독원에게 보고하여야 한다.

계약상대자가 제출한 공정은 발주자가 검토하여 필요하다고 인정될 때 이를 수정할 수 있다.

공사변경

본 공사 시행중 야기되는 일체의 공사변경에 대해서는 감독원의 사전 승인을 득한후 시행하여야 하며, 감독원의 승인없이 시행하는 작업은 인정치 않는다.

본 공사 수행 중 주위 여건의 변화, 설계기준의 변경 등으로 인하여 공사의 변경이 요구될 때에는 그 변경 양의 경중에 따라 감독원은 설계변경 여부를 결정할 수 있으며, 계약상대자는 이 결정에 따라 변경 시공하여야 한다.

EHSQ 관리계획서 작성 항목

항 목	세 부 내 용
공사개요	공사개요, 전체 공정표
EHSQ 조직	현장 EHSQ 조직, 선임내역(안전보건관리책임자 선임계) 등
EHSQ 점검	자체 EHSQ 점검의 종류, 점검자 조치계획 등 공정별 점검 계획, 자체 및 정기 안전점검시기/내용/공종표/계획 등
EHSQ 교육	교육계획표, 교육목적, 교육유형, 교육대상, 교육내용, 교육시간, 교육방법 및 관리 등
현장 주변 안전관리 계획	지하매설물의 방호, 인접시설물 보호등 공사현장 및 주변의 안전관리에 관한 사항
통행안전시설 설치 및 교통 소통계획	공사현장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고 예방대책 등 교통 안전관리에 관한 사항
EHSQ 관리비 (계상된 경우)	EHSQ관리비 개요, 계상금액, 산정내역, 항목별 세부 집행계획 등
물질(MSDS) 사용현황	화학물질 및 유독물 사용현황 - 사용하는 물질의 종류, 수량, 관리방법 등
개인보호장비	직종, 작업별 필요한 개인보호장비의 종류, 지급계획 등
재난관리	재해예방조직, 경보체제, 재해발생시 행동요령 및 조치계획(인력, 자재, 시설 및 장비 등의 목록포함), 인명구조 및 복구활동, 비상연락방법 등
위험관리	위험성 평가 대상, 분석방법, 위험완화 및 평가결과의 활용 계획 등
공정별 안전관리	대상시설물별 해당되는 공사에 대하여 건설공법, 시공절차를 포함하여 작성

항 목	세 부 내 용
환경관리	대기, 수질, 폐기물, 소음, 진동 등에 대한 관리계획 환경 오염 배출시설 및 방지시설에 대한 설치, 운영에 관한 계획, 환경관리인의 신고, 자가측정에 관한 계획, 교육계획 등
품질관리 또는 품질시험계획	건설기술진흥법 및 가스공사가 요구하는 사항 - 설계서, 시방서 등에 반영된 요구사항
하도급사 EHSQ 관리	대규모 협력업체의 EHSQ관리계획서 작성항목에 대한 세부내용을 하도급사가 수립한 계획

공사시행

계약상대자는 공사 예정공정에 따라 공사를 추진해야 한다.

본 공사는 설계도서 및 시방서에 준하여 공사를 시행하여야 한다.

계약상대자는 발주자 설비의 보호에 만전을 기하여야 하며 동 설비에 손상을 주었을 경우에는 계약상대자의 부담으로 원상복구 시켜야 한다.

계약상대자는 계약서류에 특히 지정된 경우와 천재지변을 제외하고 공사 수행중 발생하는 인적, 재산상 사고와 관련된 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 공법상 당연히 필요로 하는 경미한 사항은 계약상대자의 부담으로 시행해야 한다.

환경보호

계약상대자는 공사추진에 필요한 부분을 제외하고는 주위여건을 파괴하지 않도록 유의해야 하며 훼손되거나 파괴된 부분은 계약상대자 책임 하에 복구토록 한다.

공사현장관리

공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁이 없도록 한다.

공사현장에 일반인 및 노무자의 출입감시, 위생, 화재, 도난, 기타 일체의 사고방지에 대하여는 계약상대자가 책임을 져야한다.

당일 작업완료시 현장정리는 철저히 하여야 하며, 용접봉 및 장비 등 인화성 물질에 대하여는 별도 지정된 장소로 이동, 보관하고 감독원의 승인을 득한 자재를 제외한 폐자재는 당일로 처리하여야 한다.

위의 각 항 이외에도 공사 시행에 필요하고, 감독원이 지시하는 사항에 대한 현장관리를 하여야 한다.

공사 완료시 폐자재, 잔여자재 및 장비 등은 즉시 반출하여 현장에 방치하는 일이 없도록 한다.

작업 일반사항

작업의 성격에 따라 다음날의 작업내용을 작업 전일 오후 3시까지 작성, 제출하여야 하며, 현장 작업자는 당사 안전수행부서에서 안전교육을 이수 받고 안전교육 이수증을 부착한 후 작업에 임해야 한다.

1) 위험작업 허가서

위험지역에서의 작업이나 작업 중 불꽃이 발생할 우려가 있을 때 발급하며, 유효기간이 1일간이므로 연속작업일 경우 매일 일일 작업허가를 승인 받아 작업 당일 아침 작업개시 전에 작업허가서를 교부받고 현장에 비치한 후 작업에 임하여야 한다.

2) 일반작업 허가서

불꽃이 발생할 우려가 없는 작업시에 발급하며, 유효기간이 15일이므로 작업허가서를 교부받고 해당기간동안 현장에 비치한 후 작업에 임하여야 한다.

불꽃이 발생하는 작업 수행 시 계약상대자는 규정된 소화기 등을 지참하여 공사 현장에 비치하여야 하며, 주위에 불꽃이 방산되는 경우 안전담당 부서와 협의 후 이에 필요한 소요자재는 계약상대자 부담으로 구매하여야 한다.

일체의 작업에 대해 감독원의 입회하에 수행하는 것을 원칙으로 하며, 경미한 것은 감독원의 판단에 따라 현장대리인에게 입회시킬 수 있다.

현장 감독원의 지시 없이 임의로 작업 등이 수행되는 일이 없도록 유의하고 관련 규정 및 기준을 충분히 숙지하여 공사를 수행하여야 한다.

공사의 중지

발주자는 다음 각 호중 하나에 해당될 때는 계약상대자에 대하여 필요하다고 인정하는 기간 동안 공사의 전부 또는 일부를 중지시킬 수 있다.

계약상대자가 설계도서, 시방서 또는 감독원의 정당한 지시에 따르지 않을 경우

감독원이 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 경우

자연재해, 극단적인 이변 또는 예상하지 못했던 재해 상태에 따라 공사의 계속이 부적당 또는 불가능하게 될 경우

해당 공사의 중지가 계약상대자의 책임으로 돌릴 수 없는 경우라고 인정될 때에는 발주자는 시일변경 또는 공기연장 여부를 검토 할 수 있으며, 계약상대자에게 필요한 서류를 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 따라야 한다.

공사중지 사유가 해제 또는 소멸되어 중지된 본 공사의 일부 또는 전부를 다시 착수할 때 발주자는 지체 없이 이를 통지하고 계약상대자는 통지일로부터 3일 이내 재착수 하여야 한다.

설계변경 및 정산변경

본 공사의 수행 중 주위여건의 변화, 설계기준의 변경 등으로 인하여 공사의 변경이 요구될 때에는 그 변경 양의 경중에 따라 감독원은 설계 변경여부를 결정할 수 있으며, 계약상대자는 이 결정에 따라 변경 시공하여야 한다.

폐방충재 폐기물 처리비는 발생수량에 대해 실적정산을 원칙으로 한다.

노무관리

본 공사에 투입하는 작업자는 발주자가 지정하는 요건을 갖춘 자를 참여시켜야 한다.

발주자는 작업자의 능력과 경험이 작업수행에 부족하다고 판단될 경우 작업자의 교체를 지시할 수 있으며, 계약상대자는 즉시 해당 작업자를 교체하여 공사수행에 지장을 초래하지 않아야 한다. 또한 계약상대자에게 고용된 일체의 작업자(하도급사 포함)에 대한 관리 책임은 계약상대자에게 있다.

계약상대자는 근로기준법을 준수하여 이 공사를 행하여야 한다. 계약상대자가 근로기준법을 준수하지 않음으로 인하여 발생되는 모든 문제와 법규상의 손해는 계약상대자가 책임진다.

본 공사중 발생하는 제반 안전사고에 대하여는 계약상대자에게 책임이 있음은 물론 계약상대자의 책임 하에 수습하여야 하며, 특히 절단 및 설치공사 중 계약상대자의 원인에 의하여 설비사고가 발생되었을 경우에는 즉시 원상복구 토록 하여야 한다.

계약상대자는 공사기간 중 유자격자를 현장대리인으로 상주시켜야 하며, 현장대리인이 현장을 떠날 경우 반드시 감독원의 승인을 받아야 하고 감독원의 승인 하에 임시대리인을 지명 상주시켜야 한다.

계약상대자는 본 공사 착공 전에 감독원을 경유하여 본 공사에 투입될 작업자의 명단을 작성, 제출하여야 하며, 작업자의 신원에 대한 책임을 지고 필요한 서류를 제출하여야 한다.

자재관리

계약상대자가 본 공사를 위하여 지입 하는 일체의 자재는 감독원의 검수를 받은 후 시공하여야 하며, 검수를 받지 않거나 검사에 불합격된 자재를 사용하여 시공된 부분은 즉시 계약상대자 책임 하에 재시공한다.

계약상대자가 지입하여 사용하는 일체의 장비 또는 자재가 사용하기에 알맞지 않다고 인정될 때 감독원은 이를 교체 또는 정비토록 명할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

안전관리

계약상대자는 산업안전보건법 시행령 및 고용노동부고시 “건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준”에 의거 안전관리비를 사용하여야 하며 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

계약상대자는 공사장 내의 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사 사고에 대하여 안전대책을 수립·시행하고, 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담해야 한다.

계약상대자는 작업현장에서 일체의 소화대책을 강구하여야 하며, 타 설비에 위해가 발생하지 않도록 제반 보완대책을 강구하고 공사 기간 중 유발되는 일체의 안전사고에 대한 보상은 계약상대자가 책임진다.

계약상대자는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수한다.

1) 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시

* Tool Box Meeting(이하 TBM)은 통상 작업 개시전에 작업원간 5분~10분간 그날 수행하여야 할 작업의 성격과 내용, 발생 가능한 위험요소들에 대한 대화를 나누어 효율적인 작업수행과 동시에 안전을 확보토록 한다.

2) 안전관리자 순찰활동 강화

* 안전담당자가 작업장을 순찰하면서 작업방법 및 환경에 대한 위험요소를 사전 발굴하여 사고 발생요인을 사전 차단토록 한다.

3) 개인보호구 착용여부 확인

4) 취중인 자 또는 허약자 작업 금지

5) 응급처치용 구급용품의 확보

6) 현장 정리정돈

공사 착수 전 투입인원에 대해서는 발주자 안전교육을 이수해야하고 교육 이수필증을 출입허가 신청서 제출시 첨부해야 한다.

고소작업 시 필요한 개인안전장구를 구비하여야 하고, 이외에도 유해 위험이 있다고 판단되는 작업장소에 대하여는 적절한 시설물을 설치하여야 한다.

작업현장은 핸드폰 사용금지 및 금연지역으로서, 흡연은 감독자가 지정한 장소에서만 가능하고 이를 어길시 퇴출시킬 수 있으며, 이 경우 재교육 후 감독원의 판단에 따라 1회에 한해 현장에 재투입 할 수 있다.

공사 현장 내에는 작업인원 및 명단, 작업허가 사항, 진행상황을 파악할 수 있는 현황판을 설치하여 공사 진행 상황을 파악할 수 있어야 한다.

현장에서의 정전기로 인한 화재 등 안전사고 예방을 위해 제전용 팔찌 및 작업자 식별용 조끼를 착용토록 한다.

여러 명이 동시 다발적으로 작업을 할 경우 반드시 2인 이상 1개조로 편성하여 작업을 하도록 한다.

보안관리

계약상대자는 본 공사 착공전에 감독원을 경유하여 보안담당 부서에 본 공사수행을 위해 출입하는 작업자의 명단을 작성, 제출하고 공사현장 출입허가를 득하여야 한다. 또한 작업자가 변경될 경우에도 사전에 출입허가를 득하여야 하며, 이로 인하여 공사 진행에 차질을 빚어서는 안 된다.

본 공사 수행을 위하여 계약상대자가 작업자 출입신청서 제출 시 작업자에 대하여 이를 책임질 수 있도록 서약서를 동봉하여야 한다.

품질관리 및 준공검사

계약상대자는 준공일 이전에 공사를 완료하고 준공검사를 요청해야 한다.

공사 수행 시 모든 현장검사는 감독원의 입회하에 실시하여야 하며, 이때 부적정한 시공으로 판정되었을 경우에는 즉시 보완 또는 재시공하여 재검사를 받아야 한다.

감독원은 사용목적에 부적합한 시공이 있는가를 확인하기 위해 최종검사를 요구할 수 있으며, 이때 부적정한 시공으로 판정되었을 경우에는 즉시 보완 또는 재시공하여 재검사를 받아야 한다.

감독원의 지시에 위배되는 시공으로 인하여 재시공이 요구될 시 재시공에 소요되는 일체의 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

계약상대자는 준공검사 시 준공검사자가 요구하는 관계자가 입회하여 준공검사를 받아야 하며, 부적합한 시공이 되어 시정지시를 받은 경우는 최단 시일 내에 보완 또는 재시공하고 감독원에게 보고하여야 한다. 이때 시정지시 사항이 완료될 때 까지 준공불의 지급을 보류할 수 있다.

하도급 관리

가. 하도급 시행계획

1) 계약상대자는 공사 착공 시부터 정상적으로 하도급이 계획 되고, 하도급 관리가 용이하도록 「건설산업기본법」제31조의2에 의거하여 하도급시행 계획서(별첨-1)를 공사착공신고서 제출시 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 계약상대자가 제출하는 하도급시행계획서에는 적격심사 하도급 사항 및 그 외 하도급 사항, 하도급 예정 업종, 공종, 예상 하도급액, 하도급계약 예정일, 하수급인의 선정방식 등을 포함하여야 한다.

나. 하도급 통지

1) 계약상대자는 하수급인과 하도급계약 체결 시 대등한 입장에서 공정하게 계약을 체결하기 위하여 공정거래위원회가 권장하는 건설공사 표준하도급계약서를 사용하여야 하며, 특약사항 등을 계약에 사용한 경우 계약서에 첨부하여야 한다.

2) 계약상대자는 하도급 계약을 체결한 날로부터 30일 이내 또는 하도급공사 착수 전에 발주자에게 그 하도급계약을 통지하여야 한다.

3) 계약상대자는 발주자에게 하도급 통지 시「건설산업기본법」에서 정한 건설공사 대장을 포함한 관련 서류를 제출하여야 한다.

다. 하도급 대금 지급

1) 계약상대자는 발주자로부터 기성·준공대가 및 선금을 받은 날 부터 15일 이내에 하수급인에게 발주자의 지급조건으로 지급하여야 한다.

2) 계약상대자는 하수급인에게 대금을 지급한 후 지급내역을 발주자에게 통보하여야 한다.(별첨-2 참조)

3) 하수급인은 계약상대자로부터 하도급대금을 수령한 후 수령내역을 발주자에게 통보하여야 한다.(별첨-3 참조)

4) 계약상대자는 하도급 계약시 특별한 사유가 없는 한 하수급인에게 하도급대금 지급보증서를 교부하여야 한다.

5) 계약상대자는 하도급 계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 보증서부본을 제출하여야 한다.

6) 분담이행방식의 경우에는 개별 계약상대자별로 하도급대금 지급보증서를 교부하여야 하며, 공동이행방식의 경우 공동도급사의 지분율 범위 안에서 보증서를 교부하여야 한다. 다만, 공동수급체 구성원 중 일부가 불가피한 사유로 하도급대금 지급보증서를 교부할 수 없는 경우에는 대표사가 보증서를 일괄 교부하여 처리할 수 있다.

라. 하도급 이행실태 점검

발주자는 하도급 이행실태점검을 실시할 수 있으며, 계약상대자는 원활한 이행실태 점검을 위하여 발주자가 요구하는 서류를 준비하여야 한다.

하자보증

계약상대자는 준공일로부터 2년간 하자보증을 하여야 하며 아래의 사항으로 하자 발생 시에는 발주자가 지정하는 기일 내에 계약상대자 부담으로 보수 및 손해 배상을 해야 한다.

원자재 불량으로 인한 결함

시공기술 불량으로 인한 결함

그 외 계약상대자의 과실로 인한 결함 등

기타

계약상대자는 공사수행 중 보안에 유의하고 당사의 보안규정을 준수하여야하며, 공사 준공과 동시에 발주자로부터 제공받은 제반 도면과 자료는 일체 반납하여야 한다.

본 시방서의 해석에 이의가 발생되었을 경우 감독원과 협의하여 결정한다.

작업시간 제한

1) 주간작업(09:00∼18:00) 시행을 원칙으로 하며, 작업종료시간 30분전에 현장정리를 시행하여야 한다.

2) 야간작업은 원칙적으로 금지하며, 특별한 경우의 긴급한 작업으로 감독원이 인정하고 감독원의 지시에 의하여 야간작업 허가를 득한 경우는 예외로 한다.

3) 휴일작업은 원칙적으로 금지하며, 발주자의 요구나 계약상대자의 부득이한 사유 발생시 발주자의 허가를 득한 후 휴일 주간작업을 실시 할 수 있다.

[첨부]  1. 하도급계획서

2. 하도급대금 지급내역 통보서

3. 하도급대금 수령내역 통보서

별첨-1

하 도 급 계 획 서
공사명
수급인 (대표회사)						대표자
도급금액	원					계약기간
공종별 하도급 예정계획
①하도급할 주요 공종	하도급 대상자				②하도급 공사
공종명	상호 및 대표자	소재지	등록업종 (시공능력 평가액)	선정 방식	물 량		하도급 금액
							③하도급 부분금액 (A)			④하도급 계약금액 (B)	⑤하도급율 (B/A)
「건설산업기본법」 제31조의2에 따라 하도급계획서를 제출합니다. 년 월 일 공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (인) 한국가스공사 사장 귀하
첨부서류
1. 예정공정표 1부 2. 공사량(규모)ㆍ공사단가 및 공사금액 등이 명시된 공사내역서 1부
※ 유의사항 ①하도급할 주요공종: 「건설산업기본법 시행령」 제34조의2제3항에 따라 국토해양부장관이 고시한 공종을 말하며, 입찰금액산출내역서에 준하여 기재합니다. ②하도급 공사: 수급인이 하도급할 주요 공종별로 하도급 대상자와 하도급계약을 맺은 공사 중 하도급 계약금액이 「건설산업기본법 시행령」 제34조의2제4항에 따라 국토해양부장관이 고시한 금액 이상인 공사를 말합니다. ③하도급 부분금액: 하도급하는 공사부분에 대하여 수급인의 도급금액산출내역서상 계약단가를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비ㆍ이윤 등 간접비를 포함한 금액을 말합니다. ④하도급 계약금액: 수급인이 하도급 대상자와 하도급계약을 맺으면서 지급하기로 계약한 금액을 말합니다. ⑤하도급율: 하도급 계약금액을 하도급 부분금액으로 나눈 비율을 말합니다.

별첨-2

하도급대금 지급내역 통보서

(단위 : 천원)

공종	하도급 공 종	하수급인 (대표자)	기성 회수	하 도 급 계약금액	누 계 지급금액 (금회포함)	금 회 지급금액	기 성 지급일	지 급 계좌번호

＊ 첨부서류 : 수급인의 법인 출금통장 사본 첨부(금회 지급분)

＊ 수급인이  금회 지급한 기성에 대해서만 작성(가로로 작성)

금회 기성분에 해당하는 하도급 대금을 건설산업기본법 제34조에 따라 상기와 같이 지급하였음을 통보합니다.

년      월      일

상 호 명 :

주    소 :

대 표 자 :              (인)

한 국 가 스 공 사  사 장  귀하

별첨-3

하도급대금 수령내역 통보서

(단위 : 천원)

공종	하도급 공 종	하수급인 (대표자)	기성 회수	하 도 급 계약금액	누 계 수령금액 (금회포함)	금 회 수령금액	기 성 수령일	수 령 계좌번호

＊ 첨부서류 : 하수급인의 법인 입금통장 사본 첨부(금회 수령분)

＊ 하수급인은 지급받은 전기성에 대해 회수별로 구분하여 작성(가로로 작성)

폐사에서 시공 중인 ○○공사 제○○회 하도급대금을 상기와 같이 수령하였음을 통보합니다.

년      월      일

상 호 명 :

주    소 :

대 표 자 :              (인)

한 국 가 스 공 사  사 장  귀하

Ⅴ		특 기 시 방 서

1. 적용 규격 및 기준

가. 본 공사 수행에 적용할 규격 또는 기준은 설계서 등 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 국제규격 및 기준에 따르되, 국제규격 및 기준이 없는 경우에는 건설기술진흥법 제44조의 규정에 의한 설계 및 시공기준, 산업표준화법 제10조에 규정한 한국산업규격(이하“KS”라 한다.) 또는 이와 동등한 수준 이상의 규격 및 기준에 따른다.

나. 상기 가.항에 규정된 적용기준 및 규격은 입찰공고일 30일전 유효한 것으로 하며, 발주자는 공사품질 향상을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 공사수행시점에서 유효한 최신의 규격 및 기준을 적용하도록 요구 할 수 있다.

2. 기술일반

가. 총  칙

1) 모든 작업 수행은 사전에 공사감독과 협의하여 작업을 준비하여야 한다.

2) 본 항은 일반시방서에 명시되지 않은 특별한 사항을 규정하고, 본 시방서의 내용이 일반시방서의 내용과 상충 될 경우에는 본 특기시방서의 내용이 우선한다.

3) 본 공사의 하자기간은 2년으로 한다.

4) 계약상대자는 본 설계서와 도면을 충분히 숙지하여 방충재 구매 전 제작도면 및 제조사 승인관련 서류를 제출하고 발주자의 승인을 얻어야 하며, 제작 완료시에는 공장검사를 통해 자재 시험성적서 및 치수 등에 대하여 감독원의 승인을 득한 후 납품할 수 있다.

5) 계약상대자는 계약된 준공기일 내에 공사를 완료하기 위해 감독원의 지시에 적극적으로 협조하여야 하며, 준공기일 내에 완료를 못 할 경우에는 발주자 제규정을 따라야 한다.

6) 도면은 협소한 지면에 작성되어 모든 상세한 것을 빠짐없이 표기함이 불가능하므로 계약상대자는 착공 시 실제 공사 현장조건을 면밀히 검토하여 본 구조물이 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 조사하고, 충분한 자재 장비 및 기술로서 완전한 설비를 갖출 수 있도록 해야 하며 제작승인도서에 이를 반영해야 한다.

7) 본 공사에 따른 시방서 및 도면 해석은 감독원이 행하며, 설계도에 미세한 누락, 오기가 있더라도 완벽한 공사를 위하여 필요한 작업을 협의하여 시행할 수 있으며, 이는 감독원의 지시에 따라 공사비의 증가 없이 계약상대자 부담으로 시행하여야 한다.

8) 계약상대자는 공사수행 설계도서 및 현장조건에 상이한 사항을 발견하였을 때는 즉시 감독원에게 보고해야 한다.

9) 공사장내의 장애물은 감독원의 지시에 따라 제거하여야 하며, 공사 수행중 발생한 각종 발생품은 일정한 장소에 정리하여 감독원의 지시에 따라 폐기 또는 반납하여야 한다.

10) 본 공사는 원칙적으로 주간에만 시공하여야 하나, 시공 상 부득이한 야간작업을 실시할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 작업시에는 충분한 조명시설과 안전표지판을 설치하는 등 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

11) 계약상대자는 본 공사에 투입된 작업자의 위생관리 및 안전관리에 유의할 것이며, 담당자를 정하여 아래 사항을 준수하여야 한다.

가) 위험 장소에 대한 안내 표지판 설치 및 신호수 배치 등

나) 안전수칙에 대한 교육 등

12) 본 시방서 및 설계도서에 의거 합격되지 않은 공종에 대하여는 감독원의 지시에 따라 보완 또는 재시공 하여야 하며, 이로 인한 일체의 비용은 계약상대자가 부담한다.

13) 계약상대자가 공사 시공에 대해 감독원의 정당한 지시에 따르지 않을 경우 감독원은 공사 시공의 전부 또는, 일부의 중지를 명할 수 있으며, 이로 인해 계약상대자에게 손해가 발생해도 발주자는 그 손해를 보상할 의무가 없다.

14) 본 공사 수행에 직접 사용될 동력 및 조명 등의 전력은 발주자 여건에 따라 무상으로 공급할 수도 있으나, 지정된 배전반 또는 분전반으로부터 설치하는 임시 배선 및 필요한 전력설비 등은 계약상대자 부담으로 설치하여야 하며 감독원의 승인을 받고 설비를 사용하여야 한다.

15) 본 공사에 관련된 다음사항 및 시설에 필요한 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

가) 시방서, 설계도서에 명기되지 않은 공사 또는 공종으로서 성질상 또는 공법상 당연히 필요로 하는 것

나) 계약상대자의 책임하에 속하는 이유에 의하여 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우

다) 공사장 부근의 보안설비

라) 긴급 비상시의 경우 이에 필요한 조치

마) 기타 본 공사에 관련된 사소하다고 판단되는 사항

17) 계약상대자는 건설공사 산업안전보건관리비(이하“안전관리비”라 한다)의 항목별 사용내역 및 기준에 따라 안전관리비를 사용하여야 하며, 또한 공사 진척에 따른 안전관리비의 사용기준에 따라 안전관리비를 사용하여야 한다. 다만, 공사의 특성상 당해 공사의 감독원 또는 건설재해예방전문기관에서 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

18) 계약상대자는「산업안전보건법」제30조 제2항의 규정에 따라 안전관리비를 다른 목적으로 사용해서는 아니 되며, 다른 목적으로 사용한 금액에 대하여는 계약금액에서 감액조치 한다.

19) 계약상대자는 안전관리비를 사용할 때는 반드시 감독원의 승인을 득한 후 사용 하도록 하고 그 내역서를 당해 공사현장내에 비치하여야 한다.

20) 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등은 준공시 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서 등을 확인 후 사후 정산 처리한다.

나. 공사용 자재

1) 수량 산출내역

품 명	규 격	수 량	비 고
BP형 방충재	400H × 2000L, 세로형	13조	예선계류부두
OV형 방충재	600H × 1000L, 가로형	4개	B/C부두 및 물량장
	250H × 1000L, 세로형	1개
충격흡수용 스테인레스 모서리보호공	130×130×7T	20m	예선계류부두 B/C부두

2) 방충재

가) 고무

① 내면 고무재료는 천연고무 및 합성고무를 주원료로 하고 내노화성, 내마모성, 인장강도가 크고 모든 사용 조건하에서 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 카본블랙(Carbon black) 및 노화 방지제 등으로 배합하되 밴버리 믹서(Banbury-mixer)로 혼합하며 고무의 조성비가 균등하게 유지 되도록 혼합하여 사용도중 유해한 결함이 발생하지 않도록 해야 한다.

② 표면 피복 고무는 클로로프렌 합성고무를 사용하며 어떠한 조건하에서도 내노화성, 내유성, 내후성 및 내마모성이 우수한 배합으로 되어야 한다.

③ 방충재 고무의 물리적 특성

항 목			단위	규 격	시험방법 (KS M 6518)
노화전	인장강도		MPa	15.7 이상	아령 3호 시편
	신 장 율		％	350 이상
	경 도		HS	75 이하
노화후	인장강도 변화율		MPa	노화전 값의 80％이상	70℃ × 96시간
	신장율 변화율		％	노화전 값의 80％이상
	경도변화		HS	노화전 값의 +8이하
인열강도	내면고무		N/㎝	588 이상	A형 시편
	표면피복고무			490 이상
내면 고무 압축 영구 줄음율			%	30 이하	70℃ × 22시간
표면 피복고무의 내유성 용적 팽창율		중 유	％	20 이하	25℃ × 24시간
		휘발유	％	60 이하

④ 물리시험은 ③항 표의 시험항목에 대하여 KS M 6518의 시험방법에 의한다. 또한 동 규격에 대하여 2종류 이상의 시험방법이 규정되어 있을 경우에는 각각 다음 방법에 따라야 한다.

- 경도시험: 스프링식 경도 시험(A형)

- 노화시험: 공기 가열 노화 시험

- 시험온도: 70±1℃

- 시험시간: 96시간

- 압축 영구 변형 시험: 열처리 온도 70±1℃

- 열처리 시간: 22시간

나) 방충재의 성능시험

① 공인기관시험

- 시험종류: 재료(고무) 특성시험

- 시험방법: KSM 6518(가황고무 물리시험방법)에 따라 시험

- 시험기관: 정부공인기관

- 제출서류: 시험성적서 원본 1부

② 제작공장 시험

완성된 제품의 성능시험은 감독자의 입회하에서 KS M 6709에 의한 시험을 하되, 성능치는 3회이상 시험하여 3회 값의 평균치로 한다.

- 시험종류: 완성품시험

- 시험시기: 고무방충재 제작완료시

- 시험수량: 각 규격별 방충재 각 1개(수량이 10개 미만일 경우 1개)

- 시험항목: 외형검사, 치수검사, 압축회복율 시험

□ 외형검사: 표면상태 및 제작상태 검사

□ 치수검사: 제작규격 확인

□ 압축 회복율 검사

□ 시험수량: 완성된 방충재중 규격별 각 1개 → 시험 대상 방충재는 감독원이 무작위 추출

□ 매회 시험시 하중과 처짐은 각각 0.1 ton 과 1.0 mm 까지 정확하게 측정하여야 한다.

□ 압축 회복시 회복율은 높이에 BP형, OV형 방충재는 45％까지 압축하여 1분간 지속 후 압력을 제거하고 30분 경과 후 압축 방향의 높이가 95％이상 회복되어야 하며, 이 시험을 3회 반복하여도 압축 회복율에 변화가 없고 제품의 변형 및 균열이 없어야 한다.

- 방충재 성능은 다음 표를 만족하여야 한다.

Type	규격	반력(ton)	흡수에너지 (ton-m)	압축율(%)	비 고
BP형	400H×3,000L	34.0 이하	4.52 이상	45	1m 당
OV형	250H×1,000L	제조사 규격에 따름
	600H×1,000L	49.5 이하	8.10 이상

- 제출서류: 자체 시험성적서 1부

다) 방충재 제작 및 취부에 사용되어지는 모든 볼트, 와셔 및 너트의 재질은 STS316(KS D 3705~3706)을 사용하여 제작하여야 한다.

라) 방충재 설치용 매입 철물의 재질은 STS316(KS D 3705~3706)을 사용하여야 한다.

마) 보강철판

보강 철판은 SS 400(KS D 3503) 이상의 재질로 하여 상하의 고무를 접착시키기 위하여 구멍을 가공하고 접착제 처리를 하여 완전한 접착을 보증키 위해 750tonf 이상의 프레스로 가압하여 고무를 성형해야 한다.

바) 방충재 치수의 허용오차

치 수	길이, 폭, 높이	몸체 두께
시공허용범위	+4%, -2%	+8%, -2% 단, 300H 이하에 대해서는 +10%, -5%

사) 볼트구멍 치수의 허용오차

치 수	볼트구멍	볼트구멍 중심간격
허용범위	±2㎜	±4㎜

아) 방충재 본체부에는 다음 사항을 표기하여야 한다.

① 치수(높이, 길이)

② 제조 연월일 또는 그 약호

③ 제조 업체명 또는 그 약호

3) 모서리 보호공

가) 모서리보호공의 강재부(앵커볼트 포함)는 재질이 STS304로 설계도서 및 현장조사 결과를 반영한 규격 및 형상으로 공장에서 제조되어야 한다.

나) 모서리보호공 1span은 1.5m를 원칙으로 하되 현장조사 결과를 반영하여 보수위치별 자재길이를 산출한다.

다) 자재 선정시 기존에 설치된 제품과 동일형식의 제품을 권고하며, 구매전 제조사의 제작도면, 시험성적서 등 승인관련 서류를 발주자에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 시공

1) 방충재

가) 방충재 설치 위치는 설계도면과 같이 설치하고 설치 문제점이 발생시는 사전에 공사감독과 협의 후 시행하여야 하며, 천공 장애요인 발생시는 감독자와 협의 후 좌·우·상·하 30cm 정도 범위 내에서 변경 시공할 수 있다.

나) 공사 시행시 작업하는 위치가 수직안벽으로 위험한 작업 조검임을 감안하여 앵커볼트 설치용 천공작업 및 방충재 설치(또는 제거)작업을 할 경우 안전 작업대를 반드시 제작 설치하여 작업에 임하고, 작업중 작업자의 추락 등 안전사고에 대비하여 안전장구를 착용한 후 시행하여야 한다.

다) 규정된 형상과 규격의 방충재를 도면에 표시된 위치에 제조회사의 설치 요구조건에 맞도록 설치하여야 한다.

라) 방충재 취부용 볼트머리는 최종 체결 후 풀리지 않도록(이중너트 또는 용접 등) 하여야 한다.

마) 고무방충재는 수송 및 보관중에 비틀림이나 휨응력이 발생하지 않도록 취급하여야 한다.

바) 고무방충재 조립시 크레인으로 들어 올릴 때는 방충재의 볼트 구멍을 상하지 않게 하기 위해 볼트 구멍에 나일론 고리를 걸어서 들어 올리고 이때 양쪽의 균형이 잡히도록 하여야 하며 방충재가 땅바닥에 끌리거나 충격을 받아서는 안 된다.

사) 안벽 취부 작업 시 방충재를 적정 능력의 크레인으로 들어내려 정확한 위치에 맞추고 고정시킨 다음 앵커볼트를 채운다.

아) 방충재의 부착 상태가 전체적으로 균형이 잡혔는가를 확인한다.

2) 설치 위치

가) 예선계류부두

나) Bunker-C 부두

3) 케미컬 앵커 설치

가) 앵커볼트 구멍 천공위치를 확인 후 안벽에 정확히 표시하여야 한다.

나) 코어천공기를 사용하여 안벽에서 수직으로 천공하되 앵커볼트 타입 전 구멍 내부의 먼지 등 이물질을 Air등을 이용 깨끗이 제거하여야 한다.

다) 케미칼 앵커는 감독원과 협의 후 선정하여야 한다.

라) 케미칼 앵커의 완전경화 시간이 약 1.5시간(+5℃ 기준)인 점을 고려 견고하게 굳은 후 방충재를 설치하여야한다.

마) 앵커볼트 구멍 천공후의 콘크리트 잔재는 별도 수거하여 도급자 부담으로 반출 및 처리하여야 한다.

4) 방충재 취부

케미컬 앵커설치 상태가 흔들림 등 견고하게 되었는지를 먼저 확인 후 기존 안벽과 방충재가 완전히 접촉되게 설치하여야 한다.(안벽의 수직도가 확보되지 않아 공극이 발생할 경우 감독원의 승인을 득한 적절한 충진재를 사용하여 견고하게 설치한다)

5) 방충재 철거

가) 방충재 철거 시에는 기존 구조물 손상방지를 위해 최대한 조심해야하며, 손상되거나 결함이 발생 될 경우 계약대상자의 부담으로 복구해야 한다.

나) 철거 된 방충재는 지정된 장소로 옮겨야 하며, 관련 법규에 따라 폐기물 처리 후 반출량에 대해 실적정산 한다.

다) 철거 후 이동 및 재설치 대상인 방충재(2개소)는 손상방지를 위해 최대한 조심히 철거해야 하며, 손상되거나 결함이 발생 될 경우 계약대상자의 부담으로 재제작하여야 한다.

6) 모서리보호공

가) 기설치된 모서리보호공 제거시 부두 구조물에 손상이 없도록 시공하여야 하며 손상부 발생시는 계약상대자가 원상복구 하여야 한다.

나) 모서리보호공을 고정시키기 위한 앵커용 철근은 소정의 규격대로 표면 및 측면이 콘크리트면과 기존 모서리보호공에 일치되도록 시공되어야 한다.

7) 작업조건

가) 각종 작업 실시는 선박 입·출항이 없는 안전한 상태에서 작업이 이루어져야 하며, 반드시 감독원과 사전 협의 하에 시행하여야 한다.

나) 모든 작업은 안전이 보장되는 조건에서 진행되어야 하며, 계약상대자는 작업방법에 대해서 감독원이 반대를 하면 다른 방법을 강구해야 한다.

다) 각종 작업 수행시 계약상대자는 통항하는 선박의 입출항 일정을 사전에 감독원과 협의하여 선박의 통항에 지장이 없는 범위 내에서 작업 일정을 확인한 후 작업에 임하여야 하며, 또한 감독원의 지시나 비상시 등 필요에 따라 명시되지 않은 사항도 점검·작업에 임하여야 한다.

라) 계약상대자는 긴급상황에 대비하여 비상연락망을 작성한 후 착공과 동시에 제출하고, 항시 비상연락망을 확인하여 비상발생시 1시간 이내에 작업이 시행될 수 있도록 하여야 한다. 위 사항 미준수시 당사 임의로 타업체를 선정하여 작업을 시행할 수 있으며, 이 경우 작업에 소요된 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다. 따라서 계약상대자는 상시 긴급상황에 대비하고 비상연락망이 변경될 경우 즉시 감독원에게 보고하여 상기와 같은 불이익이 발생하지 않도록 하여야 한다.

8) 기타사항

가) 모든 운반 및 이동비용은 공종별 공사비에 포함 된 것으로 본다.

나) 모든 작업은 시작 전·후에 관할구역 변전소 운영담당자에게 보고하여야 한다.

다) 검사결과 지적된 결함에 대하여는 계약상대자의 부담으로 재시공 또는 보수·보완하여야 한다.

라) 본 설계도서에서 제시된 도면은 목적물의 기능과 용도를 예시한 것으로 큰 오류가 없는 한 세부적인 부분은 수량산출서와 관계없이 모두 포함된 것으로 본다.

마) 제반 설치비용에는 산출내역서상의 항목명과 관계없이 본 시방서가 요구하는 공사 목적상 제작 및 설치에 관한 제비용이 포함되어 있는 것으로 보며, 도면에 명기되지 아니한 세부 설치에 관한 부분은 계약시 포함된 것으로 한다.

Ⅵ		공사비 산출서

[첨부] 참조

첨 부  1. 공사비산출서 1부

2, 사진대지 1부

[첨부2]

사 진 대 지

예선계류부두 방충재 손상 현황
예선계류부두 모서리보호공 손상 현황

사 진 대 지

B/C부두 및 물량장 방충재 손상 현황