공 사 일 반 시 방 서

2018. 12

- 목  차 -

1. 일반사항  1

2. 공사협의 및 조정 8

3. 제출서류   10

4. 자재 및 공기구 관리  15

5. 시공  18

6. 공정관리  19

7. 품질관리  21

8. 안전관리  26

9. 환경관리  35

10. 보안관리 41

11. 특수작업 및 휴전작업 43

12. 시운전 43

13. 준공  43

1. 일반사항

1.1 적용

1.1.1 이 공사시방서는 한국전력공사에서 시행하는 두미북구 주철관 노출개소 보강공사에 적용한다.

1.1.2 본 시방서 내용외의 필요한 사항은 기술시방서에 따른다.

1.2 적용순서

1.2.1 설계도서 간에 내용이 불명확하거나 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 계약서

나. 계약특수조건 및 일반조건

다. 공사시방서

라. 설계도면

바. 산출내역서

사. 관계법령의 유권해석

아. 발주자의 요청사항

자. 관련 전문시방서 또는 표준시방서

1.2.2 이 공사시방서의 일반사항과 일반사항 이외의 시방서 내용 간에 상호 모순이 있을 경우에는 일반사항이외의 시방서에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.2.3 당해공사의 계약자는 공사시행에 있어서 관계법규 및 그에 근거한 관계 관청의 지시를 준수하여야 한다.

1.2.4. 시공자는 공사 시행에 있어서 아래의 관련 기준 및 규정을 숙지하고 준수하여야 한다.

가. 전기설비기술기준 및 전기설비기술기준의 판단기준

나. 한국전력공사의 공사관리규정

다. 한국전력공사의 설계기준 및 시공기준

라. 한국전력공사의 표준규격

마. 한국전력공사의 안전작업수칙

바. K.S 규격

사. 내선규정

아. 기타 관련규정

1.2.5 시공자 및 시공관리책임자가 발주자에게 통지 또는 제출하는 모든 서류는 당해공사의 감리원을 경유하여야 한다.

1.2.6 발주자가 감리업자에게 공사감리를 발주할 경우 업무담당자는 감리원을 통하여 발주자의 지시사항 등을 전달한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 공사시방서

공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질, 시험 및 검사 등 품질관리 등에 관한 사항을 기술한 공사계약 문서를 말한다.

1.3.2 공사감리

전력기술관리법 제12조에 의거 전력시설물의 설치·보수공사에 대하여 발주자의 위탁을 받은 공사감리업자 또는 발주자의 소속직원이 설계도서 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질․시공․안전 및 공정관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 관계법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 것을 말한다

1.3.3 공사감리업자

전력기술관리법 제14조에 의한 전력시설물 감리업의 등록을 한 자(이하 ‘감리업자’라 한다)를 말한다.

1.3.4 발주자

전력시설물의 설치․보수공사를 수행하기 위하여 설계업자, 공사업자 또는 감리업자에게 공사 또는 용역을 발주하는 자를 말한다.

1.3.5 감리원

감리업자의 종사자 또는 발주자의 소속직원 중 관계법령의 규정에 의한 감리원 자격을 취득한 자로서 감리원으로 등록되어 당해공사의 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

1.3.6 업무담당자

발주자가 감리업자에게 공사감리를 발주할 경우 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상, 기타 필요한 업무를 지원 또는 수행하는 발주자의 소속직원을 말한다.

1.3.7 시공자

건설산업기본법 시행령 제 7조에 의한 대한전문건설협회에 등록한 전문공사를 시공하는 업종 중 15. 수중공사업에 등록한 업체

1.3.8 시공관리책임자

건설산업기본법 제40조 1항에 의하여 공사를 효율적으로 시공하고 관리하게 하기 위하여 시공자가 지정한 건설기술자를 말한다.

가. 시공자는 당해공사에 해당하는 기술자격소지자를 시공관리책임자로 임명하여야 한다.

나. 시공자가 시공관리책임자를 임명 또는 교체하고자 할 때는 그의 기술자격증, 이력서, 기타 필요한 사항을 감리원에게 제출하여 발주자의 승인을 얻어야 한다.

다. 시공관리책임자는 공사 현장에 상주하여 감리원의 지시에 따라 공사 현장을 관장하고 책임 관리하여야 하며, 준공검사 입회의 책임을 갖는다.

라. 발주자는 현장의 운영관리 및 작업수행에 시공관리책임자가 부적합하다고 인정할 경우 이의 교체를 명할 수 있으며 이 경우 시공자는 이에 응하여야 한다.

1.3.9 설계도서

공사시방서, 설계도면, 검토서, 기술계산서, 공사비 예산서 및 설계에 관련된 일체의 도서를 말한다.

1.3.10 공사 계약문서

계약서, 설계도서, 공사입찰 유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건으로 구성되며 상호 보완의 효력을 지닌다.

1.4 시공자의 의무

시공자는 공사 계약문서에 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 안전하게 시공하고 정해진 기간 내에 준공하여야 하며, 발주자의 재시공, 공사 중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1.4.1 설계도서 검토

가. 시공자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토한 후 ‘3.2절 시공계획서’에 명시된 시공계획서를 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 임해야 하며, 시공계획의 검토 소홀로 인하여 부실시공이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 유의하여야 한다.

나. 설계도서 검토 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 시공관리책임자의 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 통지하고 발주자의 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

1) ‘1.5.7 공사변경’에 명시한 사유가 있는 경우

2) ‘2. 공사협의 및 조정’에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

5) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

다. 시공자가 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자가 지시를 내리기 전 임의로 수행한 역무에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다.

1.4.2. 책임 한계

가. 시공자는 시공자가 당해공사를 위하여 임명, 지정, 고용한 자 및 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 시공자는 공사 목적물을 발주자에게 인도하기 전에 발생한 공사 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형으로 인한 피해나, 제 3자에 끼친 손해에 대하여는 시공자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 시공자가 발주자에게 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

라. 시공자가 지정, 배치한 시공관리책임자는 현장에 상주하여야 한다.

1.5 공정관리 및 공사변경

1.5.1 발주자가 필요하다고 인정할 경우 시공방법 및 공정을 지시할 수 있다.

1.5.2 시공자는 공사수행에 앞서 시공방법 및 공정표를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.5.3 발주자가 전항의 시행방법 및 공정에 대하여 의문이 있을 때는 시공자는 구체적인 설명을 하여야 하며, 최종 결정은 발주자의 지시에 따른다.

1.5.4 발주자는 아래사항에 대하여 필요하다고 인정될 경우, 이유를 명시하여 시공방법 및 공정 변경지시를 할 수 있다.

가. 공사가 지연될 우려가 있을 때

나. 안전 및 재해예방에 관한 조치가 불충분하다고 인정될 때

다. 기타 필요하다고 인정할 때

1.5.5 시공자는 1.5.2항에 의해 제출한 시공방법 및 공정의 변경이 필요하다고 인정 될 때에는 지체 없이 발주자에게 그 사유를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5.6 시공자는 불가항력이나 기타 시공자의 책임외의 사유로 인하여 공사 진행의 지장이 발생할 경우는 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 준공 연기 신청을 하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.5.7 공사변경

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 공사의 변경이 불가피할 경우에는 발주자의 승인을 득하여 변경, 시행할 수 있다.

가. 시공자가 발주자에게 통지한 다음 각호의 사유

1) 설계도서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순이 되는 점이 있을 때

2) 지질 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

나. 발주자가 시공자에게 통보한 다음 각호의 사유

1) 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

2) 특정 공종의 삭제

3) 공정계획의 변경

4) 시공방법의 변경

5) 기타 발주자의 계획변경이 있을 때

다. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

1.5.8 공사변경요청 서류

공사변경에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 ‘3.4 공무행정서류 3.4.5 공사변경 승인요청’에 따른다.

1.7 손해에 대한 예방

시공자는 사급자재, 대여기기, 기타 발주자 소유설비에 대한 손해를 발생시키거나 발주자의 전력공급에 지장을 초래하였을 경우, 발주자 규정에 의하여 변상하여야 함은 물론, 이에 대한 철저한 예방조치를 강구하여야 한다.

1.8 공사부지

1.8.1 현장사무실 및 자재보관 등에 필요한 부지는 발주자와 협의하여 확보하여야 한다. 단, 발주자가 시공자에게 부지를 제공할 경우는 예외로 한다.

1.8.2 발주자가 제공한 부지가 발주자의 사정에 의하여 필요하게 되었을 경우는 발주자의 요구에 따라 당해 부지를 즉시 반환하여야 하며, 이 경우 시공자는 당해 부지 내에 있는 공사용 가설비, 기계기구, 공사용 자재 등을 즉시 철거하여야 한다.

1.10 공사 현장관리

1.10.1 시공자는 공사현장의 질서를 유지하여야 하며, 항상 정리 정돈하여야 한다.

1.10.2 시공자는 당해공사와 연관공사의 시행에 있어 시공자간에 긴밀한 연락을 취하고 협력하여 공사시행을 원활하게 하여야 한다.

1.12 중간검사

1.12.1 시공자는 공사를 시행하면서 은폐된 후 다음공정으로 진행되는 공종에 대해서는 감리원의 검사를 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

1.12.2 이절에서 명시하지 않은 사항은‘9. 품질관리’에 따른다.

1.13 공사용 전력

1.13.1 공사용 전력은 설계서 및 계약서에 정한 바에 따라야 한다.

1.13.2 공사용 전력의 공급책임 분기점은 분전함의 개폐기이며 부하 측의 설비는 기술기준에 의거 시공자 부담으로 가설하며, 시설보수 및 관리 일체는 시공자 책임으로 한다.

1.14 철거자재, 잔자재 등의 처리

시공자는 공사시행에 있어 발생하는 철거자재, 잔생자재에 대하여 설계도서에 따라 신속히 처리한다.

1.15 시방에 의한 치수 및 공사수량

설계도 및 설계서에 기재되어 있는 구조물의 치수 및 공사수량은 완성된 후의 치수 및 수량을 표시한다.

1.16 공사 완료 후의 조치

시공자는 공사완료 후 발주자의 지시에 따라 공사용 가설비 및 공사용 잔자재를 철거하고 특히 사급자재의 잔재 및 대여기기는 발주자가 지시한 기일 내에 지정한 장소에 반환하여야 한다. 또한 대여용지가 있을 경우에는 원상 복구하여 반환하여야 한다. 또한 상기 사급자재에 대한 반환품이 손상되었을 경우는 그 수리 및 보상은 시공자가 부담하여야 한다.

1.17 설계도서에 대한 이견

설계도서에 관한 해석, 공사 중 이견 또는 설계도서에 기재되지 않은 사항은 발주자와 시공자의 상호 협의에 의한다.

1.18 행정처리

시공자는 공사 시행에 따른 대관 인허가 신청에 필요한 서류 작성 및 수속 일체를 책임지며, 이 시방서에 별도로 지정하거나 발주자의 지시가 있을 경우에는 이에 따른 모든 수속을 수행하여야 한다.

1.19 민원처리

공사와 관련하여 시공자의 귀책으로 발생된 민원은 시공자 책임으로 처리하고 그 결과를 발주자에게 보고 하여야 한다.

2. 공사협의 및 조정

2.1 공사 협의 및 조정

시공자는 당해공사와 연관된 다른 공사의 시공자(토목공사, 건축공사, 통신공사 등)들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의하여 공사의 진행에 지장이 없도록 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 수행하여야 한다.

2.1.1 공사변경

시공자는 당해공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과 공사변경을 요하는 사항은 감리원에게 공사변경을 요청할 수 있다.

2.1.2 종합공정관리

시공자는 착공부터 준공까지 관련 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 발주처가 행하는 종합 공정관리계획 수립 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

2.2 공사 시공한계

시공자는 공사 시공한계를 상세히 검토하여 연관공사의 시공을 원활히 하고 분쟁을 사전에 차단하며, 他시공자와의 시공한계점의 품질을 확보하여야 한다.

2.3 착공 전 회의

2.3.1 시공자는 공사 착공 전 발주자와 아래사항을 충분히 협의하여야 하며 그 결과를 공사에 참여하는 전 작업원에게 주지시켜야 한다.

가. 공사의 설계 및 시방

나. 공사 공정(착공 및 준공기일)

다. 공사 휴전계획

라. 자재도착 일시, 장소 및 방법

마. 시공방법 및 시공 주의사항

바. 사고방지대책 및 사고 조치

사. 품질․안전․환경관리

아. 공정관리

자. 공사 중의 입회 및 검사

차. 기타 필요한 사항

2.3.2 시공자의 시공관리책임자, 재해방지 책임자는 전항의 공사 협의에 반드시 참석하여야 하며, 시공자는 사전에 현지를 충분히 조사한 후 공사계획을 수립하여 협의에 임하여야 한다.

2.3.3 시공자는 협의사항에 대한 회의록을 작성하여 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.3.4 공사착공 후라도 발주자는 시공자가 필요하다고 요청하는 사항에 대하여 재협의를 할 수 있으며 시공자는 공사 시행방법의 확인 및 공사 실시에 있어 적정 여부를 검토, 확인하여야 한다.

2.4 휴전절차

특수작업(무정전, 활선작업) 및 휴전작업 절차, 조치사항 등은 ‘10. 특수작업 및 휴전작업’에 따른다.

2.5 사전승인

‘3.2시공계획서’에 명시되어 있는 공종의 공사는 작업실시에 앞서 시공계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 얻은 후 작업을 시행하여야 한다.

2.6 공사수행

2.6.1 시공자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주자의 시정요구 또는 이행 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

2.6.2 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

2.6.3 시공자는 당해공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 한다.

2.6.4 시공자는 공사현장의 작업효율증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해예방, 보건, 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착 토사의 정리, 정돈, 점검, 청소 등을 충분히 행하여 현장을 청결히 유지하여야 한다.

2.6.5 시공자는 공사를 일시 정지한 후 또는 천재지변 및 기타 사유로 공사를 중단한 경우에는 공사 중단으로 인하여 품질이 저하되지 않도록 공사 중단 부분, 시공물, 가설재 등을 보호하고 정비하여야 한다.

3. 제출서류

3.1 제출절차

3.1.1 협의 및 확인

가. 시공자는 각 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 발주자와 협의하여 조정한다.

나. 시공자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치 여부를 확인한 후  제출물에 날인하여 발주자에게 제출하여야 한다.

3.1.2 규격

가. 서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정양식을 제외하고는 시공자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리하여 제출하여야 한다.

나. 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

3.1.3 추가요구 및 변경

발주자는 공사의 원활한 진행을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 이 공사시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록 유지를 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

3.1.4 내용변경

모든 제출물은 내용의 변경을 수반하는 사유가 있어 발주자가 이를 인정한 경우에는 관련된 제출물을 재작성하여 제출하여야 한다.

3.2 시공계획서

3.2.1 승인

시공자는 단위 공종에 대하여 시공계획서를 작성하여 발주자의 확인을 받은 후 공사를 착수하여야 한다. 단, 시공계획서에 대하여 변경사항이 발생하면 변경계획안을 작성하고 발주자의 승인 후 공사를 수행하여야 한다.

3.2.2 포함내용

가. 공사개요

나. 시공관리체계

다. 세부공정표(사용할 자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)

라. 사용재료

마. 품질보증계획

바. 안전관리계획

사. 환경 및 보건관리계획

아. 他공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

자. 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

차. 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항을 기준으로 작성

3.3 공사 기록 사진

3.3.1 비치 및 제출

공사 시공 후 은폐되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 사진으로 기록, 정리하여 현장에 상시 비치하여야 하며, 1부는 파일(또는 필름)과 같이 발주자에게 제출한다.

3.3.2 촬영방법

공사시공 후 은폐되는 주요 부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

3.4 공사서류

3.4.1 공사서류의 비치

시공자는 공사의 진행을 위한 서류를 사실과 증빙자료에 근거하여 작성하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에는 감리원이 필요시 수시로 열람할 수 있도록 비치하고 공사가 준공되면 발주자에게 제출하여야 한다.

3.4.2 착공서류

가. 착공계

나. 제출서류

1) 현장기술자 배치신고서

2) 예정공정표

3) 공사도급계약서 사본 및 내역서

4) 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

5) 시공계획서

3.4.3 공사일지

가. 제출서류

당일의 일기, 공정, 장비현황, 인원사항과 익일의 공사추진 계획을 상세히 기록하여 감리원에게 제출하여야 한다.

나. 공사일지에는 아래사항이 포함되어야 한다.

1) 최저, 최고온도, 습도 및 날씨

2) 공정, 인원, 장비현황

3) 공사 주요사항

- 사건, 사고

- 공사의 중단, 연기, 결함, 손실

- 측정 및 검사사항

- 감리원의 지시, 요구사항

- 점검, 감사 등

다. 제출시기 및 부수 : 매일 17:00시까지 1부 제출

3.4.4 기성검사원

가. 제출서류

1) 기성검사원

2) 기성부분총괄내역

3) 공사비 세부내역

4) 품질시험 및 검사성과 총괄표

나. 제출시기 및 부수 : 기성검사 요청 시 각 1부

다. 기성검사원 제출 시 발주자의 확인을 받아야 하는 서류

1) 안전관리비 사용내역

2) 공정현황

3) 현장점검 및 지적사항 조치완료 여부 등

4) 관련 사진

3.4.5 준공검사원

가. 제출서류

1) 준공검사원

2) 준공부분 총괄표

3) 공사비 세부내역

4) 준공 사진(파일 또는 필름 포함)

5) 품질시험 및 검사성과 총괄표

6) 준공도면

7) 보험료 지불 영수증 및 증권

8) 기타 요청 서류

나. 제출시기 및 부수 : 준공검사 요청 시 각2부 제출

다. 준공검사원 제출 시 발주자에게 확인을 받아야 하는 사항

1) 현장점검 지적사항 조치완료 여부

2) 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

3.4.6 공사변경승인 요청

가. 제출서류

1) 변경요청 공문

2) 변경 사유서

3) 변경 총괄표, 내역서, 산출근거

4) 변경 설계도면

5) 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

나. 제출시기 및 부수 : 공사변경 승인 요청 시 각 2부 제출

3.4.7 현장지도점검

가. 현장지도점검 대장

공사 지도점검자의 시공부분 및 반입자재 부실여부에 대한 지도점검결과 지적사항 및 사전완료 확인에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다. 현장지도점검의 절차 등은 ‘7.3.5 현장지도점검’에 따른다.

나. 지적사항 조치결과 보고

현장 지도점검 결과 지적사항에 대하여 재시공 내용과 재시공 전, 후의 사진을 촬영 하여 결과보고하고, 그 자료를 상시 비치하여야 한다.

3.4.8 품질시험· 검사 및 자재관리 서류

가. 품질보증 계획 및 품질시험계획서

‘7.2 품질관리계획’에 따른다.

나. 자재 관련 서류

1) 품질시험· 검사 대장

지입자재에 대한 품질시험· 검사 결과에 대하여 시험자 및 시공관리책임자가 날인하고, 감리원의 확인을 득하여 상시 비치한다.

2) 자재수불대장

사급 자재 중 현장에 반입되어 시공자가 인수한 자재 및 시공자 지입자재는 자재 품목별 인수, 출고, 재고의 상태를 상시 기록 관리한다.

3.4.9 안전관리 서류

가. 안전관리 계획서 등

제출시기 및 부수는 ‘3.4 공무행정서류 3.4.2 착공서류’에 따른다.

나. 안전일지

시공자가 자체 관리하며, 안전점검, 안전진단, 전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

다. 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

시공자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 제출하여야 한다.

라. 기타

이 절에서 명시하지 않은 사항은 ‘8. 안전관리’에 따른다.

3.4.10 환경관리 서류

가. 환경관리 계획 및 환경관리계획서

제출시기 및 작성방법은 ‘9.2 환경관리업무’에 따른다.

4. 자재 및 공기구관리

4.1 사급자재

4.1.1 사급자재가 공사현장에 반입되어 시공자가 인수하면 시공자는 설치를완료할 때까지 자재의 원활한 관리 및 성능이 보장되도록 관리하여야 한다.

4.1.2 사급자재 인수 후 시공자는 이를 책임보관하고 파손, 도난 등이 없도록 충분히 주의하여야 한다.

4.1.3 사급자재를 분실, 파손한 경우에는 즉시 그 사유와 수량을 서류로 상세히 보고해야 하며, 이로 인한 모든 민형사상 책임은 시공자가 지고  정한 시일 내에 변상하여야 한다. 사급자재를 이용할 때에는 사용개소, 수량 등을 정확히 명기해 두고 언제든지 반출입 현황을 명확히 알 수 있도록 정리하여야 한다.

4.1.4 사급자재는 공사완료 후 즉시 자재수불대장을 작성하여 제출하여야 한다. 단, 남은 자재에 대하여는 발주자의 지시에 따라 지정된 장소에 환입하여야 한다.

4.2 공사업체조달자재

4.2.1 시공자는 공사업체조달자재가 현장에 반입되면 시공관리책임자로 하여금 검수요청명세서를 작성하여 제출하고 검수 후 합격된 수량을 기입날인한 후 시공자 책임 하에 보관한다.

가. 시험을 요하는 자재의 시험성적서

나. ‘KS’ ‘전’자 등 형식승인품은 시험면제 가능

4.2.2 검수에 필요한 비용은 시공자가 부담하여야 한다.

4.2.3 검사 또는 시험결과  불합격된 공사용 자재는 지체 없이 재수배 조치하여 공사 진행에 지장을 초래하지 않아야 한다. 검수에 합격된 자재는 공사 목적외의 재반출은 인정하지 아니한다.

4.3 자재의 보관, 운반, 취급

4.3.1 품질변화 방지

자재는 준공 전, 후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

4.3.2 자재수불대장 비치

시공자는 사급자재(설치조건부사급자재는 제외)의 인수, 출고 및 재고상태를 정확히 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대한 보관 및 관리의 책임을 진다.

4.3.3 시험자재 분리보관

현장 반입 후 시험을 시행하여야 할 자재는 시험이 종료될 때까지 기존에 반입된 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

4.3.4 화기위험자재의 분리보관

시공자는 자재 중 화기위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방대책을 수립, 시행하여야 한다.

4.4 잔자재 및 부족자재

4.4.1 사급자재 중 공사에 사용하고 남은 자재는 발주자가 지정하는 장소에 환입하여야 한다.

4.4.2 부족자재가 있을 경우에는 발주자에게 요청한다. 단 부족자재는 파손 및 분실된 것을 제외한 절대 부족량에 한한다.

4.4.3 환입대상 자재 중 사용가능한 자재는 파손되지 않도록 보관에 신중을 기하여야 한다.

4.5 공사용 기기 및 공구류

4.5.1 공사에 사용되는 일체의 기기 공구류는 시공자가 준비한다.

4.5.2 시공자가 공사 시공에 사용하는 기기공구류는 충분한 안전율을 가져야 하며 발주자는 위험하거나 불안정한 기계, 기구 등에 대하여 대체를 지시할 수 있다. 단, 대체 시 발생되는 비용은 시공자가 부담한다.

4.5.3 시공자가 발주자의 기계, 기구를 대여 받고자 할 때는 발주자에게 대여신청서를 제출하고 수령 시에 차용증 및 각서를 제출하며 사용개소 및 사용일시를 기재하여야 한다.

4.5.4 시공자는 대여기기의 보관취급 사용방법 등에 대하여 발주자의 지시에 따라야 하며 아래 사항을 충분히 주의하여야 한다.

가. 대여 기기의 성능 및 안전

나. 대여 기기의 분실 또는 손상방지

다. 대여기기와 시공자 소유 기계 기구는 서로 명확히 정리 구분하여야 하며 대여기기에는 발주자의 소유임을 분별할 수 있도록 표시하여야 한다.

4.5.5 시공자는 대여기기 사용 후 시공자 부담으로 깨끗이 손질하여야 하며 발주자가 지시하는 기일 및 장소를 엄수하여 반환하여야 한다.

4.5.6 시공자는 대여기기에 이상이 발견될 경우 또는 사용상 부적당하다고 인정되거나, 분실, 손상, 고장이 발생하였을 때는 즉시 발주자에게 보고하고 지시에 따라 조치하여야 한다.

5. 시공

5.1 적용범위

이 절은 한국전력공사 △△건설공사의 시공에 관련되는 모든 사항에 적용한다.

5.2 시공 일반사항

5.2.1 당해공사의 시공자는 시공품질에 최선을 다하여야 하며, 공종별로 승인된 세부 시공계획서에 의해 시공하여야 한다.

5.2.2 모든 기기 조립은 기기 외형도, 취급설명서, 기기 제작업체에서 제출하는 시험/검사계획서, 절차서 (ITP :Inspection & Test Plan / Procedure), 감리원의 지시, 기기제작업체의 조언 등에 의하여 작업내용, 공정 등을 확실히 파악하고 필요한 자재 장비, 인력 등을 확보한 후 조립순서에 따라 조립하여야 한다.

5.2.3 기기 설치는 기초 콘크리트가 토목공사 시방서에 명시된 최소 양생기간 경과 후 작업하되 분진이 발생되지 않도록 조치한다.

5.2.4 기기 납품업체에서 조립하는 기기에 대하여는 조립 시 장애물이 없도록 최대한 협조하여야 한다.

5.2.5 기기조립 후 최종 점검 및 조정 작업 시에는 시공자의 시공관리책임자 또는 작업책임자와 당해공사 감리원의 입회하에 동작시험을 완료하여야 한다.

5.2.6 他기기와의 시공 한계점은 설치 전 관련 시공업체와 그 한계점을 명확히 하여 누락되는 일이 없도록 하며 또한 기기가 제 성능을 발휘할 수 있도록 최대한 상호 협조해야 하며 관련공법은 공사시방서의 해당절 및 시공자가 발주자에게 제출하여 승인을 득한 시공 계획서에 의해 시행한다.

5.2.7 동력, 전등용 부속설비 및 건물조명용에 전원을 공급하는 소내배전반  과의 연결은 지정된 회로에 연결하여야 한다.

5.2.8 모든 연관작업은 제작사와 발주자 사이의 협의된 지시에 따라 시공한다.

6. 공정관리

6.1 일반사항

6.1.1 적용범위

당해공사의 착공에서 준공까지의 공사 진도관리, 기성관리 등에 대한 공정관리는 이 절에서 정하는 바에 따른다.

6.1.2 시공자는 당해공사가 정해진 공기 내에 계약서 및 설계도서에 의거 계약목적물이 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 발주자가 제시하는 협업시스템을 최대한 활용하여 공정관리 한다.

6.1.3 시공자가 작성, 제출하는 공정관리 계획서는 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 작성되어야 한다.

6.1.4 공정관리 조직

시공자는 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 공정관리업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리조직을 갖추어야 한다.

6.2 공정관리계획

6.2.1 공정관리 계획서 작성

시공자는 공사 착공부터 준공까지의 일련의 공정을 이 절에서 정하는 요건을 충족하는 공정관리계획서를 작성, 제출하여 발주자의 승인을 받아 이행하여야 한다. (3.2 시공계획서에 포함)

가. 공정관리 기법

당해공사의 공정관리는 정해진 협업시스템을 이용한다.

나. 공정관리 형태

시공자가 시행하는 공정관리는 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되어야하며 시험 및 검사계획서의 필수 확인점 및 입회점을 표기하여 품질관리 활동이 누락되는 일이 없도록 한다.

다. 공사예정공정표

공사예정공정표에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 주요 공정단계별(Activity) 착수시점, 완료시점

2) 주요 공정단계별 선후 동시시행 등의 연관관계

3) 주 공정(Critical Path) 또는 주요 공종의 목록

4) 사용자재 및 장비조달 계획

5) 기타 사항

6.2.2 공정관리 계획 작성 시 고려사항

가. 계약 공기 준수

나. 각 공정단계(Activity)별 품질, 안전관리

다. 공사주변 여건, 법적 승인 및 제약조건

라. 동원 가능한 장비, 기타 부대설비

마. 특수 장비 동원을 위한 준비기간

바. 동원 가능한 작업인원과 작업자의 숙련도

사. 투입자원의 일일 최대 가용량

아. 투입 예정자원의 적기 조달 가능성

자. 주자재의 사급, 지입, 외자, 내자의 구분

차. 자원조달 계획수립

6.3 공사 일정관리

6.3.1 시공자는 전체 실시공정표에 의한 월간, 주간 상세 공정표를 제출하여 발주자의 확인을 받아야 된다.

6.3.2 발주자 및 시공자의 공정관리 담당자는 매주 또는 매월 정기적으로 공사 진도를 확인하여 예정공정과 실시공정을 비교하여 공사의 부진여부를 검토하여야 한다.

6.3.3 공정관리 담당자는 현장여건, 기상조건, 관련기관 및 연관공사의 공정 및 협의사항이 정상적으로 추진되는지를 검토하여 주간 상세공정표 제출 시 발주자에게 보고하여야 한다.

6.3.4 공정 진척도 현황은 최근 1주 전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주 공정 일정관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

6.3.5 공정관리 담당자는 주간단위의 공정계획 및 실적을 작성하여 주간 상세공정표 제출 시 제출한다.

6.3.6 발주자는 시공자로부터 실시공정표를 제출받아 이를 확인하고, 필요한 경우 시공관리책임자를 포함한 관계직원 합동으로 작업에 대한 실적을 평가하고 공사 추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와 재발방지책, 공정진도의 평가, 기타 공사 추진 상 필요한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 공사추진 회의를 실시한다.

6.5 변경 공정계획

6.5.1 시공자의 요청 또는 발주자의 판단에 의해 변경 공정계획을 수립할 경우 시공자는 변경된 공정계획을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

6.5.2 변경 공정계획 수립 시 변경목표 종료일이 당초 계약종료일을 초과하지 않도록 하여야 하며, 초과할 경우에는 그 사유를 분석하고 검토안을 작성하여 발주자에게 보고하여야 한다.

7. 품질관리

7.1 일반사항

7.1.1 적용범위

당해공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재에 대한 품질관리는 이 절에서 정하는 바에 따라  성실히 수행하여야 한다.

7.1.2 용어의 정의

가. 품질보증계획서(QAM : Quality Assurance Program Manual)

품질에 관련된 제반 업무가 조직적이고 체계적으로 수행될 수 있도록 수립된 품질보증계획을 기술한 책자

나. 시험/검사계획서 및 절차서(ITP : Inspection & Test Plan / Procedure)

각 공정마다 준비과정에서부터 작업완료까지의 각 과정마다 정밀도 및 품질확보를 위한 수단, 절차 등을 규정한 책자.

다. 필수 확인점(Hold Point)

공정 중 감리원의 검사 또는 입회를 필요로 하는 중요단계로서 감리원의 검사에 합격하지 않고는 다음 단계의 공정으로 진행할 수 없는 검사점

라. 입회점(Witness Point)

검사를 입회하겠음을 정한 시점으로 일반적으로 필수 확인점과 구분하여 정한 시간에 감리원의 입회가 불가능할 경우 다음단계의 공정으로 진행 가능한 검사점.

마. 성적서 검토(Review)

기술된 내용이 요구조건에 적절한지 여부를 확인하기 위하여 검사성적서를 제출하여 입회검사 또는 인수 검사 시 확인하는 검사점

7.2 품질관리계획

7.2.1 계획수립 및 제출 등

시공자는 공사의 품질확보를 위하여 각 공정마다 준비과정에서부터 작업완료까지의 정밀도 및 품질확보를 위한 수단, 절차 등을 규정한 QAM와 ITP를 작성하여 발주자의 승인을 득한 후, 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

가. 관련규정의 충족

시공자가 제출한 QAM과 ITP는 발주자가 발행한 규정, 계획서, 절차서 및 이 공사시방서의 품질관리요건을 충족시켜야 한다.

나. 제출시기 및 부수

QAM와 ITP는 공사착공 전에 원본을 포함하여 3부를 제출한다.

다. 시공자는 발주자의 품질관리업무 수행에 입회하여야 한다.

7.2.2 시험/검사계획서 및 절차서(ITP)

가. ITP 내용

시공자는 7.2.1 가항의 관련규정, 계약서, 설계도면 및 규격 등을 참조하여 ITP를 작성하여야 하며 ITP에는 다음 사항이 반드시 포함되어야 한다.

1) 공사명, 공사개요

2) 작성자 및 작성조직(작업수행 조직)명

3) 공종(작업명, 품목명) 및 위치

4) 공정별 시공기준, 시험 및 검사항목, 판정기준(적용문서 포함)

5) 검사점 및 수행 장소 등

나. 검사점 설정

1) 검사점은 입회점(W), 필수확인점(H) 및 성적서 검토(R) 중의 하나로 설정한다.

2) 시공자는 다음 사항을 고려하여 검사점을 설정하여야 한다.

- 공사시방서에 기술된 주요 시공, 조립, 설치 및 관리활동 등의 반영

- 특수공정(작업자, 절차서, 장비의 자격 또는 규격이 요구되는 공정)의 관리요건 또는 선결요건 반영

- 전력, 건설기술관리법등에 규정된 발주자 검사시험요건 반영

- 자재의 적합성 검토

- 검사대상 작업의 특성 또는 검사방법

- 검사수행 책임조직의 확인 서명

- 표본시험을 위한 표본채취 계획 등의 명시 등

7.2.3 품질시험 계획

가. 시공자는 공사에 사용될 재료가 규격 및 품질기준에 적합하고 시공 시 품질관리가 효과적으로 수행되어 하자발생을 사전에 예방할 수 있도록 품질시험 계획을 수립하여야 한다.

1) 공정계획에 의해 시험 종목 별 시험 품목을 선정하고 적정 품질관리 시험요원을 사전에 확보하여야 한다.

2) 시험 종목 중 의뢰시험을 실시해야 할 종목과 현지에서 실시 가능한 종목으로 구분하여 시험계획을 수립하며 의뢰시험의 경우에는 의뢰 시험기관을 사전에 선정하여 소요 시험기간을 확인하고 현장 시험의 경우에는 공정계획에 의하여 소요 시험 장비를 사전에 현장에 비치하도록 한다.

3) 각종 시험양식지는 공사의 특성에 적합하도록 결정하고 시공자가 제출하는 공정계획서에는 품질관리시험요원 수와 시험장비 등이 명시되어야 한다.

4) 시공자의 품질관리시험요원은 자격과 능력을 보유하고 있어야 하며 무자격 품질관리(시험)요원을 배치하였을 경우에는 발주자는 이를 교체 지시할 수 있다.

5) 1일 공정계획에 의한 품질관리 시험계획은 공종별, 시험 종목별 품질관리시험요원을 확인하고 중점 품질관리 및 공종 품질관리 시험이 우선적으로 이루어질 수 있도록 한다.

6) 시공사의 품질관리책임자는 소장급으로 임명하여 품질관리에 대한 책임과 권한이 시공관리책임자와 동등 수준이 되어 실질적인 품질관리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

7.3 시험 및 검사

7.3.1 일반사항

가. 시공자는 부주의, 착오, 미확인 등에 의한 품질저하가 되지 않도록 사전에 충실한 현장 확인 업무를 수행하여야 한다.

나. 시공 후 은폐되거나 사후검사가 곤란한 시공은 감리원의 입회하에 검사하여, 시공당시 상세한 경과 기록 및 사진 촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 입증할 수 있는 자료를 작성 비치하여야 한다.

7.3.2 품질시험기준

가. 시공자는 시공품질, 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 감리원의 입회하에 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

나. 품질시험 및 검사의 종별, 시험종목, 시험방법 및 시험빈도 등 품질시험기준은 송배전분야 시공품질 검사 실시기준 및 이 공사시방서에 의한다.

7.3.3 시험장소

가. 품질시험은 공사현장에서의 현장시험을 원칙으로 한다.

나. 현장시험을 시행할 수 없는 품질시험은 품질검사전문기관(국공립시험기관 등)에 의뢰하여 시행한다.

다. 상기 가, 나항에 의하여 시험하는 것이 부적합한 경우에는 감리원 입회하에 제조공장 등에서 품질시험 및 검사를 시행할 수 있다.

7.3.4 불합격 처리

가. 시공자는 품질시험결과가 설계도서의 기준에 부적합한 경우(이하 ‘불합격’이라 한다)에는 품질시험 검사대장에 그 내용을 기재한 후 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

나. 불합격 부분은 보완 또는 재시공 하여야 한다.

다. 불합격 자재의 경우는 지체 없이 장외로 반출하여야 한다.

7.3.5 현장지도점검

가. 발주자는 공사가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장지도점검을 할 수 있으며, 점검결과 지도사항에 대하여 시공자에게 시정을 요구할 수 있다.

나. 시공자는 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 발주자에게 확인을 받아야 한다.

7.4 시험성과에 관한 검토

7.4.1 시험성과표의 검토, 확인

시공자는 공사의 품질관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공종별 시험 종목과 시험빈도 및 품질기준을 숙지하고 발주자가 시행하는 시험성과표의 검토 및 확인업무에 적극 협조하여야 한다.

가. 시험성과의 검토 및 확인

1) 시공자는 품질시험 성과를 정해진 양식지와 품질시험성과 총괄표에 기록 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 시공자는 공종별, 재료별 시험횟수가 시험기준에 의하여 시행될 수 있도록 품질관리 요원을 충분히 확보하여야 한다.

3) 시험성과가 불합격으로 판정되었을 경우에는 후속공정의 진행을 보류하고 보완대책을 강구하여야 한다. 이때 보완대책의 수립을 위하여  전문기관에 기술검토를 의뢰할 필요가 있을 때는 발주자 협의하여 결정하며 이에 소요되는 비용은 원인제공자가 부담한다.

7.4.2 시험성과표의 활용

시공자는 공사의 시험성과표를 준공검사 완료시까지 보관하며 시험결과 미비점이 발견되거나 불합격으로 판정되어 재시험을 실시하였을 경우에는 당초 시험성과표를 첨부하여 보관하여야 한다.

8. 안전관리

8.1 일반사항

8.1.1 적용범위

당해공사의 안전관리는 관련법규와 이 절에서 정하는 바에 따른다.

8.1.2 안전관리

안전관리라 함은 사고가 발생하지 않는 상태를 유지하기 위한 활동, 즉 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동을 말한다.

8.1.3 관리 및 보상의 책임

가. 시공자는 공사장 내의 시공사측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립, 시행하고 사고가 발생했을 때는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해손실에 대한 처리와 보상 일체는 시공자의 책임으로 한다.

나. 시공자는 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 모든 공작물, 농작물 및 가축 등에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가했을 경우에는 이에 대한 보상을 하여야 한다.

다. 시공자는 해당 공사수행의 직간접적인 영향으로 인한 인접지역 지반 변화를 방지하기 위하여 계측관리 등의 필요한 조치를 실시하여야 한다. 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 피해 손실에 대한 처리와 보상 및 원상복구 등은 시공자의 책임으로 한다.

8.1.4 출입자 통제

시공자는 공사안전 및 보안유지를 위하여 공사장에 관련자외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

8.1.5 안전작업 수칙

시공자가 수행하는 모든 공사는 안전작업수칙 및 시공자가 제출한 안전관리계획서에 의거 작업에 임한다.

가. 안전표지용구

작업장 내에 설비 또는 작업으로 인한 위험을 경고하고 그 상태를 표시하여 주의를 환기시켜야 하며, 안전을 확보하기 위한 표지용구를 설치하여야 한다.

나. 안전장구

작업원은 방호용구, 접지용구 등 안전장구를 필히 착용하여야 함은 물론 그 사용법을 숙지한 후 작업에 임하여야 한다.

다. 충전부 근접작업

충전부에 근접 작업을 할 경우에는 안전 및 위험표시를 하고 안전 이격거리를 절대 유지하여야 한다.

8.2 안전관리 조직편성 및 임무

건설공사의 안전시공을 위해서는 안전조직이 갖추어져야 하고 안전조직은 현장규모와 작업 내용에 따라 구성하며 동시에 전기사업법, 산업안전보건법의 해당규정에 명시된 업무도 수행되도록 한다.

8.2.1 조직편성

8.2.2 임무

가. 재해방지 책임자

공사시행에 있어 재해방지에 필요한 제반조치를 취하며 공사 투입인원의 재해에 대하여 일체의 책임을 지는 자를 말하며, 재해방지책임자는 시공관리책임자 또는 주기술자를 겸무할 수 없으며 특별한 사유를 제외하고는 시공자 대표로 한다.

나. 안전보건관리 책임자

현장의 전반적인 안전보건업무를 책임지고 추진한다.

다. 안전관리자(법정 자격자)

안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고  관리감독자 및 안전담당자에 대하여 지도, 조언한다.(안전관리자 배치는 산업안전보건법 제15조 1항에 따른다)

라. 관리감독자

공사와 관련된 당해업무와 소속직원을 직접 지휘, 감독하는 부서의 장이나 그 직위를 담당하는 자로서 당해 직무와 관련된 안전보건상의 업무를 수행한다.

마. 안전담당자

특별히 위험방지를 필요로 하는 작업에 종사하는 관리감독자 중에서 지정, 해당 작업의 안전업무를 수행한다.

바. 시공자는 근로기준법, 전기사업법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 등 안전에 관련된 법규를 준수하여야 한다.

8.3 안전관리 서류

8.3.1 제출서류

시공자는 당해공사의 안전관리를 위하여 아래의 서류를 제출하여 발주자의 승인을 득하여야 한다.

가. 안전관리 계획서

나. 재해방지책임자계 및 각서

다. 안전보건관리책임자 및 안전관리자 지정신고서

라. 안전관리자 경력증명서 및 자격증 사본

마. 작업별 책임자(시공계획서 제출 시)

바. 안전담당자(시공계획서 제출 시)

8.3.2 작성 및 제출

가. 관련규정의 충족

시공자가 제출한 안전관리계획서는 관련규정 및 법규의 요건을 충족시켜야 한다.

나. 제출시기 및 부수 : ‘3.4 공무행정 서류’에 따른다.

8.3.3 업무대행

안전보건관리책임자, 안전관리자가 전임 또는 출장으로 공석이 될 경우 사전 인계인을 선정하고 발주자에게 명단을 제출하여 승인을 받아야 한다.

8.4 안전관리 업무 수행

시공자는 산업재해예방을 위한 제반 안전관리에 적극적인 노력을 경주하고 안전 관계법규를 이행하기 위하여 다음과 같은 업무를 수행하여야 한다.

8.4.1 사전검토사항

가. 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

나. 안전관리자에 대한 임무수행 능력보유 및 권한부여 검토

다. 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토

라. 유해, 위험 방지계획(수립대상에 한함)내용 및 실천가능성 검토 (산업안전보건법 제48조 3항, 4항)

마. 안전점검 및 안전교육 계획안 수립여부와 내용의 적정성 검토 (산업안전보건법 제31조, 제32조)

바. 안전관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

사. 현장 안전관리 규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토

아. 표준안전관리비는 타 용도에 사용 불가

8.4.2 공사 중 안전업무

가. 안전관리 계획의 이행 및 여건 변동 시 계획변경 사항

나. 안전보건 협의회 구성 및 운영

다. 안전점검계획수립 및 실시(일일, 주간, 우기 및 해빙기 등 자체안전점검, 산업안전보건법에 의한 안전 점검, 안전진단 등)

라. 안전교육계획의 시행(사내 안전교육, 직무교육)

마. 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행(고소작업, 추락위험작업, 중량물 취급 작업, 전기시설 취급 작업, 화재위험작업, 건설기계 위험작업등)

바. 안전표지 부착 및 유지관리

사. 안전통로확보 및 유지관리

아. 사고조사 및 원인분석, 각종 통계자료 유지

자. 월간 표준 안전관리비 사용 실적 보관

차. 안전점검 등

8.5 안전 점검

8.5.1 안전점검의 종류

안전점검은 크게 자체점검 및 특별점검으로 구분된다.

가. 자체점검

자체점검은 일상점검, 주간점검, 계절별점검, 수시점검으로 구분한다.

1) 일상점검

시공자는 작업원의 작업개시 전 T.B.M(Tool Box Meeting)을 실시하고  위험예지훈련의 실시로 그 일과를 시작한다. 안전관리자는 매일 공사 전 안전조회 및 체조, 안전구호복창 등으로 안전의 생활화가 되도록 무의식중에 근로자가 인지할 수 있는 체제를 갖도록 하며 필요 시에는 각 공종 근로자별로 금일의 안전수칙에 대한 안전협의도 시행한다. 작업 중에도 근로자들이 안전수칙을 이행하고 있는지, 안전 장구의 착용 유무 등에 대하여 주의를 기울이며 이행하고 있지 아니할 경우에는 즉시 시정토록 한다.

2) 주간점검

시공자의 안전보건관리책임자와 발주자의 주관 하에 실시하며 아래와 같은 항목을 점검한다.

- 작업장내의 환경, 설비, 금구류의 점검

- 진행작업의 공종별 작업 협의 및 신규공종의 시공요령등 전달

- 안전점검표에 의거 점검

3) 계절별점검

발주자와 안전보건관리 총괄책임자의 주관 하에  산업안전보건법 제29조에 의한 안전관리협의체 요원이 참여하여 아래와 같은 항목을 점검한다.

- 안전관리사항 협의

- 정기 안전점검 실시 및 공사기계류 등에 대한 검사

4) 수시점검

수시점검은 외부 안전관리 인사를 초빙하여 전반적인 안전관리 분야에 대하여 점검 받음으로서 자체 점검 시 누락되었거나 시정될 사항에 대하여 계획을 수정하고 점검표도 검증받는다.

나. 특별점검

우기 등 재해가 우려되는 시기에 사전 점검하여 재해 발생율을 줄이는 방안을 강구하며 재해 우려시기를 아래표와 같이 설정하여 재해 우려시기 1개월 전 점검범위 및 점검표, 점검자를 선정, 15일 전 점검하고 7일전까지 지적 내용에 대한 조치를 완료한다.

구 분	재해 우려 시기	점검 시기
해 빙 기	2월 하순	2월초 점검
우 기	6월 하순	5 ~ 6월 점검
	※ 하절기를 말하며 집중 호우 시는 기상예보를 검토하여 수시 점검한다.
태 풍 기	8월 하순	6 ~ 7월 점검
동 절 기	12월 중순	11 ~ 12월 점검

8.5.2 안전점검의 방법

가. 육안점검

나. 기능점검

다. 기계, 기구에 의한 점검

8.5.3 점검사항

점검사항은 점검표에 의해 실시하며 점검표 작성은 설비별로 각 점검종류에 맞게 다음 사항을 고려하여 작성한다.

가. 양호, 미흡, 불량 여부를 확인할 수 있도록 세분화

나. 구체적인 점검내용

다. 점검대상의 기능적 특성을 고려

라. 점검대상에 대한 일반적인 사고빈도 및 위험도를 고려

마. 점검수준을 점검자의 능력에 맞춰 점검한계 설정

8.6 기록유지

8.6.1 안전관리 담당자는 안전에 관한 업무를 수행하기 위한 다음 자료를 기록 유지한다.

가. 안전업무 일지(일일보고)

나. 안전점검 실시(안전업무일지에 포함 가능)

다. 안전교육(안전업무일지에 포함가능)

라. 각종 사고보고(사고 발생시 즉시보고 및 기록유지)

마. 월간 안전 통계(무재해, 사고)

바. 안전관리비 사용실적(월별)

8.7 안전교육

8.7.1 안전교육 계획

시공자는 다음의 순서에 따라 안전교육계획을 수립하고 이에 따라 안전교육을 실시하여야 한다.

가. 교육목적

나. 교육대상, 내용 및 방법 결정

다. 교육실시

라. 교육평가

8.7.2 안전 교육의 내용

시공자의 안전관리책임자 및 안전관리자는 다음의 내용 및 자료가 포함된 안전교육을 실시하여야 한다.

가. 산업재해에 관한 통계 및 정보

나. 작업자의 자질에 관한 사항

다. 안전관리조직에 관한 사항

라. 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

마. 작업공정에 관한 사항

바. 산업안전보건법 등 관계법규에 관한 사항

사. 작업별 안전대책에 관한 사항

아. 현장 안전보건 개선방법

자. 안전장치 및 방호설비의 사용에 관한 사항

8.8 안전관리 결과 보고서

8.8.1 안전관리 결과 보고서 제출

가. 제출

시공자는 매분기별 안전관리결과보고서를 감리원에게 제출하여 검토를 받아야 하며 검토결과 미비한 사항이 있을 시에는 시정조치를 하여야 한다.

나. 시기 및 부수 : 매분기말 1부

8.8.2 안전관리 결과보고서 내용

안전관리 결과보고서에는 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다.

가. 안전관리 조직표

나. 안전보건 관리체제

다. 재해발생 현황

라. 산재요양 신청서

마. 안전교육 실적표

8.9 사고처리

8.9.1 사고보고

가. 시공자는 현장에서 사고가 발생하였을 경우 즉시 필요한 응급 조치를 취하고 발주자에게 보고하여야 한다.

나. 시공자는 사고 처리 후 발주자에 사고보고서를 제출하여야 한다.

8.9.2 사고처리 연락체계 수립 및 게시

가. 시공자는 사고 발생시의 대책 및 연락부서(감리원, 업무담당자 및 병원, 경찰서, 소방서 등)와의 연락 방법 등을 강구하여 감독부서에 제출하여야 하며 작업원 전원에게 철저히 주지시킴은 물론 작업장에서 볼 수 있도록 작업장 개소별로 게시하여야 한다.

나. 시공자는 공사현장에 응급조치에 필요한 약품을 준비하며 그 사용방법을 명시하고 이를 전원에 숙지시켜야 한다.

8.10 시공자 안전관리비

8.10.1 증빙서류 비치

시공자는 노동부고시 ‘건설공사표준안전관리비 계상 및 사용기준’에 의거 계상된 안전관리비를 동 고시 별표의 내용에 준용하여 당해공사 현장근로자의 산업재해 및 건강장해 방지에 사용하고 발주자가 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 증빙서류 등을 작성하고 비치하여야 한다.

8.10.2 사용내역 제출

시공자는 기성 또는 준공검사원 제출 시 발주자에게 안전관리비 항목별 세부 사용내역 및 집행 영수증 사본을 제출하여야 한다.

※ 안전관리 기술지도

시공자는 계약 특수조건의 기술지도 계약을 체결하였을 경우 공사착공 후 14일 이내에 계약서를 발주자에게 제출하여야 한다. 또한 준공 시는 기술지도 완료증명서를 발주자에게 제출하여야 하며 이를 이행하지 않을 경우 안전관리비의 20% 범위 내에서 미지급 및 환수할 수 있다.(산업안전보건법 30조 1항)

9. 환경관리

9.1 일반사항

9.1.1 적용범위

공사 과정에서 발생되는 자연환경 및 생활환경 보전과 환경오염방지 등 일반적인 사항에 적용한다.

9.1.2 환경관리

환경관리는 사업 시행으로 인한 환경위해를 예방하고 자연환경, 생활환경, 사회 및 경제환경을 적정하게 관리보전 함으로서 현재와 장래의 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하며 환경관리계획을 충실히 이행하기 위함이다. 환경영향평가 또는 사전환경성검토를 시행한 경우는 이에 대한 협의내용을 이행한다.

9.1.3 관련법규

가. 환경정책기본법

나. 환경․교통․재해등에관한영향평가법

다. 수질환경보전법

라. 대기환경보전법

마. 소음․진동규제법

바. 폐기물관리법

사. 자원의절약과재활용촉진에관한법률

아. 오수․분뇨및축산폐수의처리에관한법률

자. 지하수법

차. 하수도법

카. 자연환경보전법

타. 토양환경보전법

파. 해양오염방지법

하. 습지보전법

9.1.4 환경관리 조직편성 및 임무

가. 조직편성

시공자는 환경관리계획 협의 내용을 근거로 하여 현장에 적합한 환경관리조직을 편성한다. 환경영향평가 또는 사전환경성검토를 시행한 경우는 이에 대한 협의내용으로 한다.

나. 임무

1) 환경관리책임자는 환경관리계획수립 및 대책 등을 지시하고 예산의 조치 및 환경관리자, 환경담당자를 임명하고 현장 환경관리 업무를 책임지고 추진한다.

2) 시공자는 환경관리계획에 의하여 환경관리책임자를 지정하여 발주기관의 장에게 보고한다. 환경영향평가 또는 사전환경성 검토를 시행한 경우는 그에 따른다.

9.2 환경관리 업무

9.2.1 환경관리 계획서 작성· 제출

시공자는 당해공사에 대해 당사와 협의 내용을 근거로 하여 지형, 지질, 대기, 수질, 소음, 진동 등의 관리계획서를 수립하여 공사 착공 서류 제출 시 이를 제출하여 승인을 받아야 한다. 환경영향평가 또는 사전환경성검토를 시행한 경우는 그에 따른다.

9.2.2 작성 사전검토 사항

가. 시공자의 환경관리 조직편성, 임무의 법적 구비조건, 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

나. 환경관리계획 또는 환경영향 평가 협의 내용의 관리계획 실효성 검토

다. 환경영향 저감대책 및 공사 중, 공사 후 환경관리 계획서 적정성 검토

라. 환경관리자에 대한 업무수행능력 및 권한 여부 검토

마. 환경전문기술자 자문사항에 대한 검토

바. 환경관리 예산편성 및 집행계획 적정성 검토

9.2.3 기록유지

환경관리관리 책임자로 하여금 관리대장을 기록, 비치한다. 환경영향평가를 시행한 경우는 환경영향평가법 제23조 협의내용 이행의무 및 시행규칙 제11조, 제13조에 따른다.

9.2.4 환경관리 결과보고

시공사의 환경관리책임자는 사후 환경영향조사를 실시하여 결과 보고서를 작성하고 감리원에게 제출하여 검토를 받아야 하며 검토결과 미흡한 사항이 있을 경우 시정조치를 하여야 한다.

9.2.5 환경관리계획서에 포함되어야 할 사항

가. 공사 개요

나. 환경요인 분석

다. 환경관리 계획

라. 환경관리 조직 및 책임

마. 환경교육 계획

바. 인허가 등 대관업무 계획

사. 해당 오염물질별 관리 계획

1) 대기오염 방지 계획

2) 수질오염 방지 계획

3) 폐기물 처리 계획

4) 기타 오염물질 처리 계획

5) 비상사태 대응 계획

6) 관련 절차 목록

9.3 환경관리 업무수행

9.3.1 대기질

가. 도급자는 국민의 건강을 보호하고 공사장 주변의 쾌적한 대기환경을 조성하기 위해 환경정책기본법의 관련규정에 의한 환경기준을 유지하도록 하여야 한다.

나. 도급자는 건설사업 수행시 일정한 배출구 없이 대기중에 비산먼지를 발생시키는 사업을 수행하는 경우에는 그 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 도급자는 건설공사 수행시 발생되는 폐기물을 소각하고자 할 때에는 폐기물관리법에서 정하는 적합한 소각시설에서 소각하여야 하며, 노천소각을 하여서는 안 된다.

9.3.2 수질

가. 도급자는 공사장주변의 하천, 호소, 해역 등 공공수역 및 공공하수도에 수질오염물질배출로 인한 오염을 방지하기 위하여 수질환경보전법에서 정하는 배출허용기준을 준수하여 환경정책기본법에 의한 수질환경기준을 유지하도록 하여야 한다. 또한 환경영향평가 대상사업으로 환경부와 별도로 협의된 배출허용기준이 있는 경우 이를 준수하여야 한다

나. 도급자는 공사현장에서 수질오염물질이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 불가피하게 수질오염물질이 발생하는 경우 공사현장의 지역적 특성과 공종별 특성에 맞는 적절한 수질오염방지시설을 설치․운영하여야 한다.

다. 도급자는 공사현장에 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 수질환경보전법에 따라 설치하고 운영하여야 한다.

라. 도급자는 건설공사 수행시 토사 등 환경오염을 유발하는 물질이 유출되어 상수원 또는 하천･호소･해역 등을 오염시키지 않고, 하수도 운영에 지장이 없도록 토사유출 저감시설 등 수질오염 방지시설을 설치․운영하여야 한다.

마. 도급자는 건설활동 수행시 공사장 주변 하수도 시설의 균열․이탈․매몰 또는 파손 등으로 인한 하수의 유출로 토양, 지하수 또는 하천, 호소, 해역 등 공공수역의 오염을 방지하기 위하여 하수도 보호시설을 설치․운영하여야 한다.

9.3.3 소음･진동

가. 도급자는 건설공사를 시행함에 있어 소음･진동규제법에서 정하는 생활소음･진동규제기준을 준수하여 현장에 투입되는 공사장비에 의한 소음･진동의 영향을 최소화하여야 한다.

나. 도급자가 건설현장내에 소음･진동 배출시설을 설치하고자 할 때에는 소음･진동규제법에 따라 설치하고 운영하여야 한다.

다. 도급자는 공사구간이 건설소음․진동규제지역으로 지정된 지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 따라 공사를 시행하여야 한다.

라. 도급자는 공사차량운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위해서 차량의 운행속도를 제한하거나 소음방지시설을 설치하여 주변생활환경지역의 영향을 최소화하여야 한다.

마. 도급자는 건설활동을 위하여 발파작업이 필요할 경우에는 굴착에 앞서 시험발파를 실시하여 인근에 피해를 방지하기 위한 발파공법, 천공장, 천공배치, 화약의 종류, 지발당허용장약량 등의 발파작업계획과 적정한 소음･진동저감대책을 수립･시행하여야 한다.

9.3.4 폐기물

가. 도급자는 공사현장에서 배출되는 폐기물을 폐기물관리법의 관계규정에 적합하게 분리수거, 수집․운반․보관 및 처리하여야 한다.

나. 도급자는 공사현장에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위하여 소각시설, 파쇄시설 등을 설치할 경우 폐기물관리법에 의해 적정한 시설을 설치･운영하여야 한다.

다. 도급자는 공사현장에서 배출되는 폐기물 중 재활용이 가능한 폐기물이 폐기물관리법, 자원의절약과재활용촉진에관한법률 및 도로공사표준시방서 등에 의해 처리되도록 발주자와 협의하고 처리하여야 한다.

라. 도급자는 공사현장에서 발생하는 건설폐재를 폐기물관리법, 자원절약과재활용촉진에관한법률 및 건설폐재배출사업자의재활용지침 등 관계규정에 따라 적정하게 처리하여야 한다.

9.3.5 토양보전

가. 도급자는 건설활동 수행시 공사장에서 발생하는 토양오염유발시설에 대해 토양환경보전법에 따라 조치를 하여야 한다.

나. 도급자는 토공작업시 필요시 표토 등 비옥도가 높은 토양을 일정장소에 수집, 보관, 관리하여 조경공사시 식재토양으로 재활용하여야 한다.

다. 도급자는 비탈면에 대한 녹화 및 피복처리는 가능한 한 조기에 실시하고, 우기에 비탈면 토사가 유출되지 않도록 보호조치를 취하여야 하며, 토사의 채취, 운반은 가능한 우기를 피하여야 한다.

9.3.6 생태계 보전

가. 도급자는 건설사업을 수행함에 있어서 자연생태계를 고려한 환경친화적 건설사업이 될 수 있도록 노력하여야 한다.

나. 도급자는 건설사업 시행에 따른 식생의 훼손을 최소화하기 위하여 공사용 가도로, 가시설물 설치시에 주변환경여건을 고려하여 시공하여야 하며 이식이 가능한 수목은 이식지역을 선정하여 최대한 활용하도록 한다.

다. 건설지역에 따라 동･식물의 서식지, 이동로의 단절 등이 최소화되도록 설계시에 반영하고 공사를 시행하여야 한다.

라. 설계도에 보전하도록 지정된 교목, 관목, 덩굴식물, 잔디나 다른 경관 구조물은 감독원의 승인을 받은 임시 울타리 등으로 둘러 구분하여야 한다. 도급자는 승인받은 작업 지역 경계 바깥의 시공중에 손상되거나 파괴된 경관구조물을 복구해야 한다.

마. 시공활동은 지표수 및 지하수의 오염을 피하기 위해 감독, 관리, 통제 하에 이루어져야 한다. 독성 또는 유해 화학물질은 토양 또는 식물에 살포해서는 안 된다.

9.3.7 기타 환경관리

가. 도급자는 비탈면 발생지역의 안전을 도모하고 산사태를 방지하여야 하며 연약지반 등에서 발생하는 지반침하 및 배출수에 의한 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 도급자는 공사시 자연경관의 훼손을 저감하기 위하여 과도한 지형의 변형, 수목벌채를 금하여 시공하여야 한다.

다. 도급자는 공사장 주변의 주거지역 등 공사 중 각종 환경오염의 피해대상지역 상태를 사전에 파악하고, 생활환경보전에 만전을 기하여야 한다.

라. 도급자는 공사장 주변에 공사시 발생할 수 있는 문화재의 훼손을 사전에 방지하기 위해 관련법령에 의해 조치를 취하여야 한다.

마. 도급자는 환경정책기본법에 의한 사전환경성검토, 환경․교통․재해등에관한영향평가법에 의한 협의 결과를 이행하여야 한다.

9.4 환경관리계획 협의내용 이행

9.4.1 환경관리계획 협의내용의 이행

가. 도급자는 건설공사시 협의내용 관리책임자를 지정하여 환경관리계획의 협의내용 이행계획을 수립하여 이를 성실히 수행하여야 한다.

나. 협의내용관리 책임자는 협의내용을 성실히 이행하기 위하여 협의내용을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용의 이행여부 및 환경영향조사 결과를 통하여 현장을 수시로 점검하고 이행되지 아니한 사항이 있을 경우에는 이를 감독자와 협의하여 이행토록 조치하여야 한다.

다. 도급자는 환경피해 발생시 환경피해보고서를 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

라. 도급자는 발주기관 혹은 환경관련기관으로부터 환경관련 점검시 지적사항에 대하여는 조속히 시정조치하고, 시정전･후 확인가능한 자료사진을 발주기관에 제출하여야 한다.

9.4.2 환경관리행정

도급자는 협의내용 관리책임자를 두고 다음의 업무를 수행하여야 한다.

가. 공사장내의 환경관리에 관한 업무계획 수립

나. 환경영향저감시설의 설치 및 운영여부 감독

다. 환경관련 점검, 교육, 행사계획의 수립 및 실시

라. 환경관련법에 명시된 제반 신고사항 및 변경신고의 준수

마. 건설폐재 재활용 계획 수립 및 실적관리

바. 환경관련법에 의거 비치해야하는 문서의 작성 및 관리

10. 보안관리

10.1 보호구역의 범위

10.1.1 제한지역 : 비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역

10.1.2 제한구역 : 비밀 또는 중요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위하여 그 출입에 안내가 요구되는 구역

10.1.3 통제구역 : 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 지역

10.2 보안대책

10.2.1 보호구역 출입 통제

가. 제한구역에 출입하고자 할때에는 사전에 출입신청을 하여야 하며, 시설의 관리책임자는 출입자의 신분과 용무를 확인한 후 출입을 승인한다.

나. 부득이 제한구역․통제구역 (급전소, 급전분소, 변전소 감시실, 통신실 등)에 출입하고자 할 때에는 사전에 당해시설 보안책임자의 허가를 받아야 하며, 감독자의 입회․감독을 받도록 한다.

10.2.2 도급공사 수행시 보안대책

가. 공사에 종사하는 모든 작업자에 대하여 다음사항이 포함된 보안교육을 시행한다.

- 공사수행중 지득한 사실에 대해 비밀을

준수하고, 위반시 민․형사상 책임 이행

- 공사수행중 지득한 정보를 우리회사 허가없

이 타인에게 제공 금지

- 공사수행 자료가 저장된 PC에서 상용P2P,

메신저, 웹하드 등 인터넷 자료 공유프로그

램 사용 금지

- 중요자료에 대한 인계인수를 철저히 하고

인계인수대장에 기록

- 중요자료는 도급공사 완료시 전량 반납

- 보안 위반업체에 대해 부정당업체 등록, 출

입제한 등 불이익을 받을수 있음

10.2.3 공사현장 외 시설물의 촬영을 제한하며, 필요시 사전 승인 후 촬영한다.

10.2.4 변전소 근무자 또는 경비근무자가 보안상 필요에 의해 공사 현장 통제시, 이에 응해야 한다.

11. 특수작업 및 휴전작업

당해공사의 특수작업(무정전, 활선작업) 및 휴전작업은 발주자의 안전작업 수칙, 무정전배전공사 시공업체 관리기준 및 휴전업무처리지침 등 관련 기준 및 지침에 따라 안전하게 수행하여야 한다.

12. 시운전

12.1 시공자는 발주자의 지시에 따라 업무수행 및 시운전 계획에 최대한 협조하여야 한다.

12.2 시운전 시 발생하는 결함 사항이 시공자의 귀책 사유에 의한 것이면 시공자는 이에 따른 보완 및 재시공의 책임을 진다.

12.3 시운전 요원으로 차출된 시공자측 직원은 시운전이 종료될 때까지 비상연락체계를 갖추어야 한다.

13. 준공

13.1 준공예비점검

13.1.1 시공자는 발주자의 지시에 따라 준공 1개월 전에 시행하는 예비준공검사에 대비한다.

13.1.2 준공 예비점검결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정 조치를 완료하고 발주자에게 통보하여야한다.

13.2 준공검사

13.2.1 준공검사원

준공검사원의 제출은 ‘3.4 공무행정서류 3.4.4 준공검사원’에 따른다.

13.2.2 준공검사 및 조치

가. 시공자는 준공검사일에 시공관리책임자가 입회하여 발주자가 요구하는 사항을 이행하여야 한다.

나. 준공검사 결과 미시공 부분이 발견 되거나 설계내용과 현격한 차이가 있어 재시공이 불가피한 경우 또는 시정사항의 과다로 인수하기에 부적당하다고 판정되는 경우에는 불합격판정을 내리며 재시공후 다시 준공검사를 받아야 한다.

다. 사용전검사일에도 시공관리책임자이 입회하여야 하며 검사결과 시정사항은 시공자 부담으로 시정하여야 한다.

13.3 준공서류

13.3.1 종류 및 내용

준공서류의 제반사항은 ‘3.4 공무행정서류 3.4.4 준공검사원’에 따른다.

13.4 인도 및 현장철수

13.4.1 준공검사를 합격한 경우에는 시공자는 공사목적물을 지체 없이 발주자에게 인도하여야 한다.

13.4.2 시공자는 작업장 내외에서 발생된 물품대차 및 금전관계의 처리를 완료하여 발주자의 확인을 받은 후에만 현장에서 철수할 수 있다.

13.4.3 시공자가 발생시킨 쓰레기, 공사임시가설물 및 기타 이물질은 깨끗이 제거하고 청소한다. 끝.