상사치도 해상 수중암 제거공사

설        계        서

2019. 1.

	목포지방해양수산청

2019년도 1월 설계		설계자	이 현 관 (인)	심사자	권 혁 주 (인)	대표이사	성 낙 일 (인)
2019년도
	상사치도 해상 수중암 제거공사
	설 계 서
목포지방해양수산청

목    차

1. 설 계 설 명 서

2. 일 반 시 방 서

3. 특 별 시 방 서

4. 예 정 공 정 표

5. 동원인원계획표

6. 설 계 예 산 서

7. 공사원가계산서

8. 일 위 대 가 표

9. 단 가 산 출 서

10. 수 량 산 출 서

11. 설  계  도  면

1. 설 계 설 명 서

1. 설 계 설 명 서

1.1 공사명

◦ 상사치도 해상 수중암 제거공사

1.2 공사위치

◦ 전남 신안군 안좌면 상사치도 서방

1.3 공사목적

◦ 본 공사는 상사치도 서측에 암초가 위치하여 주변 통항선박의 안전항해에 위해요소가 되므로 수중암을 수중파쇄 후 준설하여 선박안전사고를 방지하는데 그 목적이 있음

1.4 공사개요

◦ 수중암 파쇄 : 60m3

◦ 수중암 굴착 : 25m3

1.5 공사시행방법

◦ 본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

1.6 공사기간

◦ 착수일로부터 90일간(절대공기)으로 한다.

1.7 설계변경 조건

◦ 본 공사 수행 중 다음과 같은 사유가 발생하였을 때에는 설계변경 할 수 있다.

1) 과업범위에 증감이 있을 때

2) 정부품셈 기준이나 노임단가의 변경이 심할 때

3) 용역결과 설계금액이 추정공사비와 상이할 때

4) 기타 발주청의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

2. 일 반 시 방 서

2. 일 반 시 방 서

2.1 적용 범위

이 시방서는 목포지방해양수산청에서 발주한「상사치도 해상 수중암 제거공사」를 시행함에 있어 공사 계약서, 설계도서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약 내용의 이행을 확보하기 위한 것이며, 내용은 일반시방서와 특별시방서로 구분하여 구성된다.

2.2  적용 기준

1) 시방규정 및 관련 법규

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 제반 규정과 관련법의 규정을 준용하되, 규정 간에 상이한 사항이 있을 경우에는 항만  및 어항공사 표준시방서(KCS 64 00 00)를 우선하여 적용한다.

1) 항만 및 어항공사 표준시방서	7) 시설공사 검사업무 규정
2) 토목공사 표준일반시방서	8) 선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률
3) 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률	9) 건설공사 관계법령 및 규정
4) 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	10) 건설산업 기본법
5) 한국산업규격 (KS)	11) 건설기술 진흥법
6) 건설공사 품질관리 검사기준	12) 기타 본 공사에 관련되는 각종 기준 및 규격

2) 본 공사에 관련되어 발주처가 제공하는 제규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 간주한다.

3) 발주처에 제출하는 모든 서류는 반드시 공사 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

2.3  공사 시행

1) 착공시 서류 제출 사항

도급자는 공사 착공시 다음 서류가 포함된 착공신고서를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(1) 현장대리인계

(2) 현장기술자 지정신고서 (안전관리자, 환경관리자, 품질관리자)

(3) 공사 예정공정표

(4) 안전․환경 및 품질관리 계획서

(5) 공정별 인력 및 장비투입 계획서

(6) 착공 전 현장 사진

(7) 주요자재 투입 계획서

(8) 환경오염 방지계획서

(9) 기타 발주처가 지정한 사항

2) 도급자의 의무

(1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

(2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 발주처가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

(3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제반 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주처의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

(4) 공사를 위한 보상을 하거나 임대 업무를 추진함에 있어, 도급자는 토지 소유자 등 이해관계인과 협의한 다음, 관련 사항을 조속히 조치하고, 발주처의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

(5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 공정표 및 시공계획서

(1) 도급자는 당해 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 익월 5일까지 공사 감독관에게 제출하여야 한다.

① 월별 공정율 및 수행공사 금액

② 인력, 장비 및 자재 현황

③ 공정 상황을 나타내는 현장 사진

(2) 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 예정공정표를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(3) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 작성하여 공사감독관에게 제출하여야 하며, 월별 현황과는 별도로 주간 공정 현황을 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(4) 도급자는 공사시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입계획, 주요 장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대한 상세한 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 착수하여야 한다.

(5) 기수립된 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 공사감독관에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

(6) 공사진도가 도급자의 귀책에 의하여 예정 공정보다 지연될 경우, 도급자는 공사감독관의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입 등 공정관리에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생하는 경비는 도급자 부담으로 한다.

4) 현장대리인 및 현장종사원

(1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법등 관계법령에 의한 건설기술자라야 하며, 공사감독관의 승인없이 임의로 현장을 떠나서는 아니되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

(2) 공사감독관은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

(3) 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독관의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

(4) 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

5) 제보고 및 서류 양식

(1) 계약서에 지정한 것과 공사감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

(2) 공사감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따라 정하지 않은 경우에는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

6) 관계기관 등과의 협의

(1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 공사감독관의 협조를 받아 도급자가 수행하여야 한다.

(2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 공사감독관을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

7) 공사부지의 사용

(1) 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주처 소관의 부지는 발주처의 승인을 받아 무상으로 일시 사용할 수 있다.

(2) 공사를 시행하기 위해 발주처로부터 차용한 부지외에 도급자의 필요에 의하여 설계 범위이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 발주처와의 협의에 따라 토지의 차용, 보상을 시행하되, 제반 사항은 도급자 책임으로 시행되어야 한다.

(3) 도급자는 공사 시행에 직접, 간접적으로 영향이 있어 철거가 불가피한 지장물에 대하여는 발주처와 협의, 당해 지장물의 소유주 (기관포함)의 사전 승인을 받아야 한다.

8) 문화재 보호

(1) 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 그 즉시 공사를 중지하고 도난, 손괴 등을 방지할 수 있도록 현장보존조치를 하여야 하며, 이 사실을 공사감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

9) 제법규의 준수

(1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

(2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 투입된 모든 근로자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

10) 설계도서 등의 비치

(1) 공사 현장에는 해당공사에 관련된 계약서, 설계도서, 제반 표준시방서, 관계 법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 공사시행에 필요한 기구류 등을 비치하여야 한다.

2.4  시공기준

1) 설계도서 및 측량 기준

(1) 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 내용을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

(2) 도급자는 공사의 시공에 앞서 설계내역, 설계시방서, 구조계산서, 설계도 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

(3) 도급자는 상기와 같은 검토과정에서 수록된 내용의 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사감독관에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

(4) 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 공사감독관이 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

(5) 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후의 형상과 치수를 나타낸다.

(6) 구조물의 표고는 약최저저조면을 기본 수준면으로 하는 해상 기본 수준면(APP. L.L.W DL(±)0.00)을 기준으로 한다.

(7) 공사수량의 단위 및 수량계산은 정부시설공사 건설표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

(8) 공사 시공 중 또는 준공 정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도요령에 따라야 한다.

2) 시공측량

(1) 도급자는 설계도서 및 공사감독관이 서면으로 제시한 기준점을 기준으로 하여 정확한 시공 측량을 하여야 한다.

(2) 공사 시행에 필요한 제반 측량은 공사감독관의 검증을 받아야 하며 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임져야 한다.

(3) 공사 현장에서 가장 가까운 위치에 공사감독관의 승인을 얻어 수준점 양수표를 설치하여 조위를 상시 관측할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격시험에 합격한 자로서 당해 시공측량에 적합한 능력을 갖추고 있는 자라야 한다.

(5) 측량에 사용되는 각종 기기는 반드시 국가공인교정 검정기관의 검정을 받은 기기에 한해 사용하여야 한다.

(6) 도급자는 시공측량에 소요되는 모든 비용과 기구 및 인원동원에 대한 책임을 져야 한다.

3) 사전조사

(1) 공사 장소에 인접한 시설물 등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 공사감독관과 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

(2) 기타 공사에 관련된 환경에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

4) 건설장비

(1) 도급자는 현장에 반입, 공사에 투입될 장비의 제원 및 수량을 서면으로 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 투입된 선박의 고장, 수리등에 대비하여 공사구역내에 필요한 장비, 설비 및 부대기구의 예비품을 구비해 고장 즉시 교체, 수선이 가능토록 해야 한다.

5) 공사용 자재

(1) 본 공사를 위한 주요 자재의 세부사항은 특별시방서에 따른다.

(2) 공사용 모든 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라야 하며 주요 자재는 현장 반입전에 재료시험 성과표 등의 품질확인 서류를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(3) 주요자재 보관중 도급자 귀책에 의해 자재가 변질, 변형, 오손되었을 경우에는 도급자 부담으로 제반 품질기준에 맞는 자재로 교체하여야 한다.

(4) 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 또는 산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

(5) 공사현장 반입시 합격판정을 받은 자재라 할지라도 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 파손되었을 때는 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

2.5  가시설물

1) 공사용 가설물

(1) 공사용 가설물은 공사감독관과 협의하여 선택할 수 있다.

(2) 공사 시행을 위한 현장사무소, 공사 품질관리를 위한 시험실 및 각종 자재의 변질, 파손, 도난을 방지하기 위한 자재창고를 건립하고 이를 유지 관리하여야 하며, 공사완료 후 도급자 부담으로 이를 철거하여야 한다.

(3) 현장사무소 및 시험실의 실내 배치 및 부착물 등에 대해서는 공사감독관과 협의하여 설치하여야 하며, 각종 비품 및 시험기기의 준비와 채광, 환기, 보안대책, 전화 등을 가설하여 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

2) 안내 표지판의 설치

(1) 도급자는 공사의 안내 표지판을 설치하여야 하며, 그 표지판의 규격, 재료, 표기 내용 및 설치 장소 등은 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

2.6  시공 관리

1) 공사기간

도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

특히 전체 공사의 완료전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 공사감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한, “2)”항의 공사 중지사항 중 (1), (3), (4), (5)항에 의해 공사기간 연장이 불가피할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 14일이내에 공사감독관에게 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

2) 공사의 일시 중지

공사감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

(1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

(2) 도급자가 설계도서대로 시공하지 않을 때

(3) 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

(4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

(5) 발주처의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

3) 작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

4) 입회 및 자료 제출

(1) 수중부 천공 등 시공 후의 검사가 곤란한 구간에 대하여는 공사감독관의 입회하에 천공위치 등을 확인하고 그 기록, 기타 필요한 자료 (검사보고서, 기록사진, 현장관리시험대장등)를 제출하여야 한다.

5) 공사기록

(1) 도급자는 공사감독관이 승인한 작업 상황보고 양식에 따라 매일의 작업내용, 취업인원, 취업장비 및 가동시간과 공사용 자재의 불출 상황을 기입, 매 익일 공사감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 매 익일의 작업계획을 공사감독관에게 제출하고 매월 말에는 다음달의 작업 계획과 그 달의 작업성과를 제출하여야 한다.

(3) 도급자는 공사 진행에 따라 공사기록 사진을 촬영하여 필름에 수록하고, 주요 공정에 대한 검사, 매몰부분 등에 대한 검사, 기성 및 준공 검사 장면을 사진 및 비디오로 촬영 수록하며, 완공 후 제반 성과를 작성 편집하여 제출하여야 하며 기록 사진의 크기는 공정을 확인하기 위해 필요할 경우에는 변경 조정하여 제작한다.

(4) 시공 후 매설되거나 담수되어 확인할 수 없는 부분은 필히 사진촬영을 하여 수록하여야 하며, 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격 등을 판별할 수 있게 측량용 Pole이나 Staff와 함께 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

6) 현장관리

(1) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 해상장비에서 발생되는 쓰레기 등 폐기물은 적법하게 처리하여 해양오염방지에 노력하여야 하며 부득이하게 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독관에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 공종별로 매작업 단계마다 공사감독관의 검사를 필한 후 다음 단계의 작업을 착수하여야 한다.

(3) 공사중 항상 관할 관계기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

(4) 화약, 휘발유, 전기등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

(5) 위험 때문에 일반인의 출입을 금지시킬 필요가 있는 공사 현장에는 공사감독관의 승인을 받아 그 구역에 적당한 방책을 설치하는 동시에 출입금지의 표지를 설치하여야 한다.

(6) 도급자는 해상 작업에 따른 장비의 제반 규칙을 준수하여 운반선, 바지선, 예인선등의 항해에 위험을 줄 수 있는 기타 해상 장비 또는 장애물에는 경고등을 설치하여야 한다. 도급자는 이와 관련하여 경고등 설치를 태만히 하였거나 설치를 하지 않았기 때문에 야기되는 일체의 피해에 대한 책임을 진다. 공사로 인한 기존 항로의 장애는 최소한으로 줄인다.

(7) 도급자는 공사 시행중 선박들이 항해를 자유로이 할 수 있도록 하여야 하며, 공사감독관을 위한 해상 교통수단을 제공하며 이와같은 교통수단은 공사기간중 항시 이용될 수 있도록 한다.

(8) 도급자는 공사구역의 표시 및 검사의 편의에 필요한 측표, 부표 및 기타표지를 설치 및 유지하여야 한다.

7) 분진 및 소음장치

(1) 도급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 분진 및 소음으로 공중에 피해가 없도록 하여야 한다.

8) 특허권의 사용

(1) 공사시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법 및 재료 등을 사용할 때에는 도급자가 그의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

9) 사고의 처리

(1) 공사중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

10) 가설건물

(1) 공사에 필요한 현장사무소, 재료창고, 기계기구 거치장소 등에 대하여는 공사감독관과 협의하여야 한다.

(2) 현장 대리인은 공사감독관 입회하에 공사구역내 가설구조물을 정기적으로 점검하여 항상 안전을 확인해야 한다.

11) 시공중 검사

(1) 공사의 단계별 완료시에는 검사요청서를 제출하여 공사감독관의 승인을 득한후 다음 단계의 작업을 진행하여야 한다.

12) 준공검사

(1) 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요한 제반 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사관의 지시에 따른다.

(2) 준공검사관의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

13) 비용부담에 관한 사항

공사 시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

(1) 공사시방서, 설계 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항

(2) 공사 착공 및 준공시와 공사 진행중 필요한 수심, 수중탐사 및 각종 측량

(3) 기성검사 및 예비준공검사, 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

(4) 공사 시행상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험

(5) 교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대 시설

14) 공사 준공후의 정리

(1) 공사가 완료되었을 때에는 공사감독의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고 현장을 청소, 정리하여 공사감독관의 검사를 받아야 한다.

2.7  품질관리 및 검사

1) 품질관리 일반

(1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술진흥법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당기준, 시험규정 등에 따라서 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

(2) 도급자는 착공 후 공종별 품질관리계획을 수립하여 시공단계별로 공사감독관의 확인을 받아야 한다.

(3) 규격 및 시험 방법은 계약서의 시방내용과 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

2) 공사용 재료의 품질

(1) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국산업규격에도 부합되어야 한다.

(2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 공사감독관이 변질 또는 불량품으로 판정한 때는 이를 사용할 수 없다.

(3) 공사감독관이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 시공확인 및 검사

(1) 공사감독관이 행하는 재료검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 도급자 부담으로 제공하여야 한다.

(2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

(3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 공사감독관의 입회하에 검사를 받고, 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

4) 기성 및 준공검사

(1) 공사의 기성부분 검사 및 준공 검사는 현장대리인이 받아야 한다.

(2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

(3) 공사준공 기간

① 전체 공사는 설계설명서에 정하여진 바에 따라 입찰서에 기입할 착수일로부터 계산한 기간내에 완전 준공되며, 공사기간은 휴일이 포함된 날짜를 기준하여 정한다.

② 천재지변, 국가전쟁, 화재, 전염병, 폭동, 공항 및 항구폐쇄와 같은 예기치 못한 불가항력의 원인에 의한 경우는 도급자의 공사 불이행으로 간주치 아니하며, 도급자는 원인 발생일로부터 10일이내에 그 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

2.8 안전 및 환경관리

1) 안전관리

(1) 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

2) 안전조치

(1) 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립, 공사감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 안전 조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

(3) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

3) 안전표지 및 안전 보호구

(1) 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

(2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

4) 안전교육

(1) 산업안전보건법에 의거 공사 시공 중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

5) 안전시공

(1) 도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

6) 사고보고 및 응급조치

(1) 공사시공중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 공사감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 사상사고

② 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

③ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

(2) 전항의 경우에 인사사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 공사감독관에게 긴급보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

7) 안전관리비의 사용

(1) 도급자는 산업안전보건법등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 공사감독관의 제출 요구시에는 이에 따라야 한다.

(2) 당해 공사 금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안 된다.

(3) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

8) 환경보호

(1) 도급자는 공사중 또는 공사준공후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 또는 훼손이 발생치 않도록 공사장과 인근의 환경 보호에 만전을 기해야 한다.

2.9 준 공 검 사

1) 준공 도서

(1) 전공정에 따른 시공 사진첩 2부

(2) 준공도서에는 아래 항목들이 첨부되어야 한다.

① 준공 현장 전체 외관 사진

② 공사감독관의 지시사항에 따른 이행사항

③ 공사 시공중 애로사항 및 시정을 요하는 사항

④ 공사도중 재해대책 및 안전관리 사항

⑤ 준공도서 사본

2) 준공검사 및 인수

(1) 도급자는 계약상 준공일전에 공사를 완료하고, 공사감독관에게 준공검사를 요청하여야 한다.

(2) 검사관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 실시할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다.  시험 및 검사에 합격하여 검사관이 공사완료되었다고 인정한 경우 준공검사 요청서를 접수 처리한다.

(3) 도급자는 준공검사시 현장대리인 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회케하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 시공불량 개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단시일 내에 재시공 하여야 한다.

(4) 도급자는 준공검사 완료통지를 받은 후 지체없이 다음과 같은 서류를 작성 제출하여, 현장인수를 요청하여야 한다.

① 공사 설계도서

② 준공 검사 조서

③ 시설물의 개요 설명서

④ 사진대장 (별도 요구양식)

3. 특 별 시 방 서

3. 특 별 시 방 서

3.1 총칙

1) 일반사항

본 시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 특별한 사항만을 규정하며 제 시방서보다 우선한다.

2) 관련사항

본 공사와 관련된 제규정 및 본 공사도면은 본 시방서의 일부로 간주한다.

3.2 수중암 파쇄

1) 일반사항

(1) 본 시방은 상사치도 수중암반을 절취하는 공사에 적용한다.

(2) 암파쇄 작업중 또는 완료 후에 공사비 산정을 위하여 지층을 분류할 필요가 있는 경우 수급인은 관련 자료를 첨부하여 감독원에게 확인 요청을 하고 발주청의 장이 임명한 암판정위원회 공동조사 결과에 의하여 지층경계선을 확정하여야 한다.

(3)  비탈면의 기울기 조정이 필요한 경우 비탈면 안정분석 및 대책 검토서를 발주청에 제출하여야 한다.

2) 시험시공

공사시 파쇄공법은 표준 파쇄패턴 및 설계 기준으로 하여 천공의 간격과 깊이등을 가장 합리적이고 안전한 방법을 택하여 현장여건별 시험파쇄를 시행하여 겔파쇄특허권자 및 발주처의 승인을 받아서 시행한다.

3) 시  공

(1) 시공일반

수급인은 흙깍기 작업시 비탈면의 기울기를 설계도서에 따라 시공하여야 한다. 다만, 흙깍기작업이 진행되는 과정에서 설계시 예상하지 못한 지층의 변화와 절리, 단층 등의 불연속면 발달, 지하수의 용출 등이 확인된 구간이나 비탈면이 불안정한 경우에는 비탈면안정분석 및 대책검토서를 제출하여 발주청의 승인을 받은 후 비탈면의 기울기를 조정할 수 있다.

(2) 굴착계획

① 굴착에 앞서 암질, 예상되는  파쇄결과 등에 의한 천공장, 천공배치, 기폭약의 종류, 지발당허용 장약량, 등의 파쇄계획을 세워 시공관리가 되도록 한다.

② 파쇄작업에 있어서는 지질, 암의 경연정도 등에 따라 겔자재 배합 및 화약량을 조정 검토하여야 한다.

③ 파쇄계획에 있어서는 주변의 환경에 주는 영향을 고려한다.

(3) 천 공

① 천공은 미리 정해진 천공배치에 의해서 위치, 방향, 깊이 등에 맞추어 정확하게 시공 하여야 한다.

② 천공시에는 기존 잔여공에 천공하는 일이 없어야 한다.

③ 천공경은 ø38mm ~ ø175mm 로 하고 Tamping효과, 파쇄효과, 천공능률을 고려하여 비트를 사용하고 암의 성질이나 파쇄방법을 고려하여 적용한다.

(4) 장 약

① 장약은 미리 정해진 파쇄패턴에 따라 안전하게 시행되도록 한다.

② 전기뇌관을 사용하는 경우에는 미주전류, 누설전류 등에 충분히 주의하여야 한다.

③ 화약류의 운반은 소정의 용기, 방법에 의하여 이루어져야 한다.

(5) 파 쇄

① 파쇄 작업은 파쇄책임자의 지휘하에 시행되어야 하며, 그 책임자는 작업원의 대피를 확인한 후에 시행한다.

② 파쇄후는 적당한 시간이 경과한 후가 아니면 파쇄장소에 접근하여서는 안된다.

③ 매 파쇄시에는 파쇄진동속도에 대한 계측이 자동기록 가능한 측정계기를 설치하여야 한다.

④ 파쇄를 하고자 할 때에는 미리 정한 작업구역안에 감시원을 배치하고 관계인 이외의 인원과 장비의 출입을 금지시키는 등 적절한 조치를 취한다.

⑤ 파쇄 전에는 반드시 위험요소를 제거하고 안전한 조치를 취한 후 파쇄준비를 하되 천둥번개가 있을 때에는 결선하지 않는다.

⑥ 뇌관의 결선방법은 병렬결선을 원칙으로 한다.

⑦ 각선은 결선부위가 상호 접촉이 되지 않게 견고하게 연결하고 작업장에 물이 감지될 때에는 절연체로 감아주는 것을 원칙으로 한다.

⑧ 파쇄 전에는 반드시 주위의 시설물을 점검 및 보완하고 사람과 장비 등은 안전한 장소에 대피를 확인한다.

⑨ 결선작업이 완료되었을 때에는 안전한 곳에서 전기식뇌관은 저항측정기를 사용하여 모선, 보조모선, 각선의 단락유무를 확인하고 안전하다고 인정될 때 화약류 취급 책임자가 직접 파쇄하도록 한다.

(6) 파쇄영향 규제 및 계측관리

① 파쇄는 인접구조물 등에 손상을 입히지 않도록 시공하여야 하며 각 보안시설물의 진동속도 기준은 설계 적용기준에 의거 소음․진동 규제치를 초과하지 않도록 하여야 한다.

② 파쇄소음 및 진동의 계측관리

◦ 진동 및 소음의 계측은 매 파쇄마다 실시하도록 한다.

◦ 매 파쇄시마다 계측된 자료를 적절한 기간을 주기로 취합한 다음 회귀분석내지 기타 다른방법을 이용하여 추후 파쇄진동의 예측에 수정 보완하여 적용하도록 한다.

◦ 계측기의 센서(Geophone, Microphone)는 가급적으로 단단하게 고정시키고 장비에 누수가 일어나지 않도록 하고 진동의 계측은 파쇄방향과 지장물 등을 고려하여  측정을 실시한다.

③ 소음 및 진동 기준

◦ 소음 및 진동은 환경관련 제규정을 준수하여 주변에 지장 없도록 한다.

④ 파쇄영향 규제 및 조정

◦ 파쇄겔은 시험시공을 실시하여 배합 및 배치를 결정한다.

◦ 암질의 구분은 연암, 보통암, 경암, 극경암, 서울화강암, 송이, 기타 등으로 분류하고 절리 빈도와 크기등 특성을 고려한다. 이에 따라 파쇄겔을 시험하여 결정한다.

◦ 천공경은 38 ~ 175mm, 천공장은 1.0m이상으로 한다.

◦ 기폭약 및 전기뇌관의 취급은 총포 도검 화약류등 단속법시행령 관련 제규정을 준수하여 주변에 지장 없도록 한다.

◦ 시공중 암반상태변화에 따른 파쇄겔 조정은 즉시 파쇄겔 기술자에게 통보 해결한다.

(7) 파쇄겔 보관

① 파쇄겔은 상온(영하5도 ~ 영상35도) 그늘진 장소에 보관한다.

② 현장보관 3개월 넘으면 모두 반품조치한다.

3.3 수중암 준설공

1) 적용 범위

본 시방은 수중암 파쇄로 발생된 파쇄암의 준설 및 해상운반, 투기에 대하여 규정한다.

2) 참조규정

① 개항질서법

② 총포․도검․화약류 등의 안전관리에 관한 법률

③ 항로표지법

④ 해양환경관리법

⑤ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

3) 제출물

① 수급인은 해당 공사 착수 전에 시공계획서를 작성하여 공사 감독자에게 제출하여야 한다.

② 공사 착수 전 제출할 시공계획서에는 아래 내용이 포함되어야 한다.

◦ 현장조사계획 : 자연조건, 토질, 저질, 위험물, 장애물 및 투기장의 여건

◦ 준설선 선정 : 공사량, 기상, 해상, 토질, 운반로 부근의 선박 교통상황, 준설선 투입조건, 공기 등의 공사 여건을 감안하여 적합한 준설선을 선정

◦ 선단구성 : 선정된 준설선에 따라 예인선, 토운선, 양묘선, 연락선 등을 포함한 가장 능률적인 작업을 할 수 있는 선단구성, 현장 투입 및 회항 계획

◦ 투기계획 : 준설토의 운반방법 및 투기계획

◦ 환경관리계획 : 준설 시, 준설토 운반 시 및 투기 시의 환경관리 계획과 예상민원 대처방안

◦ 안전관리계획 : 준설선의 이동, 대피, 회항 및 발파, 쇄암준설 시의 안전관리 계획

◦ 재해예방대책 : 악천후 시 준설선단의 대피 등 재해예방 계획

◦ 위치 및 심도확인 : 준설 작업 중 준설선의 위치와 준설심도를 정확하게 확인 할 수 있는 방법, 준설구역의 표시방법

③ 공사 완료 후에는 본 절『5) 검사 및 허용오차』항목의 내용이 포함된 검측계획서 및 검측결과 보고서를 제출하여야 하며 해양수산부장관이 발행한 수로 도서지의 내용변경이 필요할 경우에는 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률의 해당규정에 의거 수로조사를 시행하여야 한다.

4) 시 공

① 사전조사

◦ 바람은 파랑을 발생시키고 준설공사의 진행이나 안전성에 직접 영향을 주므로 해당지역의 풍향이나 풍속을 파악하여야 한다.

◦ 하구의 경우 강우 시 유사로 인해 준설구역이 매몰될 수 있고 안개 등의 영향으로 조업차질이 예상될 수도 있으므로 항상 일기예보를 청취하여 미치는 영향을 최소화하여야 한다.

◦ 준설 공사 시 파랑의 특성은 공사기간에 큰 영향을 미치므로 통계적 성질(파고, 파향, 주기)을 파악할 필요가 있으며 파랑예보를 청취하여 작업계획과 선단대피 등 안전관리에도 유의하여야 한다.

◦ 조석에 의한 고저차는 바다의 기본적 현상으로서 특히 준설공사와 관계가 깊으므로 현장에서 직접 관측하거나 인근 검조소의 기록을 분석하여 그 특성을 파악하여야 하며 공사용 기준면과의 상호관계도 확인하여야 한다.

◦ 태풍시의 기압강하나 강풍이 지속적으로 불 경우 수심이 얕은 내만에 이상 수위가 발생하여 만조 시와 겹치게 되면 큰 피해가 날수 있으므로 기상 이변 발생에 대비 사전 안전조치를 철저히 하여야 한다.

◦ 준설 시 오탁수가 조류에 의해 확산될 가능성이 많은 경우나 협수로에서의 준설공사 시에는 사전에 준설구역 부근해역의 조류조사를 시행할 필요가 있다. 조사의 규모나 내용, 지역 등은 공사의 규모나 내용, 인근지역현황(어장의 유무, 규모 등)에 따라 적절히 조정한다.

◦ 표사에 의한 매몰이 심한 해역에서는 표사 이동방향, 계절별 표사 이동 양상 등을 조사한다.

◦ 준설 중 해수 오탁이 우려될 경우에는 사전에 해수수질을 조사하고 시공 중이나 시공 후 분석결과와 비교하여 환경영향 평가 시 제시된 기준치를 초과할 경우 공사 중단이나 준설강도의 조절 등, 조치를 취하여야 한다.

◦ 준설 공사 시에는 다음과 같이 공사 단계별로 수심측량을 시행한다.

- 공사발주 혹은 공사시행 전 실시하는 사전측량

- 시공 중의 관리측량

- 준공확인 측량

- 수로 도서지의 내용 변경에 필요한 수로조사

◦ 공사시행 중 사전측량 시에는 선단투입 가능수심, 간조와 만조 시 준설 가능 수심 등을 검토한다.

◦ 준설토 사토 장소인 투기장의 조건은 공사의 능률과 경제적인 면에서 중요한 역할을 하므로 제반조건을 충분히 검토하여야 한다.

◦ 설계 시 제시된 외해 혹은 호안으로 조성된 투기장에 대해서 사전 검토할 내용은 다음과 같다.

- 준설구역으로부터의 운반경로와 거리

- 투기장의 수심과 넓이

- 투기장 주변의 조류와 해류

- 투기토의 누출과 표사이동에 대한 검토

- 어업 및 수산물 피해

② 작업선의 선정

◦ 작업선은 해저 토질, 준설량, 수심, 투기조건, 기상, 해상, 공사기간, 주변해역 이용 상황 등의 현장여건을 고려하여 효율적인 작업이 가능한 선종 및 규격을 선정 하여야 한다.

◦ 준설선의 종류 및 규격은 해당 준설물량을 정해진 공기 내에 완료할 수 있도록 선정 하여야 한다.

◦ 버킷 준설의 경우 토사 또는 자갈 혼합이 많은 지반에 주로 적용되나 경질에서 비교적 연약지반까지 대처가 가능하다.

③ 준설공사의 작업한계

◦ 바람은 풍속이 15m/sec 이상이면 작업이 어렵고 일 강우량 10㎜ 이상이면 야외작업이 곤란하며, 시계 1㎞ 이하의 안개일 때는 토운선 운항 등을 중지하는 것이 좋다.

◦ 아래 표는 준설선의 종류에 따른 준설공사의 작업한계를 표시한 것으로 해상조건이 아래의 한계치를 초과한 경우에는 공사감독자와 협의하여 작업을 중지하거나 안전 대책을 수립한 후 작업의 진행 여부를 확인하여야 한다.

준 설 선		풍 속 (m/s)	파 고 (m)	비 고
준설선의 종류	규 격
그래브선	100ps 이하	5	0.3
	250ps 급	10	0.4

◦ 조류는 2~4노트 이상일 경우 작업이 어렵고 2노트 이하에서도 준설선의 계류방향을 저항이 적은 쪽으로 택할 필요가 있다.

◦ 자항식 펌프선 즉 호퍼준설선의 작업한계파고는 크기에 따라 1.5~3.0m 정도이나 대형선의 경우 3m 이상인 경우에도 작업이 가능하므로 선종에 따라 사전에 작업한계파고를 확인하여야 한다.

④ 예항 및 회항

◦ 작업선의 예항 및 회항 거리가 멀 경우에는 도중에 파랑에 의한 손상이나 침수피해 등이 발생할 수 있으므로 예인 선박의 조합, 예항속도, 기상, 해상, 항로상 타선박의 종류나 규격 등을 종합적으로 고려하여 안전성이 가장 높은 예항 및 회항 방법을 채택하여야 한다.

◦ 필요할 경우에는 보험에 가입하고 출발지에서 도착지까지의 일정 및 코스를 해당 지방해양수산청에 통보하여야 한다. 예항 및 회항의 계획 시 만일의 경우를 대비긴급 회항항도 고려한다.

⑤ 소요수심 및 소요폭

◦ 여굴두께는 준설심도나 토질, 준설선의 형식과 능력, 토층의 두께, 해상조건 등에 따라 달라지며 다음 표에 제시된 값을 표준으로 한다.

토질	선종	시공수심별 여굴두께
		5.5m 미만	5.5 이상~9.0m 미만	9.0m 이상
보통토사	그래브 준설선	0.5m		0.6m
암반	그래브 준설선	0.5m

주) 시공수심은 평균해면(M.S.L)을 기준으로 한 준설저면(여굴포함) 수심임.

◦ 사면 여유폭(餘裕幅)은 투입되는 준설선종에 따라 아래 표와 같은 값을 기준으로 한다.

토질	선종	여유폭
보통토사	그래브 준설선	4.0m
암반	그래브 준설선	2.0m

주) 상기 여유폭은 양쪽 기준이며 한쪽 준설폭 및 유지준설일 경우에는 본 표 값의 1/2을 적용한다.

◦ 기초 터파기와 같이 준설사면의 존치기간이 일시적이고 구조물 안전상 문제가 없으며 선박통항이 이루어지지 않는 경우에는 여굴 및 여유폭을 고려하지 않는다.

◦ 준설구역이 기존구조물에 인접한 경우에는 준설로 인한 인접구조물의 안전에 유의하여 준설하여야 하며, 준설 중 구조물 등에 이상이 발생할 우려가 있거나 민원이 발생할 경우 공사감독관과 협의하여야 한다.

⑥ 시공관리

◦ 준설장비 및 공사용 선박은 개항질서법의 관련규정에 의거 해양수산부장관에게 출입신고를 하여야 하며 항계 내에서의 정박 및 통행 시에도 개항질서법의 관련규정을 준수하여야 한다.

◦ GPS 측량에 의한 성과에 따라 굴착구역을 선정하고 작업 중 수시로 확인하여 준설구역의 위치를 명확히 하여야 한다.

◦ 준설선의 작업위치를 확인하기 위한 기준점은 관측이 용이한 곳에 설치하여야 한다. 장대나 부표를 보면서 위치나 구역을 판단할 경우에는 풍향이나 조류의 영향을 고려하여야 한다.

◦ 준설공사 시 안전을 확보하기 위하여 작업 전에 안전관리 체계수립 및 중점관리 항목 선정, 종사자 교육 등을 실시하고 사고 발생 시에는 공사감독자와 상의하여 긴급조치를 취한 후 관할 관청에 보고하여야 한다.

◦ 준설장비의 원활한 가동을 위하여 공사구역 내에 필요한 장비, 설비 및 부대기구의 예비품을 구비하여 장비의 고장 시 교체 혹은 수리가 가능하도록 하여야 한다.

◦ 공사 관련 장비는 정기적으로 점검하여 항상 최상의 상태를 유지하여야 하며 특히 마모가 심한 부위나 손상 시 안전관리 상 문제점 발생이 예상되는 부위 등은 수시로 점검하여야 한다.

◦ 모든 준설토와 굴착토는 지정된 투기장으로 반출 투기하여야 하며 운반 도중에 누출 등이 없도록 주의하여야 한다.

◦ 어떠한 사유이든지 투기장이 아닌 곳에 투기하였거나 지정된 구역 밖에 흩어져 있는 투기토는 수급인 부담으로 이를 제거하여 지정된 투기장에 투기하여야 한다.

◦ 주변에 통행 선박이 빈번할 경우에는 통행선박의 주 운행방향, 일정 등을 사전에 분석하여 가장 효율적이고 안전한 작업이 될 수 있도록 세부준설계획도를 작성하여야 한다.

◦ 사업대상지 부근은 여객선이 상시 통항하는 지역으로 공사시 통항선박에 대해 안전대책을 수립하고 야간에는 작업선과 통항선박간 추돌사고가 발생하지 않도록 대책을 수립하여 공사감독관의 승인을 득해야 한다.

◦ 작성된 준설 계획도는 인근 항만시설을 이용하는 관계자(부두운영사, 도선사회, 선박회사, 선박관제소 등)에게 배포하여 상호 협조할 수 있도록 하여야 한다.

◦ 준설토를 투기하거나 혹은 투기 후 준설구역으로 선박을 이동할 경우에는 준설계획도상 준설 예정구역과 예상시간을 관계자들에게 무선으로 통보하여야 하며 통항선박에 지장이 있을 경우에는 관계자와 재협의 하여야 한다.

5) 검사 및 허용오차

(1) 검사일반

① 수급인은 준설공사가 끝나면 검측일정, 기준 및 방법이 포함된 검측계획서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야한다.

② 준설구역에 대한 준설확인은 도면상의 위치와 실작업 위치가 일치하는지, 시공된 구역의 수심, 폭, 준설사면 등이 설계와 같이 시공되었는지 확인하여야 한다.

③ 준설공사가 완료된 후 그 성과는 수심도에 의해 최종 확인되므로 수급인은 수심측량 결과를 기초로 수심도를 작성하여 수심측량 성과표와 같이 제출하여야 한다.

④ 검사 확인측량은 작업선이 공사현장에서 철수하기 전에 시행하여야 하며 음향측심기 및 DGPS를 사용한다.

(2) 허용오차

구 분	준 설	기초 터파기	비고
수심(저면)	(+) : 0 (-) : 규정하지 않음	(±)300mm
비탈면	(+) : 100mm (-) : 규정하지 않음	외측 : 2m 내측 : 300mm	비탈면(법면)과 직각방향

4. 예 정 공 정 표

[예 정 공 정 표]

구 분		가 중 치 (%)	공 사 기 간 (개월)			비 고
			1	2	3
1. 공사준비		8.6
2. 수중암파쇄 및 준설		35.3
3. 부 대 공		56.0
공 정 (%)	소 계	100.0	26.7	37.0	36.3
	누 계	100.0	26.7	63.7	100.0

5. 동 원 인 원 계 획 표

[동원인원계획표]

구 분	투 입 인 원(인)			계
	1개월	2개월	3개월
기 술 공	25	34	34	93
일 반 공	11	15	14	40
소 계	36	49	48	133
누 계	36	85	133	133

6. 설 계 예 산 서

2019년도 1월 설계		설계자	이 현 관 (인)	심사자	권 혁 주 (인)		대표이사	성 낙 일 (인)
2019년도
	상사치도 해상 수중암 제거공사
	설 계 예 산 서
▣ 공사개요 1. 수중암파쇄 : 60m3 2. 수중암준설 : 25m3
▣ 총공사비 : 일금 일억칠천만원정 일금 170,000,000 원						공 급 가 액 : 일금 154,545,455원정 부가 가치세 : 일금 15,454,545원정
목포지방해양수산청

7. 공 사 원 가 계 산 서

8. 일 위 대 가 표

9. 단 가 산 출 서

(1) 단가산출

(2) 기계경비

(3) 자재단가

(4) 노임단가

(5) 기타자료

(1) 단가산출

(2) 기계경비

(3) 자재단가

(4) 노임단가

(5) 기타자료

10. 수 량 산 출 서

11. 설  계  도  면